2019년 목침목 교체공사

설   계   서

2019. 03.

대전광역시도시철도공사

설 계 설 명 서

1. 공 사 명: 2019년 목침목 교체공사

2. 공사구간: 대전도시철도 판암차량기지, 외삼차량기지

3. 공사목적: 차량기지 구내 훼손 목침목을 교체하여 열차 안전운행 확보

4. 공사개요

- 훼손 목침목 ⇒ 신품 목침목으로 교체(우리공사 관급자재 사용, 침목운반시 트레일러 제공)

- 작업방법: 주간작업(4시간 차단공사)

- 주요공정: 침목교체, 체결구 해체 및 체결, 신침목 및 폐침목 운반, 자갈 인력다짐 등

선 명	수 량 (정)	비 고
판암·외삼차량기지	222 (판암 182, 외삼 40)	분기침목 및 이음매침목 포함

5. 공사기간 : 착공일로부터 25일간

- 예정공정표

공 종	5일			15일			5일
현장조사
침목교환
현장정리

공 사 시 방 서

Ⅰ.일반시방서

1. 공사의 적용범위

1) 본 시방서는  대전도시철도공사가 발주하는 “2019년 목침목 교체공사”에 적용한다.

2) 계약상대자는 공사와 관계되는 아래의 법률, 시행령, 규칙, 훈령 및 예규, 표준시방서 등을 항상 숙지하고 이를 준수해야 하며, 계약상대자나 그의 고용인이 아래의 법률, 시행령, 규칙, 훈령 및 예규, 표준시방서 등을 위반함으로써 발생되는 여타의 민원이나 책임문제가 야기되지 않도록 하고 이에 대한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

① 법  령: 건설업법, 건설산업기본법, 건설기술진흥법, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 예산회계법, 근로기준법, 산업안전보건법, 철도안전법, 기타관련법

② 시방서: 철도궤도공사 표준시방서, 토목공사 일반표준시방서

③ 도시철도 건설규칙, 선로관리내규, 공사 집행규정 등 설계도서와 관계법령, 시방서 등에 명시되지 않은 경미한 사항에 대하여는 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

④ 계약상대자 및 현장대리인이 대전도시철도공사에 통지 또는 제출하는 서류는 감독자를 경유하여야 한다.

⑤ 용어의 정의

가. 공사: “2019년 목침목 교체공사”를 말한다.

나. 발주처: 공사의 주체인 “대전도시철도공사”를 말한다.

다. 계약상대자: 발주처와 적법한 절차를 거쳐 계약을 체결한 자로서 공사수행의 의무를 가진 자를 말한다.

라. 감독자: 발주처에 의해서 감독의 임무를 수행토록 명받은 자를 말한다.

2. 감독자의 의무

1) 감독자는 본 공사 수행에 따른 계약이행 상황 및 작업 수행과정 등을 전반적으로 감독한다.

2) 본 공사를 시행함에 있어 계약상대자는 감독자의 관리와 지시에 충실히 따라야만 한다.

3) 감독자는 계약상대자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다.

다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

3. 계약상대자의 책무

1) 계약상대자는 공사 착공 전에 설계도서를 면밀히 검토하고, 설계도서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

2) 계약상대자는 공사착공과 동시에 설계서의 내용이 공사현장 여건에 적합한지를 확인하여 이상 유무를 즉시 감독자에게 보고한다.

3) 본 공사에 소요되는 자재 및 발생품은 감독자가 지정하는 장소에 운반정리 하여야 한다.

4) 작업책임자는 궤도분야의 다년간 유경험자로서 현장에 상주하여야 하나 부득이한 사정으로 현장을 이탈할 경우 감독자의 승인을 득하여야 한다.

5) 공사현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 품질향상, 안전사고 및 환경공해 예방, 보건·위생 등을 위하여 공사용 자재·기계기구·잔재의 정리정돈 등을 충분히 행하여 현장을 청결하게 유지하여야 한다.

6) 공사 착공 전 착공계(예정공정표, 현장대리인계, ,작업책임자 선임계, 안전책임자 선임계, 안전관리계획서, 착공전 사진, 장비투입계획 등) 등 우리공사에서 요구하는 서류를 필히 제출하여야 한다.

7) 계약직후 당해 공사에 투입될 작업원의 보안시설물 출입에 따른 보안각서를 제출하고, 적격자를 현장에 투입하여야 하며, 공사기간 중 작업원 신상변동이 있을시 사전에 감독자의 승인을 득한 후 출입하여야 한다.

8) 설계서 내용상 불분명으로 해석 또는 지시가 필요한 경우 계약상대자는 사전 협의 또는 승인을 받고 시행해야 하며, 만약 임의해석으로 부실시공을 초래한 경우에는 재시공 등 이에 대한 조치를 하여야 한다.

9) 기타 공사로 인해 우리공사 시설물이나 제3자에게 끼친 손해에 대해서는 계약상대자가 원상복구, 손해배상 등의 일체의 책임을 진다.

4. 공사기간 및 작업일정

본 공사의 수행기간은 착공일로부터 25일간으로 한다. 다만 불가항력적인 사유 및 통념상으로 인정되는 부득이한 사유가 발생하여 공사가 지연될 경우는 기한을 연기할 수 있다.

5. 공사의 수량 및 장소

본 공사의 수량은 다음과 같다.

- 교체수량: 목침목 222정 (분기침목 및 이음매침목 포함)

-  장  소 : 판암차량기지, 외삼차량기지

6. 공사조건의 변경 및 정산

1) 발주처는 공사수행 중 불가피한 사유가 발생한 경우는 공사의 계획을 변경할 수 있다.

2) 발주처의 사정으로 인한 계획변경으로 본 공사의 범위 및 물량에 증․감이 있을 때에는 계약금액 범위 내에서 계약을 변경할 수 있다. 별도 특별한 지시나 사전에 발주처의 승인을 득한 물량 증․감분에 대한 대가는 계약금액 범위 내에서 정산한다.

7. 공사관련 제출서류

1) 공사 착공

계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 내용이 포함된 착공계를 감독자의 확인을 받아 감독자에게 제출하고, 발주처의 승인을 득한 후 본 공사에 착공하여야 한다. 다만 발주처의 사정상 착공이시기를 조정할 필요가 있을 때에는 발주처가 따로 정한 기일까지 착공이시기를 연기할 수 있다.

① 공사착공계(예정공정표, 현장대리인계, 작업책임자 선임계, 안전책임자 선임계, 등 포함)

② 현장기술자 재직증명서, 경력증명서 또는 자격증 사본

③ 도급내역서, 안전관리계획서

2) 공사 준공

계약상대자는 아래사항을 포함한 준공계 감독자의 확인을 받아 감독자에게 제출한다.

① 준공검사원

② 준공내역서

③ 준공사진대지 등

8. 작업책임자의 선임과 복무

1) 본 공사를 총괄하는 작업책임자는 업무수행에 필요한 제반 지식과 충분한 경험이 있는 자(숙련자)를 선임, 배치하여야 한다.

2) 작업책임자의 교체가 필요한 경우 계약상대자는 감독자의 승인을 득하고 반드시 동일 날짜에 선임과 해임하여야 한다.

3) 작업책임자는 본 공사에 지장을 줄 수 있는 타 기관 및 타 현장의 업무를 겸임하여서는 안 된다.

4) 작업책임자는 본 공사 수행으로 취득한 당 공사 시설에 대한 비밀누설 금지의 보안책임 업무를 겸임하고 일체의 법적책임을 진다.

9. 작업원의 확보

1) 계약상대자는 본 공사를 충실히 시행하기 위해 가능한 한 숙련된 전문인력을 확보하여야 한다.

2) 공사 진척속도가 현저히 느려 예정된 공사기한 내에 공사수행이 불가하다고 판단될 때 감독자는 작업원의 추가투입을 요구할 수 있고 계약상재자는 이에 따라야 한다.

10. 작업용품과 장비의 확보 및 지원

1) 계약상대자는 작업 착공일 이전까지 본 공사 수행에 필요한 일체의 작업장비 및 용품을 확보하여야 한다.

2) 선로 구간 내에는 화재 및 악취발생이 예상되는 용품(신나, 용재 등)은 보관할 수 없으며, 외부의 별도 장소에 보관 하여야한다. 다만, 감독자와 사전에 협의하여 적당한 장소에 비치할 수 있다.

11. 작업방법 및 현장감독

1) 계약상대자는 본 공사와 관련하여 계약서에 명시된 사항에 대해 감독자가 지시하는 바를 성실히 이행하여야 하며, 지속적인 작업이 가능한 근무체계를 수립하여야 한다.

2) 작업구간 열차운행 시 현장작업은 감독자의 지시에 의하여 실시하여야 하며, 작업 완료 후에는 열차 안전운행에 지장이 없도록 임시설치물 철거, 장비와 용품확인 및 현장 뒷정리에 특히 철저를 기하고 그 결과는 감독자에게 즉시 보고 하여야 한다.

3) 계약상대자는 현장작업 도중 공사수행과 관련된 긴급한 사항(열차안전운행 저해요인 및 안전사고 발생 등)이 있는 경우 감독자의 지시에 따라 최단시간 내에 현장에 도착하여 즉각적인 임시조치를 취하여야 하고, 발주처와 협의하여 제 기능 유지를 위한 조치를 완료하여야 한다. 또한 발주처는 계약상대자가 지시한 기간 내에 정당한 요청에 응하지 않거나 조치사항을 수행할 능력이 없다고 판단되는 경우에는 「일반시방서 17. 계약의 해제 또는 해지」조항을 적용하여 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

4) 계약상대자는 매일 작업 완료 후 감독자의 확인을 받아야 하며 감독자는 현장상태가 불량한 경우 당일 작업을 인정하지 않을 수 있다. 또한 감독자가 작업불량 사항에 대하여 재작업을 지시할 경우 계약상대자는 즉시 재작업에 착공하여야 하고, 작업 완료 후 계약상대자는 감독자의 재확인을 받아야 한다.

5) 4항에 의한 재시행 지시에도 불구하고 이를 시행치 않거나, 작업상태가 불량한 경우에는 해당 물량에 대한 공사비를 지불하지 아니할 수 있다.

6) 발주처는 선로에 대한 보수작업(점검포함) 시행 등 부득이한 경우에 한하여 공사를 일정기간 중지시킬 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 이의를 제기할 수 없고 공사기간에는 산정하지 않는다.

7) 계약상대자는 부득이한 사정으로 3일 이상 작업을 할 수 없는 경우 발주처에 작업 중지 승인을 요청하여야 하며, 발주처는 계약상대자의 요청이 과업수행기간에 지장이 없는 범위 내에서 승인할 수 있다. 이 경우 작업 중지 기간은 공사기간으로 산정 한다.

12. 금지사항

계약상대자는 다음 각 호에 해당하는 행위를 하여서는 안 된다.

1) 열차안전 운행에 지장을 초래하는 행위

2) 사전 출입허가가 되지 않은 곳 또는 출입이 금지된 구역을 출입하는 행위

3) 도시철도 내 시설 및 설비 현황을 외부에 누설하는 행위(발주처가 승인한 경우는 제외)

4) 작업장 내(선로 등)에 청소용품, 장비 등을 방치하여 열차운행에 위험을 초래하는 행위

5) 직․간접적으로 환경보건 및 관계법령에 위배되는 행위

6) 시설물 보안에 따른 사진촬영 행위

7) 기타 발주처에서 금지하는 행위

13. 안전관리

1) 계약상대자는 본 작업을 수행함에 있어 철도안전법령, 공사 철도안전관리체계 및 선로관리내규를 준수하여야 한다.

2) 계약상대자는 안전사고 예방에 충분한 대책을 수립 후 작업에 임하여야 한다.

3) 계약상대자는 본 공사 수행으로 인해 열차안전운행에 어떠한 지장도 주지 않아야 한다.

4) 계약상대자는 공사 수행기간동안 현장대리인, 작업책임자, 안전책임자와 작업원간 비상연락체계(연락체계 및 무선연락 등)를 항시 유지하여야 한다.

5) 계약상대자는 현장 작업수행 시 안전관리를 위하여 첨부 1 “작업책임자 준수사항”및 첨부2 “선로구간 내 작업시 안전수칙”을 반드시 숙지하고 철저히 이행하여야 한다.

14. 사고발생시 책임

1) 계약상대자는 계약을 이행함에 있어 안전사고가 발생되지 않도록 제반 안전대책 등을 철저히 강구․시행하여야 하며, 본 공사 수행 중 발생할지도 모르는 만일의 인명사고를 비롯한 모든 사고에 대한 일체의 민․형사상 책임을 진다.

2) 계약상대자는 자신의 귀책사유로 인해 발주처 또는 제3자에게 인적․물적 손해를 끼친 경우 일체의 보상, 변상 및 원상복구의 책임을 진다.

15. 작업원의 관리

1) 계약상대자는 작업원을 채용함에 있어 신원이 확실하고 신체가 건강한 자를 채용하여야 한다. 단, 임산부와 18세 미만인 자는 채용할 수 없다. (관계법령 : 근로기준법 제65조「사용금지」)

2) 계약상대자는 본 공사를 수행하기 위해 고용한 작업원의 행위에 대하여 일체의 책임을 지며 발주처는 계약상대자의 작업원 중 공사 수행에 부적합하다고 판단되는 자의 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자 특별한 사유가 없을시 이에 응하여야 한다.

3) 계약상대자작업원의 처우에 있어 근로기준법 등 제반 노동관련 법령을 준수하여야 한다.

4) 계약상대자는 작업원의 건강, 신원, 위생, 안전관리 및 작업규율 등에 관하여 일체의 책임을 진다.

16. 작업원의 안전교육

계약상대자는 작업원에게 작업요령, 안전관리, 화재예방 등에 관해 교육을 실시하여 작업원 개개인의 자질 향상과 안전 사고방지에 최선의 노력을 다하여야 한다.

17. 계약의 해제 또는 해지

1) 발주처는 계약상대자가 다음에 해당하는 행위를 하였을 경우에는 본 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

① 정당한 이유 없이 공사를 수행하지 않거나 공사를 수행 할 능력이 없음이 명백한 경우

② 발주처는 공사수행과 관련된 긴급한 사항(열차안전운행 저해요인 및 안전사고 발생 등)이 발생한 경우나, 응급조치 등이 필요하여 추가 지시한 사항에 대하여, 발주처가 인정하는 기간 내에 지시에 응하지 않거나 긴급작업을 수행할 능력이 없다고 판단되는 경우

③ 「일반시방서 12. 금지사항」을 위반하여 발주처로부터 시정요구를 받았음에도 불구하고 이를 시정하지 않았을 경우

④ 계약체결 전․후를 막론하고 확실한 근거 없이 허위사실을 유포하는 등 발주처의 명예를 실추케 한 경우

2) 발주처와 계약상대자는 계약을 해제 또는 해지하고자 할 경우에는 적어도 3일 전에 발주처, 계약상대자 쌍방이 그 사유를 통지하여야 하며, 계약이 해제 또는 해지되거나 계약기간이 만료되어 발주처가 타 업체와 계약을 체결한 경우에 계약상대자는 공사가 원활히 수행될 수 있도록 협조하여야 하며, 타 업체에 의한 공사 재착공 전까지는 미 수행 공사(물량)를 수행하여야 한다.

18. 환수 및 추징

계약체결 후 또는 계약이행 후라도 계약금액 결정상 명백한 하자로 인하여 계약상대자가 부당이득을 취한 사실이 발견될 경우 해당금액을 계약금액에서 감액 또는 환수 조치할 수 있다.

19. 조문의 해석

계약서의 각 조항 및 기타 사항의 해석에 의문 또는 규정되지 아니한 사항이 있을 시에는 발주처와 협의하여 정부법령을 준용할 수 있으며, 견해 차이가 발생하였을 때에는 쌍방이 협의하여 결정한다.

20. 기타사항

계약상대자가 공사를 수행하는 도중 발주처가 지정한 개소와 필요하다고 판단하여 특별히 지정하는 장소에 대하여는 작업 전, 중, 후 사진을 촬영하여 사진첩 2부를 제출하여야 한다.

첨부 1. 작업책임자 준수사항.

첨부 2. 선로구간 내 작업 시 안전수칙.

《첨부 1》

작업책임자 준수사항

1. “작업승인요청서”를 작성하여 전일 15:00 까지 토목분소에 제출하고 대전도시철도공사의 승인을 득하여야 한다.

※ 기재사항: 위치, 작업시간, 작업책임자 및 작업인원, 연락처, 사용장비 등

2. 작업장 출입 전 토목분소에 작업승인요청서의 승인 여부를 확인한다.

- “작업승인 요청서□내용의 승인 여부

- 임시열차 운행계획(각종 행사일, 열차 주행시험 등), 회송열차 또는 전동차 반․출입 계획

3. 차량기지에 출입하기 위하여 출입목적, 출입자, 출입시간 등을 통보하고 출입자 통제를 받아야 한다.

4. 차량기지 출입 시 작업원의 안전복(야광띠 부착) 및 안전모 착용상태를 확인하고 작업원을 인솔하여 작업장에 출입하여야 한다. 특히 작업원의 개별적인 출입 및 음주를 한 작업원의 출입을 금하여야 한다.

5. 작업 시작 전 작업원에게 일일안전교육을 실시하여야 한다.

6. 작업시야가 확보되지 않아 안전사고 우려가 있는 구간에는 작업구간 시점 및 종점지점에 경광등을 설치하여야 한다.

7. 열차운행에 지장이 없도록 하기 위해 지정된 시간 내에 작업을 종료할 수 있도록 작업지시를 한다.

8. 작업은 승인된 시간 내에 종료하여야 한다. 또한 작업종료 후 사용한 장비, 자재, 기구 등은 현장에서 완전히 철수하고 열차저촉 우려가 있는 지장물의 방치여부는 반드시 재확인한다.

《첨부 2》

선로구간 내 작업 시 안전수칙

1. 선로구간 내에서는 안전복(반사판 부착) 및 안전모를 착용하여야 한다. (미 착용시 선로구간 출입금지)

2. 선로구간 출입 시에는 작업책임자와 함께 출입하여야 하며, 개별적인 출입을 금한다.

3. 선로구간 내 각종 전선(감전위험), 배수로 등 시설물을 손상하지 않도록 주의한다.

4. 선로구간 내에서는 불안전한 행동을 삼가고 불한전한 요소를 사전에 제거한다. (개별행동, 음주, 언쟁, 모닥불피우기 등)

5. 작업책임자는 작업 전, 후방에서 운행되는 열차(모터카 등)를 감시한다.

6. 작업책임자(안전책임자)는 항상 호루라기를 휴대하여 위급상황 시 즉시 신호한다.

7. 선로 내에서는 인화물질의 사용을 금지하며, 부득이한 경우 감독자의 승인을 받아 지정된 장소에서 특별 관리한다.

8. 중량물 취급 시에는 적정한 공구를 사용하고 충분한 인원이 취급하여야 한다.

9. 작업종료 후 장비, 자재 등은 해당구간 토목분소장이 지정하는 장소에 보관하여 열차 안전운행에 지장을 주지 않도록 한다.

10. 당일□선로작업승인부□에 표시된 작업구간 이외 장소에서의 작업은 금지한다.

Ⅱ.특기시방서

1. 일반사항

1) 본 공사 시행 중 설계도서와 제 시방서에 명시 되지 않은 사항은 반드시 감독자 지시에 따라 시공하여야 하며, 명시되어 있는 사항 중에도 상호 이견이 있을 시는 감독자와 협의하여 현장여건에 따른 최적의 방법을 강구하여 작업하여야 한다.

2) 계약상대자는 계약수량에 대하여 감독자의 요구시 공사착공 전 작업물량, 시공계획, 공사장비 등에 대한 시공계획서를 제출하여야  한다.

3) 본 공사로 인하여 열차운행 지장이 발생할 우려가 있거나 발생할 경우 계약상대자는 타 작업에 우선하여 즉시 보수조치 하여야 한다.

2. 시공시 준수사항

1) 계약상대자는 공사착공 전에 안전관리계획서를 제출하여 감독자의 확인을 받아 계획대로 시행될 수 있도록 하여야 한다.

2) 작업시 안전장비(안전화, 안전모, 안전조끼 등)을 반드시 착용하도록 하며, 미착용자는 작업에 참여할 수 없다.

3) 본 공사에 소요되는 목침목(보통, 이음매, 분기), 레일체결구 및 장치 등은 지급자재를 사용하고, 발생품은 감독자가 지정하는 장소에 반납 처리하고 재사용 재료는 깨끗이 청소하여 사용이 가능하도록 보관하여야 한다.

4) 본 공사 시행중 각종 체결구 해체시에는 재료의 분실 및 훼손이 발생 되지 않도록 유의하여야 하며, 체결시에는 견고하게 체결하여 이완 및 탈락이 없도록 하여야 한다.

5) 신 침목 및 폐 침목 운반

① 신 침목은 작업능력을 감안하여 필요한 수량을 교환개소에 운반 배열한다.

② 침목 운반 시에는 파손되지 않도록 주의하고, 1m이상의 높이에서 떨어뜨려서는 안 된다.

③ 폐 침목 및 철거자재 운반 시에는 궤도 야작정 또는 감독자가 지정한 장소에 정리정돈하여 배치하여야 한다.

④ 새 침목은 작업능력을 감안하여 당일 필요한 수량을 사용하며, 새 침목 및 발생침목을 현장에 적치할 때에는 열차 운행 및 타 분야 작업에 지장을 초래하지 않도록 보관하여야 한다.

6) 침목교체

① 분기부 등 다른 분야와 관련이 있는 구간의 침목을 교체할 경우에는 반드시 감독자와 협의하여 관련부서의 입회하에 작업을 시행하고, 수급인 임의로 시공하지 않도록 한다.

② 새 침목 삽입 시에는 레일방향과 직각이 되도록 설치하여 틀림이 없도록 한다.

③ 침목과 레일사이에 레일패드를 삽입하며, 코일스프링클립 고정장치와 레일사이에 절연블럭을 설치한 후, 팬플러를 사용하여 코일스프링클립을 견고히 체결한다.

④ 레일패드를 삽입할 때에는 설치위치의 불순물을 완전히 제거한 후 설치하여야 한다.

⑤ 탄성체결장치 해체 및 체결 시 충격, 진동 등으로 기존 시설물에 충격이 발생하지 않도록 하여야 한다.

⑥ 체결구 체결 시에는 레일저부에 침목을 밀착시킨 후 궤도틀림이 없도록 상태를 확인하며 체결하여야 한다.

⑦ 침목교체 후 다짐을 철저히 하여 처짐이 없도록 하고, 자갈은 침목면에 맞추어 표면 및 빗면을 다짐정리(타이탬퍼)한다.

⑧ 도상자갈 부족 및 침목노출개소는 선로주변 과다 적치개소에서 자갈을 보충 후 정리하여야 한다.

⑨ 침목교체 작업 시 진동, 충격 등으로 인하여 레일본드 등 부착물이 탈락되거나 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

⑩ 침목교체 완료 후 시공 상태에 대하여 감독자의 확인을 받아야 하며, 감독자는 우리공사 선로관리내규에 따른 궤도틀림이 발생한 경우 재시공을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

3. 행정사항

○ 하자보증 기간

- 지방계약법 시행규칙 제68조(담보책임 존속기간)에 의하여 전문공사 중 자갈도상 철도·궤도 공사로 1년으로 한다.