		2018년도
		공사코드 : KR-CEE-18-043
	공 사 명 : 경부고속선 동대구-신경주간 305.100㎞ 부근 외 19개소 심플레이트 고저정정 및 기타공사
				설 계 서
(회 계)
		예산관리센터)	3000442		(경주시설-(수탁)시설-고속유지FC)
		약정항목)	51040251		(고속유지-수선유지비-공비)
		G/L 계정)	51021370		(수선유지비-공비)

	목 차
	1. 설 계 설 명 서 ………………………………………………… 1 2. 공 사 시 방 서 ………………………………………………… 2 3. 특 별 시 방 서 ………………………………………………… 25 4. 예 정 공 정 표 ………………………………………………… 41 5. 설 계 예 산 내 역 서 ………………………………………………… 42 6. 공 종 별 예 산 조 서 ………………………………………………… 43 7. 철도공사 직 원 급 내 역 서 ………………………………………………… 44 8. 개 소 별 명 세 서 ………………………………………………… 45 9. 전 자 입 찰 수 수 료 ………………………………………………… 48

1. 설 계 설 명 서

1. 공 사 명 : 본 과업의 명칭은 「경부고속선 동대구-신경주간 305.100㎞ 부근 외 19개소 심플레이트 고저정정 및 기타공사」     이라 하고, 경주고속철도시설사무소를 “관리주체”, 수급자를 “계약상대자”로 명칭한다.

2. 목    적 : 본 공사는 경부고속선 동대구-부산 간 294.683km~362.820km(환) 구간의 콘크리트 궤도의      원형유지보수로 고속열차의 안전운행 및 고속철도 시설물의 내구성을 확보하기 위함.

3. 위     치 : 대구광역시, 경산시, 울산광역시 일원

4. 공사 개요

가. 과업대상 : 총 2 공종

공종명	개소	연장(m)	비 고
심플레이트 고저정정	6	852
고저정정 작업개소 응력균질화	14	6,088

나. 공사기간 : 착수일로부터 60일간

다. 계약방법 : 일반경쟁계약(철도·궤도공사업)

	2. 공 사 시 방 서
1. 일반사항 가. 적용범위 (1) 본 공사는 철도공사 전문시방서(토목편) 및 철도건설규칙, 토목표준시방서, 열차운행선로지장작업 업무세칙(2014.06.13), 운전취급규정(2018.05.08.), 고속철도 운전취급세칙(개정 2018.05.08), 표준안전시방서(철도공사 안전관리처-2927호, 2015.7.13.), 철도공사현장 안전확보를 위한 관리지침, 안전계약 특수조건 기준 외 특별시방서와 설계도서에 의하여 시행하여야 하며, 공사 시행중 관련 법규, 지침 및 규정이 개정될 시에는 개정된 지침을 적용한다. (2) 공사 시행 일체를 설계도서 및 본 시방서, 특별시방서에 의해 시공하여야 하며, 본 시방서 및 설계 도면에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정‘조경공사 표준시방서’를 적용한다. (3) 도면, 시방서, 내역서의 내용이 상이하거나, 관련공사와 부합되지 않을 때 또는 의문이 생길 때 에는 감독자의 지시에 따른다. 또한 설계도서에 누락된 사항일지라도 당연히 시공 되어야 할 사항은 감독자의 지시에 따라 시공하여야 하며, 시방이 불분명할 시에는 그 시방을 작성, 감독자에게 제출하여 승인을 득한 후 시공하여야 한다. (4) 수급자는 산업기사이상 자격취득자로서 당해 기술분야 3년 이상 실무에 종사한 자 또는 당해 기술분야의 중급기술자 이상인 자, 당해 기술분야의 초급기술자로서 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무를 3년 이상 수행한 자(건설산업기본법 시행령 제35조)를 현장대리인으로 선임하고 현장에 상주시켜야 한다.

	2. 공 사 시 방 서
2. 감독자의 권한 가. 감독자는 공사감독자 복무규정 등 정해진진 사항의 범위 내에서 그의 권한을 행사하여야 한다. 3. 수급자의 의무 가. 수급자는 공사의 목적물을 계약서에서 정한 것에 따라 성실히 시공하고 완성해야 하며 발주자가 최종 인수전까지는 관련 시설에 대하여 관리할 책임을 져야 한다. 나. 수급자는 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사시행으로 인하여 발생되는 손해와 손상에 대하여 책임을 져야 한다. 다. 수급자는 공사의 목적물이 손상을 받을 경우 또는 공사의 목적물이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독자의 지시에 따라 조치하여야 하며, 또한 수급자는 목적물의 품질에 대하여 책임을 져야 한다. 4. 공사현장 관리 가. 공사 현장이 서로 인접하거나 동일 장소에서 시공하고 별도 공사가 있을 경우에는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다. 나. 공사 시공 중 수급자는 감독자 및 발주자의 허가 없이 공공의 해를 끼칠만한 시공방법을 써서는 안된다. 다. 공사 현장에서 일반인 및 노무자 출입의 감시, 풍기 위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고 방지에 대하여 특히 유의하여야 한다. 라. 수급자는 공사장 및 그 부분에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

	2. 공 사 시 방 서
5. 공사시행 및 공정관리 가. 수급자는 본 공사시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공사 시행에 필요하다고 판단되어 감독자가 요청할 경우에는 이를 협의 조정하여 성실히 시행하여야 한다. 나. 수급자는 계약일로부터 7일 이내에 착공하여야 하며 안전관리계획서는 공사시작 전 제출하며 착공계는 공사 시작 후 10일 이내에 제출하여야 한다. (1) 착공계 제출 (가) 계약상대자가 착공 시 제출할 착공계에 포함하여 제출할 서류의 내용과 서식은 다음 각 호와 같다. 1) 공사착공계 2) 현장대리인 지정계(위임장, 재직증명서, 경력증명서 포함) 3) 안전관리자 지정계(위임장, 재직증명서, 건설기술인협회 경력증명서 포함) 4) 예정공정표 5) 청렴이행 각서 6) 철도운행안전관리자 및 전기철도안전관리자(필요시) 지정계(자격증 사본 및 경력증명서 포함) 7) 산업재해 보험가입 증명원 (나) 수급자는 상기 가)항의 착수 신고서류 2부를 관리주체에 제출하여야 한다. (2) 착공 도급내역서 제출 (가) 계약상대자는 착수 도급내역서 작성 시 각 공종별 단가에 낙찰률을 적용하여 작성하여야 한다. 다. 공정 및 시공계획서 (1) 수급자는 착공 전에 공정표, 가설공사에 필요한 제반사항, 공사용 기계 기구의 사용계획, 작업장, 기타 용지 사용에 대하여 시공계획서를 작성하여 감독자의 승인을 받는다.

	2. 공 사 시 방 서
(2) 수급자는 감독자의 요구가 있을 때에 공사 시행의 순서, 방법, 주요자재 반입 주요 기계설비의 반입과 배치 및 사용계획 및 노무계획 등에 대하여 상세한 계획서를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다. 라. 공사보고 (1) 수급자는 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 소비, 처후, 기타 필요한 사항을 기재한 공사 보고서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다. (2) 수급자는 항상 공사 진행상황을 계획과 대조하여 주요공정이 현저히 지연 될 때에는 즉시 그 사유 및 공정관리 대책을 수립하여 감독자에게 보고한다. (3) 공정보고 및 작업일지 기록 (가) 현장대리인은 공사시행기간 중 다음사항을 포함하여 매일 작업일지를 작성하여 보고하고, 준공 시 감독자에게 제출한다. 1) 공사시행내용 및 공정현황 2) 공사 시행 시 중요 문제점 및 대책 3) 인력 및 장비투입현황 4) 익일 작업계획 (나) 현장대리인(안전관리자)는 매일 현장투입 전 안전교육을 실시하여, 현장 안전교육일지를 작성하고 준공 시에는 감독자에게 제출한다. (다) 작업자는 공사 시행 전 감독자가 시행하는 교육을 2시간 이상 받아야 한다(각종 사고사례 교육 포함, 전파교육 가능)

	2. 공 사 시 방 서
6. 작업시간 가. 공사 시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축할 수 있으나, 야간 또는 휴일에 작업 할 때에는 미리 감독자의 승인을 받아야 한다. 나. 공사 시행의 형편에 따라 작업시간의 연장이나 단축 또는 야간 작업의 필요성을 감독자가 인정할 때에 수급자는 그 지시에 따라야 한다. 7. 공사기간 가. 수급자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체없이 계획대로 공사를 추진하여 계약 기간내에 완료하여야 한다. 특히, 전체공사 완료 전 특정부분에 대하여 공사의 완료 또는 시공순서에 대한 감독자의 지시가 없을 때에는 이에 따라야 한다. 나. 공사를 시행하고자 할 경우는 감독자의 승인을 득한 후 시행하여야 하며, 천재지변, 타공사와의 연계성 등 부득이한 경우로 공사의 지연이 불가피한 경우에는 승인을 받아 연기하여야 한다. 8. 공사일시중단 가. 감독자는 다음과 같은 경우에 공사의 전부 또는 일부를 중단 시킬 수 있다. (1) 수급자가 설계도서 및 시방서와 상이한 시공을 할 경우 (2) 불완전한 시공을 하거나 기타 사정으로 공사 지연 또는 시공을 소흘이 할 경우 (3) 기후 조건 또는 천재지변으로 인해 부실한 시공이 될 우려가 있을 경우 (4) 수급자의 안전관리 소흘로 산업재해가 발생하였을 경우 (5) 기타 감독자의 정단한 지시에 불응한 경우

	2. 공 사 시 방 서
9. 사용재료 가. 모든 공사용 자재는 사전 감독자의 검사를 받아서 합격품에 한하여 사용하며, 불합격품에 대하여는 즉시 공사장 외로 반출하여야 한다. 나. 본 공사에 사용되는 제반재료는 한국공업규격품을 사용하되 부득이한 경우에는 이와 동질 이상의 것을 사용하여야 한다. 10. 재료관리 가. 재료가 현장에 반입되어 감독자의 검사를 받아서 합격한 후에는 작업에 지장이 없는 장소에 적치하여 감독자가 쉽게 점검할 수 있도록 하여야 한다. 나. 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때 감독자가 변질 또는 불량으로 인정할 경우 이를 사용하여서는 안된다. 다. 공사에 쓰이는 재료의 사용 수량은 감독자의 승인을 받아 기록해야 한다. 11. 검 사 가. 수급자는 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 감독자의 입회하에 시공하여야 한다. 나. 검사관과 감독자의 직무 수행 상 필요하다고 인정할 때 파괴검사를 할 수 있으며, 검사관과 감독과의 시공에 대한 지시는 다른 시공에 우선하여 처리한다.

	2. 공 사 시 방 서
12. 공사의 안전관리 가. 본 공사는 열차가 빈번히 운행되는 곳으로 25,000V의 고압전류가 흐르는 선로변에서 시행하므로, 제반 안전관리에 각별히 유의하고 특히 계약업무처리 시행세칙(개정 2017.07.25. 제2017-046호) [별표 48]<신설 2014.08.11.>『안전계약특수조건』이행에 만전을 다 할 것이며, 현장 내에서 발생한 제반 사고에 대하여는 민형사상의 일체의 책임은 수급자가 져야 한다. 나. 안전 관리자 책임자 선임 (1) 책임자 선임 : 현장대리인이 안전관리 업무를 겸임할 수 있으며, 현장에 배치되어야 한다. 다. 안전관리자의 의무 (1) 안전보건관리규정에서 정한 직무 및 용역 수행 시 작업현장의 안전관리를 총괄한다. (2) 안전관리 실시계획서(안전 및 보건 교육, 작업장 안전관리포함)를 작성하여 감독자에게 제출하고, 현장에 비치하여야 하며 실시결과를 보고하여야 한다. (3) 산업안전보건법 제33조의 방호장치, 산업안전보건법 제34조의 기계, 기구 및 설비등 안전 물품 구입 시 적격품 및 친환경상품으로 선정한다. (4) 고속선 입·출입 시 관리주체의 내부 절차에 따라 시행한다. (5) 관리주체의 안전교육 시행절차 및 세부사항에 따라 직원들을 대상으로 한 안전교육을 시행한다. (6) 작업현장 지도 및 점검(작업자의 안전보호구 상태 및 착용여부 검사 포함)을 시행한다. (7) 작업 전 철도운행안전관리자와 함께 임시열차 및 작업차량 운행여부를 반드시 확인하고, 작업자에 대해 교육을 실시한다.

	2. 공 사 시 방 서
(8) 매 회 작업 투입 전·후 인원점검 및 장비 점검을 시행하고 열차 운행에 지장이 없도록 작업 개소의 뒷마무리를 확인한다. (9) 공기구 및 작업대차(트로리)에 LED경광등 또는 반사재 부착하여 시인성을 확보하도록 한다. (10) 작업 중 비상상황 발생 시 철도운행안전관리자와 함께 작업자 및 열차운행의 안전확보를 위한 응급조치를 시행한다. (11) 차단작업 계획 수립(필요 시) 라. 수급인은 매월 “안전·보건 협의체” 운영 시 수급인 근로자 산업재해 발생보고를 해야 하며, 산업재해를 보고하지 않거나 허위로 보고할 경우 불이익을 감수한다. 마. 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한자) 및 철도운행안전관리자는 작업장 단위별로 반드시 현장에 상주토록 관리한다. 바. 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한자) 및 철도운행안전관리자가 감독자의 승인 없이 현장 이탈시 작업중지 조치한다.(단, 부득이한 경우 관리주체(감독자)와 협의하여야 하며, 관리주체(감독자)의 허가 없이 임의로 현장을 이탈하여서는 안된다.) 사. 현장이동 및 출입문 취급절차 (1) 시공사 책임자(현장대리인 또는 안전관리자)는 안전관리계획서 제출 시 당해 공사 현장에 대한 발주자의 의견을 수렴하여 작업개소별 이동방법(작업자 대기장소, 작업자 이동경로, 출입문위치 등)을 포함하여 작성하고, 이를 항상 숙지하고 준수하여야 한다. (2) 작업자는 사전 협의된 “작업자 대기장소”에 집합하여야 하며, 관리주체(감독자) 인솔하에 작업장소(선로변등)로 이동하여야 하며, 절대 개별적인 행동을 해서는 안된다.

2. 공 사 시 방 서

(3) 작업자는 작업완료후 관리주체(감독자)와 함께 작업장에서 “작업현장 밖 안전한 장소”로 이동하여야 하며, 절대           개별적으로 이동하여서는 안된다.

아. 공사 시행 단계별 안전교육 시행

(1) 계약상대자(현장대리인 또는 안전관리자)는 안전교육 절차에 의거 단계별 교육 시행 후 실적관리(교육내용, 서명, 사진 등)를 하여야 하며, 관리주체에서 시행하는 정기 및 특별교육에 성실히 임하여야 한다.

(2) 계약상대자(현장대리인 또는 안전관리자)는 교육종료 후 관리주체에서 지정한 현장담당관(감독자포함)에게 SNS로 보고하여야 한다.(보고내용 : 교육내용, 서명, 사진 등을 포함한 교육일지)

(3) 계약상대자(현장대리인 또는 안전관리자)는 안전교육 미 이행(실적관리 미흡등)에 따른 제재조치에 대하여 어떠한 이의를 제기할 수 없다.(1회 : 경고(문서), 2회 : 당일작업 중지)

※ 용역 단계별 대상교육

교육명	시행시기	시행주체	교육대상
착수전 최초교육	용역계약 후	발주자	감독자, 외주업체
착수전 전파교육	용역시행 전	계약상대자	참여기술자, 작업자(신규작업자)
일일안전교육	당일작업 전	계약상대자	참여기술자, 작업자
정기·특별교육	월1회 또는 수시	계약상대자	참여기술자, 작업자

2. 공 사 시 방 서

	≪안전교육 시행절차≫			≪안전교육 세부사항≫

	2. 공 사 시 방 서
13. 철도운행안전관리자 선임 가. 과업 착수 전 철도운행안전관리자 선임계를 제출하고 관리주체로 부터 고속선 출입 및 작업자 보호조치(CPT) 및 무전기 취급에 관한 교육을 반드시 이수하여야 한다. (1) 철도운행안전관리자 자격요건 (가) 국토해양부장관이 인정한 교육훈련기관에서 국토해양부령이 정하는 교육훈련을 수료할 것 (나) 철도기술인협회에서 발급한 철도운행안전관리자 자격증 소지자 (2) 철도운행안전관리자의 임무 (가) 운행선로 또는 위험지역 밖에서 과업 수행 시 차단작업에 대한 계획 수립 및 작업시간 조정 등의 차단작업에 대한 협의 (나) 당일 작업구간 및 이동 중 각종 지장물, 위험요인, 작업 열차 운행 등 안전관련 사항 검토 및 안전작업계획 수립하고 작업원에게 안전교육 시행 (다) 위험요인을 숙지하며 선행하여 작업원을 현장 인솔 및 열차 운행선에 대한 작업자 안전확보 방안 수립·시행 (라) 작업 전 차단협의 시 차단열차 및 작업차량 운행 여부 확인 (마) 작업자 보호장치(CPT) 취급과 열차접근감시자의 배치 등에 관한 계획 수립 및 시행, 확인 (바) 철도차량 운전자 또는 관제업무 종사자와 연락체계 구축

2. 공 사 시 방 서

(사) 작업 중 모타카 운행 시 인적, 물적 사고가 발생 요인이 없음을 확인 후 통과 협의

(아) 작업에 필요한 장비의 이동 및 설치, 철거 등 작업 전·후 열차 운행에 따른 지장여부(선로, 전차선 등) 확인

(자) 작업 중 비상상황 발생 시 작업자 및 열차 운행 안전 확보 조치 시행

(차) 작업 전·후 열차 운행에 지장여부(선로, 전차선 등)를 확인하고 이상 발생 시 조치하여 열차운행안전을 확보

(카) 작업시행점검표 작성 등 운행선 작업 사규 개정 전 우선 시행되는 철도운행안전관리자 임무 수행

(수송운영처-3649,2018.7.3.)

위험지역 밖 진입 (작업승인시각 30분전)	➡	작업승인 협의	➡	작업 시행	➡	작업장 뒷정리	➡	작업 완료	➡	작업종료 통보
철도운행 안전관리자 작업원		철도운행 안전관리자		작업원		작업원		철도운행 안전관리자 작업원		철도운행 안전관리자

(3) 철도운행안전관리자 선임 시 구비 서류

(가) 철도운행안전관리자 선임계

(나) 철도운행안전관리자 자격증 사본

(4) 철도운행안전관리자의 교체

(가) 다음과 같은 상황이 발생하였을 경우 관리주체는 철도운행안전관리자의 해임 또는 교체를 요구 할 수 있으며, 수급자는 즉각 교체하여야 한다.

1) 철도운행안전관리자 자격요건 충족이 되지 아니한 자를 운행안전관리자로 선임하였을 경우

2) 철도운행안전관리자의 임무를 수행함에 있어서 수행능력이 저하되거나, 불성실 이행 하였을 경우

(나) 철도운행안전관리자가 재선임 되기 전까지 작업을 중단하며, 이는 공사기간 연장 사유에 해당되지 아니한다.

	2. 공 사 시 방 서
14. 열차감시원의 배치 가. 열차감시원은 작업자에게 열차의 접근 여부를 알려주기 위한 기본 휴대품(열차시각표, 호루라기, 적·백 수신호기 등)을 소지하고, 그 여부를 현장대리인에게 확인 받아야 한다. 나. 열차감시원은 선로변 작업 시 작업 개소별로 배치하여 작업자가 열차에 접촉되지 않도록 열차접근 여부를 지속 확인 한다. 다. 열차감시원은 선로변 작업안전수칙을 준수하며 감독자와 연락상태를 유지한다. 라. 의사소통이 되지 않는 구간으로 작업자가 이동하여 작업할 경우에는 사전에 다른 소통방법을 협의하고 연습을 시행한 후 작업하도록 한다. 마. 작업개소가 의사소통이 되지 않은 거리에 있을 경우에는 열차감시원을 작업개소 만큼 배치하여 개소별로 열차를 감시토록 한다. 바. 열차감시업무를 할 때에는 선로에서 벗어나 선로변에서 감시하여야 하며, 본인의 안전관리에도 주의하여야 한다. 사. 열차감시원은 열차감시업무 이외의 다른 업무에 배치되어서는 안되며, 휴대폰 사용이나 잡념으로 업무가 소홀해지지 않도록 특히 주의하여야 한다. 아. 열차감시원의 전문성 확보를 위해 착수 전 4시간 이상 교육(이론 및 현장)을 이수하여야 한다. 15. 열차운행선로지장작업 시 안전관리(운행선 인접작업 포함) 가. 수급자는 공사를 시행하면서 감독자가 열차운행선로지장작업 외에 운행선 인접작업 시행에 필요하다고 판단 되거나, 연관된 사항에 대하여 요구할 경우 본 항에 준하는 안전관리를 시행하여야 한다. 나. 수급자는 철도안전법, 건설기술관리법, 산업안전보건법 및 관련 규칙과 한국철도공사 열차운행선로지장작업

	2. 공 사 시 방 서
업무세칙에 적합하게 안전관리를 하여야 하며, 안전관리 소홀로 인한 안전사고에 대하여 전적인 책임은 수급자에게 있으며, 수급자의 부담으로 원상복구 및 손해배상을 하여야 한다. 다. 수급자는 작업 시작 전 감독자와 작업내용, 방법, 열차운전취급 방법 등을 협의한 후 작업을 수행하여야 하며, 어떠한 경우라도 감독자의 작업승인 또는 지시 없이 열차운행선상에 작업원을 투입하여 작업준비 및 작업착수를 해서는 안 된다. 라. 수급자(안전관리자)는 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 체계적이고 계획적인 안전관리 계획을 수립하여 안전교육을 철저히 시행하여야 한다. 마. 수급자는 작업요원을 유해 위험작업에 배치할 경우 당해 작업조건에 적합한 보호구를 지급하여 착용하도록 하고 작업 전에 착용유무를 확인하여야 하며, 작업요원에게는 개인별 안전 보호구를 지급하여야 하고, 작업 중 훼손, 분실 시 즉시 재 지급하여야 한다. 바. 수급자는 열차운행선로지장작업 업무세칙에 의거하여 현장조사, 입회 등 차단작업 수행 시 철도운행안전관리자를 선임·배치하여야 한다. 사. 작업현장에서는 항상 위험에 대비한 인식을 새로이 하여 작업의 차질이나 종사자의 부주의가 없도록 주의하여야 한다. 아. 공사(운행선 인접작업 포함) 시행 시에는 다음 사항을 준수하여야 한다. (1) 안전관리자(또는 현장대리인)은 고속선 입‧출입 시 관리주체 내부 규정 “고속선 출입 절차서” 개정안(경주고속철도시설사무소-338. ‘18.1.17.)에 따라 행정 절차에 따라 시행하고 출입문 쇄정상태를 점검한다. (2) 고속선 출입문의 번호 자물쇠는 감독자가 직접 취급한다.

	2. 공 사 시 방 서
(3) 현장대리인(안전관리자)는 작업현장 지도 및 점검(작업자의 안전보호구 상태 및 착용여부 검사 포함)을 시행한다. (4) 현장대리인(안전관리자)는 작업 전 철도운행안전관리자와 함께 임시열차 및 작업차량 운행여부를 반드시 확인하고, 작업자에 대해 교육을 실시한다. (5) 현장대리인(안전관리자)는 매 회 작업 투입 전·후 인원점검 및 장비 점검을 시행하고 열차운행에 지장이 없도록 작업 개소의 뒷마무리를 확인한다. (6) 현장대리인(안전관리자)는 작업 중 비상상황 발생 시 철도운행안전관리자와 함께 작업자 및 열차운행의 안전확보를 위한 응급조치를 시행한다. (7) 차단작업 계획 수립점검 업무 및 접근 방법과 관련하여 참여자기술자는 안전사고 예방에 특별히 유의한다. (8) 안전관리자는 아래 사항에 대한 실시 계획서를 작성하여 감독자에게 제출하고 현장에서 지참하고 실시 결과를 보고하여야 한다. (가) 안전·보건 교육 (나) 외업중 안전 관리 (9) 안전상의 조치 : 다음 장소는 특히 안전 조치를 하여야 한다.(개인 안전조치 포함) (가) 과업 중 기술자가 추락할 위험이 있는 장소 (나) 물체가 낙하 비산할 위험이 있는 장소 (다) 출입 금지 구역 설정 및 안전 표지판 설치 (라) 과업 중 자재 및 기계 장비 등의 건축 한계선 내 방치 금지 (마) 공기구 및 작업대차(트로리)에 LED경광등 또는 반사재 부착하여 시인성을 확보

	2. 공 사 시 방 서
(바) 과업 시행중 발생한 각종 안전사고는 감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한다. (사) 과업 중 열차 운행에 지장을 주는 또는 줄 수 있는 작업은 감독자와 협의하여 사무소 및 관련 기관의 승인을 얻은 후 시행해야 한다. (10) 당일 안전작업계획 수립 (가) 안전관리자(현장대리인 및 철도운행안전관리자)는 관리주체와 작업 내용 관련하여 사전 협의 (나) 작업자, 장비, 자재 준비 상태 (다) 작업시간 승인여부 확인(운전명령, 관련 관제사) (라) 작업시간 확보 및 관계소속 통보여부 등을 종합하여 당일 적정량 설정 (마) 고속선 출입 전 반드시 감독자 및 해당 사업소에 출입승인을 얻어야 한다. (11) 작업내용 설명 및 안전교육 시행 (가) 당일 작업할 내용, 시간, 최초 운행 열차 시각 (나) 작업 방법 및 안전 교육 시행 (다) 작업 장소별 업무 연락 책임자 지정(연락방법, 통신 수단) (라) 작업을 위한 복장, 안전보호구 착용상태 확인 (마) 작업자 음주 유무 및 심신상태 확인 (12) 작업 현장준비, 안전조치 실태확인

	2. 공 사 시 방 서
(가) 작업 현장 단위별 인원, 장비, 자재 적정 배치 여부 (나) 철도운행안전관리자 및 열차감시자 배치, 안전설비 설치 상태 (다) 단전이 필요한 개소는 단전 조치 후 작업 위치 전후에 접지걸이 설치 여부 확인 (라) 울타리 출입은 작업자가 임의로 출입할 수 없으며, 감독자 인솔하여 출입 가능 (13) 운전협의 철저 이행 (가) 운전 및 급전 관제사 등 관련 관제사(고속관제 포함)와 운전협의 (나) 작업 시간, 열차 운행시간 등 사전확인 숙지 (다) 이례 사항 발생시 연락방법, 통신 수단 등 상호 협의 (라) 주요 작업내용에 대하여 상호간 기록유지 자. 고속선 출입절차에 따른 출입 허가 (1) 고속철도운전취급세칙 제37조(고속선 출입제한)에 의거 계약 상대자는 출입목적 및 출입인원, 출입기간 등을 작성하여 관리주체에 출입허가를 요청하여야 한다. 차. 고속선 차단작업 시행도중 이행상태 확인점검 (1) 안전수칙 준수여부 확인 (가) 지시위반자에 대한 경고장 발부 제재 조치 (나) 위반 내용을 기록, 수급자에게 통보, 작업 참여 배체 촉구

	2. 공 사 시 방 서
(2) 작업 진척 상황 수시 정보 교환 (가) 계획대로 진행되는지 상황을 파악 후 관리주체 및 관제사에 수시 정보 제공 (나) 작업 시간 부족 또는 지연이 예상될 때는 정보제공 신속 이행 및 용정 축소 (다) 부득이 작업이 지연될 때는 신속히 관리주체 및 관련 관제사에게 통보 후속 조치 의뢰 카. 작업 시행 후 마무리 상태 점검, 확인 (1) 안전관리자 및 철도운행안전관리자 합동 점검 시행 (가) 건축한계내 지장 여부 (나) 장비, 자재 및 공구류가 안전한 장소에 정리, 보관되어 있는지 여부 (다) 선로변에서 비산하여 전차선을 지장을 줄 수 있는 물체 존치 여부 (라) 작업 종료 내용을 관리주체 및 관계 관제사에 통보 (마) 울타리 출입문의 쇄정상태 확인 타. 일정기간 공사 일시 중단 후 재시행, 공사를 할 때의 조치할 사항 (1) 수급자는 반드시 점검계획을 미리 제출하여야 하며 감독자의 승인 없이 임의 작업 시행 금지 (2) 작업을 재시행할 때 반드시 감독자 입회하에 준수사항 확인 및 점검 후에 시행 파. 작업 시행 도중 이례 사항 발생 시 조치할 사항

	2. 공 사 시 방 서
(1) 이례사항 발생 내용을 신속히 관리주체, 관제사(급전, 운전)에 상세히 보고 (가) 통화자 상호간 통보시각, 내용, 직명, 성명, 기록 유지 (나) 통화시는 상호 복창하여 의사 전달 정확 여부 확인 (2) 현장의 안전조치 신속히 시행 (가) 열차운행 일시 중지 또는 일시 서행 (나) 열차감시자 배치, 서행준수 여부 감시 (3) 필요한 경우 인원, 장비 등의 지원요구 필요여부를 신속히 판단 조치 이행 (4) 기타 필요 사항 발생 시 안전 위주의 조치 이행 16. 설계변경 조건 가. 감독자는 공사 시행 중 현장 여건에 따라 공사의 세부사항 변경, 물량의 증가, 감소 등을 조절하는 권리를 갖으며, 그와 같은 증가, 감소, 변경으로 인하여 그 계약을 무효화 시키거나 보증을 해제하지 못하며, 원 계약서와 동일한 조건으로 변경된 용역을 완료하여야 한다. 나. 수급자는 계약체결 후, 착공 전 공사에 필요한 설계서 및 관련 자료를 검토하고 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 감독자에게 보고하고, 그 이유가 정당하고 계약기간의 조정이 필요하다고 인정될 때에는 감독자와 협의하여 조정할 수 있다. 다. 공사 시행 중 여건의 변동 및 관리주체가 필요하다고 인정할 경우에는 설계 변경을 할 수 있다.

	2. 공 사 시 방 서
라. 관리주체의 계획 변동으로 인하여 공사 내용(물량 등)의 변동이 있을 경우에는 설계 변경할 수 있다. 마. 공사 시행 중 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생되어 그 사유가 인정될 경우 감독자의 지시 또는 수급자의 요청에 의하여 설계변경을 할 수 있다. (1) 공종별로 시행 물량의 증감이 발생하였을 때 (2) 신규 공정의 추가 또는 계획이 변경되었을 때 (3) 현장조건(토질, 용수, 지하매설물 등)의 변동으로 인한 물량차이가 발생할 때 (4) 관리주체의 사정으로 공사기한 연장이 된 경우 설계내역 변경이 필요할 때 (5) 기타 필요하다고 인정하는 경우 바.「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제73조 및「정부입찰‧계약 집행기준」제17장에 의거 실제 공사에 투입된 인공에 따라 계약체결 당시 지급된 대가에서 실제 투입한 결과에 의거 정산하여 감액조치 할 수 있으며, 초과 시 설계변경 사유에 해당하지 않을 경우에는 추가지급하지 않는다. 사. 공사 시행 중 중 철도운행안전관리자 및 열차감시자는 실제 투입한 결과에 따라 정산한다. (1) 철도운행안전관리자 참여일수는 운행협의서(운전명령서식 10호, 20호) 또는 안전작업계획서에 의거 산정 후 실비정산(지급)처리토록 한다.(단, 관련서류 증빙 시) (2) 열차감시자의 참여인원 및 일수는 안전작업계획서에 의거 산정 후 실비정산(지급)처리토록 한다.(단, 관련서류 증빙 시)

	2. 공 사 시 방 서
17. 관계처 협의 가. 관계법령(건축법, 도로법, 도시계획법 및 각종 시행령)에 의한 각종 인‧허가 및 동의, 통보 등 필요한 협의는 감독자의 지시에 따라 수급자가 사전에 확인 이행하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 수급자 부담으로 한다. 18. 사진촬영 가. 수급자는 시공 전‧중‧후 과정, 공사 시행 중 매몰 또는 기타 사항으로 나타나지 않는 부분 등, 기타 감독자가 지시하는 부분은 천연색 사진으로 기록 보존하여야 하며, 감독자의 필요로 하는 부수만큼 제출하여야 한다. 나. 현장교육사진 또한 날짜별로 촬영하여 작성 제출해야한다. 19. 공사 준공 시 납품 가. 수급자가 공사 준공 시 제출한 준공계에 포함하여 제출할 서류의 내용과 서식은 다음 각 호와 같다. (1) 준공 검사원 (2) 준공계 (3) 준공조서 (4) 준공 개소별 명세서 (5) 준공도면

	2. 공 사 시 방 서
(가) 수급자는 준공 시 시공 사항을 정확히 측정하여 준공도면과 기타 필요한 사항을 원도로 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다. (6) 준공 사진첩 (가) 수급자는 시공 전‧중‧후 과정, 공사 시행 중 매몰 또는 기타 사항으로 나타나지 않는 부분 등, 기타 감독자가 지시하는 부분은 천연색 사진으로 기록 보존하여야 하며, 감독자의 필요로 하는 부수만큼 사진첩 및 USB를 제출하여야 한다. (나) 현장교육사진 또한 날짜별로 촬영하여 작성 제출해야 한다. (다) 작업위치별, 공종별 시공 전, 중, 후 사진을 제출하여야 한다. (7) 안전작업계획서 및 운전명령서식 20. 뒷정리 가. 본 공사로 인하여 발생된 오물은 준공 전에 깨끗이 청소하여야 하며, 작업현장을 정리정돈 하여야 한다. 21. 환경관리 가. 공사 시행 시 발생되는 사업장 폐기물관리는 폐기물관리법에 의한다. 나. 수급자는 설계내역서 외의 재료 사용 시 친환경 상품을 우선한다.

	2. 공 사 시 방 서
22. 산업안전보건법령의 준수 가. 수급자는 공사 착공 시 ‘산업안전보건법 시행규칙‘ 제29조에 의거 관리주체와 안전‧보건 협의체를 구성하며, 공사 준공 시 까지 관리주체에서 시행하는 매월 정기회의에 참석하여야 한다.나. 공사 시행 시 ‘산업안전보건법 시행규칙‘ 제30조에 의거 계약상대자는 관리주체와 안전‧보건조치 등을 위하여 합동 순회점검을 시행하는 등 산업재해를 예방하기 위한 조치를 하여야 한다. 23. 법률 준수의 의무 가. 수급자는 공사를 시행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위를 할 경우 이로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다. 나. 본 공사의 최종성과 내용의 미비, 과오, 진행상 오류 등의 결함에 대한 수급자의 책임은 면제 될 수 없다. 다. 공사의 하자로 인하여 금전적 손실 및 인명피해 등 진행상 지장을 초래한 때에는 해당 부분을 원인자 부담으로 재시행 하여야 하며, 관련법에 따라 관리주체가 결정하는 책임부분에 대하여 수급자는 공사의 재시행 및 손해배상 등의 책임을 진다. 라. 공사 시행 시 특허권 및 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어있는 것을 사용할 때에는 수급자가 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

	3. 특 별 시 방 서
1. 일반사항 가. 적용범위 (1) 본 시방서는『경부고속선 동대구-신경주 305.100㎞ 부근 외 19개소 심플레이트 고저정정 및 기타공사』에 시행되는 일련의 모든 작업공정에 적용한다. (2) 모든 공정이라 함은 심플레이트 고저정정, 응력균질화 등을 말한다. 나. 관련규정 (1) 본 공사 관련사항으로 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 국토해양부 제정 시방서, 철도건설규칙, 표준안전시방서, 선로지장 취급절차 및 설계도면 등에 의거 시행하여야 한다. 다. 일반사항 (1) 수급업자는 감독자가 필요하다고 인정되는 관련서류를 제출하여야 한다. (2) 공사장에서 발생하는 안전사고는 수급자 책임하에 처리하여야 한다. (3) 공사기간 동안 본 건으로 인한 열차 안전운행에 지장이 없도록 하고 감독자의 지시에 의해 작업을 실시하도록 한다. (4) 기타 감독자가 필요하다고 인정되는 안전시설은 수급자 부담으로 설치하여야 한다. (5) 열차운행선 공사 안전관리 대책에 의거 안전관리자와 열차감시자, 철도운행안전관리자를 반드시 배치하여야 한며, 작업장이 여러 개로 나누어진 경우 각 작업장별로 열차감시자, 철도운행안전관리자를 두어야 한다. (6) 현장대리인은 감독자의 사전 승인없이 현장을 이탈해서는 안되며 현장에 상주하여 전반적인 보수공사에 기술지도를 하여야 하고, 특별히 안전에 지장이 없도록 총괄 관리를 하여야 한다. (7) 현장대리인은 매 공정이 끝나면 감독자의 승인을 득한 후 다음 공정작업을 하여야 한다.

	3. 특 별 시 방 서
(8) 본 공사 구간에 설치되어 있는 지장물은 공사감독자 및 관계기관과 협의하여 이설조치 후 공사를 시행하여야 한다. (9) 본 공사 개소에서 발생되는 폐기물 및 발생재료는 당일 회수 또는 정리정돈 하여야 한다. (10) 본 공사는 야간시간대에 시행하므로 시인성이 좋은 발광형 안전조끼와 공기에 야광 반사재를 부착하여야 한다. (11) 현장대리인은 안전교육일지와 일일작업보고를 매일 작성하여 준공 시 공사감독자에게 제출하여야 한다. (12) 현장대리인은 일일작업 시작전 작업자들에게 지적확인환호응답을 포함한 안전교육을 실시하며, 음주측정 등을 실시하여 음주자는 당일 작업에서 배제시켜야 한다. (13) 현장대리인은 현장특성에 맞는 Check List 점검사항을 작업 전, 중, 후 실시 및 기록 관리하여야 한다. 2. 시공일반 가. 적용범위 (1) 이 시방서는 “경부고속선 동대구-신경주 305.100㎞ 부근 외 19개소 심플레이트 고저정정 및 기타공사” 에 적용한다. (2) 본 공사 시행 전 조치사항 ① 현장조사 결과를 기초로 종합 검토하여 형식 및 규모, 설치위치 결정 ② 설치시기, 설치위치, 규격 등에 대하여 발주청과 협의 - 재료 시험 성적서 승인 요청(국가공인기관 시험 인증) - 시행계획서 통보 ③ 부속 시설물 조사 해당 관리부서와 협의 및 통보(지장물 이전 및 시공시 관계자 입회) (3) 이 시방서에 명기된 내용 이외에 정밀공사 및 품질관리를 위해 필요한 사항은 감독자와 협의하여 시행한다.

	3. 특 별 시 방 서
나. 제작 일반 (1) 본 공사는 기존 고속철도 시설물(콘크리트 궤도)을 보수, 보강하는 공사로 기존 시설물의 성능 유지에 이상이 없어야 한다. (2) 현장 시공은 설계도와 공사시방서에 따른다. (3) 본 공사는 고속열차 운행선상에서 작업이 이루어 지므로 열차안전운행 확보에 만전을 기하여야 한다. 다. 재료 (1) 설계도서를 검토하여 조달재료의 규격을 확인하여야 한다. (2) 재료규격 중 KS규격품이 아닌 특수한 규격이 있는지 확인하여 조달계획을 수립 검토 후 조달하여야 한다. (3) 재료별 시험성적서(공인기관)를 제출하여 감독자의 승인을 얻어야 한다. 3. 시공(경부고속철도 2단계 구간 유지관리매뉴얼 준용) 가. 심플레이트 고저정정 작업 (1) 고저정정은 베이스 플레이트 아래에 높이조절용 심플레이트를 삽입하는 것으로 1㎜단위로 정정이 가능하며 높이조절용 심플레이트 조합은 –2/+55㎜까지 가능하다. (심플레이트 조합표 참고) (2) 본 작업 착수 전, 필요한 정정범위를 결정하여 사전 검측(측량)을 통한 미세 조정량을 산정한다. (3) 정정할 구간의 레일체결구 볼트를 해체한다. (4) 사전 조합한 심플레이트를 삽입 후, 레일체결구 볼트를 체결한다. 이때 토크량은 250~300N*m에 설정한다.

	3. 특 별 시 방 서
(5) 작업 공정 및 기타 사유로 인해 작업 연장을 조정할 경우, 전장에 걸쳐 고저 단차량의 600배 이상 체감하여야 한다. (6) 당일 작업 후 검측(측량)을 시행하여 궤간, 고저, 방향, 수평 등 고속선 선형관리기준에 부합되는지 감독자의 승인을 득해야 한다. (7) 작업 책임자는 최초 열차의 통과상태를 확인 후 이상유무를 매일 감독자에게 보고하여야 한다. 나. 응력균질화 작업 (1) 응력균질화 작업은 야간 대기온도법으로 시행하며, 10분이상 레일 온도를 측정하여 온도변화가 급격할 경우 작업을 시행하여서는 안된다. (2) 체결구 해체에 따른 응력 교란이 발생한 구간의 양쪽 단부에서 50m 떨어진 두 지점 사이에서 응력 균질화 연장을 결정한다. (3) 응력을 균질화 할 장대레일 전 장에 걸쳐 시작 지점을 ‘0’으로 하여 매 50m 마다 마커로 표기한다. (4) 응력 균질화를 실시할 연장이 150m 이상인 경우, SFC체결구를 해체 후, 침목 10~15개 간격으로 레일 저부에 롤러를 설치한다. (5) 시점→종점 일방향으로 떡매 등으로 레일을 타격하며 응력의 균질화를 시행한 후, 롤러를 철거하고 SFC체결구를 재 체결한다. (6) 당일 작업 후 검측(측량)을 시행하여 궤간, 고저, 방향, 수평 등 고속선 선형관리기준에 부합되는지 감독자의 승인을 득해야 한다. (7) 작업 책임자는 최초 열차의 통과상태를 확인 후 이상유무를 매일 감독자에게 보고하여야 한다.

	3. 특 별 시 방 서
4. 기타사항 가. 기성대가 및 준공대가 지급 시 산재보험료, 고용보험료, 건강보험료, 연금보험료 등을 사후정산 하여 지급하며, 이는 수급자가 제출한 보험료 납입확인서(사업주 및 개인의 부담금) 금액을 준공일과 동시에 제출하여야 한다. (1) 정산제출 서류 (가) 사업장 단위로 기재된 납입확인서 (나) 가입자별 납부확인서(영수증) (다) 개인별 보험료 고지(산출) 내역서 나. 본 공사가 완료되었을 때는 공사현장의 뒷정리 및 주변 환경을 깨끗이 하여 감독자의 검사를 받은 준공검사에 임하여야 한다.

	3. 특 별 시 방 서
※ 공사계약 특수조건 (계약업무처리 시행세칙 제161조, 2017.07.25.) 공사명 : 경부고속선 동대구-신경주간 305.100㎞ 부근 외 19개소 심플레이트 고저정정 및 기타공사 제1조(목적) 이 공사계약특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)은 한국철도공사와 계약상대자가 체결하는 공사도급계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다. 제2조(정의) ① 이 특수조건에서 사용하는 용어의 정의는 특수조건에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 한국철도공사 공사계약일반조건(이하 “일반조건”이라한다) 제2조에서 정한 바에 따른다. ② 공사의 착공, 감독, 하도급관리, 공정관리, 대가의 지급검토, 검사, 재해방지조치, 인수, 하자관리등 공사현장에서 계약이행과 관련된 사항에 대하여는 달리 규정한 경우를 제외하고는 공사 및 용역관리규정(철도공사 사규)에 의한 시행부서의 장(그 위임을 받은 직원을 포함한다. 이하 같다)을 계약담당자로 본다. 제3조(수입인지 및 국·공채의 매입) 계약상대자는 인지세법, 주택법등에서 규정한 바에 따라 수입인지 또는 국·공채를 매입하고 그 매입필증 등을 계약담당자에게 제출하여야 한다. 제4조(장기계속계약의 잔여공사 계약) 장기계속계약의 경우 제2차이후 공사계약은 부기한 총공사 부기금액에서 이미 계약된 금액을 공제한 잔여금액의 범위안에서 계약을 체결하여야 한다. 제5조(공사손해보험의 가입) ① 계약상대자는 회계예규 「정부 입찰·계약 집행기준」제11장(공사의 손해보험가입 업무집행) 및 일반조건 제10조에서 정하는 바에 따라 공사손해보험 계약목적물의 착공일(공사손해보험가입 비대상공사가 포함된 공사의 경우에는 손해보험가입대상공사 착공일을 말함)이전에 공사손해보험 또는 조립보험(이하 “보험”이라 한다)에 가입하여야 한다. ②「정부 입찰·계약 집행기준」제57조에서 정한 손해의 담보에 대한 계약상대자의 자기부담금은 매 건당 각각 1억원이하로 한다. 다만, 공사의 특성 및 여건에 따라 자기부담금의 최고한도액을 1억원을 초과하지 않는 범위내에서 조정할 수 있다.

	3. 특 별 시 방 서
③ 보험약관은 특별히 정한 경우를 제외하고는 도심지내의 공사는 영국식 약관, 기타공사는 독일식 보통약관으로 한다. ④ 계약상대자는 공사보험 계약일로부터 6개월 이내에 보험회사로부터 위험도조사보고서(Risk Survey Report)를 징구하여 시행부서에 제출하여야 한다. 다만, 공사의 특성 및 여건에 따라 불가피한 경우 시행부서와 협의하여 제출기한을 연장할 수 있다. ⑤ 계약상대자는 보험회사가 제출한 위험도 조사보고서에 따른 적절한 위험방지 조치를 취하여야 하며, 공정율 50% 전후에 이미 제출한 위험도조사보고서의 내용을 보완하여 다시 제출하여야 한다. ⑥ 공사계약금액이 증감(시행령 제64조 내지 제66조의 규정에 의한 계약금액의 증감)된 경우 보험가입금액의 증감은 「정부 입찰·계약 집행기준」제57조제4항에 의하며, 계약상대자는 계약금액 변경일로부터 14일이내에 보험계약을 변경처리하여야 한다. ⑦ 계약상대자는 「정부 입찰·계약 집행기준」제62조제2호에 따라 계약금액의 변경, 설계변경, 공사중단 등의 공사계약 변경사항을 보험회사에 통지하여야 한다. ⑧ 보험가입대상 공사에 대한 보험가입 지연으로 발생하는 보험사고의 보상·배상은 계약상대자 부담으로 하며 보험가입대상 공사의 준공일까지 보험에 가입하지 않는 경우에는 예정가격조서상에 계상된 보험료를 감액 조치한다. ⑨ 계약상대자는 보험사 선정시 당해 보험사의 재정상태, 담보능력등을 감안하여 건실한 보험사를 선정하여야 하며 부실보험사 선정으로 보상 또는 배상을 받지 못할 경우에는 계약상대자 부담으로 한다. ⑩ 계약상대자는 예정가격조서상에 계상된 보험료와 보험가입시 실제 납입한 보험료간의 차액발생을 이유로 보험가입을 거절하거나 동 차액의 정산을 요구할 수 없으며, 보험가입 이전에 청구하는 기성대가에 대하여는 지급을 유보할 수 있다. ⑪ 계약상대자는 보험계약서류, 위험도 조사보고서, 보험사고 발생 및 처리현황, 보험계약 종결보고서를 시행부서에 제출하여야 한다. ⑫ 제1항 내지 제10항에 규정한 사항이외에 보험과 관련된 기타 계약조건은 공사계약일반조건 제10조 및 집행요령에 정

	3. 특 별 시 방 서
한 바에 의한다. 제7조(노임지급) 계약담당자는 원활한 계약이행을 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 공사현장에 종사하는 근로자의 노임지급과 관련하여 필요한 지시를 할 수 있으며, 계약상대자가 이를 이행하지 아니할 경우 당해 공사대금에서 노임을 공제하여 근로자에게 직접 지불할 수 있다. 다만, 현장근로자의 노임을 직접 공제해서는 아니되는 정당한 사유가 있음을 계약상대자가 증명한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 계약상대자는 노임을 계약금액 산출내역서에 명시하여야 하며, 이를 명시하지 아니한 경우 관련법령의 규정에 의거 압류가 금지되는 노임은 고용노동부장관이 산업재해보상보험법의 규정에 따라 고시하는 당해연도의 건설공사 노무비율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액으로 본다. 제8조(환경오염방지등) ① 계약상대자는 대기오염, 수질오염, 소음, 진동, 악취등으로 환경피해가 발생하거나 인근주민 또는 통행인에게 불편이 없도록 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음·진동규제법, 폐기물관리법, 오수·분뇨및축산폐수의처리에관한법률등 관계법령 및 설계서에 의거 발생 오염물질 종류와 예상량, 처리방법, 처리시행자등이 포함된 환경오염방지계획을 수립하여야 한다. ② 계약상대자는 공사착공신고서 제출시 제1항의 환경오염방지계획서를 계약담당자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 계약담당자가 보완을 요청하였을 때에는 이에 따라야 한다. ③ 계약상대자는 환경오염방지계획서를 현장에 비치하고, 오염방지 이행실적을 기록 유지하여야 하며, 계약담당자가 환경오염방지계획 및 이행실적의 제출을 요구할 때에는 그에 따라야 한다. 제8조의 2(폐기물의 처리) ① 계약상대자는 폐기물관리법령에 의거 폐기물처리업자로 허가된 자에게 위탁하여 폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 관련법령에 따라 폐기물처리시설을 설치하여 승인을 받았거나 신고 후 직접 처리하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 계약상대자는 폐기물관리법령의 규정에 따라 폐기물을 처리하여야 하며 이를 위반하여 처리하는 경우 계약담당자는

	3. 특 별 시 방 서
이의 시정을 요구할 수 있다. ③ 계약상대자가 제2항에서 규정한 시정 요구에 응하지 않을 경우 계약담당자는 폐기물처리업자에게 위탁하여 처리할 수 있으며 이에 소용되는 비용은 계약상대자의 부담으로 한다. ④ 계약담당자 폐기물을 폐기물처리업자에게 직접 위탁하여 처리하는 경우에도, 계약상대자는 계약담당자 및 폐기물처리업자와 협의하여 폐기물의 반출 등에 필요한 적정한 편의를 제공하여야 한다. 제9조(적격심사 관련사항의 준수의무) ① 계약상대자는 조달청시설공사적격심사세부기준 제4조 제2항의 규정에 의한 하도급관리계획서를 제출한 경우 적격심사 당시 제출한 내용대로 철저하게 이행하여야 한다. ② 계약상대자는 공사를 수행함에 있어 불가피한 사유로 제1항에서 규정하는 하도급관리계획서의 하도급사항을 변경하고자 할 경우에는 당초의 하도급 조건 이상으로하여 수요기관의 장의 사전 승인을 받아야 한다 제10조(산업안전보건관리비 등의 목적 외 사용금지 및 기술지도계약) ① 계약담당자는 계약상대자가 계약금액에 포함된 산업안전보건관리비, 환경보전비 및 건설근로자 퇴직공제부금(이하 “산업안전보건관리비 등이라 한다)을 산업안전보건법령 또는 건설기술진흥법령 또는 건설산업기본법령에서 정한 목적 이외에 사용하거나 목적대로 사용하지 아니한 경우 그 금액을 감액조치 한다. 이 경우 관련 증빙서류에는 당해공사명 또는 계약번호 등이 포함되어 있어야 한다. <개정 2014. 10. 31.> ② 계약상대자는 제1항에서 규정한 산업안전보건관리비 등을 목적 외에 사용하지 않았음을 이유로 안전관리 및 환경관리를 소홀히 하여서는 아니된다. ③ 계약상대자는 산업안전보건법시행규칙 제32조 제3항에 규정된 “노동부령이 정하는 자”에 해당하는 규모의 건설공사는 기술지도계약을 공사착공 후 14일 이내에 체결하고 기술지도계약서를 시행부서에 제출하여야 한다. 다만, 동조항 단서 각호의 1에 해당하는 공사인 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 계약담당자는 계약상대자가 산업안전보건법령 및 제3항에서 규정하는 기술지도계약대상공사에 대하여 기술지도계약

	3. 특 별 시 방 서
을 체결하지 아니한 경우에는 산업안전보건법 제30조 제1항의 규정에 의하여 계상한 산업안전보건관리비의 20%에 해당하는 금액을 감액하며, 기술지도계약을 지연체결하여 수수료가 조정된 경우에는 조정된 금액만큼 감액한다. 제10조의 2(산업안전보건관리비 등의 계상) ① 총액입찰로 집행한 공사인 경우, 관련법령의 규정에 의거 공사비에 포함하도록 한 산업안전보건관리비 등은 다음에 해당하는 금액을 계약금액 산출내역서에 포함하여야 한다. 1. 설계금액에 계상된 산업안전보건관리비 등에 투찰율(예비가격기초금액 대비 계약금액 비율을 말하며, 이하 이 조에서 같다)을 곱한 금액 이상 <개정 2014. 10. 31.> ② 계약상대자가 제1항에서 규정하는 비용을 포함하지 않은 경우, 계약담당자는 계약체결 이후라도 당해 비용을 산출내역서에 포함하고 그로 인하여 증감된 차액은 「정부 입찰·계약 집행기준」제21조제2항의 규정에 따라 조정하도록 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다. 제11조(공사감독자의 지시) 계약상대자는 공사감독자의 구두지시가 있을 경우(지시내용의 이행 전후에 관계없이) 이를 지체없이 서면으로 확인하여야 한다. 제11조의2 삭제 <2014. 8.11.> 제12조(계약상대자에 의한 도면) ① 공사 일부분의 시공상세도면을 계약상대자가 작성토록 설계서에 명시된 경우 계약상대자는 필요한 시공상세도면·계산서 등을 작성 제출하여 당해 공종의 착공전까지 공사감독자의 확인을 받아야 한다. ② 계약상대자는 제1항에서 규정하는 시공상세도면 등에 대하여 공사감독자의 서면 승인을 받기 전까지는 당해 공종을 착수하여서는 아니된다. 시공상세도면 등에 대한 공사감독자의 승인은 제1항에 따른 계약상대자의 책임을 감면시키지 아니한다. ③ 공사감독자는 공사전·공사중 또는 준공여부와 관계없이 계약상대자가 제공한 시공상세도면 등의 결함을 발견한 경우에는 그의 시공상세도면 등을 변경·수정토록 하고 그에 따라 시공토록 지시할 수 있다. 제13조(인접공사 계약자에 대한 협조) ① 계약상대자는 계약담당자의 요구가 있을 경우 이 계약의 공사현장내 또는 인접

	3. 특 별 시 방 서
공사현장(이하 “인접공사”라 한다)에서 다음 각호의 자가 자기공사를 이행하는 데 필요한 적절한 편의를 제공하여야 한다. 1. 계약담당자과 계약한 다른 계약자 및 그들의 고용인 2. 인접 공사현장의 시공자 ② 이 계약을 이행함에 있어 공사 전체 또는 일부분이 인접공사 계약의 적절한 시행 또는 그 결과에 의존할 때에는, 계약상대자는 이 계약의 이행에 악영향을 끼칠 수 있는 명백한 위반 또는 결함을 조사하여 즉시 서면으로 공사감독자에게 통보하여야 한다. 계약상대자가 이를 이행하지 아니한 경우에는 계약상대자는 인접공사 계약의 이행이 이 공사를 진행하는데 적합함을 인정하는 것으로 본다. 제14조(하자보수 책임승계 등) 계약상대자는 이전의 계약상대자가 이행한 공사를 계속하여 시공하는 경우 이전 계약상대자가 이행한 부분에 대하여도 하자보수의 책임을 진다. 다만, 계약상대자가 하자발생 사유가 자신의 귀책이 아님을 입증하였거나 하자책임 구분이 분명한 경우에는 그러하지 아니하다. 제15조(하자담보) ① 일반조건 제33조에서 정한 하자담보책임기간은 준공검사를 완료한날로부터 계약서에 정한 바에 따른다. 다만, 공종별 하자담보책임기간은 시행규칙 제70조에서 정한 바에 따르며, 장기계속공사에 있어서 하자담보책임기간은 시행령 제60조 제2항에 정한 바에 의한다. ② 일반조건 제34조에서 정한 하자보수보증금은 계약서에 정한 바에 의한다. 다만, 공종별 하자보수보증금율은 시행규칙 제72조에서 정한 바에 의하며, 장기계속공사에 있어서 하자보수보증금은 시행령 제62조 제3항에 의하여 납부하여야 한다. 제16조(공사관리) ① 계약담당자는 계약관리를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 공사현장에 대하여 다음 각호의 사항을 조사·점검하거나 계약상대자에게 자료를 요구할 수 있다. 1. 시공상태

	3. 특 별 시 방 서
2. 안전관리 상태 3. 설계변경등 계약내용 변경에 관한 사항 4. 공사현장 관리상태 5. 하도급에 관한 사항 6. 기타 계약조건 이행사항 ② 계약담당자는 제1항에 의한 조사·점검 결과 계약상대자가 계약조건 및 설계서 등의 계약내용과 다르게 시공한 사항에 대하여는 시정토록 조치할 수 있다. ③ 계약담당자는 제1항 또는 제2항의 결과에 대하여 시행령 제13조 및 제42조의 규정에 의한 심사에 반영할 수 있다. ④ 계약담당자는 공사관리를 위하여 필요한 경우 제1항 각호의 사항을 조사·점검하거나 자료의 제출을 요구할 수 있다. 제16조의 2(공사계약내용의 변경) 계약담당자는 공사계약 체결이후에 발생하는 설계변경등으로 인하여 계약내용을 변경하고자 하는 경우에는 변경계약체결 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제17조(법령의 준수 등) ① 계약상대자는 각종 법령, 조례, 규칙 또는 공사수행과 관련하여 공공기관에 의하여 요구되는 사항을 준수하여야 하며, 법령 및 계약내용등이 상호 일치하지 않거나 모순이 있어 계약이행에 어려움이 예상될 경우 지체 없이 계약담당자에게 이를 서면으로 확인하여야 한다. ② 계약상대자는 어떠한 경우에도 이 계약의 체결 또는 이행과 관련하여 관련직원에게 금품 또는 향응을 제공하여서는 아니된다. ③ 제2항의 규정을 위반함으로써 받게 되는 입찰참가자격제한 처분등 모든 불이익에 대한 책임은 계약상대자에게 있다. 제17조의 2(공동계약 내용의 준수) ① 공동계약의 경우 공동수급체의 구성원은 출자비율 또는 분담내용대로 계약이행에 참여하여야 한다. ② 계약상대자는 공사 착공신고서 제출 시 공동수급체 구성원별 출자비율 또는 분담내용에 따른 다음 각 호의 내용이

	3. 특 별 시 방 서
포함된 공동계약이행계획서(이하 “계약이행계획서”라 한다)를 수요기관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 다만, 불가피한 사유가 있는 경우 시행부서의 장의 승인을 받아 착공신고서 제출일로부터 30일 이내에 제출할 수 있다. 1. 구성원별 이행부분 및 내역서(이행부분을 구분하지 아니하는 경우에는 제외) 2. 별첨양식의 공동계약이행계획서(붙임 1) 3. 그 밖의 수요기관이 요구하는 사항 ③ 시행부서의 장은 공동수급체구성원이 연명으로 출자비율 또는 분담내용을 준수하는 범위내에서 제2항의 규정에 의한 계약이행계획서의 변경에 대한 승인을 요청하는 때에는 공사의 적정한 이행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에 한하여 이를 승인할 수 있다. 제18조(부도 등으로 인한 보증시공 청구) ① 일반조건 제44조 제1항 각호의 사유로 인하여 계약을 해지·해제할 수 있을 경우에는 연대보증인 또는 공사이행보증회사에게 보증시공을 청구하거나 공동수급체 구성원에게 잔여공사를 완성하게 할 수 있다. ② 계약상대자의 부도·파산·해산·영업정지 등(이하 “부도 등”이라 한다)으로 인하여 준공기한까지 공사를 완성할 가능성이 없다고 인정될 경우에는 계약자의 동의여부에 불구하고 제1항에 정한 조치를 할 수 있다. ③ 공동수급체 구성원중 부도 등이 발생한 자에 대하여는 부도 등의 발생일로부터 1개월 이내에 당해 구성원의 잔여 출자비율을 ‘0’으로 조정하거나 연대보증인 또는 공사이행보증회사에 보증시공을 청구 할 수 있으며, 정당한 이유 없이 당초 협정서의 내용대로 공사를 이행하지 않는 경우 수요기관의 장 및 잔여구성원 전원의 탈퇴요청이 있으면 당해 구성원의 동의여부에 불구하고 탈퇴조치하고 제1항에 정한 조치를 할 수 있다. ④ 공동수급체 구성원중 부도 등으로 출자비율을 변경하여 잔여공사지분이 없는 구성원이 있는 경우에는 대가지급신청·계약내용변경 및 장기계속공사의 차수계약 등은 잔여공사지분이 있는 구성원만의 서명 날인에 의할 수 있다. 제19조(분쟁의 해결) ① 일반조건 제51조제1항에서 규정하는 협의는 문서로 하여야 한다.

	3. 특 별 시 방 서
② 계약상대자는 당해 계약의 이행과 관련하여 분쟁의 사유가 되는 사안이 발생한 날 또는 지시나 통지를 접수한 날로부터 30일 이내에 공사감독자을 경유하여 계약부서로 협의를 요청하여야 한다. ③ 계약담당자는 제2항에서 규정하는 협의요청을 받은 날로부터 60일 이내에 계약상대자의 요구사항에 대한 수용 여부를 결정하여 계약상대자에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우 30일의 범위내에서 결정기한을 연장할 수 있으며 연장하는 사유와 기한을 계약상대자에게 통지하여야 한다. ④ 계약상대자는 제3항에서 규정하는 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 통지내용에 대한 수용여부를 계약담당자에게 통보하여야 하며, 이 기간내에 통보하지 않은 경우에는 이를 거절한 것으로 본다. ⑤ 일반조건 제51조제2항에서 규정하는 중재법에 의한 중재로써 분쟁을 해결하고자 하는 경우에는 사전에 계약당사자간에 중재로서 분쟁을 해결한다는 별도의 서면합의가 있어야 한다. 제20조(감액 또는 환불) 계약상대자는 계약조건에 따라 신의성실하게 계약이행을 하여야 한다. 다만 본 계약을 위하여 작성한 설계서 내역중 정부가 발행한 표준품셈 물량규격·수량·단가 또는 노임단가가 기준보다 과다하게 책정되었거나 제잡비율 적용에 착오가 있음이 계약체결 후에 발견되었을 경우, 계약담당자는 계약상대자에게 감액 또는 환불을 요구할 수 있다. <개정 2015. 9. 00> ② 전항의 감액 또는 환불 해당액은 철도공사가 계약상대자에게 지불할 여하한 기성고 지급금액 중에서도 차인할 수 있으며, 기성고 지급분이 없을 경우에는 발주부서에서 정한 소정기일까지 환불하여야 한다. 제20조의2(채권양도) 계약상대자는 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사대금청구권)을 제3자에게 양도하고자 하는 경우에는 미리 연대보증인 또는 공사이행보증서 발급기관의 동의를 얻어 계약담당자의 서면승인을 받아야 한다. 제21조(보칙) ① 회계예규 공동계약운용요령에 의거 공동수급체가 제출한 공동수급협정서는 계약담당자의 사전승인 없이는 변경할 수 없다. ② 계약이행과 관련한 기간의 계산은 특별한 규정이 없는 한 민법에서 정한 바에 따른다.

	3. 특 별 시 방 서
③ 공사계약일반조건 제22조에 의하여 물가변동에 의한 계약금액을 조정할 경우는 (품목조정율, 지수조정율)을 적용한다. ④ 계약상대자는 계약서에 명시된 주소가 변경되었을 때에는 즉시 계약담당자 및 공사감독자에게 서면으로 변경 신고를 하여야 하며, 이를 이행하지 아니하여 발생하는 불이익은 계약상대자에게 있다. ⑤ 계약상대자의 전화·팩스번호 등 의사전달 수단의 변경시에도 제4항을 준용한다. ※ 「하도급지킴이」(정부계약 하도급관리시스템) 이용에 관한 사항 (국토교통부 건설정책과-3173호, 2017.12.18., 계약처-9904, 2017.12.21.) 공사명 : 경부고속선 동대구-신경주간 305.100㎞ 부근 외 19개소 심플레이트 고저정정 및 기타공사 이 공사는 수요기관 요청에 따라, 「하도급지킴이」를 이용하는 사업이다 입찰에 참여하는 자는 입찰서 제출 시「하도급지킴이 이용 확약서」를 제출하여햐 한다. 다만, 나라장터를 이용하여 입찰서를 제출하는 경우에는 전자입찰서에 「하도급지킴이 이용 확약서」 내용을 포함한 것으로 보고 전자입찰서 제출로 확약서 제출을 갈음한다. 아울러, 계약대상자는 계약첼결 후 착공계 제출 시 동 확약서를 수요기관에 제출하여야 하며, 제출된 확약서는 계약서의 일부로서 효력을 가진다. 낙찰을 받은 자는 「하도급지킴이」를 이용하여 하도급계약을 체결한다. 다만, 하도급자(장비․자재업체 포함)와 수기로 하도급계약을 체결하는 경우에도 하도급지킴이에 등록하여야 한다. 또한, 원․하도급 대금․노무비․장비․자재대금을 「하도급지킴이」를 이용하여 전자적으로 지급하여야 한다. 가. 원․하도급대금 등 지급에 있어, 「인출 제한」기능 사용에 대하여 수요기관과 상호 협의하여 결정한다. 나. 수요기관의 원․하도급대금․노무비․장비․자재대금의 직접지급 또는 적정지급 여부 확인에 적극 응하여야 한다 5. 하도급지킴이 이용에 관한 자세한 사항은 「나라장터-하도급지킴이-시스템 사용안내(업체)」를 참고한다.

3. 특 별 시 방 서

※ 계약업무처리 시행세칙(개정 2017.07.25. 제2017-046호) [별표 48]<신설 2014.08.11.>『안전계약특수조건』

공사명 : 경부고속선 동대구-신경주간 305.100㎞ 부근 외 19개소 심플레이트 고저정정 및 기타공사

제1조(목적) 본, 안전계약 특수조건은 한국철도공사와 계약상대자가 체결하는 공사․용역계약에 있어 일반조건 외에 산업재해예방을 위한 점검 및 준수의무 등을 특별히 규정함에 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 한국철도공사의 사업장내에서 시행하는 모든 발주공사와 용역사업의 계약상대자를 대상으로 한다.

제3조(안전준수 의무 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 산업안전보건 관계법령 및 안전수칙을 준수하여야 하며 한국철도공사에서 시행하는 산업재해예방시책에 적극 따라야 한다.

제4조(사전예방조치 의무 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 유해․위험요인 실태를 수시로 파악하고 평가하여 불안전요소를 개선하는 등 산업재해예방을 위한 사전조치를 하여야 한다.

제5조(통지 의무 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 중대재해가 발생하였거나 긴박한 재해발생 우려가 있다고 판단될 경우 해당 작업자를 대피시키고 지체 없이 한국철도공사에 통지하여야 한다.

제6조(안전․보건협의체 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 한국철도공사가 운영하는 안전․보건협의체의 당연 구성원이 되며 협의회에 출석할 의무와 필요시 임시 회의 개최요구를 할 권한이 있다.

제7조(안전보건지도․점검 등) ① 한국철도공사는 계약상대자가 공사․용역이행 과정에서 취하는 산업재해 예방조치를 확인하기 위하여 언제든지 안전지도․점검을 시행할 수 있으며 계약상대자는 지도․점검에 동참하는 등 적극 협조하여야 한다.

② 한국철도공사는 안전지도․점검결과에 따라 필요하다고 인정하는 경우 계약상대자에게 시정요구를 할 수 있으며 시정요구를 받은 계약상대자는 한국철도공사에 개선계획 및 개선결과를 제출하여야 한다.

제8조(공사․용역 중지 등) ① 한국철도공사는 안전지도․점검결과 긴박한 사고발생 우려가 있는 유해․위험요인을 발견하였을 경우 그 유해․위험요인이 완전히 해소되었다고 인정될 때까지 계약상대자에게 해당 공사 또는 용역의 중지를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

② 계약상대자는 제1항의 규정에 따라 공사 또는 용역 중지로 발생되는 지체상금 부과 및 작업원에 대한 휴업급여 등의 책임을 지며 이를 수용하여 민․형사상 이의를 제기하지 않는다.

4. 예 정 공 정 표
공사종류	단위	수량	공 사 기 간 (2개월 : 60일간)													기 사
			1일	5일	10일	15일	20일	25일	30일	35일	40일	45일	50일	55일	60일
1. 현장답사 및 계획준비	식	1
2. 자재준비 (에폭시 수지, 심플레이트)	식	1
3. 심플레이트 고저정정	식	1
4. 응력균질화 작업	식	1
5. 현장 뒷마무리	식	1
6. 부대공	식	1

5. 설 계 예 산 내 역 서
	총 공 사 비		(별 봉)
	1	도 급 공 사 비	(별 봉)
	2	지 급 자 재 비 (당기조달품)
	3	지 급 자 재 비 (전년도조달품)
	4	지 급 자 재 비 (중 고 품)
	5	지 급 자 재 비 (레미콘, 충용품)
	6	철도공사제공 기계기구 사용료
	7	철 도 공 사 직 원 급
	8	재 료 일 반 관 리 비
	9	운 송 비
	10	계 약 수 수 료

	6. 공 종 별 예 산 조 서
공 사 종 류	규격	단위	수량	단가(원)		금액(원)	기사
1. 공사명: 경부고속선 동대구-신경주간 305.100㎞ 부근 외 19개소 심플레이트 고저정정 및 기타공사
1) 심플레이트 고저정정	UIC60㎏	정	1,362
2) 응력 균질화 작업	UIC60㎏	정	9,739
3) 부대공
① 철도운행안전관리자	야간		30
② 열차감시자	야간		60
직접공사비
2. 간접노무비	직접노무비의	%	12.6
3. 산재보험료	노무비의	%	4.5
4. 고용보험료	노무비의	%	0.87
5. 건강보험료	직접노무비의	%	3.12
6. 연금보험료	직접노무비의	%	4.5
7. 노인장기요양보험료	건강보험료율의	%	7.38
8. 산업안전보건관리비	재료+직노+관급자재	%	2.93
9. 환경보전비	재료비+직노비+산경의	%	1.5
10. 기타경비	재료비+노무비	%	7.9
11. 일반관리비	재료비+노무비+경비	%	6.0
12.이 윤	노무비+경비+일반관리비	%	15.0
공 급 가 액
13. 부가가치세		식	10
14. 사급자재대	높이조정용 패드
총 공 사 비

		7. 철도공사 직원급 내역서
구 분	단 위		수 량	단 가	금 액		기 사
□ 여 비
1. 공사감독 여비
감독자
소 계
2. 준공검사 여비
팀 장
기술원
소 계
합 계
※ 감독비 및 검사비
공사감독비
준공검사비(팀장)
준공검사비(기술원)
합 계

			8. 개 소 별 명 세 표
위 치	선별	주소		공종별 수량(정)		명세표 (원)		작업일수(예상)	비고
				심플레이트	응력균질화
성동고가 (295.837~297.382)	T1	대구시 수성구			2,472	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:		5일	응력균질화 1일@약500m 고저정정 1일@약100m
성동고가 (295.837~297.382)	T2	대구시 수성구			2,472	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:		5일	″
금강고가 (297.665~297.989))	T1	대구시 동구			518	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:		1일	″
금강고가 (297.665~297.987)	T2	대구시 동구			515	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:		1일	″
가야고가 (304.800~305.080)	T1	경산시 진량읍			448	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:		1일	″

			8. 개 소 별 명 세 표
위 치	선별	주소		공종별 수량(정)		명세표 (원)		작업일수(예상)	비고
				심플레이트	응력균질화
가야고가 (304.800~305.080)	T2	경산시 진량읍			448	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:		5일	응력균질화 1일@약500m 고저정정 1일@약100m
가야고가-속초고가 (305.092~305.256)	T1	경산시 진량읍		262	442	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:		4일	″
가야고가-속초고가 (305.087~305.264)	T2	경산시 진량읍		283	443	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:		4일	″
가야고가-속초고가 (305.453~305.576)	T1	경산시 진량읍		197	366	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:		3일	″
가야고가-속초고가 (305.457~305.586)	T2	경산시 진량읍		206	357	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:		4일	″

			8. 개 소 별 명 세 표
위 치	선별	주소		공종별 수량(정)		명세표 (원)	작업일수(예상)		비고
				심플레이트	응력균질화
광석고가-영청고가 (308.159~308.274)	T1	경산시 진량읍		184	344	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:	3일		응력균질화 1일@약500m 고저정정 1일@약100m
광석고가-영청고가 (308.161~308.305)	T2	경산시 진량읍		230	390	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:	3일		″
외골교 (362.650~362.820)	T1	울주군 언양읍			272	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:	0.5일		″
외골교 (362.650~362.820)	T2	울주군 언양읍			272	공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:	0.5일		″
합 계						공사비: 재료비: 공사감독비: 공사감독여비: 소계:	40일		철도운행안전관리자, 열차감시자 인원 제외

	9. 전 자 입 찰 수 수 료
구 분		단 위	수 량	단 가	금 액		기 사
1. 전자입찰수수료
합 계