2018년 소사원시 궤도시설 유지보수공사

과 업 지 침 서

2018.  12.

제1장  총 칙

1. 공사일반

2. 관리 및 행정

3. 자재관리

4. 안전·보건관리

5. 환경관리

6. 준    공

7. 공사하자보수

제1장 총 칙

1. 공사일반

2018년 소사원시 궤도시설 유지보수공사

제1장  총  칙

가. 적용범위

1) 본 지침서는 소사원시운영(주)가 발주한 “2018년 소사원시 궤도시설 유지보수공사”에 적용합니다.

2) 본 공사는 설계도서와 아래의 관련법 및 규정에 의하여 시공하여야 합니다.

가) 법  령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건설산업기본법, 건설기술진흥법, 근로기준법, 산업안전보건법, 기타 건설공사 관련법 등

나) 지침서 : 토목공사표준일반시방서, 콘크리트표준시방서 등

다) 소사원시운영(주) 규정(선로정비규정, 선로지장취급내규, 선로검사내규,), 철도건설규칙, 선로유지관리지침 등

3) 궤도시설물 현황

가) 선로연장

(단위 : km)

총연장	본선(복선)	입고선	출고선	고장차 유치선	장비유치선	비 고
52.7	23.3(46.6)	2.3	2.6	0.6	0.6

나) 도상

(단위 : km)

총연장	자갈도상 (지상)	콘크리트도상 (지하)	입고선 (지하)	출고선 (지하)	비 고
52.2	5.1	42.2	2.3	2.6

다) 분기기

(단위 : 틀)

자갈도상			콘크리트 도상
#8 편개	#10 건넘선	#15 편개	#10 건넘선	#12 편개	#10 SOC
2	4	2	6	2	8

라) 기타시설물 현황

레일체결구		침목
뱅가드체결구	SFC	PC침목	Bi-Block 침목
4,462개	나머지 전체	지상구간	지하구간

나. 적용순서

1) 설계도서, 법령해석 등이 서로 일치하지 않는 경우에 있어 계약으로 그 적용순서를 정하지 아니한 때에는 다음 순서를 원칙으로 합니다.

가) 계약서

나) 계약 및 일반조건, 특수조건

다) 과업지침서

라) 설계도면

마) 산출내역서

2) 지침서에 명시되어 있어도 현장상황에 부적합하다고 판단될 경우에는 공사감독관과 협의하여 최적의 방법을 검토하고 시공합니다.

3) 지침서에 명기된 내용 이외에 공사 시공상 꼭 필요한 사항은 발주기관과 협의하여 시공방법을 선택하여야 합니다.

다. 용어정의

1) 발주기관

발주기관은 “2018년 소사원시 궤도시설 유지보수공사”를 발주한 소사원시운영(주)(이하 발주기관이라고 함.)를 말합니다.

2) 계약상대자

계약상대자는 발주기관과 공사계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말합니다.

3) 설계서

설계서란 공사지침서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서를 말합니다.

4) 과업지침서

과업지침서는 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로서 설계도면에 대한 설명이나 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서를 말합니다.

5) 설계도면

시공될 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시해 놓은 도서를 말합니다.

6) 공종별 목적물 물량내역서

공종별 목적물을 구성하는 품목․비목과 그 품목․비목의 규격․수량․단위 등이 표시되고, 입찰공고 시 입찰참가자에게 교부된 내역서를 말합니다.

7) 산출내역서

발주기관이 교부한 물량내역서에 계약상대자가 단가를 적어서 제출한 내역서를 말합니다.

8) 공사감독관

발주기관이 공사감독 업무(임무) 수행을 위하여 임명한 기술직원이나 그의 대리인을 말합니다.

9) 승인

승인이라 함은 계약상대자로부터 제출 등의 방법으로 요청받은 어떤 사항에 대하여 공사 감독관이 그 권한범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말합니다.

10) 검사

검사라 함은 공사계약 문서에 나타난 시공 등의 단계 및 납품된 공사재료에 대해서 완성품의 품질을 확보하기 위해 계약상대자의 확인검사에 근거하여 공사감독관이 기성부분 또는 완성품의 품질, 규격, 수량 등을 확인하는 것을 말합니다.

11) 확인

확인이라 함은 공사를 공사계약 문서대로 실시하고 있는지의 여부 또는 지시, 조정, 승인, 검사 이후 실행한 결과에 대하여 공사감독관이 원래의 의도와 규정대로 시행되었는지를 확인하는 것을 말합니다.

12) 지시

지시란 공사감독관이 계약상대자에게 공사 시공상 필요한 실시사항을 제시하는 것을 말합니다.

13) 시공계획서

계약상대자가 공사계약을 이행하기 위하여 공사계약 문서와 도서 및 공사지침서를 숙지한 후 공사착공부터 완공, 준공할 때까지 전체 공정에 대한 공사를 시공할 시공계획서를 말합니다.

라. 법령준수

1) 계약상대자는 본 지침서를 포함한 설계서의 내용이 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(건설공사 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함합니다.)에는 그 사실을 지체 없이 발주기관에 보고하고 관련 법령에 의하여 즉시 지침서의 변경을 요청하고 발주기관은 즉시 이를 승인합니다.

2) 계약상대자는 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 합니다.

3) 계약상대자는 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령과 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 그에 대한 책임을 준수합니다.

마. 계약상대자의 책무

1) 공사 착수 전에 설계서를 면밀히 검토하고, 이의가 있을 때에는 공사감독관에게 통지하여 설계상의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 조치를 하여야 합니다.

2) 설계서 검토 결과, 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 공사감독관에게 제출하고 발주기관과 협의 후에 공사를 시행합니다.

가) 하자 발생이 우려되는 경우

나) 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건」에 규정된 설계변경, 계약기간 연장 사유 외에 설계변경 및 계약기간 연기 사유가 있는 경우

다) 건설공사의 품질향상이나 공사비 절감을 기할 수 있는 경우

3) 발주기관에 통지하지 않고 임의로 수행한 공사에 대해서는 인정하지 않습니다.

(공사감독관의 시정 지시가 있는 경우에는 계약상대자는 즉시 이를 원상복구 합니다.)

바. 설계변경 조건

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락․오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2) 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

3) 새로운 기술․공법 사용으로 공사비의 절감과 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우

4) 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

사. 계약기간 연장조건

1) 공사의 용지사용(보상) 지연으로 착공이 불가능한 때

2) 지장물 철거 또는 이설 지연으로 인한 공사 지연인 경우

3) 지급자재의 현장공급 지연으로 주공정상 공사 지연인 경우

4) 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인한 공사 지연인 경우

5) 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단된 경우

6) 기타 계약상대자의 책임에 속하지 아니한다고 인정되는 사유로 공사가 지연되었을 경우

아. 본 공사 계약은 년간(365일) 시행예정수량에 의한 계약으로서 시행결과 계약수량 및 금액에 대폭 증감이 있더라도 수급인은 이의 제기를 할 수 없으며, 구체적인 개별공사 시행은 발주처의 별도「공사시행통지서」에 의하여 즉시 공사시행승낙서를 제출하고 발주처가 지정하는 일자에 공사를 시행하여야 합니다. [공사시행통지서 : 별지 제1호서식]

2. 관리 및 행정

가. 공사관리 및 조정

1) 공사 현장대리인

가) 계약상대자는 계약된 공사에 적격한 공사 현장대리인(건설산업기본법 시행령 제35조(별표 5) 등 공사관련 법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자 를 말합니다. 이하 같다.)을 지명하여 계약담당자에게 통지해야 합니다.

나) 공사 현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 공사감독관의 지시에 따라 공사현장 단속과 공사에 관한 모든 사항을 처리해야 한다. 다만, 공사가 일정기간 중단된 경우로서 발주기관의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니합니다.

2) 공사감독관

가) 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약상대자인, 현장책임자, 현장요원, 계약상대자가 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 계약상대자와 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련법규 및 계약문서가 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행합니다.

나) 계약상대자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 합니다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있습니다.

다) 공사감독관이 발행한 업무지시서는 문서와 동일한 효력을 갖습니다.

라) 공사감독관이 발행한 업무지시서에 대하여는 계약상대자가 이를 조치하고 그 결과를 서면으로 보고하여야 합니다. 공사감독관은 조치결과가 미흡하다고 판단되는 경우에 계약상대자와 협의하여 추가 조치를 취할 수 있으며, 계약상대자는 검토 후 성실히 이행하여야 합니다.

마) 계약상대자 및 현장책임자가 발주기관에 통지 또는 제출하는 서류 중 당해공사와 관련된 서류는 공사감독관이 확인하여야 합니다.

바) 공사감독관은 다음의 경우 공사 시공의 전부 또는 일부를 정지시킬 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 정지기간 중 선량한 관리자의 주의의무를 해태해서는 안 됩니다.

(1) 공사의 이행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우

(2) 공사의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 공사의 정지가 필요한 경우

(3) 재해방지를 위한 응급조치가 필요한 경우

(4) 발주기관의 필요에 따라 계약담당자가 지시한 경우

(5) 기타 공사감독관의 정당한 지시에 불응할 경우

3) 사전조사

계약상대자는 설계서의 내용과 현장을 확인하여 이상 유무를 검토하며, 현장여건 등 본 공사와 관련된 제반 사항을 철저히 조사하여 시공 과정에서 발생될 것으로 예상되는 문제점과 대책을 공사감독관에게 통지합니다.

4) 공사수행

가) 계약상대자는 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 계약문서에 근거한 공사감독관의 시정 요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 시정, 이행 조치 후 공사감독관의 승인, 검사 또는 확인을 받습니다.

나) 공사 중 추가적으로 시행해야 할 사항이 발생할 경우 발주기관과 협의 후 시행합니다.

다) 공사감독관은 관련 법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 시공이 적정하지 않다고 인정되는 경우에는 재시공 등의 지시를 할 수 있으며, 공사지침서에 포함되지 않는 일반적인 사항은 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

라) 계약상대자는 건설공사와 관련하여 정부 또는 발주기관이 시행하는 감사, 검사 수감 및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 하며, 최초 설계에 반영되지 않은 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 시행합니다.

마) 계약상대자는 2.-가.-2)-바)에 따라 공사를 일시 정지한 경우 또는 동절기공사에 따라 공사를 중단한 경우에는 공사 중단으로 인하여 공사목적물의 품질이 저하되지 않도록 공사 중단부분, 공사자재 및 가설재 등을 보호하거나 정비하여야 합니다.

바) 계약직후 당해 공사의 종사자 명부(변경시에는 새로운 명부)를 공사감독관에게 제출하여야 하며, 작업현장에 공사관리자 및 작업책임자를 배치하여 공사품질과 시공에 만전을 기하여야 합니다.

5) 책임한계

가) 계약상대자는 현장대리인 등 계약상대자가 당해 공사를 위하여 임명 · 지정 · 고용한 근로자 및 계약상대자와 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 해당 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 책임을 집니다.

나) 계약상대자는 공사감독관이 서면으로 공사를 인수하기 전까지 공사구간을 보호하여야 하며, 시공불량으로 발생한 피해에 대하여 준공검사 이전에 복구, 보수를 완료하여야 합니다.

6) 응급조치

가) 계약상대자는 시공기간 중의 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 사전에 공사감독관의 의견을 들어 필요한 조치를 취합니다.

나) 공사감독관은 재해방지 또는 기타 시공상 부득이한 경우에는 계약상대자에게 필요한 응급조치를 취할 것을 요구할 수 있습니다.

다) 상기의 가)항 및 나)항의 조치에 소요된 경비에 대하여는 협의하여 관련 법규에 준용하여 처리합니다.

라) 하자보수 기간 중에 발생하는 하자에 대하여 발주기관으로부터 보수 또는 수리의 요구가 있을 경우에 계약상대자는 지체 없이 그 요구에 응합니다.

7) 동절기 공사

동절기 공사기간에는 물을 사용하는 공사와 기온저하로 인하여 시공품질 확보가 어려운 공종은 공사를 중단합니다. 다만, 다음과 같은 경우에는 그러하지 아니합니다.

가) 공사감독관으로부터 공사를 계속하라는 지시가 있어 품질관리가 가능하다고 판단되는 경우

나) 시공품질의 저하 및 안전사고 등의 발생을 충분히 예방할 수 있도록 동절기공사 시행방안을 수립하여 공사감독관의 승인을 받은 경우

8) 공사장 관리

가) 매일공사 완료 후에 주변정리, 정돈을 철저히 하여 깨끗한 환경을 유지 하여야 합니다.

나) 공사장 현장 내에 자재 또는 장비 적치 시에는 열차운행중 점검자가 대피가 가능하도록 일정한 간격으로 공간을 확보하여야 합니다.

9) 하도급의 금지

가) 일괄하도급 및 주요공사 전부 하도급 금지

나) 재하도급 금지

다) 다만, 불가피한 경우 발주기관에 서면 보고하고 관련법령 및 발주기관의 적법한 절차에 의해서 승인 후 가능

10) 관련 기준 등의 비치

계약상대자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 현장 사무실 또는 현장 시험실에 아래의 관련 기준 등을 상시 비치해야 합니다.

가) 공사와 관련한 계약문서 사본 일체

나) 계약 및 건설 관련 법규 및 조례

다) 당해 건설공사와 관련하여 법규에서 요구하는 비치 서류

라) 기타 ‘제1장 총칙’의 각 절에 명시되어 있는 서류 등

11) 검사 불합격 시 조치사항

가) 준공검사 등 발주기관에서 시행한 검사에 불합격한 경우 발주기관은 검사결과 불합격 내역을 계약상대자에게 통보하여 재시공, 보수 작업을 하도록 지시할 수 있습니다. 계약상대자는 이 지시에 따라야 하고, 그 후 공사감독관의 확인을 받아 재검사원을 제출하여야 합니다.

나) 재시공 등에 소요된 기간은 계약상대자의 귀책사유로 간주합니다.

12) 공사협의 및 조정

가) 타 공사와 병행하여 시공 할 때에는 상호의 공사 진행에 지장이 없도록 협력하여 전체공사가 계획대로 완성 될 수 있도록 시행하여야 합니다.

나) 계약상대자는 인접공사와 관련된 전·후 공사의 협의 및 조정을 소홀히 함으로써 발생한 재시공 또는 수정 · 보완한 공사에 대하여 책임을 집니다.

13) 공정관리

가) 계약상대자는 공사착수 회의를 개최하며, 관련 공종별 공사를 위한 사전준비, 공사 진행방법 등에 대하여 상호·조정합니다.

나) 공사감독관은 필요하다고 인정될 경우, 수급인, 하수급인, 공사와 관련된 자와 합동으로 공정과 관련된 회의를 개최할 수 있으며, 계약상대자는 공정회의를 효율적으로 진행하는 데에 필요한 공정 추진현황, 향후 시공계획 등 필요한 사항을 공사감독관의 지시를 받아 준비합니다.

다) 계약상대자는 공사시행 중 당초에 수립한 공사예정공정표 혹은 시공계획과 공사추진을 비교하여 지연된 공종이 있을 경우에는 공정만회대책을 수립하여 공사감독관에게 제출하고, 승인을 받은 후 시행합니다.

나. 공무행정 및 제출물

1) 비치 및 제출

가) 계약상대자는 공사의 진행을 위하여 공무행정에 관한 서류를 사실과 그 증빙자료에 의거하여 작성하여야 합니다.

나) 공무행정서류 중 상시 비치를 요하는 서류는 건설공사 중에 발주기관이 수시로 열람할 수 있도록 현장사무실 또는 현장시험실에 항상 비치하여야 합니다.

다) 공무행정서류 중 제출을 요하는 서류를 지정된 제출시기에 지정된 부수를 발주기관에 제출하여야 합니다.

2) 제출절차 등

가) 작성 및 확인

(1) 제출물은 설계서의 내용 및 현장조건에 대하여 검토한 결과를 반영하여 작성합니다.

(2) 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후, 제출물에 서명 또는 날인하여 공사감독관에게 제출합니다.

나) 규격 등

(1) 서류의 규격은 발주기관의 지정양식을 제외하고는 계약상대자가 내용의 성격에 따라 임의로 정하여 작성하되, 표지는 A4 용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4 크기로 작성 제출합니다.

(2) 제출서류는 건별로 제출일자 및 각 면마다 일련번호를 명기하며, 비치서류는 건별로 작성일자 및 각 면마다 일련번호를 명기합니다.

다) 공사감독관은 공사의 원활한 진행 등을 위하여 지침서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있습니다.

라) 제출물에 대하여 그것의 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체 없이 관련되는 제출물을 재 작성하여 제출하여야 합니다.

마) 공사감독관이 확인한 제출물에 대하여 필요한 사항은 작업자 등 공사 관련자에게 전파교육을 시행하여 공사 시행상의 오류를 방지하여야 합니다.

다. 공사 착공계

1) 공사 착공 전 착공계(착공신고서 및 제출서류는 착공 즉시)를 발주기관에 제출하고 계약서 내용대로 이행합니다. 다만, 발주기관의 책임 있는 사유로 계약상 착공일에 착공이 불가능한 경우에는 착공지연계를 작성 공사감독관을 경유하여 발주기관에 제출하여야 합니다.

2) 제출서류

가) 착공신고서

나) 건설기술진흥법등 관계법령에 의한 현장기술자 지정신고서

다) 공사예정공정표(횡선식공정표 방식에 의한 실행공정표를 작성 제출)

라) 관계법령에 의한 안전 · 환경 및 품질시험 계획서

마) 현장책임자(현장대리인) 및 참여기술자 경력증명서

바) 착공 전 현장사진, 안전관리계획서

사) 사급자재 시험 및 수급계획서, 공정별 인력 및 장비투입 계획서

아) 기타 발주기관이 정한 사항

3) 착공시기

최초 계약일로부터 14일 이내에 공사에 착수하여야 합니다. 다만, 발주기관이 착공시기를 별도로 지정하는 경우에는 이에 따라야 합니다.

라. 시공계획서 제출

1) 공사 주요공종에 대한 시공계획서를 각 단계별로 작성하여 해당 공종 착수 전 공사감독관에게 제출하여 확인을 받아야 합니다.

2) 작성방법

시공계획서에 아래 사항을 포함하여 작성하여야 합니다.

가) 공사개요

나) 세부공정표(자재, 인력 및 장비계획을 포함)

다) 사용재료 및 시공결과의 품질

라) 공정단계별 시공법 및 양생계획

마) 안전관리계획, 품질관리계획, 환경관리계획 등

바) 적합한 시공을 위하여 설계서의 조정 및 변경이 필요한 사항

사) 기타 이 지침서 각 절에 명시되어 있는 사항

마. 신고 및 인·허가 신청서류

1) 인 ․ 허가 사항은 발주기관이 수행하며, 계약상대자는 최대한의 협조와 지원을 합니다.

2) 계약상대자가 공사를 위하여 직접 받아야 할 사항에 대하여는 공사감독관의 협조 및 지원을 받아 해당기관으로부터의 인․허가 업무를 수행하여야 합니다.

바. 기성검사원

1) 공사비를 청구하기 위하여 해당 공사의 기성부분 검사를 받고자 할 때에는 기성검사원을 발주기관에 제출하여야 합니다.

2) 제출서류

가) 기성검사원

나) 기성액 내역서 및 명세서

다) 기타 발주기관이 요구하는 자료

3) 기성검사원 제출시 공사감독관의 확인을 받아야 하는 사항

가) 사용자재의 품질시험 · 검사성과(총괄)표

나) 주요부분 시공과정 및 기성 전경사진

다) 자재(지급, 사급)의 사용 현황

라) 발생품, 폐기물, 폐자재 처리의 적정성 여부

마) 인건비 및 4대 보험료 정산

바) 산업안전보건관리비 사용의 적정성 여부

사. 설계변경 요청

1) 설계변경 승인 요청

가) 변경 요청 공문서

나) 변경사유서

다) 변경내역서 및 산출근거

라) 변경설계도면

마) 전문기술자의 날인이 된 구조계산서 및 공사지침서(새로운 기술 ․ 공법인 경우에 한함)

바) 기타 관련증빙자료(관련사진 등)

2) 공사기한 연기원

가) 연기사유 및 연기기간에 대한 주공정 지연일 산출근거, 수정공정계획표

나) 공사중단 사실확인서 및 증빙자료(공사정지로 인한 공사기한 연기원 제출시)

다) 기타 관련증빙자료

3. 자재관리

가. 자재 품질관리

1) 공사에 사용할 자재는 신품이어야 하며, 품질․규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 합니다. 그러나 설계서에 명확히 정하지 아니한 것은 표준품(한국철도 표준규격, KS) 이상으로서 계약의 목적을 달성하는 데에 가장 적합한 것이어야 합니다.

2) 공사용 자재(지급자재는 제외) 사용 전에 설계서 요구조건 및 품질기준의 적합성을 확인하고, 자재선정을 위한 검토나 자재의 품질보증을 위하여 자재공급원 승인 요청서를 제출하여 공사감독관의 승인을 받은 후 사용하여야 합니다.

3) 계약상대자는 공사지침서에 품질시험(검사)하도록 되어 있거나 공사 목적물의 품질관리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에 공사용 자재의 경우 그 시료를 공사감독관 입회하에 채취하여 품질시험(검사)공인기관에 의뢰하여야 합니다.

4) 계약상대자는 공사용 자재를 사용하기 전에 공사감독관의 검사를 받아야 하며, 불합격된 자재는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 합니다.

나. 자재의 보관, 운반, 취급

1) 자재의 보관

가) 공사감독관이 지정한 장소에 보관하며, 준공 전․후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주는 일체의  변화가 생기지 않도록 보관하여야 합니다.

나) 지급자재는 감독관의 입회하에 인수하고 보관 및 관리는 계약상대자가 하여야 하며 훼손, 손실 및 변질 등으로 인한 부속품에 대하여는 즉시 변상조치 하여야 합니다.

2) 지급자재의 관리 책임

가) 지급자재의 인수, 출고 및 재고상태를 지급자재수불부에 기록하고 상시 비치하여야 하며, 이에 대하여 보관 및 관리하여야 합니다.

나) 보관장소의 사용이 끝나면 계약상대자의 부담으로 이를 원상 복구하고, 지급자재 중 공사에 사용하고 남은 자재는 공사감독관이 지정하는 장소에 보관하고 인계하여야 합니다.

3) 자재 상, 하차 시 특수차 및 각종 시설물 훼손이 없도록 하여야 합니다.

다. 발생자재 관리

1) 계약상대자는 공사현장내의 발생자재의 종류, 수량, 상태 등을 확인하여 처리기준에 따라 관리 하여야 합니다.

2) 발생자재 중 고재처리 및 폐기물처리 대상품목은 공사현장에 지장을 주지 않도록 반출이 이루어 져야 합니다.

3) 재활용이 불가능하여 반납되는 품목은 발주기관이 지정하는 장소에 반납하여야 합니다.

4) 재활용이 가능한 발생자재는 자재가 훼손되지 않도록 관리하여야 하며, 공사감독관이 지정한 장소에 적치하고 인도하여야 합니다.

4. 안전․보건관리

가. 안전․보건관리 일반

1) 계약상대자는 작업 시 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 등에서 정한 안전기준을 항상 숙지하고 이를 준수하여야 합니다.

2) 계약상대자는 발주기관이 행하는 산업안전보건법에 따른 다음 각 호의 조치에 정당한 사유가 없는 한 따라야 합니다.

가) 안전보건에 관한 협의체 구성 및 운영(월1회 개최)

나) 작업장 순회점검(주1회)

다) 합동안전보건점검(분기1회)

라) 계약상대자 및 계약상대자의 근로자가 산업안전보건법을 위반한 경우 그 위반          행위를 시정하도록 하는 조치

마) 기타 산업안전보건법령 등에서 정하는 사항

3) 안전보건교육

계약상대자는 당해 사업장의 근로자에 대하여 산업안전보건교육을 실시하여야 합니다. 이때 발주기관은 계약상대자가 요구할 경우 안전보건교육에 필요한 장소 및 자료의 제공 등 필요한 조치를 하여야 합니다.

4) 관리 및 보상의 책임

계약상대자는 공사장 내의 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립 ․ 시행하고 본 사업 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하고 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

5) 안전관리계획

가) 건설기술진흥법, 동법 시행령 및 시행규칙에 의하여 안전관리계획을 수립하여 발주기관에 제출하고, 이 계획에 따라 성실하게 안전관리를 수행하여야 합니다.

나) 안전관리계획의 내용은 관련법에 따라 작성합니다.

다) 발주기관은 계약상대자가 제출한 안전관리계획에 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 합니다.

6) 출입자 통제 등

공사안전 및 보안 유지를 위하여 공사장에 관련자 외의 사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 합니다.

7) 안전한 작업환경 조성

안전한 작업환경을 조성하기 위하여 다음 사항을 준수하여야 합니다.

가) 작업개시 전 작업내용 및 안전에 대한 교육 실시

나) 개인보호구 착용여부 확인, 열차운행 시 감시인 배치

다) 음주자 또는 허약자 작업 금지, 응급처치용 구급품의 확보

라) 건축한계 내 물건적치 금지, 현장 정리정돈

9) 안전 조치

공사 중 안전사고의 사전 예방을 위하여 아래의 사항을 준수하여야 합니다.

<산업안전보건법에 의한 안전조치>

구 분	적 용
· 소화설비(소화기,소화사,방화용수 등)	· 소화설비 필요장소
· 경보 또는 연락용 설비장치	· 발파작업, 화재위험, 낙반, 출수위험 등이 있는 작업
· 살수	· 분진의 확산방지 및 시계확보를 위해 필요한 장소
· 통기 및 환기설비	· 옥내 용접작업, 밀폐된 장소
· 각종 안전완장	· 안전관리자등 착용
· 안전리본, 각종안전 스티커, 무재해기록판 등	· 공사공사감독관과 협의하여 필요시
· 기타	· 기타관계법령에 의해 요구되는 사항

10) 전기사고 예방대책

가) 주요시설물 일반인 출입금지

나) 전선의 절연 피복상태 확인 후 손상된 부분은 즉시 교체

다) 누전차단기 설치 및 전기용량 초과 사용금지

라) 옥외분전함의 덮개 및 빗물받이 차양설치

마) 가설전선 침수방지 및 차량통과부위 절연피복 보호조치

바) 고압선 통과부위 위험표지판 및 경고 안내문 설치

11) 화재예방 대책

가) 전기 무단사용금지

나) 페인트 등 인화성물질 및 위험물 방지

다) 하자보수용 자재보관 및 대기실 사용

라) 각종 공사용 자재 방치

마) 현장사무실, 창고, 숙소에 소방기구 비치

12) 안전 ․ 보호장구 사용

가) 적용대상 : 협력업체 전 직원

나) 착용방법

(1) 작업복 또는 작업 조끼 중 선택하고 상의는 필수

(2) 터널 또는 야간 도로 작업에는 형광색 띠의 안전조끼 착용 필수

다) 작업복의 색상

(1) 진한 회색 계열 색상으로 일괄 적용 (진한 회색 비율 90% 이상)

(2) 안전조끼는 작업복과 동일하게 진한회색 바탕에 흰색 안전띠

(3) 신호수용 조끼는 주황색 바탕에 흰색 안전띠

(4) 가슴에 분야별 고유색 띠 부착 : 궤도(주황)

(5) 용역 복장 : 공사와 분리되도록 군청색

<작업복 예>

<작업복>	<작업조끼>	<작업자용 안전 조끼>	<신호수용>

라) 궤도분야 부착 규격 (어깨 및 등 부위 부착 제외)

가 슴

규격

좌측

우측

100mm×25mm

궤   도

업체명 또는 CI

마) 안전장구

안전모	안전화	비고
흰 색	자 율

13) 안전시설

유해 위험이 있다고 판단되는 부위에 대하여는 적정한 안전시설물을 설치하여야 합니다.

14) 가설동력

가) 임시수전 설비시설의 이상유무 및 방지책 훼손여부 점검

나) 분전함의 누전차단기 부착, 전선정리 및 안전표지판 부착

다) 둥근톱, 전기용접기의 안전장치류 부착

15) 위험물 저장소

화약, LPG, 산소, 아세틸렌, 유류, 도료 등은 위험물저장소를 설치하여 보관·관리하여야 합니다.

나. 안전점검

1) 정기안전점검

가) 건설기술진흥법 시행령 등 관련법에 의하여 정기안전점검 및 필요시 정밀 안전점검을 실시하여야 합니다.

나) 공사 착공 전 건설재해예방전문기관과 기술지도계약을 체결하고 정기안전점검을 시행하였을 경우에는 점검결과(사본)를 제출하여야 합니다.

2) 안전점검에 관한 종합보고서

안전점검, 안전진단, 건설재해전문기관의 지도, 안전검사, 안전보건 교육, 안전의날 행사 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치 하여야 하며, 공사를 준공한 때에는 안전점검에 관한 종합보고서를 작성하여 제출(필요시)하여야 합니다.

다. 안전점검(검사)

1) 안전관리상태 점검

발주기관은 건설공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 안전에 관한 제반의 관리 상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정 및 해당공사의 일시중단을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때에 계약상대자는 시정 조치하거나 해당공사를 일시 중단하여야 합니다.

2) 안전일지

계약상대자는 안전점검, 안전진단, 건설재해예방지도기관의 지도, 안전검사, 안전보건교육 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 합니다.

라. 산업안전보건관리비 등의 사용

1) 산업안전보건관리비의 사용

가) 계약상대자는 산업안전보건관리비를 책정(낙찰률 반영 금액조정 불가)하고, 산업안전보건관리비 사용내역서를 공사현장 내에 비치합니다.

나) 계약상대자는 매월 및 기성 또는 준공검사원 제출 시 공사감독관에게 산업안전보건관리비 항목별 세부 사용내역  집행영수증 사본을 제출합니다.

다) 산업안전보건관리비는 건설교통부 고시 「건설업 산업안전 보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 하며, 사용 실적에 따라 준공 시 정산합니다.

라) 산업안전보건관리비는 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 등 관련법에 적합하게 사용하고, 공사감독관 또는 관계인이 필요시 확인할 수 있도록 사용내역서, 항목별사용내역, 사진, 집행영수증, 기타 증빙서류 등을 정리하여 상시 비치하여야 하며, 그 증빙서류의 사본 제출을 요구할 경우 계약상대자는 제출하여야 합니다.

마) 아래 소사원시운영(주) 안전수칙준수 안전포스터를 공사현장에 부착하여야 합니다.

마. 작업장 안전관리

1) 현장대리인(작업책임자)은 당일 작업 전 작업자들에게 작업 및 공기구 취급요령 등 일일안전교육을 시행하여 안전사고 예방에 만전을 기하여야 합니다.

2) 공사감독관에게 사전 보고되지 않은 작업자는 선로출입이 불가하며, 발주기관의 선로출입절차를 준수하여 공사감독과의 입회하에 선로 출입을 시행하여야 합니다.

3) 선로 내 단전 후 특수차 및 철도장비 운행에 따른 안전사고 예방을 위하여 공사장 전․후 100m 이상의 거리에 경광등(LED)을 설치하여야 합니다.

4) 공사자재 외 인화물질의 반입은 사전 공사감독관에게 승인을 얻어야 하고 당일 반출하여야 합니다.

5) 공사용 자재, 장비를 부득이하게 선로 내 보관하여야 할 경우 공사감독관의 승인을 얻어야 하고 건축한계 밖에 열차 운행 중 진동이나 열차풍에 움직이지 않도록 고정 후 보관하여야 합니다.

6) 선로 내 화재예방을 위하여 소화기를 항상 작업장에 비치하여야 하며, 고위험 화기작업(레일절단, 용접 등)을 시행할 경우 비산불꽃에 의하여 화재가 발생하지 않도록 불연포 등으로 선로주변 시설물을 덮어 보호하여야 합니다.

7) 레일, 침목 등의 상․하차 시 선로주변 시설물이 파손되지 않도록 주의하여야 하며, 시설물의 파손이 우려되는 경우에는 공사감독관에게 보고하여 적정한 조치가 이루어질 수 있도록 하여야 합니다.

8) 작업 종료 후 현장대리인(작업책임자)는 공사감독관 입회하에 열차 운행에 지장을 주지 않도록 공사장 이상유무를 마지막까지 점검하고 철수하여야 합니다.

5. 환경관리

가. 환경관리 일반

1) 관리 및 보상의 책임

공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인에게 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이들에게 손해를 가하였을 경우에는 책임당사자가 부담하고 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

2) 소음 ․ 진동

가) 건설소음 ․ 진동 규제지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 소음 ․ 진동관리법에 의한 신고 또는 인 ․ 허가에 대한 승인을 받은 후 시행하며 해당 행정기관의 지시에 따릅니다.

나) 작업장내에서는 사용장비의 작업시간 조정, 소음기 설치 등 소음저감대책을 수립하고, 작업 시 소음․진동 발생으로 주변 환경에 영향을 미칠 수 있다고 판단될 때에는 공사 현장 주변에 소음 및 진동 저감 시설을 설치하여야 합니다.

3) 터널 내 비산먼지 관리

가) 비산먼지를 발생시키는 작업을 하고자 할 때는 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 등 필요한 조치를 하여야 하며 작업 시작과 종료 시는 작업현장에 물 뿌리기 작업을 시행하여 비산먼지의 발생이 최소화 될 수 있도록 작업환경을 개선하여야 합니다.

나) 콘크리트 표면처리 시 현장에 비산 먼지가 발생하지 못하도록 진공흡입 집진 장치를 그라인더에 부착하여 비산 먼지가 발생되지 않도록 조치하여야 합니다.

다) 천공작업 후 볼트구멍에 남아있는 분진 및 이물질 등을 산업용 청소기로 흡입하여 청소하여야 합니다.

6. 준공

가. 준공검사 내용

발주기관이 시행하는 준공 검사 시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가합니다.

1) 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

2) 궤도틀림상태 점검

3) 지급자재 정산, 잔재 및 발생자재 처리

4) 주변정리 및 원상복구사항 처리내용, 준공 전 청소 이행상태

5) 제출물 및 서류처리 상태

6) 기타 계약문서에 명시된 사항

나. 준공서류

1) 검사원 제출

해당 공사의 준공검사를 받고자 할 때에는 준공검사원을 발주기관에 제출하여야 합니다.

2) 종류 및 내용

가) 준공검사원

나) 내역서 및 품질시험 ․ 검사성과총괄표

다) 준공도면(10부)

(1) 당해 공사의 준공부분에 대한 준공도면, 시공 상세도면

(2) 공사현장에서 설계변경한 부분의 설계도면 원도

라) 공사사진첩

(1) 공종별로 전․중․후를 사진촬영(디지털카메라)하여 사진첩 1부를 제출 합니다. 또한, 촬영한 사진은 전자파일 형태로 이동식저장장치(USB)에 저장하여 제출합니다.

(2) 공사시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진(규격9㎝×12㎝)으로 기록, 사진첩으로 정리하여 상시 현장에 비치하여야 하며, 준공 시 “준공서류”에 따라 발주기관에게 제출하여야 합니다.

(3) 공사시공 중 매몰되는 주요부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공상태가 분명히 나타나게 주요 부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 합니다.

마) 사급자재 구매관련 자료(명세서 등)

바) 보험료 납입관련 자료

사) 측정, 시험 및 검사보고서

아) 기타 발주기관이 요구하는 자료

다. 보험료 등 정산

1) 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제21호) 제1장 제8절 보험료 사후정산 등」에 의거 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금 보험료를 준공 시 정산합니다.

가) 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등은 입찰공고문에 기재된 금액을 산출내역서에 조정 없이 반영하여야 합니다. 또한,「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제21호) 제1장 제8절 보험료 사후정산 등」에 따라 준공 시 정산합니다.

2) 산업안전보건관리비는 실제 사용금액을 기준으로 산출내역서 산업안전보건관리비 범위 내에서 준공 시 정산합니다.

가) 산업안전보건관리비는「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2017-8호)」에 따라 항목별 사용 불가내역을 확인하여 사용하여야 합니다.

나) 산업안전보건관리비는 본 공사 안전사고 예방의 일환으로 산업안전보건관리비 적정 확보를 위하여 입찰공고문에 기재된 금액으로 산출내역서에 조정 없이 반영하여야 합니다.

3) 보험료(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등) 및 퇴직공제보험부금비 등 제경비는 관련규정에 의거 준공 시 정산 처리하며, 각 제경비는 본 공사에 근로한 일용근로자에게 실 납부된 금액 범위 내에서 정산 처리하며, 다음 각 항에 따라 서류를 제출하여 그 사실을 입증하여야 합니다.

가) 일용근로자(계약상대자가 제출한 현장 출입자명단에 기재되어 있으며, 본 공사에 실제 근로한 일용근로자) 명의로 건강보험공단 및 연금보험공단에 납부한 납입증명서(공단 발행)

나) 납입증명서상의 사업장 명칭 항목이 현장명(공사명)이 아닌 회사명으로 기재된 경우 불인정

다) 상용근로자(직접노무비 대상에 한하며, 계약목적물을 직접 시공하는 현장대리인을 포함)는 계약 상대자가 납부한 납입확인서로 정산하되 현장작업일지, 공사감독관 감독일지, 임금대장, 출근부 등 증빙서류를 첨부하여 본 공사 계약기간 대비 실제로 투입된 일자를 계산하여 보험료를 일할 정산합니다.

4) 퇴직공제부금비는 건설산업기본법 시행령 제83조 제6항에 의거 건설업자의 공제부금 납부내역을 공사감독원에게 제출, 확인 후 정산합니다.

5) 본 공사에 투입하는 건설기계에 대하여 건설기계 대여계약 체결 시 장비 임대차 표준계약서 작성 및 그 대금의 지급을 보증하는 건설기계 대여대금 지급보증서를 발급하여 건설기계 대여업자에게 주어야 하며, 건설기계 대여애금 지급보증서 발급금액은 건설산업기본법시행령 제64조 제3항에 의거 소요비용 지출내역을 공사감독원에게 제출, 확인 후 정산합니다.

7. 기타 행정사항

가. 건설공사대장(KISCON) 작성 및 통보

계약상대자는 본 공사 착공 시부터 건설산업기본법 제22조 제3항, 제4항 및 동법시행령 제26조에 의거 건설공사대장의 기재사항을 계약체결일로부터 30일 이내 또는 변경사항이 있을 시 변경일로부터 30일 이내 발주기관에 전자적(www.kiscon.net)으로 통보하여야 합니다.

8. 공사하자보수

가. 하자담보 책임기간(건설산업기본법 시행령 제30조)

1) 레일용접 : 5년

2) 가변패드 : 3년

나. 하자보수보증금률(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제 70조)

1) 철도, 댐, 터널, 철강교설치, 발전설비, 교량, 상하수도구조물 등 중요 구조물공사 및 조경공사: 100분의 5

9. 대금지급 방법

가. 대금 지급은 매 분기말 기성청구에 의해 지급

제2장  궤도공사

1. 일반지침서

2. 특별지침서

제2장 궤도공사

2018년 소사원시 궤도시설 유지보수공사

제2장  궤도공사

1. 일반지침서

가. 적용범위

이 시방은 소사원시운영(주)에서 시행하는 “2018년 소사원시 궤도시설 유지보수공사”의 시공을 위한 궤도공사에 적용합니다.

나. 적용기준

소사원시운영(주) 규정, 내규 및 예규를 적용합니다.

1) 선로정비규정, 선로점검내규, 선로지장취급내규 등.

2) 기타 계약서 및 공사감독관이 통지한 내용.

다. 적용순서

1) 설계도서, 법령해석 등이 서로 일치하지 않는 경우에 있어 계약으로 그 적용순서를 정하지 아니한 때에는 다음 순서를 원칙으로 합니다.

가) 계약서

나) 계약 및 일반조건 및 특수조건

다) 과업지침서

라) 설계도

마) 산출내역서

2) 유지보수공사 과업지침서의 총칙과 총칙 이외의 지침 내용중에 상호 모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 지침에 명시된 내용을 우선 적용합니다.

3) 유지보수공사 과업지침서에 명기된 내용 이외에 정밀공사 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주기관과 협의 시행합니다. 또, 명시되어 있어도 현장상황에 부적합하다고 판단될 경우에도 발주기관과 협의하여 최선의 방법을 강구하고 최적의 방법으로 시공하여야 합니다.

4) 내역서, 과업지침서, 설계도면 등에 대하여 이의가 있을 때에는 공사 착수 전에 발주기관에 신청하여 지시를 받아야 합니다. 또한, 계약상대자가 공사시행에 소정의 설계대로 시공이 곤란할 때에도 발주처 신청하여 승인을 받아야하며 이로 인한 행위로 발생되는 행정소요일은 특별한 사유가 없는 한 계약기간을 연장 할 수 없습니다.

5) 현장대리인은 법령(공사계약 일반조건 Ⅴ.공사계약의 이행-4.공사현장 종사자)이 정하는 적격한 자로서 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사 업무를 책임 있게 시행할 수 있는 권한을 가진 책임기술자를 말하며 계약상대자가 지정 ․ 배치한 현장대리인, 현장요원은 공사가 진행되는 시기에는 현장에 상주하여야 하고 부득이한 사정으로 부재(이석) 할 경우에는 공사감독관의 승인을 득하여야 합니다.

6) 현장대리인은 본 공사 시공 중 공사감독관의 지시에 대하여는 그 지시사항을 본 공사에 종사하는 현장요원 전원에게 지시하여야 합니다.

7) 계약상대자는 계약 직후 본 공사의 현장요원 명부를 제출하여야 하며, 공사기간중 이동이 있을 때에는 사전에 공사감독관의 지시를 받고 변경된 명부를 제출하여야 합니다.

8) 공사 시공에 있어 작업 현장마다 작업책임자를 배치하여 공사품질과 시공에 만전을 기하여야 합니다.

9) 타 공사와 병행하여 시공할 때에는 공사감독관과 밀접한 관계를 유지하여 상호의 공사 진척에 지장이 없도록 하여야 합니다.

10) 계약상대자는 계약문서에 위반됨이 없이 공사를 이행하여야 하며 이에 따른 발주기관의 시정요구 또는 이행촉구 지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 합니다. 또한, 계약문서의 정해진 것에 대하여는 발주기관의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 하며 발주기관의 승인을 받은 문서는 계약문서와 동등한 효력을 가집니다.

11) 계약상대자는 설계도서에 명시되지 않는 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 발주기관과 협의하여 이행하여야 합니다.

12) 계약상대자는 공사 관련 발주기관이 시행하는 검사 수감 및 이에 따른 시정지시를 즉시 이행하여야 하며, 발주기관의 과실이 없는 한 이를 이유로 공사기한 연기 또는 추가 공사비를 요구할 수 없습니다.

13) 계약상대자는 공사현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 품질향상, 안전사고 및 환경공해 예방, 보건위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 잔재의 정리, 정돈, 점검, 정비, 청소 등을 충분히 행하여 현장 내를 청결하게 유지하여야 합니다.

2. 특별지침서

가. 시공기준

1) 본 공사를 시공함에 있어 궤도시설물의 정비(정정) 및 보수(재료교환 포함)에 관한 기준은 이 공사지침서에서 따로 정하고 있지 않을 경우에는 발주기관 선로정비규정에 따라야 합니다.

2) 본 공사를 시공함에 있어 궤도시설물의 정비(정정) 및 보수(재료교환 포함)에 관한 작업의 표준은 이 공사지침서에서 따로 정하고 있지 않을 경우에는 발주기관 궤도작업표준예규에 따라야 합니다.

3) 본 공사에서 시행하는 레일용접공사의 표준은 이 공사지침서에서 따로 정하고 있지 않을 경우에는 발주기관 레일용접표준예규에 따라야 합니다.

4) 발주기관의 선로정비규정, 궤도작업표준예규, 레일용접표준예규는 소사원시운영(주) 공사감독관에게 확인하실 수 있습니다.

나. 궤도정정

1) 궤도검측을 시행 후 궤간정정, 줄맞춤, 면맞춤 및 총다지기 순으로 시공합니다.

2) 직선구간에서는 좌측레일, 곡선구간에서는 외측레일을 기준으로 하고 기준 측을 정정한 다음 상대측을 정정합니다.

3) 캔트 조정 작업은 내측레일을 기준으로 합니다.

4) 작업착수 전 현장 궤도틀림을 면밀히 분석하여 작업순서, 방법 등을 결정하여야 하며 특별한 사유가 없는 한 동일개소에 대하여 중복지적이 없도록 하여야 합니다.

다. 궤간정정

1) 콘크리트침목 궤간정정에 있어서는 자갈도상용 콘크리트침목의 경우는 절연블럭(4~12mm) 조합을 변경하여 정정하되, 공사감독관의 지시에 따라야 합니다.

2) 또한, 콘크리트도상(KCT11+(SFC)형 (뱅가드),Fast-clip형,e-clip형 내 궤간정정은 공사감독관의 지시에 따라 간격재 조정 등 침목별 궤간정정 요령에 따라 시행하여야 합니다.

라. 핸드타이탬퍼 작업

핸드타이탬퍼를 사용하는 자갈다지기 작업은 다음 기준에 의하여 시행합니다.

1) 작업적용 범위

가) 레일면의 1회 양로높이 10~50mm 정도의 레일 면맞춤의 경우

나) 자갈교환 후 총다지기

다) 침목교환 후 총다지기

라) 분기기 다지기

마) 기타 필요하다고 인정하는 경우

2) 작업순서 및 요령

가) 작업책임자는 선로상태를 측정하여 1회의 타이탬퍼 작업구역을 정하고 작업의 시종점을 표시합니다.

나) 솟아 올라온 스파이크를 고쳐 박으며 불량한 것은 교환합니다.

다) 침목의 레일 체결장치가 이완된 것은 작업 전에 보수를 하여야 합니다.

라) 레일면을 높일 때에는 기준 쪽 레일을 목측으로 정정합니다.

마) 다지기 작업은 잭반 뒤를 레일 10~20m 의 사이를 두고 진행하여야 합니다.

바) 특별한 경우를 제외하고는 침목 1개에 대하여 8개소를 다져야 합니다.

사) 핸드타이탬퍼 작업은 2명이 1조가 되어 서로 마주보고 동일 침목을 다져야 합니다.

아) 궤간 내외의 다짐범위는 레일중심에서 좌우 약 400mm 내로 합니다.

자) 다짐의 정도는 양로의 높이, 자갈의 종류에 따라 가감하되 50~60초를 표준으로 합니다.

차) 다지기 작업 시는 침목 측면에서 70mm 의 거리에 탬핑바를 수직 정도로 핸들을 앞으로 경사시키며 자중과 진동으로 탬핑바가 자갈 내에 끝이 박혀 침목 하면을 지났을 때 핸들을 수평으로 세워 침목 하면의 자갈을 다집니다.

카) 다짐은 지지력이 균일하게 하며 높이차가 생기지 않도록 시행하여야 합니다.

타) 궤도의 줄맞춤이 불량한 장소는 정도에 따라 레일을 들기 전이나 자갈을 다짐 직후 또는 되메운 직후에 정정합니다.

3) 정리작업

가) 핸드타이탬퍼 다지기 작업이 끝나면 자갈을 정리하여야 합니다.

나) 작업결과를 검사하고 필요에 따라 줄맞춤 작업을 시행하여야 합니다.

4) 작업 시 주의사항

가) 핸드타이탬퍼를 시동할 때에는 1대씩 순차적으로 시동하도록 합니다.

나) 작업 시 또는 열차 대피 시 전기코드 취급을 주의하고 특히 전기코드 접촉 소켓부분이 동요되지 않도록 전기코드를 선로 내 벽체 콘센트(또는 발전기, 변압기) 홀더에 고착시켜서 사용하여야 합니다.

다) 침목 위치 또는 침목과 레일의 직각이 불량한 것은 미리 정정하여야 합니다.

마. 줄맞춤 작업

1) 준비작업

가) 틀림개소의 이동량과 작업 연장을 결정합니다.

나) 이완된 체결장치는 체결합니다.

다) 이동량 및 자갈의 상태에 따라 침목 끝을 파서 긁어내야 합니다.

2) 본작업

가) 직선의 경우

(1) 작업책임자는 정정 개소 30~50m 전방에서 기준측 레일에 걸쳐 서서 레일 두부 내측을 기준하여 목측으로 이동량과 방향을 지시합니다.

(2) 작업순서는 이동량이 큰 개소부터 시작하여 순차로 정정합니다. 다만, 이동량이 적을 때에는 편압의 순차로 정정할 수 있습니다.

(3) 이정로의 정정 시 작업인원은 좌우동수로 나누어 배치하여야 합니다. 다만, 홀수인 경우에는 이정로 쪽에 1명을 추가 배치합니다.

나) 곡선의 경우

(1) 교차법(사장식)에 의거 이동량을 계산하여 정정합니다.

(2) 곡선반경에 따라 20~30m 전방곡선의 침목 끝에서 목측으로 원호의 틀림을 보아서 정정하여야 합니다.

다) 궤도의 줄맞춤 작업은 크로바(claw-bar)를 사용하여 정정하는 것을 원칙으로          합니다. 다만, 작업량 및 현장여건에 따라 다른 방법에 의할 수도 있습니다.

라) 뒷정리

(1) 정정 완료 후 침목 양단을 충분히 다지고 자갈정리를 하여야 합니다.

(2) 작업책임자는 공사관리관 입회하에 작업완료 구간을 검사하여 궤도의 상태를 확인하여야 합니다.

마) 주의사항

(1) 혹서 또는 기온의 상승이 현저하여 레일 장출의 우려가 있을 때에는 작업을 피하여야 합니다.

(2) 레일의 어긋남이 있을 때에는 미리 교정하고 작업시간 전에 볼트 및 스파이크를 조여야 합니다.

(3) 실을 사용하여 정정 작업을 할 때에는 강풍을 피하여야 합니다.

바. 레일면 정정작업

1) 레일수평 정정의 기준은 한쪽레일을 기준 쪽 레일로 정합니다.

2) 레일면 정정은 기준 쪽 레일의 면을 정정한 후 다른 쪽 레일을 정합니다.

3) 기준 쪽 레일면의 정정은 전후 레일면의 관측에 의하여 시행합니다.

4) 레일 수평면의 정정에는 수평기를 사용하여 레일면을 관측합니다.

5) 레일을 들어 높일 필요가 있을 때에는 크로바(claw-bar) 또는 트랙잭을 사용하여 들고 동시에 레일 밑이 저하되지 아니할 정도로 핸드타이탬퍼를 사용하여 자갈다짐을 합니다.

6) 좌우레일을 모두 다짐할 장소로서 한 쪽 레일씩 다질 때에는 양측 레일면을 정정한 후 시행합니다.

7) 레일면 정정은 지휘자가 적당한 거리에서 레일면 또는 레일두부의 아래모서리를 관측하고 1명은 신호에 의하여 레일을 들며 다른 1명은 침목 밑의 자갈을 다집니다.

사. 침목위치정정

1) 작업 전에 기준 측 레일 복부에 백색페인트로 침목위치를 표시하고 표시된 위치에서 궤간 중심선에 직각이 되도록 정정하여야 합니다.

2) 침목이동은 위치 정정기 등을 사용하여야 하나, 부득이 인력으로 이동 할 때에는 나무로 만든 떡메를 사용하여 침목에 손상이 가지 않도록 하여야 합니다.

3) 레일복진 방지장치는 미리 철거했다가 작업이 완료된 후 즉시 복구하여야 합니다.

4) 위치이동이 끝난 침목은 총다지기를 하여야 합니다.

아. 침목직각틀림보수

1) 작업 전에 기준측 레일 복부에 백색페인트로 침목 위치를 표시하고 표시된 위치에서 궤간 중심선에 직각이 되도록 정정하여야 합니다.

2) 침목 직각틀림 개소가 간사식으로 발생된 곳은 직각 틀림이 없는 침목을 기준으로 간격을 맞춥니다.

3) 복진방지장치는 미리 철거했다가 작업이 완료된 후 즉시 복구하고, 훼손된 재료에 대하여는 교환토록 하고, 작업 시 먼지의 비산 방지를 위하여 작업개소에 충분한 물 뿌리기를 한 후 작업을 시행하여야 합니다.

4) 침목 이동은 위치정정기 등을 사용하여야 합니다. 부득이 인력으로 이동할 때는 나무로 만든 떡메를 사용하여 침목에 손상이 가지 않도록 하여야 합니다.

5) 침목 이동 후 이동개소 침목에 대하여는 다짐을 시행하고 자갈 정리를 철저히 시행하여 주위의 도상 상태가 양호하여야 합니다.

자. 도상자갈 정리

1) 도상자갈 정리는 1선을 기준으로 하되 궤간 내외(도상어깨 포함)에 산재한 도상자갈을 삽 등을 이용하여 정리하여야 합니다.

2) 침목 위나 체결구 내에 산재되지 않도록 하고 도상자갈이 레일저부에 닿지 않도록 정리하여야 합니다.

차. 콘크리트침목 탄성체결장치 보수

1) 콘크리트침목 탄성체결장치 보수는 각종 볼트류 이완, 레일패드 및 간격재 이탈, 체결구 절손 시 볼트류 조임, 레일패드 및 간격재 정정, 체결구 교체 등의 작업을 병행하는 것을 말합니다.

2) 콘크리트침목 각종 볼트류 조임은 임팩트렌치 등 기기를 사용하여 공사감독관의 지시에 따라 적정 조임력으로 조여야 합니다.

카. 콘크리트침목 육각볼트 보수

1) 콘크리트침목 육각볼트 보수는 육각볼트 매립전 내부에서 절손된 육각볼트를 교체하는 작업을 말합니다.

2) 육각볼트 교체는 매립전 내부에 남아 있는 육각볼트 잔재를 전동드릴을 사용하여 천공 후 빽탭으로 나사선을 만들어 제거하는 것을 원칙으로 합니다.

타. 레일교환

1) 레일의 취급

가) 레일을 궤간 내 또는 레일에 접근하여 두고 레일교환 작업을 할 때에는 유동되지 않도록 조치하여야 합니다.

나) 레일을 내릴 때에는 손상되거나 변형되지 않도록 주의하여야 합니다.

다) 레일은 레일절단기를 사용하여 직각되게 수직으로 절단하고 특별한 경우 외 에는 레일에 열을 가하여서는 안 됩니다.

라) 레일에 이음매볼트 구멍을 뚫을 때에는 레일제원에 맞는 정확한 위치에 천공하여야 하며, 볼트구멍 주위는 볼트구멍보다 3mm 큰 직경으로 면정리 (모떼기)를 시행하여야 합니다.

2) 레일 상하차 및 운반

가) 정척레일, 장척레일 등 레일운반은 발주기관에서 제공한 특수차 및 트레일러(또는 트로리)를 사용하여 운반하여야 합니다.

나) 레일운반을 위하여 트레일러(또는 트로리)에 레일을 상차하는 경우에는 문형크레인을 설치하여 상차하는 것을 원칙으로 합니다.

다) 레일교환 후 발생레일은 10m 단위로 절단하여야 하며, 트레일러에 레일을 상차하는 경우에는 특수차에 부착된 크레인을 사용하여 상차하는 것을 원칙으로 합니다.

라) 장척레일 운반 시에는 경고음이 발생하는 (LED)경광등을 트로리에 설치하여 특수차 운행 중 발생할 수 있는 안전사고에 대비하여야 하며, 레일 하차작업을 위한 작업자들이 레일절단기, 트랙잭 등을 지참하고 특수차에 동승하여 현장으로 이동하여야 합니다.

마) 장척레일을 레일교환 현장에 하차 시에는 하차장소 주변시설물을 파손, 훼손하지 않도록 주의하여 궤간 내 하차하여야 하며, 열차 운행 중에도 레일이 미끄러지거나 이동하지 않도록 레일체결구 등에 로프(끈) 등으로 단단히 묶어서 보관하는 것을 원칙으로 합니다. 또한, 장척레일 밑에 각재(50×50mm)를 받쳐야 합니다.

3) 레일교환

가) 레일교환 전 현장을 점검하여 레일교환 시종점부 레일 마모량(직마모, 측마모)를 측정하여 레일용접에 지장을 주지 않도록 하여야 하며, 레일 마모량이 이음매를 두거나 레일용접을 하기에 부적합한 경우 즉시 공사감독관에게 보고하고 지시를 받아 처리하여야 합니다.

나) 레일교환 전 절단위치를 정확하게 체크한 후 공사감독관의 지시에 따라 레일절단기를 사용하여 수직으로 절단하여야 합니다.

다) 구 레일 철거는 레일체결장치를 해체 후 작업책임자의 구령에 맞춰 궤간 밖으로 밀어냅니다. 이 때 레일교환 개소 지장물(지상자, 부급전선, 레일도유기 등)은 철거상태를 작업책임자가 최종 확인한 후에 구 레일 철거를 시작합니다.

라) 새 레일은 구 레일 철거위치에 작업책임자의 구령에 맞춰 밀어 넣고 새 레일 체결은 1차로 직선의 경우 10m당 침목 5개 정도씩 궤간을 확인하면서 가 체결한 후 순차적으로 완전 체결합니다.

마) 장대레일 교환은 1일 한 쪽 레일을 기준으로 최대 400m이하로 교환하는 것을 원칙으로 합니다. 단, 곡선연장이 400m이상으로 레일교환을 2일 이상 할 경우 신구레일의 이음부분의 단차를 최소화하여야 합니다.

바) 레일교환 완료 후에는 작업책임자가 공사감독관과 입회하에 교환개소 전반에 대하여 점검(궤도틀림검사 포함)하여 열차 안전운행에 지장을 주어서는 안됩니다.

사) 발생레일은 공사감독관이 지정하는 장소에 수량 및 치수 등을 표시하여 정리합니다.

파. 레일용접 일반사항

1) 레일용접은 발주기관 레일용접표준예규에 따라 시행합니다.

2) 레일용접은 계약상대자가 발주기관에 신고한 용접책임자(철도레일용접인정자격자)가 직접 실시하여야 합니다.

3) 계약상대자는 발주기관에서 제공한 레일을 사용하여 한국철도기술연구원에서 제시하는 규격으로 레일용접시편을 제작(가스압접 2개소, 테르밋트용접 2개소)하여 한국철도기술연구원에 품질시험(굴곡시험, 경도시험, 초음파탐상검사, 침투탐상액검사)을 의뢰하여야 하여 발주기관 레일용접 품질기준을 만족하여야 합니다.

4) 레일용접시편 품질시험 결과 불합격 시에는 레일용접시편을 2배수로 재 시험 의뢰하여야 합니다. 이 때 사용레일은 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정하되, 발주기관에서 제공하는 경우에는 사용레일에 대한 변상을 하여야 합니다.

5) 본 공사기간 중 2개소 이상 레일용접 하자가 발생하는 경우에는 발주기관에서 용접책임자 교체를 요구할 수 있습니다.

6) 레일용접, 레일절단, 레일연마 등 화재 위험성이 높은 주요 화기작업은 고위험 화기작업 사전신고서 최소 작업 3일전 제출하여야 합니다.

7)  현장에서 레일용접 시 레일패드, 절연블럭 등 다른 궤도재료가 훼손되지 않도록 주의하여야 하며 훼손 시 즉시 교체 또는 변상하여야 합니다.

8) 레일용접부 연마 시 쇳가루 등이 비산하지 않도록 주의하여야 하며, 선로 내 시설물의 화재 예방을 위하여 방염포, 불연포, 깔개를 설치하여야 합니다.

9) 레일용접부 검사 결과 시공 불량으로 확인된 개소에 대하여는 재시공 및 용접부검사(계약상대자 부담)를 재 시행하여야 하며, 자재수급이 어려울 경우 발주 기관과 협의 후 발주기관에서 자재를 제공할 수 있으며, 이에 대한 변상을 하여야 합니다.

10) 용접책임자는 시공현장에 상주하여야 하며, 공사시행 중 면허수첩을 상시 휴대하는 것은 물론 시공현장에서는 용접공은 각자의 자격을 명시한 다음과 같은 아크릴 명찰을 착용하여야 합니다.

용접공 고유번호 :
회 사 명 :		약 3cm
성 명 :
약 7cm [흰색바탕 녹색글씨]

11) 야외에서 레일용접 시 우천, 강풍, 누수, 저온 등으로 용접결과에 악영향을 초래할 우려가 있을 때에 공사감독관의 지시에 따라 적당한 방호설비를 하여야 하며, 경우에 따라 작업을 중지하여야 합니다.

12) 야적장 내 기존 적재된 정척레일을 가스압접용접이 용이한 장소로 소운반이 필요한 경우 하중 현장여건에 따라 계약상대자는 공사감독관과 협의하여 트레일러, 트로리, 지게차, 백호 등을 사용하여 운반하여야 합니다. 이 때 정척레일 소운반은 주변시설물이 훼손되지 않도록 주의하여 운반하여야 합니다. 또한, 정척레일 소운반 중 전차선 저촉 등의 우려가 있는 경우에는 공사감독관에게 보고 후 전차선 단전 등 상응하는 안전조치를 취하고 운반하여야 합니다.

13) 레일용접 후에는 용접부근의 궤간선측 레일복부에 다음과 같이 용접공법별 고유색, 시공회사, 용접공법, 용접공의 성명, 용접 년월일을 양각으로 표시한 아래 규격의 알루미늄 표찰을 준공검사 전에 강력접착제로 레일용접부 중심부에서 200mm 지점에 부착하여야 합니다. (단, 신 · 구레일 접속개소는 반드시 신품레일 복부에 부착)

(1) 가스압접부 : 황색                (2) 테르밋트 용접부 : 적색

(3) 엔크로즈드아크 용접부 : 청색     (4) 플래쉬버트 용접부 : 흑색

※ 용접표찰 규격

14) 레일용접 위험물(LPG, 산소, 아세틸렌 등)은 위험물보관함(밸브에 손이 닿지 않도록 철망 설치)을 설치, 보관하여야 합니다.

15) 레일용접부의 시인성 향상을 위하여 레일용접개소 레일 복부 및 저부에 용접 공법별로 도색하여야 합니다.

용접부 도색 방법

가스압접	테르밋트용접	플래시버트용접

하. 가스압접용접

1) 레일마춤, 중심합치기는 다음에 따라 시행하여야 합니다.

가) 단면을 오손한다던가 변형되지 않도록 레일을 도입하여야 합니다.

나) 단면은 직각이어야 하며, 레일 두부면의 차는 0.1mm이하 이어야 합니다.

다) 양단면을 합칠 때의 틀림은 두부 및 저부는 0.2mm이내 복부는 0.4mm이내 이어야 합니다.

라) 이음용접 후 레일의 사용방향이 확실한 것은 레일 두부 상면 및 궤간선측을 직선이 되도록 하여야 합니다.

마) 사용방향이 확실하지 않은 것은 좌우방향을 중심으로 맞추고 상하방향은 두부상면이 직선이 되도록 하여 오차는 저부하면으로 가도록 하여야 합니다.

2) 적열 중(공법에 따라 노마라이징 후)에 레일의 엇갈림, 굴곡 등은 교정하여야 합니다. 교정 도중 냉각되어 교정이 곤란한 경우에는 재 가열 후 시행하여야 합니다.

3) 가열 압접 완료 후에는 되도록 속히 적열 중에 트리밍 하되 깊이 깎여 들어가지 않도록 하고 여유두께가 1~1.5mm이어야 합니다.

4) 가압, 가열 및 용접은 장비 제작자의 사용 설명서와 다음 표에 의합니다.

레일종별	가압력(ton)	크램프압력	혼합가스압력	압축량
				열처리	기타
50kgN	16~18	20~21	45~60	30이상	24이상
60kgk	17~19	20~21	50~65	30이상	24이상

5) 두부 열처리레일을 용접할 경우에는 후열처리를 하여야 합니다.

거. 테르밋트용접

1) 테르밋트 용접재료는 반드시 건조한 상태로 보관하여야 하며, 제조 후 3년 이상 경과한 것은 사용해서는 안 됩니다. 또한, 한 번 습기를 포함한 용제는 건조하여 재 사용할 수 없습니다.

2) 레일의 조정은 다음에 따라 시행하여야 합니다.

가) 이음매가 있는 경우 이음매판을 철거하고 양편으로 2, 3개 정도의 체결구를 풀어 늦추어 놓습니다.

나) 이음매가 있는 경우 이음매부 부식, 후로우 등을 정리하고 레일두부와 저부 모두 유간은 25±2mm가 되도록 하며, 장대레일 용접 시 적정유간이 없으면 레일을 절단합니다.

다) 레일의 단면은 레일단부면 및 레일용접부 전후 10cm 구간을 와이어브러쉬나 스랙햄머 등으로 청소를 철저히 하여 불순물과 녹을 완전히 제거하여야 합니다.

라) 레일은 1m 수평 철자로 재어 양측면은 직선이 되도록 하고 레일두부는 이음매부의 중심을 기준으로 해서 1m 직선자의 한 쪽 끝이 1.75~2mm가 낮아지도록 맞추어야 합니다.

3) 용접용 형틀의 설치는 다음에 따라 시행하여야 합니다.

가) 고정장치는 소정위치에 견고히 고정시키고 형틀은 한 쪽에 고정시킨 다음 다른 한 쪽을 맞추어 고정시키고 양측을 조여야 합니다.

나) 틈막이 모래가 이음매부 내로 들어가지 않도록 하며, 용철이 새지 않도록 형틀의 저부, 측면을 빈틈없이 막은 다음 예열버너로 모울드 내의 모래 등을 날려 청소하여야 합니다.

다) 도가니는 고정장치 위에 설치하여야 하며, 오토탑과 프라그는 소정위치에 정확히 거치하여야 합니다.

4) 예열은 산소압력 5bar(0.5MPa), 프로판압력 1.5bar(0.15MPa)로 조정하여 레일두부로 부터 버너파이프 간격과 예열시간은 다음 표를 표준으로 하고 도가니는 1회용을 사용하고 포장을 제거하여 습윤상태인 것은 사용하지 말아야 하며, 완전건조상태에서 작업에 임하여야 합니다.

버너파이프간격(mm)		예열시간(분)
원형	사각	50kg/m	60kg/m
		25mm용접	25mm용접	68mm용접
40	50	4	5	6

5) 예열하는 동안 도가니에 테르밋트 용제를 넣은 후 예열이 끝나면 점화제로 용제에 점화시키고 약 40초 내외에 반응이 완료되어야 하며, 용제는 오드탑을 사용하여 자동 탬핑되도록 하여야 하고, 오드탑의 작동은 점화 후 15~30초가 표준입니다.

6) 25mm용접일 경우 용철이 흘러 주형내에 들어가 3분 경과 후에(PLA 경우 5분 30초) 모울드 케이스 및 크램프 장치를 해체하고 다시 6분 경과 후에 레일상면에서 약 10mm까지의 상부 모울드를 제거합니다. 이 때 레일 복부 및 저부의 모울드는 제거하여서는 안 됩니다.

7) 적열 중에 전단 잭크를 사용하여 트리밍하되 깊이 깎여 드러나지 않도록 하고 여유두께가 1~1.5mm가 있어야 하며, 저부측면에 대해서는 여성부를 레일면과 같게 양쪽 모두 갈아야 합니다.

8) 여성부는 핸드그라인더, 와이어 휠브러쉬 등으로 정리하여 용접부 표면에 날카로운 부분이나 유해한 흠이 없도록 하여야 합니다.

9) 두부 열처리레일을 용접할 경우에는 열처리레일용 테르밋트 용접재료를 사용하여야 합니다.

너. 레일용접부 검사

1) 레일용접별 검사종목은 다음 표에 의하여 시행하여야 합니다.

검사종목 용접방법	가스압접용접	테르밋트 용접	비고
외 관 검 사	전 수	전 수
자분탐상검사 또는 침투액 탐상검사	전 수	전 수
초음파탐상검사	전 수	전 수	발주기관 별도시행
경 도 시 험	5%이상(1개소 5점)	5%이상(1개소 5점)
굴 곡 시 험	매 공사 발주시마다1개	매 공사 발주시마다1개

2) 레일용접부에 대한 외관검사는 다음을 검사하되, 결점이 있어서는 안 됩니다.

가) 두부면 요철, 균열

나) 굽힘, 비틀림, 언더컫, 블로우홀

3) 하중에서 시행한 가스압접용접은 레일용접부 초음파 탐상검사를 용접 완료 후 24시간 경과 후 시행하고 장대레일을 현장으로 운반 전 까지 완료하여야 합니다.

4) 현장에서 시행한 가스압접용접 및 테르밋트용접은 레일용접부 초음파 탐상검사는 용접 완료 후 24시간 경과 후 검사하여야 합니다.

5) 전 용접개소에 대하여 레일용접부의 초음파탐상을 실시하여 융합불량(불충분한 융해)과 같은 유해한 결함이 없어야 합니다.

6) 유해한 결함의 측정위치, 범위, 결함등급 등은 발주기관 레일용접표준예규 및 부록(레일용접부 초음파탐상 지침)에 따릅니다.

7) 초음파 탐상검사는 발주기관에서 발주하여 시행하는 레일용접 비파괴검사용역(비파괴검사 전문기관에서 시행)에서 시행합니다.

8) 계약상대자는 레일용접 초음파 탐상검사 등 검사 결과 불량 용접개소에 대하여는 재 용접은 물론 레일 및 검사비 일체를 변상 조치하여야 합니다.

9) 계약상대자는 모든 레일용접에 대하여 레일용접 시공기록표(발주기관 레일용접표준예규 양식)를 작성하여 준공 전 제출하여야 합니다.

더. 침목교환

1) 침목교환 작업 후 궤간, 수평, 면, 방향 등을 정밀히 검측을 시행하여야 하며 각종 체결장치는 견고하게 설치하여 이완 및 탈락 등 틀림이 없어야 합니다.

2) 발생침목은 당일 운반을 원칙으로 하나, 부득이 현장 보관 시 열차에 접촉되지 않도록 주의하여 적치하여야 합니다.

3) 신침목 위치를 기준측 레일 복부에 백색페인트로 표시하고 표시점에 맞추어 궤간중심선에 직각으로 간격틀림이 없도록 배열 교환 하여야 합니다.

4) 코일스프링크립 체결 및 해체는 팬플러를 사용하여야 하며, 함마 등을 사용하여 코일스프링크립을 타격하여 손상을 주지 않도록 하여야 합니다.

5) 절연편은 정위치에 빠짐없이 정확히 설치하야 하며, 석분․먼지 등 오물은 깨끗이 제거 후 설치하여야 합니다.

6) 침목 교환 시는 도상자갈의 두께가 충분히 확보되도록 하여야 하며 잉여자갈은 공사감독관이 지정하는 도상자갈 부족 위치로 이동 정리하여야 합니다.

7) 침목 교환 후 다지기 작업을 충분히 시행(2회 이상) 하여야 합니다.

8) 침목교환 및 다지기 작업 완료 후 자갈정리를 철저히 시행 침목상면보다 높게 되거나 부족하지 않도록 균등하게 하여야 합니다.

9) 침목교환이 완료된 구간은 즉시 궤도정정을 시행 열차 동요가 발생하지 않도록 하여야 합니다.

10) 베이스플레이트 설치 시 침목 상면에 잔자갈이나 불순물을 완전히 제거한 후 설치하여야 합니다.

러. 도상자갈 교환 및 보충

1) 도상자갈 반입은 공사감독관이 하중 내 지정한 위치에 공사감독관 입회하에 하차하여 보관하여야 합니다. 이 때 바람 등에 의해 비산먼지가 발생하지 않도록 조치하여야 합니다.

2) 하중 내 보관 중인 도상자갈을 마대에 담아 현장으로 운반하는 경우에는 도상자갈을 마대(톤마대 기준)에 약 70%만 채워 담는 것을 원칙으로 하고 1일 운반량은 발주기관 특수차 트레일러 적재기준을 따라야 합니다.

3) 도상자갈 교환 시 철거는 본 공사 설계도면(도상자갈 교환)대로 시행하되, 도상어깨 300mm(곡선구간 외측은 400mm), 깊이는 콘크리트바닥(노반)까지 도상자갈을 긁어 내어 철거하여야 합니다.

4) 도상자갈 교환 전 자갈도상이나 마대에 담긴 도상자갈에 충분히 살수하여 비산먼지 발생을 억제하여야 합니다.

5) 도상자갈 교환 완료 후 총다지기, 자갈정리 등을 충분히 하여 열차 안전운행  확보에 최선을 다하고 발생자갈은 당일 반출을 원칙으로 하되 부득이하게 선로 내 보관하여야 할 경우 마대(톤마대 기준)에 약 50%만 채워 건축한계 밖에 이동하지 않도록 하여 공사감독관의 승인을 얻어 보관할 수 있습니다.

6) 1일 도상자갈 교환량은 공사감독관과 사전 협의하여 결정하고 혹서기에는 도상저항력이 확보되지 않아 도상자갈 교환을 시행하지 않습니다.

7)하중으로 반출한 발생자갈은 공사감독관이 지정한 위치에 흘러내리지 않도록 적치하고 그 과정에서 비산먼지 등이 발생하지 않도록 살수 등의 조치를 하여야 합니다.

머. 선로제표 정비

1) 선로제표의 설치는 소사원시운영(주) 선로정비규정에 의하며, 정확히 설치하여야 합니다.

2) 선로제표의 설치위치는 공사감독관이 지정한 위치로 상하좌우 등이 바뀌어 설치되지 않도록 유의하여야 합니다.

3) 선로제표는 열차풍 또는 진동 등으로 탈락되거나 이동되지 않도록 견고하게 설치하여야 합니다.

4) 설치할 선로제표의 보관 및 운반 시 반사체가 훼손되지 않도록 개별 포장에  유의하여야 하며 보관, 운반, 교환 시 시공사의 부주의로 선로제표에 훼손(반사체 훼손 포함)이 발생한 경우에는 즉시 새로운 선로제표로 바꾸어 설치하여야 합니다.

5) 선로제표의 청소는 선로제표의 변형, 오염 등이 발생하지 않는 세정제를 충분히 선로제표에 분사한 후 양면을 넝마 등으로 깨끗이 닦아야 합니다.

버. 응급복구

1) 응급복구는 예상치 않은 상황에서 레일의 절손 또는 훼손이 발생하여 긴급하게 시행하는 레일교환 및 용접을 말합니다.

2) 레일의 절손 또는 훼손은 열차 안전운행과 밀접한 관계가 있으므로 공사감독관이 계약상대자에게 응급복구를 지시한 경우에 계약상대자는 신속하게 응급복구 일정을 수립하여 공사감독관에게 보고하고 지체 없이 시행하여야 합니다.

3) 응급복구한 레일의 용접부는 보통의 레일교환 시 용접부 검사와 동일하게 검사를 시행합니다.

4) 궤도보수 응급복구가 발생한 경우 선 작업을 우선으로 하고 비용은 계약만료 시 계약기간 동안의 응급복구 작업의 총액을 산출, 총 계약금액의 5% 이내에서 최종 대금 지급 시 지급한다.

서. 하중구내 환경정리

1) 하중구내 환경정리는 차량기지 내 보관 중인 자재(레일, 침목 등) 및 건설폐기물 등을 공사용 자재의 대량 반입, 발생자재의 적치 공간 확보를 위하여 위치를 옮겨 정리 및 포장(천막지 사용)하거나 쾌적한 선로환경을 위하여 방치된 폐기물 등을 수거하여 깨끗하게 정리하는 작업을 말합니다.

2) 하중구내 환경정리 시 작업 전, 중, 후 사진을 담은 사진철과 작업일시, 작업위치, 투입인원 및 장비, 작업내용 등을 기재한 내역 작성하여 기성, 준공서류 제출 시 함께 제출하여야 합니다.

어. 현장사무실 및 관리

1) 현장사무실(컨테이너)을 설치하는 경우에는 공사감독관이 지정한 위치에 설치하여야 하며, 관할구청에 가설건축물 축조 신고 등 행정적인 절차를 준수하여야 합니다.

2) 또한, 현장사무실 내 조명, 사무기기(컴퓨터, 팩스, 전화 등) 운용을 위하여 전기를 사용하는 경우에는 공사감독관과 협의 후 관련서류를 제출하여 조치될 수 있도록 합니다.

3) 현장사무실은 항상 깨끗이 정리하고 문어발식 콘센트 사용 금지, 소화기 비치 등 화재예방을 철저히 하여야 합니다.(현장사무실 관리책임자 정, 부 지정 시행)

4) 공사기간 동안 차량기지 내 임시 설치한 현장사무실(컨테이너)은 즉시 철거하여 차량기지 외부로 반출하여야 합니다.

5) 부득이한 경우 현장사무실은 설치하지 않을 수 있다.

저. 가변패드주머니(부직포)

1) 수지 주입용 주머니는 비닐사이에 부직포 섬유로 구성된 재료 또는 동등 이상의 재료를 사용하여야 하며, 주머니와 공기유출 필터가 있어야 합니다.

2) 가변패드용 주입수지

가) 주입수지는 경화제와 혼합하여 완전 경화시 품질수준은 아래사항을 만족시킬 수 있어야 합니다.

※ 압축탄성율 또는 샤르피 충격강도 중 하나에 대하여 시험을 진행하여야 합니다.

나) 가변패드의 경화를 위하여 사용되는 경화제(첨가제)의 경화시간은 아래 사항을 만족하거나 동등 이상품 이어야 합니다.

다) 형태

· 형상, 치수는 당공사 현장여건에 따라 주머니의 크기, 형태를 조정하여 사용합니다.

라) 제조 및 가공

· 품질은 균일하게 제작되어야 하며, 수지액 주입후 가변패드 내부에 공극, 기포, 침전물, 기타 이물질 등이 생기지 않아야 합니다.

· 주머니는 수지액 주입후 터지지 않도록 박음질과 마감처리를 철저히 하여야 합니다.  특히 주입구 쪽은 미세한 틈이 발생되지 않도록 정확하게 접착하여야 합니다.

마) 성능 및 외관

· 가변패드는 제품의 특성상 현장여건에 맞추어 시공하였을 때 수지액이 정확하게 충진되어야 하며, 유해한 흠, 비틀림, 찟김, 주름 등이 없어야 합니다.

바) 검사

· 검사의 분류

- 겉모양 검사

- 치수검사

· 검사방법 및 수준

- 외관검사 및 치수검사는 제품 전수에 대하여 시행합니다.

- 가변패드 주머니는 현장여건에 따라 규격이 상이함을 고려하여 주문사양 규격에 따른다.

사) 시험

· 시험의 분류 : 제품시험

· 시험방법

- 가변패드는 현장에서 시공하는 화학제품이므로 시공에 사용하는 재료로 당공사 공사감독관 입회하에 시제품 3개를 제작하여 KS M 3015(열경화성프라스틱일반시험방법)에 의한 시험을 시행하여야 합니다.

아) 결점 및 불량분류

· 검사 및 시험결과 본 규격에 적합하지 않을 경우 그 해당 로트 전부를 불합격으로 합니다.  다만 1회에 한하여 재시험 할수 있으며 이때의 시험편은 첫번째의 2배로 합니다.

자) 포장

· 화학제품은 별도의 용기에 불순물 등이 들어가지 않도록 각 각 개별포장을 하여야 합니다.

· 가변패드주머니는 적당한 상자에 넣어 운반과 취급이 용이하도록 포장하여야 합니다.

차) 표시

· 제품별 포장표면에 제작자명 또는 그 약호, 제작년월, 제품종별, 부품별 수량을 표시하여야 합니다.

카) 각종 시험은 공인기관에서 실시하여야 하며, 시험에 필요한 수수료는 계약상대자 부담으로 합니다.  단 제작사에 시험 설비가 갖추어진 경우에는 사용자와 협의하여 검수자 입회하에 시행할 수 있다.

타) 규격 및 품질 보증기간은 3년간으로 하며, 이 기간 동안에 본 제품에 의한 하자 발생시 계약자는 우리공사가 지정하는 기일 내에 무상으로 보수 및 교체하여야 합니다.

파) 가변패드 주머니의 주입구 방향은 직선구간에서는 궤간내측, 곡선구간에서는 곡선내측으로 합니다.

하) A제(주제)와 B제(경화제)의 탱크를 반드시 구분하여 사용하여야 합니다.

거) 촉진제 사용시에는 촉진제를 B제용 탱크에 사용하여야 합니다.

너) 수지의 주입작업에 있어서 시공개소 및 재료의 혼합장소에 비닐시트 등을 깔고 궤도가 더러워지지 않도록 주의하여야 합니다.  또한 체결장치 부근에 넘친 수지는 특별히 주의하여 제거하여야 합니다.

더) 규격 및 특성

· 구성 : 재료(가변패드, 주입수지A액, 경화제B액)

기계기구(주입기, 온도계)

소모재(비닐호스, 신나, 노즐, 비이커등)

· 압축강도 : 1,800㎏f/㎠

· 인장강도 : 430㎏f/㎠

· 휨강도 : 689㎏f/㎠

· 신장율 : 9.0%

러) 시공할 작업 장소에서는 화기를 피하여야 합니다.

머) 수지의 보관은 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하여야 합니다.  끝.

[별지 제1호 서식]

공사시행 통지서 귀하
노 선 명	서해선 소사~원시
공 사 구 간	부터 까지 ( km)
공 사 의 종 류
공 사 의 위 치	년 월 일 년 월 일 ( 일간)
공사시행기간
이 유
‘2018년 소사원시 궤도시설 유지보수공사’과업지침서에 따라 위와 같이 공사를 시행할 것을 통지합니다. 20 년 월 일 공사시행자 (서명 또는 인)000
첨부 서류 : 설계서 1부
210㎜×297㎜(신문용지 54g/㎡)