	2019년도
공사코드 : KR-CEE-19-031
	공 사 명 : 경부고속선 동대구-고모간 자갈도상 레일패드 교환공사
	설 계 서
		담당자	시설팀장	안전기술부장	고속시설사업단장
	심사자 :	(인)
	한국철도공사 고속시설사업단장

		2019년도
		공사코드 : KR-CEE-19-031
	공 사 명 : 경부고속선 동대구-고모간 자갈도상 레일패드 교환공사
				설 계 서
(회 계)
		(예산관리센터)	3000442		(경주시설-(수탁)시설-고속유지FC)
		(약정항목)	51040251		(고속유지-수선유지비-공비)
		(G/L 계정)	51021370		(수선유지비-공비)

	목 차
	1. 설 계 설 명 서 ………………………………………………… 1 2. 공 사 시 방 서 ………………………………………………… 2 3. 특 별 시 방 서 ………………………………………………… 23 4. 예 정 공 정 표 ………………………………………………… 37 5. 설 계 예 산 내 역 서 ………………………………………………… 38 6. 공 종 별 예 산 조 서 ………………………………………………… 39 7. 철도공사 직 원 급 내 역 서 ………………………………………………… 40 8. 전 자 입 찰 수 수 료 ………………………………………………… 41

1. 설 계 설 명 서

1. 공 사 명 : 본 과업의 명칭은 「경부고속선 동대구-고모간 자갈도상 레일패드 교환공사」이라 하고, 고속시설사업단을 “발주자”, 계약상대자를 “수급자”로 명칭한다.

2. 목    적 : 본 공사는 경부고속선 동대구-고모간 289.800km~293.384km(환) 구간의 자갈궤도 중 레일패드 불량개소에 대하여 선로유지관리지침 제36조(레일체결장치 교환)에 의한 교환을 시행하여 고속열차의 안전운행 및 고속철도 시설물의 내구성을 확보하기 위함.

3. 위     치 : 대구광역시 일원

4. 공사 개요

가. 공종 : 레일패드 교환

공종명	개소	연장(m)	침목(정)	패드량(EA)	비 고
레일패드 교환	8	5,888	10,018	20,036

나. 공사기간 : 착공일로부터 60일간

다. 계약방법 : 일반경쟁계약(철도·궤도공사업)

	2. 공 사 시 방 서
1. 일반사항 가. 적용범위 (1) 본 공사는 철도공사 전문시방서(토목편) 및 철도건설규칙, 공사 및 용역관리규정(2017.01.18.), 토목표준시방서, 열차운행선로지장작업 업무세칙(2018.09.28.), 철도안전관리 시행세칙(2018.07.30.), 운전취급규정(2018.05.08.), 고속철도 운전취급세칙(2018.05.08.), 표준안전시방서(철도공사 안전관리처-2927호, 2015.7.13.), 철도안전보건관리규정(2018.07.30.), 열차운행선 인접공사 안전관리 매뉴얼(2018.03.23.), 안전계약 특수조건 기준 외 특별시방서와 설계도서에 의하여 시행하여야 하며, 공사 시행 중 관련 법규, 지침 및 규정이 개정될 시에는 개정된 지침을 적용한다. (2) 본 공사의 시행에 있어서 법령 또는 별도 정하는 것 이외에는 본 시방서 및 설계도에 정하는 바에 의해 시행하여야 하며, 본 시방서 및 설계도에 명시되지 않은 사항은 감독자의 지시를 받아 시행하여야 한다. (3) 도면, 시방서, 내역서의 내용이 상이하거나, 관련공사와 부합되지 않을 때 또는 의문이 생길 때 에는 감독자의 지시에 따른다. 또한 설계도서에 누락된 사항일지라도 당연히 시공 되어야 할 사항은 감독자의 지시에 따라 시공하여야 하며, 시방이 불분명할 시에는 그 시방을 작성, 감독자에게 제출하여 승인을 득한 후 시공하여야 한다. (4) 수급자는 산업기사이상 자격취득자로서 당해 기술분야 3년 이상 실무에 종사한 자 또는 당해 기술분야의 중급기술자 이상인 자, 당해 기술분야의 초급기술자로서 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무를 3년 이상 수행한 자(건설산업기본법 시행령 제35조)를 현장대리인(작업책임자)으로 선임하고 현장에 상주시켜야 한다. 2. 감독자의 권한 가. 감독자(건설사업관리 감리원)는 공사감독자 복무규정 등 정해진 사항의 범위 내에서 그의 권한을 행사하여야 한다.

	2. 공 사 시 방 서
3. 수급자의 의무 가. 수급자는 공사의 목적물을 계약서에서 정한 것에 따라 성실히 시공하고 완성해야 하며 발주자가 최종 인수전까지는관련 시설에 대하여 관리할 책임을 져야 한다. 나. 수급자는 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사시행으로 인하여 발생되는 손해와 손상에 대하여 책임을 져야 한다. 다. 수급자는 공사의 목적물이 손상을 받을 경우 또는 공사의 목적물이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독자의 지시에 따라 조치하여야 하며, 또한 수급자는 목적물의 품질에 대하여 책임을 져야 한다. 4. 공사현장 관리 가. 공사 현장이 서로 인접하거나 동일 장소에서 시공하고 별도 공사가 있을 경우에는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지않도록 하여야 한다. 나. 공사 시공 중 수급자는 감독자 및 발주자의 허가 없이 공공의 해를 끼칠만한 시공방법을 써서는 안된다. 다. 작업장에서 발생하는 모든 사고는 수급자 책임하에 처리하여야 한다. 라. 공사기간 동안 열차안전 운행에 지장이 없도록 하고 감독자의 지시에 의해 작업을 실시하도록 한다. 5. 공사시행 및 공정관리 가. 수급자는 본 공사시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공사 시행에 필요하다고 판단되어 감독자가 요청할 경우에는 이를 협의 조정하여 성실히 시행하여야 한다. 나. 수급인은 공사계약 체결 후 공사착공계 및 예정공정표, 주요자재 사용계획서, 장비사용계획서, 품질관리계획서(재시공 확약서 포함) 등 착공관련 서류를 공사 시작후 10일 이내에 감독자의 검토를 받은 후 발주처에 제출하여야 한다.

	2. 공 사 시 방 서
(1) 착공계 제출 (가) 계약상대자가 착공 시 제출할 착공계에 포함하여 제출할 서류의 내용과 서식은 다음 각 호와 같다. 1) 공사착공계 2) 현장대리인(작업책임자) 지정계(위임장, 재직증명서, 경력증명서 포함) 3) 안전관리자 지정계(위임장, 재직증명서, 건설기술인협회 경력증명서 포함) 4) 예정공정표 5) 청렴이행 각서 6) 철도운행안전관리자 및 전기철도안전관리자(필요시) 지정계(자격증 사본 및 경력증명서 포함) 7) 산업재해 보험가입 증명원 (나) 수급자는 상기 가)항의 착수 신고서류 2부를 관리주체에 제출하여야 한다. (2) 도급내역서 제출 (가) 수급자는 도급내역서 작성 시 각 공종별 단가에 낙찰률을 적용하여 작성하여야 한다. 다. 공정 및 시공계획서 (1) 수급자는 착공 전에 공정표, 공사용 기계 기구의 사용계획, 작업장, 기타 용지 사용에 대하여 시공계획서를 작성하여 감독자의 사전승인을 받아야 한다. (2) 수급자는 감독자의 요구가 있을 때에 공사 시행의 순서, 방법, 주요자재 반입, 주요 기계설비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획 등에 대하여 상세한 계획서를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

	2. 공 사 시 방 서
라. 공사보고 (1) 수급자는 공사의 진척, 작업자 변경, 공구의 반입, 처후, 기타 필요한 사항을 기재한 공사 보고서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다. (2) 수급자는 항상 공사 진행상황을 계획과 대조하여 주요공정이 현저히 지연 될 때에는 즉시 그 사유 및 공정관리 대책을 수립하여 감독자에게 보고한다. (3) 공정보고 및 작업일지 기록 (가) 현장대리인(작업책임자)은 공사 시행기간 중 다음 사항을 포함하여 매일 작업일지를 작성하여 보고하고, 준공 시 감독자에게 제출한다. 1) 공사시행내용 및 공정현황 2) 공사 시행 시 중요 문제점 및 대책 3) 인력 및 장비투입현황 4) 익일 작업계획 (나) 현장대리인(작업책임자)는 매일 현장투입 전 작업자에게 안전교육을 실시하여 안전사고를 예방하고, 현장 안전교육일지를 작성하여 준공 시에는 감독자에게 제출한다. (다) 작업자는 공사 시행 전 감독자가 시행하는 교육을 2시간 이상 받아야 한다.(각종 사고사례 교육 포함, 전파교육 가능) 6. 작업시간 가. 당일 공사열차(시운전, 검측차)가 운행시 작업(차단) 시간은 단축될 수 있으며, 작업은 주 5일을 기본으로 하고 주말(공휴일)에 작업 할 때에는 미리 감독자의 승인을 받아야 한다. 나. 야간에 정해진 차단시간 내 작업계획을 세부적으로 수립하여 실동시간이 반영될 수 있도록 계획수립에 만전을 기하여야 한다.

	2. 공 사 시 방 서
7. 공사기간 가. 수급자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체없이 계획대로 공사를 추진하여 계약 기간 내에 완료하여야 한다. 특히, 전체공사 완료 전 특정부분에 대하여 공사의 완료 또는 시공순서에 대한 감독자의 지시가 없을 때에는 이에 따라야 한다. 나. 공사를 시행하고자 할 경우는 감독자의 승인을 득한 후 시행하여야 하며, 천재지변, 타 공사와의 연계성 등 부득이한 경우로 공사의 지연이 불가피한 경우에는 승인을 받아 연기하여야 한다. 8. 공사일시중단 가. 감독자는 다음과 같은 경우에 공사의 전부 또는 일부를 중단 시킬 수 있다. (1) 수급자가 설계도서 및 시방서와 상이하게 시공(작업)을 할 경우 (2) 불완전한 시공(작업)을 하거나 기타 사정으로 공사 지연 또는 시공을 소홀이 할 경우 (3) 기후 조건 또는 천재지변으로 인해 부실한 시공이 될 우려가 있을 경우 (4) 수급자의 안전관리 소홀로 산업재해가 발생하였을 경우 (5) 기타 감독자의 정단한 지시에 불응한 경우 9. 설계변경조건 가. 설계수량이 현지와 차이가 있어 공사준공 처리 시 증감처리를 할 수 없을 때 나. 발주처가 인정하는 타당성이 있는 사유가 발생하였을 때 다. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제65조 및 회계예규 공사계약일반조건 제20조 규정 적용 (1) 설계서의 내용이 불분명한 경우 (2) 설계서에 누락, 오류가 있는 경우 (3) 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우 등 법규적용

	2. 공 사 시 방 서
10. 부적합한 공사조치 가. 계약서와 일치하지 않는 모든 공사는 부적합한 것으로 간주하며 불량시공, 결함자재 사용, 부주의 및 기타사유로 인한 손상 등은 재시공하여야 한다. 11. 사용재료 가. 모든 공사용 재료(공구)는 사전 감독자의 검사를 받아서 합격품에 한하여 사용하며, 불합격품에 대하여는 즉시 공사장 외로 반출하여야 한다. 나. 본 공사에 사용되는 제반공구는 한국공업규격품을 사용하되 부득이한 경우에는 이와 동질 이상의 것을 사용하여야 한다. 12. 재료관리 가. 재료(공구)가 현장에 반입되어 감독자의 검사를 받아서 합격한 후에는 작업에 지장이 없는 장소에 적치하여 감독자가 쉽게 점검할 수 있도록 하여야 한다. 나. 검사 및 시험에 합격한 재료(공구)라도 사용할 때 감독자가 변질 또는 불량으로 인정할 경우 이를 사용하여서는 안된다. 13. 검 사 가. 수급자는 시공 후 검사가 육안으로 불가능한 부분에 대하여는 감독자의 입회하에 확인시켜야 한다. 나. 검사자와 감독자의 직무 수행 상 필요하다고 인정할 때 해체 후 확인 할 수 있으며, 검사자와 감독자의 시공에 대한 지시는 다른 시공에 우선하여 처리한다. 14. 불법하도급 근절(건설산업기본법 제29조, 건설공사의 하도급 제한) 가. 건설산업기본법에 의하여 건설업자는 수급받은 건설공사의 전부 또는 대통령령으로 정하는 주요 부분의 대부분을 다른 건설업자에게 하도급할 수 없다.

2. 공 사 시 방 서

나. 수급자는 불법하도급 근절을 위하여 최선을 다하여야 하며, 위반시 관련 법령 및 철도공사 사규에 의하여 제재를 받을수 있다.

다. 불법하도급에 의한 영업정지 및 과징금 부과기준(건설산업기본법 시행령 별표6)

위반행위	근거 법조문	영업정지 기간	과징금의 비율(%)
			도급금액 5천만원 이하	도급금액 1억원	도급금액 5억원	도급금액 30억원 이상
수급받은 건설공사의 전부 또는 주요 부분의 대부분을 1인에게 하도급한 경우	법 제82조 제2항제3호	8개월	30	24	16	8
수급받은 건설공사의 전부 또는 주요 부분의 대부분을 2인 이상에게 하도급한 경우	법 제82조 제2항제3호	6개월	24	18	12	6

15. 「하도급 지킴이」(정부계약 하도급 관리시스템) 이용철저

가. 수급자는 「하도급지킴이」를 이용하여 하도급계약을 체결한다. 다만, 하도급자(장비, 자재업체 포함)와 수기로 하도급계약을 체결하는 경우에도 하도급지킴이에 등록하여야 한다.

나. 원 ‧ 하도급 대금, 노무비, 장비, 자재대금을 「하도급지킴이」를 이용하여 전자적으로 지급하여야 한다.

다. 원 ‧ 하도급 대금 등 지급에 있어 「인출 제한」기능 사용에 대하여 수요기관과 상호 협의하여 결정한다.

라. 수요기관의 원 ‧ 하도급 대금, 노무비, 장비, 자재대금의 직접지급 또는 적정지급 여부 확인에 적극 응하여야 한다.

< 하도급지킴이 이용에 관한 자세한 사항은 「나라장터-하도급지킴이-시스템 사용안내(업체)」를 참고 >

16. 정산사항

가. 철도운행안전관리자, 열차감시자는 준공계 제출시 정산처리한다.

(1) 철도운행안전관리자  : 작업등록부의 작업일수에 의거 정산(운전명령 서식10호, 20호 증빙 제출)

(2) 열차감시자 : 일일작업일지 및 안전교육일지의 작업일수에 의거 정산

	2. 공 사 시 방 서
17. 공사의 안전관리 가. 본 공사는 야간 차단시간 내 25,000V의 고압전류가 흐르는 본 선상에서 궤도점유를 시행하고 교환공사를 시행하므로, 제반 안전관리에 각별히 유의하고 특히 계약업무처리 시행세칙(개정 2018.12.31. 제2018-86호) [별표 31]<제정 2018.10.29.>『안전계약특수조건』이행에 만전을 다 할 것이며, 현장 내에서 발생한 제반 사고에 대하여는 민형사상의 일체의 책임은 수급자가 져야 한다. 나. 안전관리자 선임 (1) 안전관리자 배치 : 안전관리 업무를 총괄할 수 있는 별도의 안전관리자를 현장에 배치하여야 한다. 다. 안전관리자의 의무 (1) 안전보건관리규정에서 정한 직무 및 용역 수행 시 작업현장의 안전관리를 총괄한다. (2) 안전관리 실시계획서(안전 및 보건 교육, 작업장 안전관리포함)를 작성하여 감독자에게 제출하고, 현장에 비치하여야 하며 실시결과를 보고하여야 한다. (3) 산업안전보건법 제33조의 방호장치, 산업안전보건법 제34조의 기계, 기구 및 설비등 안전 물품 구입 시 적격품 및 친환경상품으로 선정한다. (4) 고속선 입·출입 시 발주자의 내부 절차에 따라 시행한다. (5) 발주자의 안전교육 시행절차 및 세부사항에 따라 작업자를 대상으로 안전교육을 시행한다. (6) 작업현장 지도 및 점검(작업자의 안전보호구 상태 및 착용여부 검사 포함)을 시행한다. (7) 작업 전 철도운행안전관리자와 함께 임시열차 및 작업차량 운행여부를 반드시 확인하고, 작업자에 대해 교육을 실시한다.

	2. 공 사 시 방 서
(8) 매 회 작업 투입 전·후 인원점검 및 장비 점검을 시행하고 열차 운행에 지장이 없도록 작업 개소의 뒷마무리를 확인한다. (9) 공기구 및 작업대차(트로리)에 LED경광등 또는 반사재 부착하여 시인성을 확보하고, 바퀴는 도체(알루미늄 또는 철제) 소재의 바퀴를 사용하여야 한다. (10) 작업 중 비상상황 발생 시 철도운행안전관리자와 함께 작업자 및 열차운행의 안전확보를 위한 응급조치를 시행한다. (11) 차단작업 계획 수립(필요 시) 라. 수급자는 산업재해 발생 시 즉시 근로자 산업재해 발생보고를 해야 하며, 산업재해를 보고하지 않거나 허위로 보고할 경우 어떠한 불이익도 감수하여야 한다. 마. 현장대리인(작업책임자) 및 철도운행안전관리자는 작업장 단위별로 반드시 현장에 상주토록 관리한다. 바. 현장대리인(작업책임자) 및 철도운행안전관리자가 감독자의 승인 없이 현장 이탈시 작업 중지 조치한다. (단, 부득이한 경우 감독자와 협의하여야 하며, 감독자의 허가 없이 임의로 현장을 이탈하여서는 안된다.) 사. 현장이동 및 출입문 취급절차 (1) 현장대리인(작업책임자) 또는 안전관리자는 안전관리계획서 제출 시 당해 공사 현장에 대한 발주자의 의견을 수렴하여 작업개소별 이동방법(작업자 대기장소, 작업자 이동경로, 출입문위치 등)을 포함하여 작성하고, 이를 항상 숙지하고 준수하여야 한다. (2) 작업자는 사전 협의된 “작업자 대기장소”에 집합하여야 하며, 감독자 인솔하에 작업장소(선로변등)로 이동하여야 하며, 절대 개별적인 행동을 해서는 안 된다.

2. 공 사 시 방 서

(3) 작업자는 작업완료후 감독자와 함께 작업장에서 “작업현장 밖 안전한 장소”로 이동하여야 하며, 절대 개별적으로 이동해서는 안된다.

아. 공사 시행 단계별 안전교육 시행

(1) 현장대리인 또는 안전관리자는 안전교육 절차에 의거 단계별 교육 시행 후 실적관리(교육내용, 서명, 사진 등)를 하여야 하며, 발주차가 시행하는 정기 및 특별교육에 성실히 임하여야 한다.

(2) 현장대리인 또는 안전관리자는 교육종료 후 발주자가 지정한 현장담당관(감독자포함)에게 SNS로 보고하여야 한다.

(보고내용 : 교육내용, 서명, 사진 등을 포함한 교육일지)

(3) 현장대리인 또는 안전관리자는 안전교육 미 이행(실적관리 미흡 등)에 따른 제재 조치에 대하여 어떠한 이의를 제기할 수 없다.(1회 : 경고(문서), 2회 : 당일작업 중지)

※ 공사 단계별 대상교육

교육명	시행시기	시행주체	교육대상
착공전 최초교육	공사계약 후	발주자	감독자, 현장대리인, 안전관리자 등
착공전 전파교육	공사시행 전	수급자	작업자(신규작업자)
일일안전교육	당일작업 전	수급자	작업자
정기·특별교육	월1회 또는 수시	수급자	작업자

2. 공 사 시 방 서

	≪안전교육 시행절차≫			≪안전교육 세부사항≫

	2. 공 사 시 방 서
18. 철도운행안전관리자 선임 가. 공사 착공 전 철도운행안전관리자 선임계를 제출하고 발주자로 부터 고속선 출입 및 작업자 보호조치(CPT) 및 무전기 취급에 관한 교육을 반드시 이수하여야 한다. (1) 철도운행안전관리자 자격요건 (가) 국토교통부장관이 인정한 교육훈련기관에서 국토교통부령이 정하는 교육훈련을 수료할 것 (나) 철도기술인협회에서 발급한 철도운행안전관리자 자격증 소지자 (2) 철도운행안전관리자의 임무 (가) 운행선로 또는 위험지역 밖에서 공사(작업) 시 차단작업에 대한 계획 수립 및 작업시간 조정 등의 차단작업에 대한 협의 (나) 당일 작업구간 및 이동 중 각종 지장물, 위험요인, 작업 열차 운행 등 안전관련 사항 검토 및 안전작업계획 수립하고 작업자에게 안전교육 시행 (다) 위험요인을 숙지하며 선행하여 작업자를 현장 인솔 및 열차 운행선에 대한 작업자 안전확보 방안 수립·시행 (라) 작업 전 차단협의 시 차단열차 및 작업차량 운행 여부 확인 (마) 작업자 보호장치(CPT) 취급과 열차감시자의 배치 등에 관한 계획 수립 및 시행, 확인 (바) 철도차량 운전자 또는 관제업무 종사자와 연락체계 구축 (사) 작업 중 모타카 운행 시 인적, 물적 사고가 발생 요인이 없음을 확인 후 통과 협의 (아) 작업에 필요한 장비의 이동 및 설치, 철거 등 작업 전·후 열차 운행에 따른 지장여부(선로, 전차선 등) 확인

2. 공 사 시 방 서

(자) 작업 중 비상상황 발생 시 작업자 및 열차 운행 안전 확보 조치 시행

(차) 작업 전·후 열차 운행에 지장여부(선로, 전차선 등)를 확인하고 이상 발생 시 조치하여 열차운행안전을 확보

(카) 작업시행점검표 작성 등 개정 된 운행선 작업 사규에 따른  철도운행안전관리자 임무 수행

위험지역 밖 진입 (작업승인시각 5분전)	➡	작업승인 협의	➡	작업 시행	➡	작업장 뒷정리	➡	작업 완료	➡	작업종료 통보
철도운행 안전관리자 작업자는 대기		철도운행 안전관리자		작업자		작업자		철도운행 안전관리자 작업자		철도운행 안전관리자 울타리 밖 이동

(3) 철도운행안전관리자 선임 시 구비 서류

(가) 철도운행안전관리자 선임계

(나) 철도운행안전관리자 자격증 사본

(4) 철도운행안전관리자의 교체

(가) 다음과 같은 상황이 발생하였을 경우 관리주체는 철도운행안전관리자의 해임 또는 교체를 요구 할 수 있으며, 수급자는 즉각 교체하여야 한다.

1) 철도운행안전관리자 자격요건 충족이 되지 아니한 자를 운행안전관리자로 선임하였을 경우

2) 철도운행안전관리자의 임무를 수행함에 있어서 수행능력이 저하되거나, 불성실 이행 하였을 경우

(나) 철도운행안전관리자가 재선임 되기 전까지 작업을 중단하며, 이는 공사기간 연장 사유에 해당되지 아니한다.

	2. 공 사 시 방 서
19. 열차감시자의 배치 가. 열차감시자는 작업자에게 열차의 접근 여부를 알려주기 위한 기본 휴대품(열차시각표, 호루라기, 적·백 수신호기 등)을 소지하고, 그 여부를 현장대리인에게 확인 받아야 한다. 나. 열차감시자는 선로변 작업 시에는 작업 개소별로 배치하여 작업자가 열차에 접촉되지 않도록 열차접근 여부를 지속 확인 한다. 다. 열차감시자는 선로변 작업안전수칙을 준수하며 감독자와 연락상태를 유지한다. 라. 의사소통이 되지 않는 구간으로 작업자가 이동하여 작업할 경우에는 사전에 다른 소통방법을 협의하고 연습을 시행한 후 작업하도록 한다. 마. 작업개소가 의사소통이 되지 않은 거리에 있을 경우에는 열차감시자를 작업개소 만큼 배치하여 개소별로 열차를 감시토록 한다. 바. 열차감시업무를 할 때에는 선로에서 벗어나 선로변에서 감시하여야 하며, 본인의 안전관리에도 주의하여야 한다. 사. 열차감시자는 열차감시업무 이외의 다른 업무에 배치되어서는 안되며, 휴대폰 사용이나 잡념으로 업무가 소홀해지지 않도록 특히 주의하여야 한다. 아. 열차감시자의 전문성 확보를 위해 착수 전 4시간 이상 교육(이론 및 현장)을 이수하여야 한다. 20. 열차운행선로지장작업 시 안전관리(운행선 인접작업 포함) 가. 수급자는 공사를 시행하면서 감독자가 열차운행선로지장작업 외에 운행선 인접작업 시행에 필요하다고 판단되거나, 연관된 사항에 대하여 요구할 경우 본 항에 준하는 안전관리를 시행하여야 한다.

	2. 공 사 시 방 서
나. 수급자는 철도안전법, 건설기술관리법, 산업안전보건법 및 관련 규칙과 한국철도공사 열차운행선로지장작업 업무세칙에 적합하게 안전관리를 하여야 하며, 안전관리 소홀로 인한 안전사고에 대하여 전적인 책임은 수급자에게 있으며, 수급자의 부담으로 원상복구 및 손해배상을 하여야 한다. 다. 수급자는 작업 시작 전 감독자와 작업내용, 방법, 열차운전취급 방법 등을 협의한 후 작업을 수행하여야 하며, 어떠한 경우라도 감독자의 작업승인 또는 지시 없이 열차운행선상에 작업자를 투입하여 작업준비 및 작업착수를 해서는 안 된다. 라. 수급자(안전관리자)는 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 체계적이고 계획적인 안전관리 계획을 수립하여 안전교육을 철저히 시행하여야 한다. 마. 수급자는 작업자를 유해 위험작업에 배치할 경우 당해 작업조건에 적합한 보호구를 지급하여 착용하도록 하고 작업 전에 착용유무를 확인하여야 하며, 작업자에게 개인별 안전 보호구를 지급하여야 하고, 작업 중 훼손, 분실 시 즉시 재 지급하여야 한다. 바. 수급자는 열차운행선로지장작업 업무세칙에 의거하여 현장조사, 입회 등 차단작업 수행 시 철도운행안전관리자를 선임·배치하여야 한다. 사. 작업현장에서는 항상 위험에 대비한 인식을 새로이 하여 작업의 차질이나 작업자의 부주의가 없도록 주의하여야 한다. 아. 공사(운행선 인접작업 포함) 시행 시에는 다음 사항을 준수하여야 한다. (1) 현장대리인(또는 안전관리자)은 고속선 입‧출입 시 발주자 내부 규정 “고속선 출입 절차서” 에 따른 행정 절차에 따라 시행하고 출입문 쇄정상태를 점검한다. (2) 고속선 출입문의 번호 자물쇠는 감독자가 직접 취급한다.

	2. 공 사 시 방 서
(3) 현장대리인 및 안전관리자는 작업현장 지도 및 점검(작업자의 안전보호구 상태 및 착용여부 검사 포함)을 시행한다. (4) 현장대리인 및 안전관리자는 작업 전 철도운행안전관리자와 함께 임시열차 및 작업차량 운행여부를 반드시 확인하고, 작업자에 대해 교육을 실시한다. (5) 현장대리인 및 안전관리자는 매 회 작업 투입 전·후 인원점검 및 장비 점검을 시행하고 열차운행에 지장이 없도록 작업 개소의 뒷마무리를 확인한다. (6) 현장대리인 및 안전관리자는 작업 중 비상상황 발생 시 철도운행안전관리자와 함께 작업자 및 열차운행의 안전확보를 위한 응급조치를 시행한다. (7) 차단작업 계획 수립점검 업무 및 접근 방법과 관련하여 공사 작업자는 안전사고 예방에 특별히 유의한다. (8) 안전관리자는 아래 사항에 대한 실시 계획서를 작성하여 감독자에게 제출하고 현장에서 지참하고 실시 결과를 보고하여야 한다. (가) 안전·보건 교육 (나) 공사 중 안전 관리 (9) 안전상의 조치 : 다음 장소는 특히 안전 조치를 하여야 한다.(개인 안전조치 포함) (가) 공사 중 작업자가 넘어지거나 부상당 할 위험이 있는 장소 (나) 공사 중 자재 및 기계 장비 등의 건축 한계선 내 방치 금지 (다) 공기구 및 작업대차(트로리)에 LED경광등 또는 반사재 부착하여 시인성을 확보 (라) 공사 시행 중 발생한 각종 안전사고는 감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한다.

	2. 공 사 시 방 서
(10) 당일 안전작업계획 수립 (가) 현장대리인 또는 안전관리자, 철도운행안전관리자는 발주자와 작업 내용 관련하여 사전 협의 (나) 작업자, 장비, 자재 준비 상태 (다) 작업시간 승인여부 확인(운전명령, 관련 관제사) (라) 작업시간 확보 및 관계소속 통보여부 등을 종합하여 당일 적정량 설정 (마) 고속선 출입 전 반드시 감독자 및 해당 사업소에 출입승인을 얻어야 한다. (11) 작업내용 설명 및 안전교육 시행 (가) 당일 작업할 내용, 시간, 최초 운행 열차 시각 (나) 작업 방법 및 안전 교육 시행 (다) 작업 장소별 업무 연락 책임자 지정(연락방법, 통신 수단) (라) 작업을 위한 복장, 안전보호구(발광조끼 착용) 착용상태 확인 (마) 작업자 음주 유무 및 심신상태 확인 (12) 작업 현장준비, 안전조치 실태확인, 작업 현장 단위별 인원, 장비, 자재 적정 배치 여부 (가) 철도운행안전관리자 및 열차감시자 배치, 안전설비 설치 상태 (나) 단전이 필요한 개소는 단전 조치 후 작업 위치 전후에 접지걸이 설치 여부 확인 (다) 울타리 출입은 작업자가 임의로 출입할 수 없으며, 감독자 인솔하여 출입 가능

	2. 공 사 시 방 서
(13) 운전협의 철저 이행 (가) 운전 및 급전 관제사 등 관련 관제사(고속관제 포함)와 운전협의 (나) 작업 시간, 열차 운행시간 등 사전확인 숙지 (다) 이례 사항 발생시 연락방법, 통신 수단 등 상호 협의 (라) 주요 작업내용에 대하여 상호간 기록유지 자. 고속선 출입절차에 따른 출입 허가 (1) 고속철도운전취급세칙 제37조(고속선 출입제한)에 의거 계약 상대자는 출입목적 및 출입인원, 출입기간 등을 작성하여 발주자에 출입허가를 요청하여야 한다. 차. 고속선 차단작업 시행도중 이행상태 확인점검 (1) 안전수칙 준수여부 확인 (가) 지시위반자에 대한 경고장 발부 제재 조치 (나) 위반 내용을 기록, 수급자에게 통보, 작업 참여 배체 촉구 (2) 작업 진척 상황 수시 정보 교환 (가) 계획대로 진행되는지 상황을 파악 후 관리주체 및 관제사에 수시 정보 제공 (나) 작업 시간 부족 또는 지연이 예상될 때는 정보제공 신속 이행 및 용정 축소 (다) 부득이 작업이 지연될 때는 신속히 관리주체 및 관련 관제사에게 통보 후속 조치 의뢰

	2. 공 사 시 방 서
카. 작업 시행 후 마무리 상태 점검, 확인 (1) 안전관리자 및 철도운행안전관리자 합동 점검 시행 (가) 건축한계내 지장 여부 (나) 장비, 자재 및 공구류가 안전한 장소에 정리, 보관되어 있는지 여부 (다) 선로변에서 비산하여 전차선을 지장을 줄 수 있는 물체 존치 여부 (라) 작업 종료 내용을 발주자, 감독자 및 관계 관제사에 통보 (마) 울타리 출입문의 쇄정상태 확인 타. 일정기간 공사 일시 중단 후 재시행, 공사를 할 때의 조치할 사항 (1) 수급자는 반드시 점검계획을 미리 제출하여야 하며 감독자의 승인 없이 임의 작업 시행 금지 (2) 작업을 재시행할 때 반드시 감독자 입회하에 준수사항 확인 및 점검 후에 시행 파. 작업 시행 도중 이례 사항 발생 시 조치할 사항 (1) 이례사항 발생 내용을 신속히 발주자, 관제사(급전, 운전)에 상세히 보고 (가) 통화자 상호간 통보시각, 내용, 직명, 성명, 기록 유지 (나) 통화시는 상호 복창하여 의사 전달 정확 여부 확인 (2) 현장의 안전조치 신속히 시행 (가) 열차운행 일시 중지 또는 일시 서행 (나) 열차감시자 배치, 서행준수 여부 감시 (3) 필요한 경우 인원, 장비 등의 지원요구 필요여부를 신속히 판단 조치 이행 (4) 기타 필요 사항 발생 시 안전 위주의 조치 이행

	2. 공 사 시 방 서
21. 관계처 협의 가. 관계법령(건축법, 도로법, 도시계획법 및 각종 시행령)에 의한 각종 인‧허가 및 동의, 통보 등 필요한 협의는 감독자의 지시에 따라 수급자가 사전에 확인 이행하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 수급자 부담으로 한다. 22. 공사 준공 시 납품 가. 수급자가 공사 준공 시 제출한 준공계에 포함하여 제출할 서류의 내용과 서식은 다음 각 호와 같다. (1) 준공 검사원 (2) 준공계 (3) 준공조서 (4) 준공 개소별 명세서 (5) 준공 사진첩 (가) 수급자는 시공 전‧중‧후 과정, 공사 시행 중 매몰 또는 기타 사항으로 나타나지 않는 부분 등, 기타 감독자가 지시하는 부분은 천연색 사진으로 기록 보존하여야 하며, 감독자의 필요로 하는 부수만큼 사진첩 및 USB를 제출하여야 한다. (나) 현장교육사진 또한 날짜별로 촬영하여 작성 제출해야 한다. (다) 작업위치별, 공종별 시공 전, 중, 후 사진을 제출하여야 한다. (6) 안전작업계획서 및 운전명령서식(철도운행안전관리자 증빙)

	2. 공 사 시 방 서
23. 뒷정리 가. 본 공사로 인하여 발생된 오물은 준공 전에 깨끗이 청소하여야 하며, 작업현장을 정리정돈 하여야 한다. 24. 환경관리 가. 공사 시행 시 발생되는 사업장 폐기물관리는 폐기물관리법에 의한다. 나. 수급자는 설계내역서 외의 재료 사용 시 친환경 상품을 우선한다. 25. 산업안전보건법령의 준수 가. 수급자는 공사 착공 시 ‘산업안전보건법 시행규칙‘ 제29조에 의거 발주자와 안전‧보건 협의체를 구성하며, 공사 준공 시 까지 발주자가 시행하는 매월 정기회의에 참석하여야 한다. 나. 공사 시행 시 ‘산업안전보건법 시행규칙‘ 제30조에 의거 수급자는 발주자와 안전‧보건조치 등을 위하여 합동 순회점검을 시행하는 등 산업재해를 예방하기 위한 조치를 하여야 한다. 26. 법률 준수의 의무 가. 수급자는 공사를 시행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위를 할 경우 이로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다. 나. 본 공사의 최종성과 내용의 미비, 과오, 진행상 오류 등의 결함에 대한 수급자의 책임은 면제 될 수 없다. 다. 공사의 하자로 인하여 금전적 손실 및 인명피해 등 진행상 지장을 초래한 때에는 해당 부분을 원인자 부담으로 재시행 하여야 하며, 관련법에 따라 발주자가 결정하는 책임부분에 대하여 수급자는 공사의 재시행 및 손해배상 등의 책임을 진다. 라. 공사 시행 시 특허권 및 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어있는 것을 사용할 때에는 수급자가 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

	3. 특 별 시 방 서
1. 일반사항 가. 적용범위 (1) 본 시방서는 『경부고속선 동대구-고모간 자갈도상 레일패드 교환공사』에 시행되는 일련의 모든 작업공정에 적용한다. (2) 모든 공정이라 함은 자갈궤도의 레일패드 교환을 말한다. 나. 관련규정 (1) 본 공사 관련사항으로 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 국토해양부 제정 시방서, 철도건설규칙, 표준안전시방서, 선로지장 취급절차 및 설계도면 등에 의거 시행하여야 한다. 다. 일반사항 (1) 수급업자는 감독자가 필요하다고 인정되는 관련서류를 제출하여야 한다. (2) 공사장에서 발생하는 안전사고는 수급자 책임하에 처리하여야 한다. (3) 공사기간 동안 본 건으로 인한 열차 안전운행에 지장이 없도록 하고 감독자의 지시에 의해 작업을 실시하도록 한다. (4) 기타 감독자가 필요하다고 인정되는 안전시설은 수급자 부담으로 설치하여야 한다. (5) 열차운행선 공사 안전관리 대책에 의거 안전관리자와 열차감시자, 철도운행안전관리자를 반드시 배치하여야 한며, 작업장이 여러 개로 나누어진 경우 각 작업장별로 열차감시자, 철도운행안전관리자를 두어야 한다. (6) 현장대리인은 감독자의 사전 승인없이 현장을 이탈해서는 안되며 현장에 상주하여 전반적인 보수공사에 기술지도를 하여야 하고, 특별히 안전에 지장이 없도록 총괄 관리를 하여야 한다. (7) 현장대리인은 매 공정이 끝나면 감독자의 승인을 득한 후 다음 공정작업을 하여야 한다.

	3. 특 별 시 방 서
(8) 본 공사 구간에 설치되어 있는 지장물은 공사감독자 및 관계기관과 협의하여 이설조치 후 공사를 시행하여야 한다. (9) 본 공사 개소에서 발생되는 폐기물 및 발생재료는 당일 회수 또는 정리정돈 하여야 한다. (10) 본 공사는 야간시간대에 시행하므로 시인성이 좋은 발광형 안전조끼와 안전모에 야광 반사재를 부착하여야 한다. (11) 현장대리인은 안전교육일지와 일일작업보고를 매일 작성하여 준공 시 공사감독자에게 제출하여야 한다. (12) 현장대리인은 일일작업 시작전 작업자들에게 지적확인환호응답을 포함한 안전교육을 실시하며, 음주측정 등을 실시하여 음주자는 당일 작업에서 배제시켜야 한다. 2. 시공일반 가. 적용범위 (1) 이 시방서는 『경부고속선 동대구-고모간 자갈도상 레일패드 교환공사』 에 적용한다. (2) 본 공사 시행 전 조치사항 ① 현장조사 결과를 기초로 작업방법, 공기구 등 이동 방법 결정 3. 시공 가. 레일패드 교환 작업 (1) 선로유지관리지침의 장대레일 작업제한표, 작업온도 제한표를 적용하여 공사를 시행한다. (2) 한번 레일패드 교환 시행 연장은 25m로 제한하고, 체결구가 체결된 것을 확인 한 후 다음 체결구를 해체한다 (3) 레일 저면에 협착된 레일패드는 각종 공구를 사용하여 완전하게 제거하여야 한다. (4) e코일은 완전히 체결되도록 하며, 작업 완료 후 궤도게이지로 검측을 시행하여 이상유무를 확인하여야 한다. (5) 작업 책임자는 최초 열차의 통과상태를 확인 후 이상유무를 매일 감독자에게 보고하여야 한다.

	3. 특 별 시 방 서
4. 기타사항 가. 기성대가 및 준공대가 지급 시 산재보험료, 고용보험료, 건강보험료, 연금보험료 등을 사후정산 하여 지급하며, 이는 수급자가 제출한 보험료 납입확인서(사업주 및 개인의 부담금) 금액을 준공일과 동시에 제출하여야 한다. (1) 정산제출 서류 (가) 사업장 단위로 기재된 납입확인서 (나) 가입자별 납부확인서(영수증) (다) 개인별 보험료 고지(산출) 내역서 나. 본 공사가 완료되었을 때는 공사현장의 뒷정리 및 주변 환경을 깨끗이 하여 감독자의 검사를 받은 준공검사에 임하여야 한다.

4. 예 정 공 정 표
공사종류	단위	수량	공 사 기 간 (2개월 : 60일간)													기 사
			1일	5일	10일	15일	20일	25일	30일	35일	40일	45일	50일	55일	60일
1. 현장답사 및 계획준비	식	1
2. 공기구 등 준비 (유압젝, 발전기, 트롤리 등)	식	1
3. 레일패드 교환	식	1
5. 현장 뒷마무리	식	1
6. 부대공	식	1

5. 설 계 예 산 내 역 서
	총 공 사 비
	1	도 급 공 사 비
	2	지 급 자 재 비 (당기조달품)
	3	지 급 자 재 비 (전년도조달품)
	4	지 급 자 재 비 (중 고 품)
	5	지 급 자 재 비 (레미콘, 충용품)
	6	철도공사제공 기계기구 사용료
	7	철 도 공 사 직 원 급
	8	재 료 일 반 관 리 비
	9	운 송 비
	10	계 약 수 수 료

	6. 공 종 별 예 산 조 서
공 사 종 류	규격	단위	수량	단가(원)		금액(원)	기사
1. 공사명: 경부고속선 동대구-고모간 자갈도상 레일패드 교환공사
1) 레일패드 교환	KR60㎏_TPU	EA	20,036
2) 부대공
① 철도운행안전관리자	야간		48				준공시 정산
② 열차감시자	야간		96				준공시 정산
직접공사비
2. 간접노무비	직접노무비의	%	12.7
3. 산재보험료	노무비의	%	3.75
4. 고용보험료	노무비의	%	0.87
5. 건강보험료	직접노무비의	%	3.23
6. 연금보험료	직접노무비의	%	4.50
7. 노인장기요양보험료	건강보험료율의	%	8.51
8. 산업안전보건관리비	(재료+직노)×1.2	%	2.93
9. 환경보전비	재료비+직노비+산경의	%	1.5
10. 기타경비	재료비+노무비	%	8.8
11. 일반관리비	재료비+노무비+경비	%	6.0
12.이 윤	노무비+경비+일반관리비	%	15.0
공 급 가 액
13. 부가가치세		%	10
총 공 사 비

		7. 철도공사 직원급 내역서
구 분	단 위		수 량	단 가	금 액		기 사
□ 여 비
1. 공사감독 여비
감독자
소 계
2. 준공검사 여비
팀 장
스 텝
소 계
합 계

	8. 전 자 입 찰 수 수 료
구 분		단 위	수 량	단 가	금 액		기 사
1. 전자입찰수수료
합 계