		2019년도
		공사코드 : KR-CMD-19-019
		공 사 명 : 경부선 삼성~남성현간 갈미터널(상) 궤도구조개량 기타공사
						설 계 서
						담당자		선로팀장			시설처장				본부장
						설계심사자 :
한국철도공사 대구본부장

		2019년도
		공사코드 : KR-CMD-19-019
		인 가 : 제 2019 - 호 2019년 월 일
	공 사 명 : 경부선 삼성~남성현간 갈미터널(상) 궤도구조개량 기타공사
			설 계 서
		(회 계)
		예산관리센터)		5000491(대구-수탁(시설)-일반개량FC)
		사업코드)		C42016(시설개량/시설/선로시설개량/콘크리트도상)
		약정항목)		51050251((일반개량)수선유지비-공비)

목 차
	1.	설 계 설 명 서	……………………………………………
	2.	공 사 시 방 서	……………………………………………		(별첨)
		일 반 시 방 서	……………………………………………
		특 별 시 방 서	……………………………………………
		안 전 시 방 서	……………………………………………
		기 타 시 방 서	……………………………………………
		안 전 계 약 특 수 조 건	……………………………………………
		시 설 공 사 계 약 특 수 조 건	……………………………………………
	3.	예 정 공 정 표	……………………………………………
	4.	설 계 예 산 내 역 서	……………………………………………
	5.	공 종 별 예 산 조 서	……………………………………………
	6.	지 급 자 재 조 서 서	……………………………………………
	7.	철 거 발 생 품 예 정 조 서	……………………………………………
	8.	철도공사제공기계기구 예정조서	……………………………………………
	9.	철 도 공 사 직 원 급 내 역 서	……………………………………………
	10.	예 계 개 소 별 명 세 표	……………………………………………

		1. 설 계 설 명 서
	가. 공 사 명 : 경부선 삼성~남성현간 갈미터널(상) 궤도구조개량 기타공사 나. 위 치 - 경부선 삼성~남성현(상) 347.320㎞부근 갈미터널 다. 목 적 - 경부선 삼성~남성현(상) 347.320㎞부근 갈미터널내의 궤도구조(도상) 개량을 통한 궤도안정성을 확보하고 유지관리이 효율성 제고 및 열차안전운행을 확보하기 위함 라. 공사개요 - 콘크리트도상화 0.700㎞ - 레일교환 1.045㎞ - 침목교환 1,704개 - 테르미트용접 24개소 - 가스압접 62개소 마. 시행방법 : 본 공사 시방서에 의거 시행 바. 공사기간 : 착공일로부터 214일간 사. 하자담보기간 및 담보율 : 레일용접(5년, 5%), 콘크리트직결도상(5년, 5%) 아. 하자담보금액 : 19,137,777원 자. 지체상금율 : 1/1,000/일 차. 기 타

(궤 도) 공 사 시 방 서

□ 총칙

제1장 궤도공사 일반사항

1-1 공사일반

1.1 적용범위

1.1.1 적 용

이 시방서는『경부선 삼성~남성현간 갈미터널(상) 궤도구조개량 기타공사』에 의한 궤도구조 개량공사에 적용 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

본 공사는 철도건설규칙(국토교통부령 제1호, 2013.03.23.), 선로유지관리기준(시설기술단 내규, 2011.08.11. 제정)

제4편 보선작업기준 및 제5편 레일용접관리기준, 선로유지관리지침(개정 2018.12.31), 운전취급규정(개정 2018.05.08.

제2018-26호), 신호제어설비 유지보수세칙(개정2018.04.10., 제2018-18호), 열차운행선로지장작업업무세칙(제정

2018.09.28., 제2018-65호), 철도안전관리 시행세칙(2018.07.30. 제2018-54호), 철도궤도공사표준시방서(개정 2016.02.01.),

공사 및 용역관리규정(제2017-10호, 개정2017.01.18.), 철도안전법(2018.08.14., 법률 제15740호) 제4장 제25조에

의한 철도시설 기술기준 적용 및 분기기정규도, 선로작업부도 등 관계규정 및 지침, 세칙(각각 첨부생략)에

의하여 시행하여야 한다.

※ 본 공사 시행중 각종 관련법규, 지침, 규정 등이 개정될 시에는 변경된 법규, 지침, 규정 등으로 적용한다.

※ 열차안전운행 확보를 위한 안전강화 추가 시지[수송조정처-2384(2016.05.05)호] 적용

※ 표준안전시방서[안전처-3380(2015.07.15)호] 적용.

※ 발광형 안전조끼 착용 철저 지시[궤도기술처-2708(2017.07.10)호] 적용.

※ 철도 안전사고 재발방지 종합대책 알림[궤도기술처-801(2018.03.26.)호] 적용.

1.1.2 공사 위치 및 대상

경부선 삼성~남성현(상선) 갈미터널 347.320~348.260 (L=940m)

1.1.3 적용순서

가. 공사이행에 관하여 계약 당사자 간의 권리와 의무를 규정한 서면화된 계약문서는 다음과 같으며, 계약문서 간에 그 의미가 불분명하거나 상호모순이 있을 경우에 계약문서로서의 우선순위는 아래 순서에 따라 적용한다.

1) 계약서

2) 계약 일반조건 및 특수조건

3) 공사시방서

4) 설계도면

5) 산출내역서

6) 설계서 간에 상호 모순이 있을 경우 아래 순서에 따라 적용한다.

7) 현장설명서 및 질의응답서

8) 공시시방서

9) 설계도면

10) 산출내역서

11) 승인된 시공도면

12) 관련법령의 유권해석

13) 공사감독관의 지시사항

나. 이 시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용 간에 상호 모순이 있을 경우 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

1.1.4 적용상의 주의

가. 본 시방서의 적용에 있어서 자구(字句)에 구애됨이 없이 본 시방서에서 의도하는 바를 정확하게 파악하는 것이 중요하며 당해 공사의 교통조건, 자연조건, 현장 시공조건, 공사 후 유지보수의 난이도 등을 고려하여 공사업무지원관 및 감리원은 업무를 수행하여야 하며 수급인과 현장대리인은 불합리한 시공이 되지 않도록 공법을 협의하여 시공하여야 한다.

그 외 시방서 [별첨]

3. 예 정 공 정 표
공 사 종 류	단위	수 량	공 사 기 간 (214일)							기사
			30	60	90	120	150	180	214
준비작업	식	1
레일교환 침목교환 도상치환	km 개 ㎥	1.045 1,704 1,523
콘크리트도상화	㎞	0.700
뒷정리	식	1
			착공지정일로부터 214일간

4. 설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비		5,714,126,243
1	도급공사비	3,816,162,000
2	지급재료비(중앙조달)	228,716,205
3	지급재료비(전년도조달품)
4	지급재료비(중고품)
5	지급재료비(지방조달)
6	철도공사 제공기계기구 사용료	1,660,790,238
7	철도공사직원급	4,734,800
8	공사직원급 일반관리비
9	재료일반관리비
10	운송비
11	설계수수료
12	폐기물처리비	3,723,000