		2019년도
		공사코드 : KR-CMD-19-059
		공 사 명 : 경부선 지천역구내 유효장확장 기타공사
						설 계 서
						담당자		선로팀장			시설처장				본부장
						설계심사자 :
한국철도공사 대구본부 시설처장

		2019년도
		공사코드 : KR-CMD-19-059
		인 가 : 제 2019 - 호 2019년 월 일
	공 사 명 : 경부선 지천역구내 유효장확장 기타공사
			설 계 서
		(회 계)
		예산관리센터)		5000491(대구-수탁(시설)-일반개량FC)
		사업코드)		C42017(시설개량/시설/선로시설개량/물류시설개량)
		약정항목)		51050251((일반개량)수선유지비-공비)

목 차
	1.	설 계 설 명 서	……………………………………………
	2.	공 사 시 방 서	……………………………………………		(별첨)
	3.	예 정 공 정 표	……………………………………………
	4.	설 계 예 산 내 역 서	……………………………………………
	5.	공 종 별 예 산 조 서	……………………………………………
	6.	지 급 자 재 조 서 서	……………………………………………
	7.	철도공사제공기계기구 예정조서	……………………………………………

		1. 설 계 설 명 서
	가. 공 사 명 : 경부선 지천역구내 유효장확장 기타공사 나. 위 치 - 경부선 지천역구내 다. 목 적 - 철도물류활성화를 위한 대량수송체계 구축을 위한 경부선 부본선 개량(유효장 확장)사업중 지천역 부본선 유효장을 확장하여 경부선 장대 화물열차 운행으로 철도수송능력 증대를 도모하기 위함. 라. 공사개요 - 신설 궤도부설 0.716km - 레일교환 0.44km - 침목교환 72개 - 기존선 분기기철거 5틀 - 신설 분기기부설 5틀 - 가스압접 58개소 - 테르미트용접 16개소 - 부대공사 1식 마. 시행방법 : 본 공사 시방서에 의거 시행 바. 공사기간 : 착공일로부터 180일간 사. 하자담보기간 및 담보율 : 레일용접(5년, 5%), 분기기설치1년, 5%), 궤도부설(1년, 5%) 아. 하자담보금액 : 5,777,700원 자. 지체상금율 : 1/1,000/일 차. 기 타

2. 공 사 시 방 서

□ 총칙

제1장 궤도공사 일반사항

1-1 공사일반

1.1 적용범위

1.1.1 적 용

이 시방서는『경부선 지천역구내 유효장확장 기타공사』에 의한 궤도구조 개량공사에 적용 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

본 공사는 철도건설규칙(국토교통부령 제1호, 2013.03.23.), 선로유지관리기준(시설기술단 내규, 2011.08.11. 제정)

제4편 보선작업기준 및 제5편 레일용접관리기준, 선로유지관리지침(개정 2018.12.31), 운전취급규정(개정 2018.05.08.

제2018-26호), 신호제어설비 유지보수세칙(개정2018.04.10., 제2018-18호), 열차운행선로지장작업업무세칙(제정

2018.09.28., 제2018-65호), 철도안전관리 시행세칙(2018.07.30. 제2018-54호), 철도궤도공사표준시방서(개정 2016.02.01.),

공사 및 용역관리규정(제2017-10호, 개정2017.01.18.), 철도안전법(2018.08.14., 법률 제15740호) 제4장 제25조에

의한 철도시설 기술기준 적용 및 분기기정규도, 선로작업부도 등 관계규정 및 지침, 세칙(각각 첨부생략)에

의하여 시행하여야 한다.

※ 본 공사 시행중 각종 관련법규, 지침, 규정 등이 개정될 시에는 변경된 법규, 지침, 규정 등으로 적용한다.

※ 열차안전운행 확보를 위한 안전강화 추가 시지[수송조정처-2384(2016.05.05)호] 적용

※ 표준안전시방서[안전처-3380(2015.07.15)호] 적용.

※ 발광형 안전조끼 착용 철저 지시[궤도기술처-2708(2017.07.10)호] 적용.

※ 철도 안전사고 재발방지 종합대책 알림[궤도기술처-801(2018.03.26.)호] 적용.

1.1.2 공사 위치 및 대상

경부선 지천역구내(상하）313.617~314.559 (L=942m)

1.1.3 적용순서

가. 공사이행에 관하여 계약 당사자 간의 권리와 의무를 규정한 서면화된 계약문서는 다음과 같으며, 계약문서 간에 그 의미가 불분명하거나 상호모순이 있을 경우에 계약문서로서의 우선순위는 아래 순서에 따라 적용한다.

1) 계약서

2) 계약 일반조건 및 특수조건

3) 공사시방서

4) 설계도면

5) 산출내역서

6) 설계서 간에 상호 모순이 있을 경우 아래 순서에 따라 적용한다.

7) 현장설명서 및 질의응답서

8) 공시시방서

9) 설계도면

10) 산출내역서

11) 승인된 시공도면

12) 관련법령의 유권해석

13) 공사감독관의 지시사항

나. 이 시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용 간에 상호 모순이 있을 경우 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

1.1.4 적용상의 주의

가. 본 시방서의 적용에 있어서 자구(字句)에 구애됨이 없이 본 시방서에서 의도하는 바를 정확하게 파악하는 것이 중요하며 당해 공사의 교통조건, 자연조건, 현장 시공조건, 공사 후 유지보수의 난이도 등을 고려하여 공사업무지원관 및 감리원은 업무를 수행하여야 하며 수급인과 현장대리인은 불합리한 시공이 되지 않도록 공법을 협의하여 시공하여야 한다.

그 외 시방서 [별첨]

3. 예 정 공 정 표
공 사 종 류	단위	수 량	공 사 기 간																	비고
			착수지정일로부터 180일
			10	30	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	150	180
1. 착수 및 준비	식	1
2. 궤도철거	km	0.364
3.궤광조립및자갈살포 (300m/일,180㎥/일)	km	0.562
4. 장비작업(신설), MTT	식	1
5.분기기철거및신설,STT (운행선,3일/틀,/W포함)	틀	5
6. 준공단계	식	1

4. 설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비
1	도급공사비	별봉
2	지급재료비(중앙조달)
3	지급재료비(전년도조달품)
4	지급재료비(중고품)
5	지급재료비(지방조달)
6	철도공사 제공기계기구 사용료
7	철도공사직원급	1,356,600
8	공사직원급 일반관리비
9	재료일반관리비
10	운송비
11	계약수수료	30,000
12	폐기물처리비

5. 공 종 별 예 산 조 서

공종 번호	공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
	□ 공사명 : 경부선 지천역구내 유효장확장 기타공사
	Ⅰ. 순 공 사 비
	가. 공 사 비
	가-1. 공 사 비	운행선 안전관리자 제외(보험료 및 퇴직공제비 산출용)
	1. 분기기중량화		1	식
	2. 레일중량화		1	식
	3. 부대공사		1	식
	나. 간접노무비	직노*12.7%	1	식
	다. 산재보험료	노무비*3.75%	1	식
	라. 고용보험료	노무비*0.87%	1	식
	마. 건강보험료	직노*3.23%	1	식
	바. 연금보험료	직노*4.5%	1	식
	사.노인장기요양보험료	건보*8.51%	1	식
	아. 퇴직공제부금비	직노*2.3%	1	식
	자. 산업안전보건관리비	((재+직노)*1.86%+5,349,000)*1.2	1	식
	차. 기타 경비	(재+노)*8.8%	1	식
	카. 공사이행보증수수료	(4.0백만원+(공사비-140억원)×0.0193%)×1/12	1	식
	타. 환경보전비	(재+직노+산경)*1.5%	1	식
	파. 건설기계대여대금지급보증서발급금액	(재+직노+산경)*0.10%	1	식
	Ⅱ. 일반 관리비	(재+노+경)*6.0%	1	식
	Ⅲ. 이 윤	(노+경+일반관)*15%	1	식
	Ⅳ. 공 급 가 액		1	식
	Ⅴ. 부가 가치세	Ⅳ*10%	1	식
	Ⅵ. 도 급 금 액		1	식
	Ⅶ. 관 급 자 재		1	식
	Ⅷ. 기계기구사용료		1	식
	Ⅷ. 총 공 사 비		1	식
	1. 분기기중량화
221	분기기교환	#8, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
133	분기기철거	#8, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	2	틀
137	분기기철거	#10, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
141	분기기철거	#12, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
42	분기기부설	60kg, #10(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	2	틀
46	분기기부설	60kg, #12(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	2	틀
81	테르미트용접	60kg, 야간(사용중지 4시간)	30	개소
86	테르미트용접(경두)	60kg, 야간(사용중지 4시간)	40	개소
275	재료 상하차	기계, 레일, 분기기, 신축 등	458.84	톤
287	도상자갈철거	야간(사용중지 4시간)	323.31	㎥
281	자갈살포	자갈화차, 야간(사용중지 3~4시간)	106.65	㎥
284	자갈고르기	자갈화차, 야간(사용중지 3~4시간)	271.84	㎥
294	자갈도상 인력다지기	타이탬퍼, 야간	4.24	㎥
242	레일절단	50kg	350	개소
244	레일천공	37~60kg	160	공
	2. 레일중량화
121	궤광철거	50kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 4시간)	0.529	km
64	신축이음매철거	편단신축, 야간(사용중지 4시간)	2	틀
10	궤광조립	60kg, 기계화, PCT, 단선, 야간(사용중지 4시간)	0.716	km
18	궤도양로	60kg, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	0.716	km
173	레일교환	PCT, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	0.044	km
201	침목교환	PCT→PCT, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	72	개
283	자갈고르기	기계화, 야간	1,283	㎥
281	자갈살포	자갈화차, 야간(사용중지 3~4시간)	1,460	㎥
284	자갈고르기	자갈화차, 야간(사용중지 3~4시간)	437	㎥
278	침목(WT,PCT) 운반배열	백호우 야간	1,290	개
276	침목(WT,PCT) 상하차	백호우	1,290	개
275	재료 상하차	기계, 레일, 분기기, 신축 등	153.840	톤
66	가스압접	60kg, 문형크레인	58	개소
81	테르미트용접	60kg, 야간(사용중지 4시간)	16	개소
243	레일절단	60kg	14	개소
244	레일천공	37~60kg	170	공
	2. 부대공사
320	WT포장덮기	WT 100개 기준, 주간	3	개소
319	조명설비	야간	88	시간
321	모타카경비	주간	48	시간
322	모타카경비	야간	88	시간
327	열차감시원 배치	주간	17	인
329	열차감시원 배치	야간(사용중지 4시간)	66	인
325	운행선 안전관리자	주간	24	인
326	운행선 안전관리자	야간	44	인

6. 사 원 급 내 역 서

구 분	단위	수량	단가	금액	기사
합 계				1,356,600
안전점검여비	일	48	26,600	1,276,800	일비+식비
준공검사여비	일	3	26,600	79,800	일비+식비

7. 일 위 대 가 표

공종 번호	공 종 명	규 격	수 량	단 위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비고
1	궤도부설	50kg, 기계화, 신설선(20~50m, 베이스플레이트부설)	1	km
2	궤도부설	60kg, 기계화, 신설선(20~50m, 베이스플레이트부설)	1	km
3	궤광조립	50kg, 기계화, PCT, 단선, 주간	1	km
4	궤광조립	50kg, 기계화, PCT, 단선, 야간	1	km
5	궤광조립	50kg, 기계화, PCT, 단선, 야간(사용중지 3시간)	1	km
6	궤광조립	50kg, 기계화, PCT, 단선, 야간(사용중지 4시간)	1	km
7	궤광조립	60kg, 기계화, PCT, 단선, 주간	1	km
8	궤광조립	60kg, 기계화, PCT, 단선, 야간	1	km
9	궤광조립	60kg, 기계화, PCT, 단선, 야간(사용중지 3시간)	1	km
10	궤광조립	60kg, 기계화, PCT, 단선, 야간(사용중지 4시간)	1	km
11	궤도양로	50kg, 기계화, 주간	1	km
12	궤도양로	50kg, 기계화, 야간	1	km
13	궤도양로	50kg, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	km
14	궤도양로	50kg, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	km
15	궤도양로	60kg, 기계화, 주간	1	km
16	궤도양로	60kg, 기계화, 야간	1	km
17	궤도양로	60kg, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	km
18	궤도양로	60kg, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	km
19	분기기부설	50kg, #8(PCT), 기계화, 주간	1	틀
20	분기기부설	50kg, #8(PCT), 기계화, 야간	1	틀
21	분기기부설	50kg, #8(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
22	분기기부설	50kg, #8(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
23	분기기부설	50kg, #10(PCT), 기계화, 주간	1	틀
24	분기기부설	50kg, #10(PCT), 기계화, 야간	1	틀
25	분기기부설	50kg, #10(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
26	분기기부설	50kg, #10(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
27	분기기부설	50kg, #12(PCT), 기계화, 주간	1	틀
28	분기기부설	50kg, #12(PCT), 기계화, 야간	1	틀
29	분기기부설	50kg, #12(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
30	분기기부설	50kg, #12(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
31	분기기부설	50kg, #15(PCT), 기계화, 주간	1	틀
32	분기기부설	50kg, #15(PCT), 기계화, 야간	1	틀
33	분기기부설	50kg, #15(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
34	분기기부설	50kg, #15(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
35	분기기부설	60kg, #8(PCT), 기계화, 주간	1	틀
36	분기기부설	60kg, #8(PCT), 기계화, 야간	1	틀
37	분기기부설	60kg, #8(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
38	분기기부설	60kg, #8(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
39	분기기부설	60kg, #10(PCT), 기계화, 주간	1	틀
40	분기기부설	60kg, #10(PCT), 기계화, 야간	1	틀
41	분기기부설	60kg, #10(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
42	분기기부설	60kg, #10(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
43	분기기부설	60kg, #12(PCT), 기계화, 주간	1	틀
44	분기기부설	60kg, #12(PCT), 기계화, 야간	1	틀
45	분기기부설	60kg, #12(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
46	분기기부설	60kg, #12(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
47	분기기부설	60kg, #15(PCT), 기계화, 주간	1	틀
48	분기기부설	60kg, #15(PCT), 기계화, 야간	1	틀
49	분기기부설	60kg, #15(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
50	분기기부설	60kg, #15(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
51	분기기부설	50kg, WT, 주간	1	틀
52	분기기부설	50kg, WT, 야간	1	틀
53	분기기부설	50kg, WT, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
54	분기기부설	50kg, WT, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
55	신축이음매부설	편단신축, 주간	1	틀
56	신축이음매부설	편단신축, 야간	1	틀
57	신축이음매부설	편단신축, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
58	신축이음매부설	편단신축, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
59	신축이음매부설	양단신축, 주간	1	틀
60	신축이음매부설	양단신축, 야간	1	틀
61	신축이음매부설	양단신축, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
62	신축이음매부설	양단신축, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
63	신축이음매철거	편단신축, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
64	신축이음매철거	편단신축, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
65	가스압접	50kg, 문형크레인	1	개소
66	가스압접	60kg, 문형크레인	1	개소
67	경두레일후열처리	주간	1	개소
68	테르미트용접	50kg, 주간	1	개소
69	테르미트용접	50kg, 야간	1	개소
70	테르미트용접	50kg, 야간(사용중지 3시간)	1	개소
71	테르미트용접	50kg, 야간(사용중지 4시간)	1	개소
72	테르미트용접	50kg, 야간(1개소)	1	개소
73	테르미트용접(경두)	50kg, 주간	1	개소
74	테르미트용접(경두)	50kg, 야간	1	개소
75	테르미트용접(경두)	50kg, 야간(사용중지 3시간)	1	개소
76	테르미트용접(경두)	50kg, 야간(사용중지 4시간)	1	개소
77	테르미트용접(경두)	50kg, 야간(1개소)	1	개소
78	테르미트용접	60kg, 주간	1	개소
79	테르미트용접	60kg, 야간	1	개소
80	테르미트용접	60kg, 야간(사용중지 3시간)	1	개소
81	테르미트용접	60kg, 야간(사용중지 4시간)	1	개소
82	테르미트용접	60kg, 야간(1개소)	1	개소
83	테르미트용접(경두)	60kg, 주간	1	개소
84	테르미트용접(경두)	60kg, 야간	1	개소
85	테르미트용접(경두)	60kg, 야간(사용중지 3시간)	1	개소
86	테르미트용접(경두)	60kg, 야간(사용중지 4시간)	1	개소
87	테르미트용접(경두)	60kg, 야간(1개소)	1	개소
88	테르미트용접(UIC)	60kg, 야간(사용중지 3시간)	1	개소
89	테르미트용접(UIC)	60kg, 야간(사용중지 4시간)	1	개소
90	장대레일재설정	인장기, 주간	1	km
91	장대레일재설정	인장기, 야간	1	km
92	장대레일재설정	인장기, 야간(사용중지 3시간)	1	km
93	장대레일재설정	인장기, 야간(사용중지 4시간)	1	km
94	장대레일재설정	자연대기온도법, 주간	1	km
95	장대레일재설정	자연대기온도법, 야간	1	km
96	장대레일재설정	자연대기온도법, 야간(사용중지 3시간)	1	km
97	장대레일재설정	자연대기온도법, 야간(사용중지 4시간)	1	km
98	장대레일재설정	가열기, 주간	1	km
99	장대레일재설정	가열기, 야간	1	km
100	장대레일재설정	가열기, 야간(사용중지 3시간)	1	km
101	장대레일재설정	가열기, 야간(사용중지 4시간)	1	km
102	궤광철거	37kg, 기계화, WT, 주간	1	km
103	궤광철거	37kg, 기계화, WT, 야간	1	km
104	궤광철거	37kg, 기계화, WT, 야간(사용중지 3시간)	1	km
105	궤광철거	37kg, 기계화, WT, 야간(사용중지 4시간)	1	km
106	궤광철거	37kg, 기계화, PCT, 주간	1	km
107	궤광철거	37kg, 기계화, PCT, 야간	1	km
108	궤광철거	37kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 3시간)	1	km
109	궤광철거	37kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 4시간)	1	km
110	궤광철거	37kg, 기계화, 교량(터널), 주간	1	km
111	궤광철거	37kg, 기계화, 교량(터널), 야간	1	km
112	궤광철거	37kg, 기계화, 교량(터널), 야간(사용중지 3시간)	1	km
113	궤광철거	37kg, 기계화, 교량(터널), 야간(사용중지 4시간)	1	km
114	궤광철거	50kg, 기계화, WT, 주간	1	km
115	궤광철거	50kg, 기계화, WT, 야간	1	km
116	궤광철거	50kg, 기계화, WT, 야간(사용중지 3시간)	1	km
117	궤광철거	50kg, 기계화, WT, 야간(사용중지 4시간)	1	km
118	궤광철거	50kg, 기계화, PCT, 주간	1	km
119	궤광철거	50kg, 기계화, PCT, 야간	1	km
120	궤광철거	50kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 3시간)	1	km
121	궤광철거	50kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 4시간)	1	km
122	궤광철거	50kg, 기계화, 교량(터널), 주간	1	km
123	궤광철거	50kg, 기계화, 교량(터널), 야간	1	km
124	궤광철거	50kg, 기계화, 교량(터널), 야간(사용중지 3시간)	1	km
125	궤광철거	50kg, 기계화, 교량(터널), 야간(사용중지 4시간)	1	km
126	궤광철거	60kg, 기계화, PCT, 주간	1	km
127	궤광철거	60kg, 기계화, PCT, 야간	1	km
128	궤광철거	60kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 3시간)	1	km
129	궤광철거	60kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 4시간)	1	km
130	분기기철거	#8, 기계화, 주간	1	틀
131	분기기철거	#8, 기계화, 야간	1	틀
132	분기기철거	#8, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
133	분기기철거	#8, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
134	분기기철거	#10, 기계화, 주간	1	틀
135	분기기철거	#10, 기계화, 야간	1	틀
136	분기기철거	#10, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
137	분기기철거	#10, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
138	분기기철거	#12, 기계화, 주간	1	틀
139	분기기철거	#12, 기계화, 야간	1	틀
140	분기기철거	#12, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
141	분기기철거	#12, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
142	분기기철거	#15, 기계화, 주간	1	틀
143	분기기철거	#15, 기계화, 야간	1	틀
144	분기기철거	#15, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
145	분기기철거	#15, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
146	레일교환(인력)	50kg(WT), 인력, 주간	1	km
147	레일교환(인력)	50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	km
148	레일교환(인력)	50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	km
149	레일교환(인력)	50kg(PCT), 인력, 주간	1	km
150	레일교환(인력)	50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	km
151	레일교환(인력)	50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	km
152	레일교환(인력)	50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	km
153	레일교환(인력)	50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	km
154	레일교환(인력)	50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	km
155	레일교환(인력)	50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	km
156	레일교환(인력)	60kg(WT), 인력, 주간	1	km
157	레일교환(인력)	60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	km
158	레일교환(인력)	60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	km
159	레일교환(인력)	60kg(PCT), 인력, 주간	1	km
160	레일교환(인력)	60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	km
161	레일교환(인력)	60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	km
162	레일교환(인력)	60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	km
163	레일교환(인력)	60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	km
164	레일교환(인력)	60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	km
165	레일교환(인력)	60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	km
166	레일교환	WT, 기계화, 주간	1	km
167	레일교환	WT, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	km
168	레일교환	WT, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	km
169	레일교환	WT, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	km
170	레일교환	PCT, 기계화, 주간	1	km
171	레일교환	PCT, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	km
172	레일교환	PCT, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	km
173	레일교환	PCT, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	km
174	레일교환	교량, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	km
175	레일교환	교량, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	km
176	레일교환	교량, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	km
177	레일교환	터널, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	km
178	레일교환	터널, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	km
179	레일교환	터널, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	km
180	침목교환(인력)	WT→WT, 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	개
181	침목교환(인력)	WT→WT, 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	개
182	침목교환(인력)	WT→PCT, 인력, 주간	1	개
183	침목교환(인력)	WT→PCT, 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	개
184	침목교환(인력)	WT→PCT, 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	개
185	침목교환(인력)	PCT→PCT, 인력, 주간	1	개
186	침목교환(인력)	PCT→PCT, 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	개
187	침목교환(인력)	PCT→PCT, 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	개
188	침목교환(인력)	교량, 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	개
189	침목교환(인력)	교량, 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	개
190	침목교환	WT→WT, 기계화, 주간	1	개
191	침목교환	WT→WT, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	개
192	침목교환	WT→WT, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	개
193	침목교환	WT→WT, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	개
194	침목교환	WT→PCT, 기계화, 주간	1	개
195	침목교환	WT→PCT, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	개
196	침목교환	WT→PCT, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	개
197	침목교환	WT→PCT, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	개
198	침목교환	PCT→PCT, 기계화, 주간	1	개
199	침목교환	PCT→PCT, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	개
200	침목교환	PCT→PCT, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	개
201	침목교환	PCT→PCT, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	개
202	침목교환	교량, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	개
203	침목교환	교량, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	개
204	침목교환	교량, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	개
205	침목교환	터널(WT→WT), 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	개
206	침목교환	터널(WT→WT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	개
207	침목교환	터널(WT→PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	개
208	침목교환	터널(WT→PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	개
209	침목교환	터널(PCT→PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	개
210	침목교환	터널(PCT→PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	개
211	분기기교환(인력)	#8, 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
212	분기기교환(인력)	#8, 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
213	분기기교환(인력)	#10, 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
214	분기기교환(인력)	#10, 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
215	분기기교환(인력)	#12, 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
216	분기기교환(인력)	#12, 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
217	분기기교환(인력)	#15, 인력, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
218	분기기교환(인력)	#15, 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
219	분기기교환	#8, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	개
220	분기기교환	#8, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
221	분기기교환	#8, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
222	분기기교환	#10, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	틀
223	분기기교환	#10, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
224	분기기교환	#10, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
225	분기기교환	#12, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	틀
226	분기기교환	#12, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
227	분기기교환	#12, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
228	분기기교환	#15, 기계화, 주간(사용중지 4시간)	1	틀
229	분기기교환	#15, 기계화, 야간(사용중지 3시간)	1	틀
230	분기기교환	#15, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	틀
231	텅레일교환	50kg(WT), 주간	1	개
232	텅레일교환	50kg(WT), 야간	1	개
233	텅레일교환	50kg(WT), 야간(사용중지 3시간)	1	개
234	텅레일교환	50kg(WT), 야간(사용중지 4시간)	1	개
235	크로싱교환	50kg PS,NS → 50kg Mn	1	틀
236	궤도정정(1m미만)	기계화, 야간	1	km
237	궤도이설(1~3m)	기계화, 야간	1	km
238	차막이설치(레일식)	1선식	1	조
239	레일당기기	야간(사용중지 4시간)	1	km
240	레일바꿔 놓기(인력)	50kg(PCT), 야간(사용중지 4시간)	1	km
241	레일바꿔 놓기(인력)	60kg(PCT), 야간(사용중지 4시간)	1	km
242	레일절단	50kg	1	개소
243	레일절단	60kg	1	개소
244	레일천공	37~60kg	1	공
245	침목천공	침목 개소 당(8개소)	1	침목
246	나사스파이크 조임 및 해체	침목 개소 당(8개소)	1	침목
247	자갈도상 인력다지기	타이탬퍼	1	㎥
248	교상가드레일 설치	주간	1	km
249	교상가드레일 설치	야간	1	km
250	교상가드레일 설치	야간(사용중지 4시간)	1	km
251	교상가드레일 철거	주간	1	km
252	교상가드레일 철거	야간	1	km
253	교상가드레일 철거	야간(사용중지 4시간)	1	km
254	가드레일부설	주간	1	m
255	가드레일부설	야간	1	m
256	가드레일철거	주간	1	m
257	가드레일철거	야간	1	m
258	교량침목고정장치 설치(철거)	설치 또는 철거, 주간	1	개
259	교량침목고정장치 설치(철거)	설치 또는 철거, 야간	1	개
260	교량침목 하부패킹	침목제작설치 기계화 주간	1	개
261	목침목탄성체결구 설치(철거)	설치 또는 철거, 주간	1	침목
262	목침목탄성체결구 설치(철거)	설치 또는 철거, 야간	1	침목
263	타이플레이트 설치(철거)	설치 또는 철거, 타공사 병행, 주간	1	개
264	타이플레이트 설치(철거)	설치 또는 철거, 타공사 병행, 야간	1	개
265	이음매판 설치(철거)	설치 또는 철거, 주간	1	개소
266	이음매판 설치(철거)	설치 또는 철거, 야간	1	개소
267	건널목 널깔기	1선식 폭 2m까지	1	개소
268	건널목 널깔기	1선식 폭 2m이상 1m증가시	1	개소
269	건널목 널철거	1선식 폭 2m까지	1	개소
270	건널목 널철거	1선식 폭 2m이상 1m증가시	1	개소
271	건널목 고무보판설치	WT, 인력, 주간	1	조
272	건널목 고무보판설치	WT, 인력, 야간(사용중지 4시간)	1	조
273	건널목 고무보판설치	PCT, 기계화, 주간	1	조
274	건널목 고무보판설치	PCT, 기계화, 야간(사용중지 4시간)	1	조
275	재료 상하차	기계, 레일, 분기기, 신축 등	1	톤
276	침목(WT,PCT) 상하차	백호우	1	개
277	침목(WT,PCT) 운반배열	백호우 주간	1	개
278	침목(WT,PCT) 운반배열	백호우 야간	1	개
279	자갈살포	자갈화차, 주간	1	㎥
280	자갈살포	자갈화차, 야간	1	㎥
281	자갈살포	자갈화차, 야간(사용중지 3~4시간)	1	㎥
282	자갈고르기	기계화, 주간	1	㎥
283	자갈고르기	기계화, 야간	1	㎥
284	자갈고르기	자갈화차, 야간(사용중지 3~4시간)	1	㎥
285	도상자갈철거	주간	1	㎥
286	도상자갈철거	야간(사용중지 3시간)	1	㎥
287	도상자갈철거	야간(사용중지 4시간)	1	㎥
288	분기기 도상자갈철거	인력 70%, 장비 30%, 야간(사용중지 4시간)	1	㎥
289	도상자갈 치환	인력, 야간(사용중지 4시간)	1	㎥
290	자갈정리(폭 1.5m 기준)	인력, 주간	1	m
291	자갈정리(폭 1.5m 기준)	인력, 야간	1	m
292	침목위치정정	주간	1	개
293	침목위치정정	야간	1	개
294	자갈도상 인력다지기	타이탬퍼, 야간	1	㎥
295	궤간정정(목침목, 한쪽당)	인력, 주간	1	침목
296	궤간정정(목침목, 한쪽당)	인력, 야간	1	침목
297	면맞춤(한쪽만)	인력, 주간	1	침목
298	줄맞춤(양쪽)	인력, 주간	1	m
299	줄맞춤(양쪽)	인력, 야간	1	m
300	총다지기(양쪽)	인력, 주간	1	침목
301	총다지기(양쪽)	인력, 야간	1	침목
302	나사스파이크보수	파워렌치, 주간	1	개
303	나사스파이크보수	파워렌치, 야간	1	개
304	분기기궤간 및 줄맞춤	인력, 주간	1	침목
305	분기기궤간 및 줄맞춤	인력, 야간	1	침목
306	분기기 고저정정	인력, 주간	1	침목
307	분기기 고저정정	인력, 야간	1	침목
308	배수로정비	인력, 주간	1	㎥
309	배수로정비	기계화, 주간	1	㎥
310	유간정정	인력, 주간	1	m
311	유간정정	인력, 야간	1	m
312	분기침목 교환	주간, 총다지기 안 할 경우	1	개소
313	분기침목 교환	야간, 총다지기 안 할 경우	1	개소
314	교상발판 부설	-	1	m
315	분니제거	열차빈도 19회이상, 인력, 주간	1	㎥
316	폐기물처리(폐유,고상)	30km이하	1	ton
317	예초	벌목 30%, 예초 70%, 주간	1	㎡
318	레일앵커 철거	야간	1	개
319	조명설비	야간	1	시간
320	WT포장덮기	WT 100개 기준, 주간	1	개소
321	모타카경비	주간	1	시간
322	모타카경비	야간	1	시간
323	모타카경비	철도공사제공장비, 주간	1	시간
324	모타카경비	철도공사제공장비, 야간	1	시간
325	운행선 안전관리자	주간	1	인
326	운행선 안전관리자	야간	1	인
327	열차감시원 배치	주간	1	인
328	열차감시원 배치	야간(사용중지 3시간)	1	인
329	열차감시원 배치	야간(사용중지 4시간)	1	인
330	테르미트용접((Smartweid jet)	50kg, 야간(Smartweid jet)	1	개소

8. 지 급 자 재 조서

자재번호	자재내역	단위	수량	단가	금액	인도지	기사
	합 계
1072636	철도용탄성분기기:KRCS 9801 PC침목용 60KG 침목포함 #8 좌	set	1			해당역
1100575	철도용탄성분기기:KRCS 9801 06 #10 우 건널선 60kg PC침목용 31,802㎜ 401㎜ 1,713㎜ (PC침목 기본 66개 포함)	set	2			해당역
1072640	철도용탄성분기기: KRCS 9801 12# 좌 60KG PC침목용 37,877㎜ 401㎜ 1,708㎜ PC침목 기본75개포함	set	1			해당역
1072642	철도용탄성분기기: KRCS 9801 12# 우 60KG PC침목용 37,877㎜ 401㎜ 1,708㎜ PC침목 기본75개 포함	set	1			해당역
1077725	철도용레일:KSR9106 25.0M 60kg KR	개	48			해당역
1013937	철도용중계레일:KRS TR 0003-07R 10.0M 단조품 60-50㎏ 단조품	개	10			해당역
1013899	철도용절연레일:KRS TR 0004-07R 6.0M 60㎏ K 접착식	개	2			해당역
1013900	철도용절연레일:KRS TR 0004-07R 12.0M 60㎏ K 접착식	개	22			해당역
1017936	철도용콘크리트침목:KRS TR 0008-07R 코일스프링절연숄더 60㎏ 90년	개	1290			해당역
1067820	철도용코일스프링클립:KRS TR 0014 09 50-60KG PC침목용	개	5160			해당역
1071242	철도용절연블럭:KRS TR 0014 60㎏ E-클립용 T8㎜	개	5160			해당역
1078736	철도용레일패드:KRS TR 0014 PC침목용 60KG E-크립	개	2580			해당역
1013954	철도용철도용이음매판:철도용이음매판:이음매판KRCSA001레일용60㎏	set	52			해당역
1016994	철도용사각머리볼트:사각머리볼트:사각볼트 KRCS A004 03 납짝형 14㎜ 60kg 이음매판용 볼트너트 130㎜ 20㎜ 45㎜	개	156			해당역
1017312	철도용스프링와셔:스프링와셔:스프링와샤 KRCS A003 04 135㎜ 20㎜ 45mm 1종	개	156			해당역
1041696	철도용자갈:자갈:도상자갈 (깬자갈) 22.4-63㎜	㎥	2327.36			해당역

9. 철거발생품 예정조서

자재번호	자 재 내 역	단위	수량	발 생 내 역						기사
				사용가능	사용가능 (충용)	사용가능 (공단이관)	사용불가 (폐기)	사용불가 (매각)	사용불가 (감손)
1029362	레일 50㎏ 각종 헌레일 3m이상 불용품	m	864	-	-	-		864	-
1029363	레일 60㎏ 각종 헌레일 3m이상 불용품	m	228	-	-	-		228
1014367	신축이음매장치 50kg 편단WT	set	2	-	-	-	-	2	-
7019195	헌 콘크리트침목(PC침목) 불용품 각종	개	870	-	-	-	870	-	-
1067820	코일스프링클립 50-60KG PC침목용	개	3,480					3,480
1067820	절연블럭 50kg T8㎜ e-크립용	개	3,480				3,480
1078735	레일패드 PC침목용 50KG E-크립용 TPU재질	개	1,740				1,740
	철도용분기기:8# 50kg 목침목용	틀	1				1
	철도용분기기:8# 60kg 목침목용	틀	2				2
	철도용분기기:10# 60kg 목침목용	틀	1				1
	철도용분기기:12# 60kg 목침목용	틀	1				1