		2020년도
		공사코드 : KR-CJD-20-001
		공 사 명 : 전라선 관촌~임실역간 용암터널(상,하) 궤도구조개량 기타공사
						설 계 서
						담당자		선로팀장			시설처장				본부장
						시설기술팀장 :					설계심사자 :
한국철도공사 전북본부장

		2019년도
		공사코드 : KR-CJD-20-001
		인 가 : 제 2020 - 호 2020년 월 일
	공 사 명 : 전라선 관촌~임실역간 용암터널(상,하) 궤도구조개량 기타공사
			설 계 서
		(회 계)
		예산관리센터)		5000680(전북-수탁(시설)-일반개량FC)
		사업코드)		C51213(시설유지-도상보수)
		약정항목)		51050251((일반개량)수선유지비-공비)

목 차
	1.	설 계 설 명 서	……………………………………………
	2.	공 사 시 방 서	……………………………………………
		일 반 시 방 서	……………………………………………
		특 별 시 방 서	……………………………………………
		안 전 시 방 서	……………………………………………
		기 타 시 방 서	……………………………………………
		안 전 계 약 특 수 조 건	……………………………………………
		시 설 공 사 계 약 특 수 조 건	……………………………………………
	3.	예 정 공 정 표	……………………………………………
	4.	설 계 예 산 내 역 서	……………………………………………
	5.	공 종 별 예 산 조 서	……………………………………………
	6.	지 급 자 재 조 서 서	……………………………………………
	7.	철 거 발 생 품 예 정 조 서	……………………………………………
	8.	철도공사제공기계기구 예정조서	……………………………………………
	9.	철 도 공 사 직 원 급 내 역 서	……………………………………………
	10.	예 계 개 소 별 명 세 표	……………………………………………

		1. 설 계 설 명 서
	가. 공 사 명 : 전라선 관촌~임실역간 용암터널(상,하) 궤도구조개량 기타공사 나. 위 치 - 전라선 관촌-임실(상,하) 50.073㎞부근 용암터널 다. 목 적 - 전라선 관촌-임실(상,하) 50.073㎞부근 용암터널내의 궤도구조(도상) 개량을 통한 궤도안정성을 확보하고 유지관리 효율성 제고 및 열차안전운행을 확보하기 위함 라. 공사개요 - 콘크리트도상화 0.720㎞ - 레일교환 0.950㎞ - 기타 부대공 1식 마. 시행방법 : 본 공사 시방서에 의거 시행 바. 공사기간 : 착공일로부터 293일간 사. 하자담보기간 및 담보율 : 레일용접(5년, 5%), 콘크리트직결도상(5년, 5%) 아. 하자담보금액 : 19,541,428원 자. 지체상금율 : 1/1,000/일 차. 기 타

(궤 도) 공 사 시 방 서

제1장 총칙

1-1 공사일반

1.1 적용범위

1.1.1 적 용

이 시방서는『전라선 관촌~임실역간 용암터널(상,하) 궤도구조개량 기타공사』에 의한 궤도구조 개량공사에 적용 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

1.1.2 공사 위치 및 대상

가. 전라선 관촌-임실(상) 50.052~50.552 (L=500m)

나. 전라선 관촌-임실(하) 50.062~50.549 (L=487m)

1.1.3 적용순서

가. 공사이행에 관하여 계약 당사자 간의 권리와 의무를 규정한 서면화된 계약문서는 다음과 같으며, 계약문서 간에 그 의미가 불분명하거나 상호모순이 있을 경우에 계약문서로서의 우선순위는 아래 순서에 따라 적용한다.

1) 계약서

2) 계약 일반조건 및 특수조건

3) 공사시방서

4) 설계도면

5) 산출내역서

6) 설계서 간에 상호 모순이 있을 경우 아래 순서에 따라 적용한다.

7) 현장설명서 및 질의응답서

8) 공시시방서

9) 설계도면

10) 산출내역서

11) 승인된 시공도면

12) 관련법령의 유권해석

13) 공사감독관의 지시사항

나. 이 시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용 간에 상호 모순이 있을 경우 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

1.1.4 적용상의 주의

가. 본 시방서의 적용에 있어서 자구(字句)에 구애됨이 없이 본 시방서에서 의도하는 바를 정확하게 파악하는 것이 중요하며 당해 공사의 교통조건, 자연조건, 현장 시공조건, 공사 후 유지보수의 난이도 등을 고려하여 공사업무지원관 및 감리원은 업무를 수행하여야 하며 수급인과 현장대리인은 불합리한 시공이 되지 않도록 공법을 협의하여 시공하여야 한다.

그 외 시방서 [별첨]

3. 예 정 공 정 표
공 사 종 류	단위	수 량	공 사 기 간 (293일)													기사
			25	50	75	100	125	150	175	200	225	225	250	275	293
준비작업	식	1
궤도작업 (레일교환, 재설정 등)	㎞	0.950
콘크리트도상화	㎞	0.720
뒷정리	식	1
			착공지정일로부터 293일간

4. 설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비
1	도급공사비	별봉
2	지급재료비(중앙조달)	별봉
3	지급재료비(전년도조달품)
4	지급재료비(중고품)
5	지급재료비(지방조달)
6	철도공사 제공기계기구 사용료	별봉
7	철도공사직원급	8,640,000
8	공사직원급 일반관리비
9	재료일반관리비
10	운송비
11	계약수수료
12	폐기물처리비	별봉

5. 공 종 별 예 산 조 서

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
□ 공사명 : 전라선 관촌~임실역간 용암터널(상,하) 궤도구조개량 기타공사
Ⅰ. 순공사원가	(재+노+경)
가. 직접공사비
가-1. 주요재료비
나. 노무비		1	식
나-1. 직접노무비		1	식
나-2. 간접노무비	직노의 13.0%	1	식
다. 경비		1	식
다-1. 산출경비		1	식
다-2. 산재보험료	노무비의 3.73%	1	식
다-3. 고용보험료	노무비의 0.87%	1	식
다-4. 건강보험료	직노의 3.335%	1	식
다-5. 연금보험료	직노의 4.5%	1	식
다-6. 노인장기요양보험료	건강보험료의 10.25%	1	식
다-7. 퇴직공제부금비	직노의 2.3%	1	식
다-8. 산업안전보건관리비	도급자관급 포함 : ⓐ와 ⓑ 중 적은금액 적용	1	식
ⓐ 의 경우	(재+직노+관급)X1.86%+5,349천원	1	식
ⓑ 의 경우	{(재+직노)X1.86%+5,349천원}x1.2	1	식
다-9. 건설기계대여대금지급보증서 발급	(재+직노+산경)의 0.16%	1	식
다-10. 환경보전비	(재+직노+산경)의 1.5%	1	식
다-11. 기타경비	(재+노)의 9.1%	1	식
Ⅱ. 측량비		1	식
Ⅲ. 운행선 안전관리자		1	식
Ⅳ. 일반관리비	(순공사원가+측량비+운행선안전관리자)의 5.0%	1	식
Ⅴ. 이윤	(노+경+측량비+운행선안전관리자+일)의 15%	1	식
Ⅵ. 공급가액	(재+노+경+일+이윤)	1	식
Ⅶ. 부가가치세	(공급가액)의 10.0%	1	식
Ⅷ. 도급금액
1.도상자갈철거		1	식
도상자갈철거(인력)	터널,야간(사용중지4시간)	290.38	㎥
도상자갈철거(기계)	터널,야간(사용중지4시간)	2613.44	㎥
배수로 뚜껑 열기 및 설치	야간(사용중지6시간)	932	m
배수로정비	인력,야간	28.94	㎥
모타카 경비	25톤,야간,모타카운전원 포함	875	시간
모타카 경비	철도공사제공장비,주간	350	시간
발생자갈 내리기 및 정리	기지,주간	2903.82	㎥
2.침목교환		1	식
침목교환	PCT→PCT,기계화,야간(사용중지 4시간)	222	개
침목교환	터널(PCT→PCT),기계화,야간(사용중지 4시간)	1304	개
자갈상차	로더,1.34㎥	2914.31	㎥
자갈살포고르기	야간(사용중지4시간)	703.89	㎥
자갈살포고르기	터널,야간(사용중지4시간)	1870.39	㎥
자갈살포	야간(사용중지3~4시간)	152.98	㎥
자갈살포	터널,야간(사용중지3~4시간)	187.05	㎥
자갈도상 인력다지기	중앙부,타이탬퍼,터널,야간	312.57	㎥
3.모르터 타설		1	식
유로폼 설치 및 해체	보통,H=0-7m,터널,야간(사용중지6시간)	924.04	㎡
합판거푸집 제작설치	4회,야간(사용중지6시간)	226.01	㎡
스틸그레이팅 설치	야간(사용중지6시간)	24	개소
부직포 설치	터널,야간(사용중지6시간)	8960	㎡
체결장치덮개제작, 거치 및 해체	야간(사용중지6시간)	0.72	km
모르터타설(바스콘 Basic)	터널,야간(사용중지6시간)	310.74	㎥
모르터타설(바스콘 MF-R)	터널,야간(사용중지6시간)	512.27	㎥
균열유도줄눈설치	야간(사용중지6시간)	0.717	km
신축이음설치	합판사용,야간(사용중지6시간)	39	개소
습윤양생	야간(사용중지6시간)	824.89	㎥
표면마무리	모르터타설후 표면마감,야간(사용중지6시간)	3253.9	㎡
콘크리트실링재코킹	야간(사용중지6시간)	1440	m
4.레일교환		1	식
레일교환	기계화,야간(사용중지4시간)	0.116	km
레일교환	기계화,터널,야간(사용중지4시간)	0.834	km
장대레일재설정	레일인장법,60kg,야간(사용중지4시간),R1200~R800	0.454	km
레일절단	60kg,야간(사용중지6시간)	80	개소
레일가스압접	60kg	56	개소
테르밋트 용접(외부검사비용포함)	60kg,야간(사용중지4시간)	24	개소
5.제표공사		1	식
선로제표설치	서행예고표,야간(사용중지6시간)	2	개소
선로제표설치	서행신호표,야간(사용중지6시간)	2	개소
선로제표설치	서행해제표,야간(사용중지6시간)	2	개소
선로제표설치	공사알림판,야간(사용중지6시간)	4	개소
6.부대공사		1	식
침목하화	침목,전진기지	1526	개
재료상하차	기계,레일,분기기,신축등,전진기지↔현장	1944.172	ton
침목상하차	기계	3155	개
레일체결장치상하차	e-clip,레일패드,절연블럭,ALT,전진기지↔현장	52.849	ton
휨강성보강레일설치	60kg,야간(사용중지6시간)	4	개소
굵은골재마모시험	10,000㎥마다	1	회
입도조립률시험	10,000㎥마다	1	회
압축강도시험	10,000㎥마다	1	회
잔골재 유기불순물시험	10,000㎥마다	1	회
단위용적질량시험	10,000㎥마다	1	회
유동성시험	KSF2402,1일타설량마다,야간	84	회
염화물함유량시험	KSF4009,1일타설량마다,야간	84	회
압축강도시험	KSF2405,1일타설량마다,야간	84	회
공시체제작	KSF2403,1일타설량마다,야간	84	회
레일용접부검사	레일직진도 검사기(디지털식)	80	개소
품질관리활동비		12	개월
콘테이너박스설치및철거	사무실용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월	2	동
콘테이너박스설치및철거	창고용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월	1	동
콘테이너박스설치및철거	시험실용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월	1	동
열차감시원 배치	주간	175	인
열차감시원 배치	야간	350	인
안전휀스 설치 및 철거	야간(사용중지6시간)	360	m
조명설비	야간	0.932	km
터널물청소	고압살수,야간(사용중지6시간)	0.466	km
자갈상차(재활용자갈)	로더,1.34㎥	871.15	㎥
모타카 경비(재활용자갈운반)	25톤,야간,모타카운전원 포함	75	시간
모타카 경비(재활용자갈)	철도공사제공장비,주간	30	시간
자갈살포(재활용자갈)	야간(사용중지4시간)	871.15	㎥
폐콘크리트상차비	폐콘크리트,15톤덤프,중간처리대상폐기물	191.784	ton
폐합성고무상차비	폐합성고무,16ton압롤트럭,매립지반입대상폐기물	0.866	ton
폐자갈상차비	15톤덤프,중간처리대상폐기물	2961.896	ton
7.사급자재		1	식
광폭침목	60kg,ALT-I용	1084	정
광폭침목	60kg,ALT-I용,접속부,콘크리트도상용	32	정
콘크리트침목	60kg,보강레일용 방진침목(C=0.24N/㎣, t=10mm)	132	개
레일체결장치	60kg,ALT-I용	2232	조
침목패드	방진침목용(C=0.24N/㎣, t=10mm)	132	개
세척자갈	22.4~63mm	2914.31	㎥
바스콘 MFR	25kg/포	1055280	kg
바스콘 Basic	25kg/포	640260	kg
8.측량비		1	식
선형측량	야간(사용중지6시간)	3.064	km
9.운행선안전관리자		1	식
전기안전관리자	야간	175	인
안전관리자	야간	175	인
철도운행안전관리자	주간	175	인
철도운행안전관리자	야간	175	인
10.지급자재		1	식
레일	60kg KR 25.0m	84	개
콘크리트침목	60㎏ 코일스프링 절연숄더	278	개
절연블럭	60kg T8㎜ e-클립용	6760	개
코일스프링클립	50-60kg PC침목용	6760	개
레일패드	60kg PC침목용 e-크립용 TPU재질	1148	개
11.폐기물처리		1	식
폐콘크리트처리		194.784	ton
폐합성고무처리	절연블럭,레일패드,매립대상	0.866	ton
폐자갈처리		2961.896	ton
12.철도공사제공기기계기구사용료		1	식
멀티플타이탬퍼	공사장비,MTT	2	일
밸러스트콤팩터	공사장비,CO	81	일
밸러스트레귤레이터	공사장비,RE	83	일
스위치타이탬퍼	공사장비,STT	83	일
자갈화차	30㎥,50톤	3785.46	㎥

6. 사 원 급 내 역 서

구 분	단위	수량	단가	금액	기사
합 계				8,640,000
공사감독여비	일	208	40,000	8,320,000	일비+식비
준공검사여비	일	8	40,000	320,000	일비+식비

7. 일 위 대 가 표

공 종 명	규 격	수 량	단 위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비고
#1 선형측량	야간(사용중지6시간)	1	km
#2 전기안전관리자	야간	1	인
#3 안전관리자	야간	1	인
#4 철도운행안전관리자	주간	1	인
#5 철도운행안전관리자	야간	1	인
#6 도상자갈철거(인력)	터널,야간(사용중지4시간)	1	㎥
#7 도상자갈철거(기계)	터널,야간(사용중지4시간)	1	㎥
#8 배수로 뚜껑 열기 및 설치	야간(사용중지6시간)	1	m
#9 배수로정비	인력,야간	1	㎥
#10 모타카 경비	25톤,야간,모타카운전원 포함	1	시간
#11 모타카 경비	철도공사제공장비,주간	1	시간
#12 침목교환	PCT→PCT,기계화,야간(사용중지 4시간)	1	개
#13 침목교환	터널(PCT→PCT),기계화,야간(사용중지 4시간)	1	개
#14 자갈상차	로더,1.34㎥	1	㎥
#15 자갈살포	야간(사용중지3~4시간)	1	㎥
#16 자갈살포	터널,야간(사용중지3~4시간)	1	㎥
#17 자갈도상 인력다지기	중앙부,타이탬퍼,터널,야간	1	㎥
#18 유로폼 설치 및 해체	보통,H=0-7m,터널,야간(사용중지6시간)	1	㎡
#19 합판거푸집 제작설치	4회,야간(사용중지6시간)	1	㎡
#20 스틸그레이팅 설치	야간(사용중지6시간)	1	개소
#21 부직포 설치	터널,야간(사용중지6시간)	1	㎡
#22 체결장치덮개제작, 거치 및 해체	야간(사용중지6시간)	1	km
#23 모르터타설	터널,야간(사용중지6시간)	1	㎥
#24 신축이음설치	합판사용,야간(사용중지6시간)	1	개소
#25 습윤양생	야간(사용중지6시간)	1	㎥
#26 표면마무리	모르터타설후 표면마감,야간(사용중지6시간)	1	㎡
#27 콘크리트실링재코킹	야간(사용중지6시간)	1	m
#28 레일교환	기계화,야간(사용중지 4시간)	1	km
#29 레일교환	기계화,터널,야간(사용중지 4시간)	1	km
#30 레일절단	60kg,야간(사용중지6시간)	1	개소
#31 레일가스압접	60kg	1	개소
#32 테르밋트 용접(외부검사비용포함)	60kg,야간(사용중지4시간)	1	개소
#33 선로제표설치	서행예고표,야간(사용중지6시간)	1	개소
#34 선로제표설치	서행신호표,야간(사용중지6시간)	1	개소
#35 선로제표설치	서행해제표,야간(사용중지6시간)	1	개소
#36 선로제표설치	공사알림판,야간(사용중지6시간)	1	개소
#37 침목하화(PCT)	전진기지	1	개
#38 레일체결장치상하차	e-clip,레일패드,절연블럭,ALT,전진기지↔현장	1	ton
#39 굵은골재마모시험	10,000㎥마다	1	회
#40 입도,조립률시험	10,000㎥마다	1	회
#41 압축강도시험	10,000㎥마다	1	회
#42 잔골재 유기불순물시험	10,000㎥마다	1	회
#43 단위용적질량시험	10,000㎥마다	1	회
#44 유동성시험	KSF2402,1일타설량마다,야간	1	회
#45 염화물함유량시험	KSF4009,1일타설량마다,야간	1	회
#46 압축강도시험	KSF2405,1일타설량마다,야간	1	회
#47 공시체제작	KSF2403,1일타설량마다,야간	1	회
#48 레일용접부검사	레일직진도 검사기(디지털식)	1	개소
#49 품질관리활동비		1	개월
#50 콘테이너박스설치및철거	사무실용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월	1	동
#51 콘테이너박스설치및철거	창고용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월	1	동
#52 콘테이너박스설치및철거	시험실용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월	1	동
#53 열차감시원 배치	주간	1	인
#54 열차감시원 배치	야간	1	인
#55 안전휀스 설치 및 철거	야간(사용중지6시간)	1	m
#56 조명설비	야간	1	km
#57 터널물청소	고압살수,야간(사용중지6시간)	1	km
#58 자갈마대 내리기		1	㎥
#59 발생자갈 정리	로더	1	㎥
#60 자갈고르기	야간(사용중지3~4시간)	1	㎥
#61 자갈고르기	터널,야간(사용중지3~4시간)	1	㎥
#62 잡철물 제작	알루미늄강용	1	ton
#63 균열유도줄눈설치	H=20∼30㎜,야간(사용중지6시간)	1	km
#64 균열유도줄눈채움	실링재,야간(사용중지6시간)	1	km
#65 장대레일재설정	레일인장법,야간(사용중지4시간)	1	km
#66 테르밋트 용접	60kg,야간(사용중지4시간)	1	개소
#67 궤광조립	체결장치배열 및 체결,야간(사용중지6시간)	1	개
#68 전력요금	일반용전력(갑Ⅰ,저압전력 적용)	1	㎾h
#69 전력요금	산업용전력(갑,고압A적용)	1	㎾h
No.1 폐콘크리트처리		1	ton
No.2 폐합성고무처리	절연블럭,레일패드,매립대상	1	ton
No.3 폐자갈처리		1	ton
No.4 발생자갈 내리기 및 정리	기지,주간	1	㎥
No.5 자갈살포고르기	야간(사용중지4시간)	1	㎥
No.6 자갈살포고르기	터널,야간(사용중지4시간)	1	㎥
No.7 균열유도줄눈설치	야간(사용중지6시간)	1	km
No.8 장대레일재설정	레일인장법,60kg,야간(사용중지4시간),R1200~R800	1	km
No.9 재료 상하차	기계,레일,분기기,신축등,전진기지↔현장	1	ton
No.10 침목상하차	백호,PCT,광폭침목,전진기지↔현장	1	개
No.11 휨강성보강레일설치	60kg,야간(사용중지6시간)	1	개소
No.12 품질검사비	기타비용	1	식

8. 지 급 자 재 조서

자재번호	자재내역	단위	수량	단가	금액	인도지	기사
	합 계
1013931	철도용레일:레일 60㎏ 25.0m	개	84			해당역
1017936	철로용침목:콘크리트침목 KRS TR 0008 코일스프링절연숄더 60㎏ 90년 2400㎜ 200㎜ 265㎜	개	278			해당역
1071242	철도용콘크리트침목체결구:절연블럭 KRS TR 0014 60kg 8MM e클립용	개	6,760			해당역
1014002	철도용코일스프링클립:코일스프링클립 KRS TR 0010 50-60㎏ PC침목용	개	6,760			해당역
1078736	철도용타이패드:레일패드KRSTR0014PC침목용60KGE-크립용 TPU재질 160㎜ 6㎜ 158㎜	개	1,148			해당역

9. 철거발생품 예정조서

자재번호	자 재 내 역	단위	수량	발 생 내 역						기사
				사용가능	사용가능 (충용)	사용가능 (공단이관)	사용불가 (폐기)	사용불가 (매각)	사용불가 (감손)
1013931	철도용레일:레일 60㎏ 25.0m	개	76	40	36	-	-	-	-
1017936	철로용침목:콘크리트침목 KRS TR 0008 코일스프링절연숄더 60㎏ 90년 2400㎜ 200㎜ 265㎜	개	1,629	843	786	-	-	-	-
1071242	철도용콘크리트침목체결구:절연블럭 KRS TR 0014 60kg 8MM e클립용	개	3,258	-	3,258	-	-	-	-
1014002	철도용코일스프링클립:코일스프링클립 KRS TR 0010 50-60㎏ PC침목용	개	6,516	-	6,516	-	-	-	-
1078736	철도용타이패드:레일패드KRSTR0014PC침목용60KGE-크립용 TPU재질 160㎜ 6㎜ 158㎜	개	3,258	-	3,258	-	-	-	-