		2020년도
		공사코드 : KR-CHD-20-008
		공 사 명 : 경부선 세천~옥천역간 증약터널(하선) 궤도구조개량 기타공사
						설 계 서
						담당자		선로팀장			시설처장				본부장
						시설기술팀장 :					설계심사자 :
한국철도공사 대전충남본부 시설처장

		2020년도
		공사코드 : KR-CHD-20-008
		인 가 : 제 2020 - 호 2020년 월 일
	공 사 명 : 경부선 세천~옥천역간 증약터널(하선) 궤도구조개량 기타공사
			설 계 서
		(회 계)
		예산관리센터)		5000351(대전충남-수탁(시설)-일반개량FC)
		사업코드)		C42016(시설개량-시설-선로시설개량)
		약정항목)		51050251(일반개량-수선유지비-공비)

목 차
	1.	설 계 설 명 서	……………………………………………
	2.	공 사 시 방 서	……………………………………………
		일 반 시 방 서	……………………………………………
		특 별 시 방 서	……………………………………………
		안 전 시 방 서	……………………………………………
		기 타 시 방 서	……………………………………………
		안 전 계 약 특 수 조 건	……………………………………………
		시 설 공 사 계 약 특 수 조 건	……………………………………………
	3.	예 정 공 정 표	……………………………………………
	4.	설 계 예 산 내 역 서	……………………………………………
	5.	공 종 별 예 산 조 서	……………………………………………
	6.	지 급 자 재 조 서 서	……………………………………………
	7.	철 거 발 생 품 예 정 조 서	……………………………………………
	8.	철도공사제공기계기구 예정조서	……………………………………………
	9.	철 도 공 사 직 원 급 내 역 서	……………………………………………
	10.	예 계 개 소 별 명 세 표	……………………………………………

		1. 설 계 설 명 서
	가. 공 사 명 : 경부선 세천~옥천역간 증약터널(하선) 궤도구조개량 기타공사 나. 위 치 - 경부선 세천-옥천역간 증약터널(하선) 174.885㎞부근 다. 목 적 - 경부선 세천~옥천역간 174.885부근 증약터널(하선)내의 궤도구조(도상) 개량을 통한 궤도안정성을 확보하고 유지관리 효율성 제고 및 열차안전운행을 확보하기 위함 라. 공사개요 - 콘크리트도상화 0.912㎞ - 레일교환 1.050㎞ - 기타 부대공 1식 마. 시행방법 : 본 공사 시방서에 의거 시행 바. 공사기간 : 착공일로부터 1년간 사. 하자담보기간 및 담보율 : 레일용접(5년, 5%), 콘크리트직결도상(5년, 5%) 아. 하자담보금액 : 레일용접 1,260,696원, 콘크리트직결도상 13,817,660원 자. 지체상금율 : 1/1,000/일 차. 기 타

(궤 도) 공 사 시 방 서

제1장 총칙

1-1 공사일반

1.1 적용범위

1.1.1 적 용

이 시방서는『경부선 세천~옥천역간 증약터널(하선) 궤도구조개량 기타공사』에 의한 궤도구조 개량공사에 적용 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

1.1.2 공사 위치 및 대상

가. 경부선 세천-옥천 증약터널(하선) 174.875-175.925 (L=1,050m)

1.1.3 적용순서

가. 공사이행에 관하여 계약 당사자 간의 권리와 의무를 규정한 서면화된 계약문서는 다음과 같으며, 계약문서 간에 그 의미가 불분명하거나 상호모순이 있을 경우에 계약문서로서의 우선순위는 아래 순서에 따라 적용한다.

1) 계약서

2) 계약 일반조건 및 특수조건

3) 공사시방서

4) 설계도면

5) 산출내역서

6) 설계서 간에 상호 모순이 있을 경우 아래 순서에 따라 적용한다.

7) 현장설명서 및 질의응답서

8) 공시시방서

9) 설계도면

10) 산출내역서

11) 승인된 시공도면

12) 관련법령의 유권해석

13) 공사감독관의 지시사항

나. 이 시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용 간에 상호 모순이 있을 경우 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

1.1.4 적용상의 주의

가. 본 시방서의 적용에 있어서 자구(字句)에 구애됨이 없이 본 시방서에서 의도하는 바를 정확하게 파악하는 것이 중요하며 당해 공사의 교통조건, 자연조건, 현장 시공조건, 공사 후 유지보수의 난이도 등을 고려하여 공사업무지원관 및 감리원은 업무를 수행하여야 하며 수급인과 현장대리인은 불합리한 시공이 되지 않도록 공법을 협의하여 시공하여야 한다.

그 외 시방서 [별첨]

3. 예   정   공   정   표

공 종	물량		예 정 공 정(개월)												비 고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공사준비	1	식													차단협의 재료수급
레일교환	1	km													200m/일
침목, 자갈갱환	1	km													10m/일
모르터 주입	0.912	km													15m/일
마무리 및 준공	1	km													준공검사 발생품 인계

4. 설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비
1	도급공사비	별봉
2	지급재료비(중앙조달)	별봉
3	지급재료비(전년도조달품)
4	지급재료비(중고품)
5	지급재료비(지방조달)
6	철도공사 제공기계기구 사용료	별봉
7	철도공사직원급	8,640,000
8	공사직원급 일반관리비
9	재료일반관리비
10	운송비
11	계약수수료
12	폐기물처리비	별봉

5. 공 종 별 예 산 조 서

공 종 명	규 격	수량	단위	합계		재료비		노무비		경비		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
총공사비		1	식
Ⅰ. 순 공 사 비
가. 공 사 비
Ⅰ.직접공사비		1	식
나. 간접노무비	직노×13.0%	1	식
다. 산재보험료	노무비×3.73%	1	식
라. 고용보험료	노무비×0.87%	1	식
마. 건강보험료	직노×3.335%	1	식
바. 연금보험료	직노×4.5%	1	식
사. 노인장기요양보험료	건보×10.25%	1	식
아. 퇴직공제부금비	직노×2.30%	1	식
자. 건설기계대여대금지급보증서발급금액	공사비×0.16%	1	식
차. 산업안전보건관리비	(재+직노)×1.86%×1.2	1	식
카. 기타 경비	(재+노)×9.1%	1	식
타. 환경보전비	공사비×1.5%	1	식
파. 전기철도안전관리자 배치	야간	216	인
하. 안전관리자 배치	야간	216	인
거. 철도운행안전관리자 배치	야간	216	인
Ⅱ. 일반 관리비	(재+노+경)×5.0%	1	식
Ⅲ. 이 윤	(노+경+일반관)×12.0%	1	식
Ⅴ. 공 급 가 액		1	식
Ⅵ. 부가 가치세	(Ⅵ+Ⅴ)×10%	1	식
Ⅵ. 도 급 금 액		1	식
Ⅱ.지급자재비		1	식
Ⅳ.기계구사용료		1	식
Ⅸ. 총 공 사 비		1	식
Ⅰ.직접공사비		1	식
1.신축이음매 철거		1	식
2.도상자갈철거		1	식
3.침목교환		1	식
4.도상콘크리트 타설		1	식
5.레일교환		1	식
6.제표공사		1	식
7.부대공사		1	식
8.사급자재		1	식
9.폐기물처리		1	식
1.신축이음매 철거		1	식
신축이음매철거	60kg,WT,양단신축(야간),사용중지4시간	1	틀
2.도상개량		1	식
도상자갈철거(기계)	야간 사용중지 4시간	132.951	㎥
도상자갈철거(기계)	야간 사용중지 4시간,터널	1885.15	㎥
모타카 경비	25톤,야간 사용중지 4시간,모타카운전원 포함	1080	시간
배수로 준설	야간 사용중지 4시간	69.173	m
배수로 준설	야간 사용중지 4시간,터널	980.827	m
배수로 뚜껑 철거 및 설치	야간 사용중지 4시간	69.173	m
배수로 뚜껑 철거 및 설치	야간 사용중지 4시간,터널	980.827	m
노반면 깍기	토사	550.461	㎥
무근콘크리트깨기	소형장비	44.1	㎥
3.침목교환		1	식
침목교환	기계화시공(PCT→PCT) 야간 사용중지 4시간	111	개
침목교환	기계화시공(PCT→PCT) 야간 사용중지 4시간,터널	1515	개
깬자갈상차	페이로다,1.34㎥	309.408	㎥
자갈살포	자갈화차(모타카) 야간 사용중지 4시간	165.168	㎥
자갈살포	자갈화차(모타카) 야간 사용중지 4시간,터널	144.24	㎥
궤도양로	자갈궤도,60kg,양로기,야간4시간사용중지	0.069	km
궤도양로	자갈궤도,60kg,양로기,야간4시간사용중지,터널	0.981	km
4.도상콘크리트 타설		1	식
합판거푸집 제작설치	6회,야간 사용중지 4시간,터널	139.356	㎡
부직포 설치	야간 사용중지 4시간,터널	4359.2	㎡
깬자갈상차	페이로다,1.34㎥	1433.04	㎥
자갈살포	자갈화차(모타카) 야간 사용중지 4시간,터널	1433.04	㎥
깬자갈다지기	야간 사용중지 4시간	165.168	㎥
깬자갈다지기	야간 사용중지 4시간,터널	1577.28	㎥
침목덮개제작, 거치 및 해체	야간 사용중지 4시간,터널	0.913	km
모르터주입	전기식,발전기사용,야간 사용중지 4시간,터널	477.997	㎥
균열유도줄눈설치	야간 사용중지 4시간,터널	0.679	km
신축이음설치	야간 사용중지 4시간,터널	22	개소
피막양생	야간 사용중지 4시간,터널	2655.8	㎡
스틸그레이팅 설치	300*500*44,야간 사용중지 4시간,터널	22	개소
5.레일교환		1	식
레일교환(PCT)	기계화시공,야간 사용중지 4시간	0.07	km
레일교환(PCT)	기계화시공,야간 사용중지 4시간,터널	0.981	km
레일절단	기계화시공(60kg), 야간 사용중지 4시간	4	개소
가스압접	60kg	62	개소
테르밋트 용접	60kg,일반, 야간 사용중지 4시간	23	개소
테르밋트 용접	60kg,열처리,야간 사용중지 4시간	1	개소
열처리레일후열처리	야간 사용중지 4시간	4	개소
6.제표공사		1	식
선로제표설치	서행예고신호기표	1	개소
선로제표설치	서행신호기표	1	개소
선로제표설치	서행해제신호기표	1	개소
7.부대공사		1	식
지반계측비	소형충격재하시험(LFWD)	9	개소
장대레일설정	레일인장법,야간 사용중지 4시간	0.2	km
장대레일설정	레일인장법,야간 사용중지 4시간, 터널	0.2	km
재료 상하차		283.963	ton
침목 상하차(WT,PCT)	백호	3279	개
휨강성보강레일설치	야간,사용중지4시간	2	개소
공기량시험	KSF 2409,1일 타설량마다	48	회
염화물시험	KSF 2402,1일 타설량마다	48	회
압축강도시험	KSF 2405,1일 타설량마다	48	회
공시체제작	KSF 2405,1일 타설량마다	48	회
유동성시험	KSF 2405,1일 타설량마다	48	회
굵은골재마모시험	10,000㎥마다	1	회
입도,조립률시험	10,000㎥마다	1	회
압축강도시험	10,000㎥마다	1	회
잔골재 유기불순물시험	10,000㎥마다	1	회
단위용적질량시험	10,000㎥마다	1	회
품질관리활동비		1	식
콘테이너박스설치및철거	사무실용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월	2	동
콘테이너박스설치및철거	창고용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월	1	동
조명설비	야간	1.05	km
열차감시원 배치	야간	216	인
폐침목상차비	콘크리트침목	40.26	ton
폐합성고무상차비	절연블럭,레일패드	0.889	ton
폐자갈상차	자갈섞인 토사	1558.28	ton
폐자갈운반	자갈섞인 토사,ℓ=30km,사토	1558.28	Ton
강판절단	6mm, 간단	1050	m
8.사급자재		1	식
광폭침목	KR60,ALT-I용	1390	개
레일체결장치	KR60,ALT-I용	2780	조
콘크리트침목	KR60,VIPA,접속부 자갈도상용	64	개
콘크리트침목	KR60,VIPA,접속부 콘크리트도상용	16	개
콘크리트침목체결구	KR60,VIPA,접속부 자갈도상용	128	조
콘크리트침목체결구	KR60,VIPA,접속부 콘크리트도상용	32	조
세척자갈	22.4~63mm	1742.45	㎥
바스콘 MFR	25kg/포	477.997	㎥
열연박판	6t,0.6m,배수로뚜껑	630	㎡
9.폐기물처리		1	식
폐침목처리	콘크리트침목	40.26	ton
폐합성고무처리	절연블럭,레일패드	0.889	ton
Ⅱ.지급자재비		1	식
레일	KR60,L=25m	85	개
레일	KR60,L=25m,HH370	3	개
콘크리트침목	KR60,일반용,절연숄더포함	156	개
콘크리트침목체결구	코일스프링크립식,절연블럭,KR60,8mm	6184	개
코일스프링크립	e2007	6184	개
레일패드	코일스프링크립식,KR60,PCT,TPU	312	개
부가가치세		10	%
Ⅳ.기계구사용료		1	식
스위치타이템퍼	공사장비,STT	105	일
자갈화차	300㎥,50톤	1742.45	㎥
부가가치세		10	%

6. 사 원 급 내 역 서

구 분	단위	수량	단가	금액	기사
합 계				12,480,000
공사감독여비	일	300	40,000	12,000,000	일비+식비
준공검사여비	일	12	40,000	480,000	일비+식비

7.  일 위 대 가 표

공종명	규격	수량	단위	합계	재료비	노무비	경비	비고
#1 측구터파기	토사	1	㎥
#2 헐기/부수기	소형장비	1	㎥
#3 깬자갈상차	페이로다,1.34㎥	1	㎥
#4 궤도양로	자갈궤도,60kg,양로기,야간4시간사용중지	1	km
#5 궤도양로	자갈궤도,60kg,양로기,야간4시간사용중지,터널	1	km
#6 품질관리활동비		1	식
#7 조명설비	야간	1	km
#8 폐기물상차	자갈섞인 토사	1	ton
#9 폐기물운반	자갈섞인 토사,ℓ=30km	1	Ton
#10 레일신축이음매장치 상차	양단	1	틀
#11 레일신축이음매장치 운반	양단,철거자재	1	틀
#12 레일신축이음매장치 하화	양단	1	틀
#13 배수로 준설		1	m
#14 배수로 뚜껑 철거 및 설치		1	m
#15 부직포 설치		1	㎡
#16 침목덮개제작, 거치 및 해체		1	km
#17 모르터주입	전기식,발전기사용	1	㎥
#18 균열유도줄눈설치	H=20∼30㎜	1	km
#19 균열유도줄눈채움	실링재	1	km
#20 신축이음설치	합판사용	1	개소
#21 스틸그레이팅 설치	300*1,000*44	1	개소
#22 전력요금	일반용전력	1	㎾h
#23 궤광조립	체결장치배열 및 체결	1	개
#24 레일침목위올리기	일반	1	km
No.1 전기안전관리자 배치	야간	1	인
No.2 안전관리자 배치	야간	1	인
No.3철도운행안전관리자 배치	야간	1	인
No.4 신축이음매철거	양단,야간4시간사용중지	1	틀
No.5 도상자갈철거(기계)	야간 사용중지 4시간	1	㎥
No.6 도상자갈철거(기계)	야간 사용중지 4시간,터널	1	㎥
No.7 모타카 경비	25톤, 야간	1	시간
No.8 배수로 준설	야간 사용중지 4시간	1	m
No.9 배수로 준설	야간 사용중지 4시간,터널	1	m
No.10 배수로 뚜껑 철거 및 설치	야간 사용중지 4시간	1	m
No.11 배수로 뚜껑 철거 및 설치	야간 사용중지 4시간,터널	1	m
No.12 침목교환	기계화시공(PCT→PCT) 야간 사용중지 4시간	1	개
No.13 침목교환	기계화시공(PCT→PCT) 야간 사용중지 4시간,터널	1	개
No.14 자갈살포	자갈화차(모타카) 야간 사용중지 4시간	1	㎥
No.15 자갈살포	자갈화차(모타카) 야간 사용중지 4시간,터널	1	㎥
No.16 합판거푸집 제작설치	6회,야간 사용중지 4시간,터널	1	㎡
No.17 부직포 설치	야간 사용중지 4시간,터널	1	㎡
No.18 깬자갈다지기	야간 사용중지 4시간,터널	1	㎥
No.19 침목덮개제작, 거치 및 해체	야간 사용중지 4시간,터널	1	km
No.20 모르터주입	전기식,발전기사용,야간 사용중지 4시간,터널	1	㎥
No.21 균열유도줄눈설치	야간 사용중지 4시간,터널	1	km
No.22 신축이음설치	야간 사용중지 4시간,터널	1	개소
No.23 피막양생	야간 사용중지 4시간,터널	1	㎡
No.24 스틸그레이팅 설치	300*1,000*44,야간 사용중지 4시간,터널	1	개소
No.25 레일교환(PCT)	기계화시공,야간 사용중지 4시간	1	km
No.26 레일교환(PCT)	기계화시공,야간 사용중지 4시간,터널	1	km
No.27 레일절단	기계화시공(60kg), 야간 사용중지 4시간	1	개소
No.28 가스압접	60kg	1	개소
No.29 테르밋트 용접	60kg,일반, 야간 사용중지 4시간	1	개소
No.30 테르밋트 용접	60kg,열처리,야간 사용중지 4시간	1	개소
No.31 열처리레일후열처리	야간 사용중지 4시간	1	개소
No.32 선로제표설치	서행예고신호기표	1	개소
No.33 선로제표설치	서행신호기표	1	개소
No.34 선로제표설치	서행해제신호기표	1	개소
No.35 장대레일설정	레일인장법,야간 사용중지 4시간	1	km
No.36 장대레일설정	레일인장법,야간 사용중지 4시간, 터널	1	km
No.37 재료 상하차	기계, 레일, 분기기, 신축 등	1	ton
No.38 침목 상하차(WT,PCT)	백호	1	개
No.39 휨강성보강레일설치	야간,사용중지4시간	1	개소
No.40 공기량시험	KSF 2409,1일 타설량마다,야간	1	회
No.41 염화물시험	KSF 2402,1일 타설량마다,야간	1	회
No.42 압축강도시험	KSF 2405,1일 타설량마다,야간	1	회
No.43 공시체제작	KSF 2405,1일 타설량마다,야간	1	회
No.44 유동성시험	KSF 2405,1일 타설량마다,야간	1	회
No.45 굵은골재마모시험	10,000㎥마다	1	회
No.46 입도,조립률시험	10,000㎥마다	1	회
No.47 압축강도시험	10,000㎥마다	1	회
No.48 잔골재 유기불순물시험	10,000㎥마다	1	회
No.49 단위용적질량시험	10,000㎥마다	1	회
No.50 콘테이너박스설치및철거	사무실용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월	1	동
No.51 콘테이너박스설치및철거	창고용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월	1	동
No.52 열차감시원 배치	야간	1	인
No.53 폐침목상차비	콘크리트침목	1	ton
No.54 폐합성고무상차비	절연블럭,레일패드	1	ton
No.55 강판절단	6mm, 간단	1	m
No.56 폐침목처리	콘크리트침목	1	ton
No.57 폐합성고무처리	절연블럭,레일패드	1	ton
No.58 궤광조립	야간 사용중지 4시간	1	개
No.59 레일침목위올리기	야간 사용중지 4시간	1	km
No.60 품질시험비		1	식

8.  지 급 자 재 조 서

자재내역	규격	수량	단위	재료비		인도지	비고
				단가	금액
레일	KR60,L=25m	85	개			해당역
레일	KR60,L=25m,HH370	3	개			해당역
콘크리트침목	KR60,일반용,절연숄더포함	156	개			해당역
콘크리트침목체결구	코일스프링크립식,절연블럭,KR60,8mm	6184	개			해당역
코일스프링크립	e2007	6184	개			해당역
레일패드	코일스프링크립식,KR60,PCT,TPU	312	개			해당역
	합 계

9. 철 거 발 생 품  예 정 조 서

번호	자재내역	규격	단위	수량	발생내역				비고
					계	사용가능		사용불가
						재사용	을종
1	레일	60kg, L=25m	개	80	80			80	전량병종
2	레일	60kg, L=24.85m, 이하	m	100	100			100	전량병종
3	콘크리트침목	60kg PCT 일반용	개	1,653	1,653		1,488	165	90%을종, 10%병종
4	레일패드	60kg, PCT	개	3,306	3,306			3,306	전량병종
5	절연블럭	60kg, PCT	개	6,612	6,612			6,612	전량병종
6	코일스프링크립	e2007(PCT용)	개	6,612	6,612			6,612	전량병종
7	신축이음매	WT, 양단	조	1	1			1	전량병종