	2020년도
	공 사 명 :	한국철도 대전충청본부 등 7개본부 레일연마 기타공사
			설 계 서
		담당자			선로팀장(심사)			시설처장		본부장
		시설기술팀장 :
						한국철도 대전충청본부장

	2020년도
	공사코드 : KR-CHF-20-163
	인 가 : 제2020 - 호 2020년 월 일
	공사명 : 한국철도 대전충청본부 등 7개본부 레일연마 기타공사
			설 계 서
	(회 계)
	예산관리센터)			5000349	[대전충청-수탁(시설)-일반유지FC]
	단위사업)			C51211	[시설유지-시설-레일보수]
	약정항목)			51030251	[(일반유지)수선유지비-공비]

	목 차
	1.	설계설명서	…………………………………	1
	2.	공사시방서	…………………………………	2
	3.	표준안전시방서	…………………………………	25
	4.	안전계약특수조건	…………………………………	46
	5.	공사계약특수조건	…………………………………	46
	6.	예정공정표	…………………………………	55
	7.	설계예산내역서	…………………………………	56
	8.	공종별예산조서	…………………………………	57
	9.	철도공사직원급내역서	…………………………………	59

1. 설  계  설  명  서

가. 공 사 명 : 한국철도 대전충청본부 등 7개본부 레일연마 기타공사

나. 위    치 : 한국철도 대전충청본부 관내

(수도권광역, 대전충청, 전북, 광주, 대구, 부산경남, 강원)

다. 목    적 : 레일 표면결함 연마 및 예방연마를 시행하여 궤도시설물의 사용수명 연장으로 유지보수 비용을 절감하고, 소음 및 진동 저감 등 승차감 향상과 열차의 주행안전성 확보

라. 공사개요 : 대전충청본부 등 7개지역본부 관내 레일연마

- 레일연마 : km

수도권광역본부		대전충청본부		전북본부		광주지역관리단		대구지역관리단
연장	수량	연장	수량	연장	수량	연장	수량	연장	수량
3.7	88.80	18.08	374.79	6.38	120.32	4.54	109.01	1.10	26.4
부산경남		강원본부		합계
연장	수량	연장	수량	연장			수량
4.1	74.40	11.45	91.57	49.350			885.288

마. 시행방법 : 본 공사 시방서에 의거 시행

바. 공사기간 : 착수지정일로부터 180일간

사. 기    타

		2. 공 사 시 방 서
	1. 총칙 가. (목 적) 이 시방서는 『한국철도 대전충청본부 등 7개본부 레일연마 기타공사』에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 나. (정 의) 이 시방서에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. ⑴ “감독자”란 공사 또는 용역의 감독업무를 담당하는 직원 또는 건설사업관리기술인을 말한다. ⑵ “공사관리관”이란 건설사업관리 공사의 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지보상 지원 그 밖에 필요한 업무를 담당하는 시행부서의 장이 지정한 직원을 말한다. ⑶ “검사자”란 공사, 용역 및 하자보수 공사의 검사업무를 담당하는 직원 또는 건설사업관리기술인 말한다. ⑷ “수급인”이란 발주청으로부터 건설공사를 도급받은 건설업자를 말하고, 하도급의 경우 하도급 하는 건설업자를 포함한다. ⑸ “작업책임자”란 철도보호지구에서 작업을 시행함에 있어서 시행부서장이 작업의 협의·지휘·감독·안전관리 등의 업무에 종사토록 지정한 자를 말한다. ⑹ “철도운행안전관리자”란 「철도안전법 시행령」제60조에 따라 국토교통부장관이 발급하는 철도안전전문인력 자격증을 보유하고 동 시행령 제59조에 정한 업무를 담당하는 자를 말하며, “운행안전협의담당자”란 公社직원으로 일정한 자격을 갖추고, 公社 지역본부장이 발급한 “운행안전협의담당자증”을 소지하고 “철도운행안전관리자”의 업무를 수행하는 자를 말한다. ⑺ “장비운전원”이란 장비 운전업무에 종사하는 자로서 열차운행선로지장작업 업무세칙 제56조에 의한 자격자를 말한다. ⑻ “차단작업”이란 철도차량운행시설물의 정상취급을 중지하거나 철도차량의 운행을 중지하면서 시행하는 작업을 말한다. ⑼ “안전성 검증”이란 열차운행안전 및 고객안전을 위하여 관련부서가 계획단계에서 시행한 안전성 평가 및 안전조치 등의 적정성 여부를 검증부서의 장이 확인하는 것을 말한다.

⑽ “장비운전원 적합성검사”란 장비운전 업무에 종사하기 전에 작업원 적합성 검사 기록부(별지 제6호서식)의 시행방법에 따른 적합성 검사를 받아야 하며, 장비운전원 적합성 검사 결과, ‘부적합’으로 판정된 장비운전원은 장비 운전을 할 수 없으며, ‘적합’으로 판정된 장비운전원은 작업 당일 장비가 최초 출발하는 역장에게 적합성 검사 결과를 무선으로 통보하여야 한다.

다. (적용범위) 『한국철도 대전충청본부 등 7개본부 레일연마 기타공사』 시공은 설계서 및 이 시방서에서 정하는 바에 의한다. 다만, 이 시방서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 선로유지관리지침(2018.12.31.), 열차운행선로지장작업업무세칙(2018.09.28.), 철도설계지침 및 편람 KR C-14050 장대레일, 열차운전시행세칙(2019.05.31.), 고속철도운전취급세칙(2020.01.07.), 연결선구간운전취급내규(2017.08.14.), 공사 및 용역관리규정(2019.11.28.) 등 관련규정 및 법규가 정하는 바에 의한다.

라. 본 공사는 계약수량 및 금액에 증감이 있더라도 수급인은 이의 제기를 할 수 없으며 구체적인 개별공사 시행은 발주청의 별도 공사시행통지서에 의하여 즉시 공사시행 승낙서를 제출하고 발주청이 지정하는 일자에 공사를 시행하여야 한다.

마. 본 공사 시행중 안전조치 불이행과 작업원의 부주의로 인한 사고가 발생하여 사상자가 있거나 우리공사 또는 제3자의 재산상의 손실이 있을 때에는 수급인 부담으로 이를 변상 또는 원상 복구하여야 하며, 본 공사로 인하여 발생되는 민·형사상의 책임도 수급인이 져야한다.

2. 일반시방서

가. 연마차 운용 및 작업계획 수립

⑴ 수급인은 공사시행 전 작업개소별 시행계획이 포함된 작업계획을 수립하여 발주청에 제출하여야 하며, 개소 별 차단일정 등 세부사항은 발주청과 협의한다.

⑵ 수급인은 차단계획에 따라 발주청에서 레일연마작업 요청 시 레일연마차를 투입하여야 한다.

⑶ 수급인의 사정에 의해 연마차 투입 지연 시 “철도궤도공사 적격심사 세부기준(2018-4호)”의 신인도 평가 기준에 따라 감점처리 한다.

⑷ 발주청은 수급인이 정당한 사유 없이 3회 이상 레일연마를 위한 차단작업을 시행하지 않을 경우 지체상금 부과, 계약해지 등을 할 수 있으며, 수급인은 민·형사상 이의를 제기하지 않는다.

나. (감독자의 임무) 감독자의 임무는 다음 각 호와 같다.

⑴ 감독자는 건설기술 진흥법 제49조(건설공사감독자의 감독의무)에 의거 건설공사가 설계서, 계약서, 그 밖의 관계 서류의 내용대로 시공되도록 하여야 한다.

⑵ 감독자는 계약서 및 설계서에 근거하여 계약된 공사의 수행, 지휘, 감독 및 입회를 함과 동시에 당해공사 및 이에 부대한 공사의 행정, 공정, 품질, 시공관리 등을 하여야 한다.

⑶ 감독자는 공사에 사용될 지급재료의 수불관리 및 사급재료의 검사를 시행하여야 한다.

⑷ 감독자는 계약자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경시키거나 기한연장 등 계약조건과 다른 지시나 결정을 할 수 없다.

다. (현장대리인의 임무) 수급인은 건설산업기본법 제40조 및 동법 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등), 공사 및 용역관리 규정 제27조(기술요원 배치)에 따라 공사현장에 상주하여 도급공사의 일체를 책임지고 시공 할 수 있으며 그 공사에 상응하는 기술자격소지자(철도안전법시행령 제60조 제2항 관련 [별표5]의 철도궤도분야 안전전문기술자 중 고급 이상 자격자이거나, 중급이상 자격자로서 “철도궤도분야 업무에 3년 이상 종사한 자)를 현장대리인으로 지정하여 발주자에 통보하여야 하며, 현장대리인의 임무는 다음 각 호와 같다.

⑴ 현장대리인은 공사현장에 상주하여 현장 감독자의 감독 또는 지시에 따라 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다. 부득이 현장을 이탈할 경우는 미리 감독자의 승인을 얻어야 하며 공사현장에는 정감독자가 반드시 상주하여야 한다.

⑵ 현장대리인은 1개 공사현장에서 동시다발적으로 차단공사를 하는 경우에는 주요작업개소에서 작업지휘를 하고 다른 작업개소에는 품질 관리자에게 작업에 관한 사항을 교육하여 궤도작업책임자로 지정하여 작업하게 할 수 있다.

	⑶ 현장대리인은 매일 작업 시작 전 공사 및 열차안전에 대해 교육을 시행하고 서명날인을 받아 감독자에게 제출 하여야 한다. ⑷ 현장대리인은 감독자의 작업지시를 받지 않고는 어떠한 경우라도 열차운행선 공사현장에 작업원을 투입시켜서는 아니 되며, 준비 작업이라고 하더라도 임의 작업을 하여서는 아니 된다. ⑸ 현장대리인은 공사 시 승인된 시간 내에 공사가 완료 될 수 있도록 사전에 감독자와 공사계획을 면밀히 검토하여 작업량을 적의 조정, 작업지연으로 열차운행에 지장을 주지 않도록 하여야 한다. 라. (안전관리자의 임무) 본 공사는 열차운행선상에서 이루어지는 특수성을 감안하여 산업안전보건법시행령 제14조 관련 [별표4] 각호의 1에 해당(단, 제10호 내지 제11호 해당자는 제외) 하는 자 중 1년 이상 철도궤도분야 업무에 종사한 경력이 있는 자(궤도공사 적격심사 시 선정된 안전관리자 우선배치)를 배치하여야 하며 안전관리자의 임무는 다음 각 호와 같다. ⑴ 안전관리자는 공사 착수 전 안전교육계획 및 위험성평가(개선대책 포함)를 작성하여 공사감독자에게 제출하여야 한다. ⑵ 안전관리자는 최초 안전교육에 반드시 참석하여 관련 내용에 대한 작업원에게 전파교육 시행한다. ⑶ 안전관리자는 작업원을 대상으로 당일 작업에 대한 작업계획서를 작성·교육을 시행하고 결과를 공사감독자에게 확인 하여야 한다. ※ 작업계획서 작성내용 : 작업인원, 작업량, 순서, 방법, 안전보호구·공기구 점검 및 위험요인에 대한 안전조치 방법 등 ⑷ 안전관리자는 작업현장 출동 전 위험예지훈련을 주관하여 시행하고 위험예지훈련 시행결과를 포함한 업무수행 일지를 작성하여 준공 시 제출하여야 한다. ⑸ 안전관리자는 작업원과 구분될 수 있도록 별도의 안전조끼를 착용하여야 한다. ⑹ 산업안전보건법시행령에 명시된 안전관리자의 업무를 수행한다. ㈎ 공사현장 순회점검·지도 및 조치의 건의 ㈏ 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 조언·지도

㈐ 산업재해에 관한 통계의 유지·관리·분석을 위한 보좌 및 조언·지도

마. (궤도작업 책임자) 1개 공사현장에 동시 다발적으로 작업 시 작업개소 마다 궤도작업책임자를 배치하여야 한다. 단, 현장대리인이 작업지휘를 하고 있는 작업개소에는 배치하지 않을 수 있다.

바. (공사 시공계획서) 수급인은 시공개소마다 시공시기, 순서, 방법 및 안전관리대책 등 공사 전반에 대한 시공계획서를 제출하고 이를 변경 시 감독자의 승낙을 받아야 하며, 공사시공 시 예상되는 분진소음, 폐기물처리 등 환경 저해요인에 대한 예방대책을 수립하여 시행하여야 한다.

사. 공사기록 및 사진

⑴ 공사의 착수일로부터 준공 시까지 일일작업계획, 실적[선로보수작업 기록부 등(선로유지관리지침 별지 제3호 서식), 재료, 물품수불사항 및 기상조건 등 필요한 공사 전반에 관한 사항을 기록 관리하고 감독자의 제출 요구 시 제출 하여야 한다.

⑵ 공사기록 사진은 공사 착수 전, 시공 중, 시공 후의 상황사진을 동일위치에서 촬영하여 감독자에게 제출하여야 한다.

종 별	규 격	비 고
공사 시행 전 · 중 · 후 사진	175 × 125㎝	시공 전 ․ 후 사진은 동일 장소 동일방향에서 촬영

아. (연마차 운용) 적격심사 시 제출하여 평가된 연마차는 반드시 본 공사에 투입하여야 하며(단, 정당한 사유가 있는 경우 제외), 수급인은 연마차 운용시 다음 사항을 준수하여야 한다.

⑴ 수급인은 연마차 취급 및 사용은 열차운행선로지장작업업무세칙과 고속철도운전취급세칙 등에 따른다.

⑵ 공사 착공시 연마차가 철도안전법 제26조에 의한 철도차량 형식승인 및 철도차량안전기준에 관한 규칙(국토교통부령) 에 따라 유지관리 되고 있는 장비임을 확인할 수 있는 증빙자료를 제출하여야 하며, 운전실 내에 상시 비치하여야 한다.

	⑶ 당일 투입되는 연마차는 작업 전에 일상점검을 시행하고, 현장대리인 또는 안전관리자가 직접 확인 후 감독자에게 당일 운행가능 여부를 보고하여야 한다. ⑷ 수급인의 연마차 운행 시에는 열차운행선로지장작업업무세칙 제56조에 의거 철도차량 운전면허를 소지한 자 만이 할 수 있으며 운전자는 운전실에 철도차량 운전면허증 사본을 게시하고 명찰을 착용하여야 하며 수급사 직원이 公社 장비를 운전할 경우에는 公社 해당본부장(시설처장)의 승인을 받아야 한다. ⑸ 수급인의 연마차는 각종 검수를 철저히 하여 운행 및 연마작업에 지장이 없는 상태를 유지하여야 한다. 또한 운행 및 연마작업으로 인한 사고·장애 등이 발생 시에는 수급인 책임으로 사고복구 및 피해보상을 시행하여야 하며, 민·형사상 이의를 제기하지 않는다. 자. 공사기한 연장 및 공사일시중지 ⑴ 공사 착공 후 발주청 사정으로 장기간 선로차단공사 승인을 득하지 못하였을 경우에는 수급인의 요청에 의하여 공사일시중지를 결의 할 수 있다. ⑵ 선로차단공사 승인 후 수급인의 사정으로 작업을 하지 못하였을 경우에는 수급인은 다음 차단공사계획을 제출하여야 하며 그 기한은 기한연장 사유가 될 수 없다. 차. (설계변경) 본 공사 시행 중 다음과 같은 사유가 발생될 시는 설계변경 할 수 있다. ⑴ 사업계획 변경, 공사용 지급자재 조달불가, 차단공사 승인불가 등으로 물량 변동이 있을 때 ⑵ 실제 수량이 설계 수량과 현저한 차이가 있을 때 ⑶ 국가 감사기관으로부터 시공 중인 공사에 지적 또는 변경 사유가 발생하였을 때 카. 기타사항 ⑴ 공사 시공을 위하여 가설물을 설치하고자 할 때에는 다음 각 호에 따라야 한다. ㈎ 열차운전에 지장되거나 여객의 안전이 우려되는 가설물은 미리 감독자와 협의하여야 한다. ㈏ 기타 시설물, 철도시설물의 사용은 감독자와 미리 협의하되 다른 법령이나 규정에 저촉됨이 없도록 하여야 한다.

	⑵ 타 공사와 병행하여 시공할 때에는 감독자와 수시로 연락하여 타 공사의 공사 진척에 지장이 없도록 하여야 한다. ⑶ 공사 시행에 필요한 조명은 소정의 조도를 확보하여야 하며, 조명의 방법 및 사용기기에 대하여는 미리 감독자와 협의하여야 한다. ⑷ 공사 시행에 필요한 측량 및 검측은 수급인이 시행하고 지시된 사항에 대하여는 결과를 제출하고 감독자의 승인을 받아야 한다. ⑸ 공사 후 뒷마무리 또는 용지 내 및 용지에 근접한 가설물의 철거는 특별히 지시된 것 이외에는 공사기간 내에 완전히 완료하여야 한다. ⑹ 감독자 등이 시공의 확인 및 검사 시에 필요한 인원 및 자재 등은 수급인 부담으로 제공하여야 한다. 3. 특별시방서 가. (레일연마차) 본 공사는 24석 이상의 회전 숫돌 Type 레일연마차를 이용한다. ⑴ 레일연마 지석수와 현장여건을 고려하여 연마대상개소 사전검측(검사)결과에 따라 적정 패스를 재산정 할 수 있다. ⑵ 레일연마차는 이례사항 발생(장비고장 포함) 시 모터카(MC) 등 한국철도공사 장비에 의한 견인이 가능하도록 연결봉과 커플러를 이용한 견인장치가 제작되어져 있어야 한다. ⑶ 레일연마 착공 전 레일연마차에 대한 적합성 검사 시행 후 작업을 시행하여야 하며 반드시 철도공사의 승인 하에 장비가 투입되어야 한다. ⑷ 수급인은 계약기간 중 레일연마차를 작업개소 이외의 장소로 이동 또는 변경 시 발주청의 사전승인을 받아야 한다. 나. (레일연마작업) 레일연마 작업 시행 후 효과분석을 포함하여 작업구간에 대한 결과물을 제출하여야 한다. ⑴ 본 시방서는 고속선 및 일반구간(연결선 포함)의 레일 연마작업에 적용하며, 레일연마차(24석 이상)에 의한 레일 표면연마, 레일 단면의 원형 재생(Re-profiling) 및 주행단면 형성을 위한 수정 연마를 포함한다.

⑵ 수급인은 연마작업 전, 후 연마차에 탑재된 장비 등을 사용하여 연마 대상구간의 레일 단면을 측정하고 측정 결과를 감독자에게 제출하여야 한다.

⑶ 연마작업은 본선(역구내 부본선 포함, 분기부 및 신축부 제외) 및 연결선을 실시하되 궤간선측 게이지 코너 13mm, 레일두부 정면(80mm, 300mm)을 연마한다. (각도로 표시하면 궤간선측 –70〫, 궤간외측 +5〫 범위)

⑷ 예방연마는 레일두부 연마 깊이 0.2 ~ 0.3mm로 하고 원형 프로파일을 형성 하여야 한다.

⑸ 보수연마는 연마 깊이 0.3mm를 초과해서 최소 표면결함 깊이 0.3mm 이상의 표면결함이 제거되어야 하고 원형 프로파일을 형성 하여야 한다.

⑹ 레벨링 결함을 발생시키는 레일단면상의 레일표면결함은 연마작업으로 제거하여야 한다.

⑺ 평균 표면 거칠기(Ra=Average roughness)는 레일두부 중심 ±15mm 범위에서 레일 종방향 축을 따라 연마 후 즉시 측정하되 최소 500m를 초과하지 않는 간격으로 측정하고 10㎛(마이크로미터) 이하이어야 한다.

⑻ 연마 후의 평면결함

㈎ 연마 후 평면 발생 폭의 최댓값은 다음과 같다. 1) 레일두부 게이지 코너상 R=13mm 부위 최대 4mm 2) 레일두부 게이지 코너상 R=80mm 부위 최대 7mm 3) 레일두부 R=300 부위 최대 10mm

⑼ 연마작업 후 레일단면은 일정해야 하며 육안으로 감지될 수 있는 평면 또는 파형의 결함이 없어야 하며, 게이지코너에서는 돌기가 발생되어서는 안 되며 다음과 같은 가공 결함이 발견될 경우 즉시 제거하여야 한다.

㈎ 청열(blueing)

㈏ 어복형상(fish bellide form)

㈐ 파상마모(corrugation)

㈑ 잔류결함

⑽ 연마 잔여물은 궤도상에 남아 있어서는 안 되며, 연마 후 열차 운행 시 아무런 지장이 없도록 궤도전체 연장이 깨끗이 청소되어야 한다. 특히 연마 잔여물이 제거되어야 할 케이블, 신호시설물, 제표 등과 같은 요주의 개소는 별도의 안전조치를 취하고 작업을 시행해야 한다.

다. (작업 기준 및 허용오차) 연마작업은 다음의 품질기준 및 허용오차를 만족하여야 하며 전체 연마구간에 대한 육안검사를 시행하여야 한다.

⑴ 레일두부 종방향 형상

㈎ 레일두부 종방향 형상 검측은 주행면 범위로 하며 직선구간 검측범위는 레일중심선에서 ±15mm 이내

㈏ 레일 종방향에 대한 레일연마 작업 검증은 아래의 3가지 방법 중에서 하나의 방법으로 검증하여야 한다.

1) 이동 평균 실효치 한계 값

파장대역(㎜)	10∼30	30∼100	100∼300	300∼1,000	비 고
이동평균 실효치(㎜)	±0.004	±0.004	±0.012	±0.040

2) 이동평균 첨두간 한계 값

파장대역(㎜)	10∼30	30∼100	100∼300	300∼1,000	비 고
이동평균 첨두간 한계값(㎜)	±0.010	±0.010	±0.030	±0.100

※ 이동 평균 실효치 한계 또는 이동 평균 첨두간 값 한계를 초과하는 확률

파장대역(㎜)	10∼30	30∼100	100∼300	300∼1,000	비 고
허용기준	5%	5%	5%	10%

3) 기준치를 초과하는 요철 개수(레일 100m에 대한 기준치 초과 개소)

파장대역(㎜)	10∼30	30∼100	100∼300	300∼1,000	비 고
첨두간 값 한계(㎜)	±0.010	±0.010	±0.030	±0.100
허용기준	250	100	25	10

㈐ 종파장의 허용한계치는 ㈏항을 기준으로 하나, 육안으로 확인 가능하거나 특정부위에 대한 이상 파장 발생 시는 재 연마를 시행하여야 한다.

⑵ 레일두부 횡방향 및 단면형상

㈎ 레일 형상에 대한 레일두부 횡방향 형상의 승인 허용오차의 범위는 ±0.3mm 이다.

* 측정 형상 편차 : 측정 형상과 기준레일이 점 A와 B 또는 A와 B2에서 정렬될 때 어느 형상도 회전 없이 기준레일의 표면에서 수직으로 측정된 측정 형상과 기준레일 간의 편차

	㈏ 레일두부 단면 형상은 레일부설 각도에 맞추어 목표 형상으로 복원해야 하며 상기의 허용기준에 적합해야 한다. 목표형상은 궤간 선측 –70〫 에서 궤간 외측의 접선각 5〫 범위로 한다. 라. (작업 전, 후 검측) 수급인은 연마작업 전, 후 레일 형상에 대하여 검측·관리하여야 한다. ⑴ 종방향 검측 : 수급인은 연마작업 전, 후 작업 전 구간에 대하여 레일 종방향 형상을 측정하고 측정 결과를 파장별로 작성 · 제출하여야 한다. ⑵ 횡방향 검측 : 수급인은 연마작업 전, 후 최소 500m를 초과하지 않는 간격으로 횡단면 형상을 정밀검측기에 의한 검측을 시행하고 그 결과를 제출하여야 한다. ⑶ 연마량 검측 : 수급인은 연마작업 전, 후 최소 500m를 초과하지 않는 간격으로 연마량을 정밀검측기에 의한 검측을 시행하고 그 결과를 제출하여야 한다.(연마량 측정 위치는 레일두부 중심점에서 횡방향으로 ±15mm 범위) ⑷ 추가 검측 : 수급인은 필요시 감독자가 지정한 개소에 대하여 추가적인 검측을 실시하여야 한다. ㈎ 육안으로 감지할 수 있는 거친 부분 및 긁힌 자국이 있는 경우 ㈏ 연마 작업의 시․종점부 ㈐ 기타 감독자가 지시하는 부분 마. (장비 유치 및 이동) 수급인은 장비 유치 및 이동 시 자체방호를 위한 안전조치를 하여야 한다. ⑴ 장비유치 협의 시 공사감독자와 사전협의를 통하여 안전한 장소에 장비를 유치하여야 한다. ⑵ 장비유치 시 수용제동기, 차륜지 설치 등 정확한 주차여부를 확인하여 유치하여야 한다. ⑶ 장비에는 동륜 수 이상의 수용 바퀴구름막이를 적재하여야 하며, 유치 시에는 반드시 설치하여야 한다. ⑷ 차량 유치 시 차막이 또는 인접분기기로부터 상당거리 이격하여 유치하여야 한다.(열차제동 거리확보) ⑸ 공기제동은 구름방지의 목적으로 사용하지 않아야 한다. ⑹ 장비유치 시 장비의 내·외부 시설 등의 도난방지를 위해 자체 도난방지시설 등을 설치하여야 한다.

	⑺ 유치장소 최전방 및 최후방에서 10~25m 내외 지점 선로 상에 야간에도 인식 가능한 안전설비를 설치하되 전도 등이 방지되도록 견고하게 설치하여야 한다. ⑻ 장비의 이동 및 작업 시에는 주위의 작업자가 분별이 가능하도록 야광반사지 등으로 장비에 표시를 하여 안전을 도모하여야 한다. ⑼ 장비조작자는 장비를 떠나기 전 장비가 안전하게 보호되었는지 확인하여야 한다. ⑽ 장비운전자 분기기 포인트부 전방 5m 진입 전 일단정지 후 진로확인 * 선로전환기 정·반위 진로상태를 장비운전자가 1단계 확인 후 지적확인 환호응답, 안전관리자가 2단계로 진로상태를 재확인 후 지적확인 환호응답 시행 ⑾ 절대표지 미점등 시에 백색등 점등 요구 및 관제사에 확인 절차 철저 바. 장비입환 ⑴ 입환 시 계획을 숙지하고 야간 및 취약개소의 전철기는 감시원을 배치하여 입환 정보 교환 ⑵ 입환 작업 시 지적확인 환호응답을 철저히 시행한다. ⑶ 입환 표지가 없는 전철기를 통과할 때는 즉시 정차할 수 있도록 감속하여 입환을 시행하여야 한다. ⑷ 부득이 추진운전에 의한 입환 취급 시는 후부에 감시원을 배치하고 감속하여 입환을 시행하여야 한다. 4. 안전시방서 가. 공사현장의 안전조치 ⑴ 공사현장에서는 열차운행선로지장작업업무세칙 제9조(작업 전 안전관리)에 의거 당일 작업을 시행하기 전에 작업원을 대상으로 다음 각 호의 안전교육을 시행하여야 한다. ㈎ 그날 작업계획(철도차량운행시설물 사용중지 계획, 작업순서와 방법, 이동계획 등) ㈏ 작업구간 열차운행선로의 특성과 운전취급 변경에 관한 사항 ㈐ 열차감시원 배치와 열차접근 시 작업자 보호에 관한 사항 - 열차감시원의 전문성을 확보하기 위하여 4시간이상의 교육(이론 및 현장)시행, 안전 또는 발주부서(토목시설처-801,’18. 3. 26.) ㈑ 전기철도안전관리자 배치와 전차선로 근접작업 안전관리에 관한 사항 ㈒건널목 임시관리원 배치와 근무요령에 관한 사항 ㈓건설기계 등 장비 사용 시 철도시설 보호에 관한 사항 ㈔그 밖에 안전사고 예방을 위한 사항

⑵ 작업을 시행함에 있어 열차운행선로지장작업업무세칙 제10조(작업 중 안전관리)에 의거 다음 사항을 작업책임자는 작업을 시행할 때 다음 각 호의 사항을 관리하여야 한다.

㈎ 작업원 또는 장비 등이 철도차량과 접촉할 우려가 있는 작업 시 열차감시원 배치

㈏ 전차선로의 단전이 필요하거나 작업원 또는 건설기계 등이 전차선로에 접촉할 우려가 있는 작업 시 전기철도안전관리자 배치

㈐ 계속 경보 또는 무경보 등의 지장이 있는 건널목에 임시관리원 배치

㈑ 건설기계 작업 시 건설기계 작업지휘자 또는 유도자 배치

㈒ 작업구간 표지(선로작업표지, 공사알림판 등) 및 서행 관련 임시신호기 등의 설치

㈓ 작업원 보호를 위한 안전설비 설치 및 취급(작업안전선 설치, 일반선 단락용 동선 설치, 터널경보장치 취급, 고속선 작업자 방호 스위치 취급 등)

㈔ 전차선로 단전상태 확인 및 전차선로 근접작업 안전관리

㈕ 해당 역장과 협의하여 수신호등 설치 및 확인

㈖ 운행선로 보호를 위한 안전조치(선로전환기 잠금, 임시차막이, 낙하물 방지시설 등)

㈗ 그 밖에 안전작업을 위한 필요사항의 조치(레일연마차에 LED경광등, 고휘도 반사재 반드시 부착)

⑶ 야간작업 시 작업자 보호 및 안전도 향상을 위하여 발광형(LED, EL패널) 안전조끼 또한 발광형 벨트 착용 및 안전모 재귀 반사재 부착을 하여야 한다. (관련근거 : 궤도기술처-2708,`17.7.10, 동-3637,`17.9.15)

⑷ 작업 착수 전 철도안전관리시행세칙 제37조(음주 등의 제한)에 의거 업무개시 전 음주감지기 또는 음주측정기로 음주여부를 확인하여야 하며 필요시 업무수행 중에도 음주 여부를 측정할 수 있으며, 약물복용이 의심스럽거나 약물복용을 하였다고 판단될 경우에는 약물복용 검사가 가능한 관계기관에 검사를 의뢰할 수 있다. 또, 음주감지기로 측정하여 음주하였다고 판단되었을 때에는 반드시 음주측정기로 혈중 알코올 농도 수치 여부를 확인하여야 한다.

㈎ 음주 제한자 : 철도차량의 운행선로 또는 그 인근에서 철도시설의 작업 및 공사와 관련된 작업자

㈏ 음주 검사자 : 작업 및 공사감독자, 지원업무수행자, 감리원

⑸ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)에 의거 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 작업자에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따라 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다.

㈎ 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업: 안전모

㈏ 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업: 안전대(安全帶)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제418조(교량에서의 추락 방지)에 교량에서 궤도와 그 밖의 관련 설비의 보수ㆍ점검 등의 작업을 하는 경우에 추락 위험을 방지할 수 있도록 안전난간 또는 안전망을 설치하거나 안전대를 지급하여 착용하게 하여야 한다.

㈐ 물체의 낙하ㆍ충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전(帶電)에 의한 위험이 있는 작업: 안전화

㈑ 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안경

㈒ 감전의 위험이 있는 작업 : 절연용 보호구

㈓ 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업 : 방열복

⑹ 궤도작업차량을 이용하는 작업을 하는 경우 유도하는 사람을 지정하여 궤도작업차량을 유도하여야 하며, 일정한 신호방법을 정하여 신호하도록 하고, 운전 중인 궤도작업차량 또는 자재에 근로자가 접촉될 위험이 있는 장소에는 관계 근로자가 아닌 사람을 출입시켜서는 아니 된다.

나. (안전설비) 수급인(현장대리인, 안전관리자)은 다음 각 호에 의한 안전설비를 하여야 한다.

⑴ 여객 및 통행차량에게 위험의 우려가 있다고 판단될 때는 이에 적절한 특수안전설비를 하여야 한다.

⑵ 가설 구조물, 수리시설 및 기타 교통기관에 대하여 위험이 우려될 때에도 지정된 안전설비 이외에 필요에 따라 적절한 안전설비를 하여야 한다.

다. (사고보고) 수급인(현장대리인, 안전관리자)은 다음 각 호에 의한 사고보고 조치를 하여야 한다.

⑴ 공사현장에서 각종 사고 발생 시 즉시 감독자와 해당 관제사에게 통보하고 그 지시에 따라 응급조치를 하여야 한다.

⑵ 열차운행선로지장작업업무세칙 제20조(긴급상황 시 안전확보)에 의거 작업과 관련하여 열차 운행의 위험을 초래할 긴급한 상황이 발생한 경우 또는 작업원 보호를 위해 열차 운행 중지가 필요한 경우 작업관계자는 「운전취급규정」 제5장제2절(열차의 방호)에 준하는 조치를 신속히 하고 해당 역장 또는 관제사에게 보고 후 그 지시에 따라야 한다.

㈎ 열차사고(열차충돌, 열차탈선, 열차화재) 발생 또는 발견 시 즉시 열차방호를 시행한 후 인접선 지장여부를 확인한다.

㈏ 열차사고 이외의 경우라도 철도사고 및 운행 장애 등으로 관계열차를 급히 정차시킬 필요가 있을 경우에는 열차방호를 하여야 한다.

㈐ 열차방호의 종류 및 시행방법은 운전취급규정 제265조(열차방호의 종류 및 시행방법)에 의거 다음 각 호와 같으며 현장상황에 따라 신속히 시행하여야 한다.

1) 무선전화기 방호 : 지장열차의 기관사 또는 선로 순회 직원은 지장 즉시 무선전화기의 채널을 비상통화위치(채널 2번) 또는 상용채널(채널1번 : 감청수신기 미설치 차량에 한함)에 놓고 “비상, 비상, 비상, ○○~△△역간 상(하)선 무선방호!(단선 운전구간의 경우에는 상·하선 구분생략)”라고 3~5회 반복 통보하고, 관계 열차 또는 관계 정거장을 호출하여 지장 내용을 통보할 것. 이 경우에 기관사는 열차승무원에게도 통보할 것

라. (보수작업의 제한) 공사 시공에 있어서 열차의 서행 및 작업의 제한이 따르는 경우는 다음에 의한다.

⑴ 기온의 변화가 현저하거나 우천 등 작업이 곤란할 때에 공사를 시공할 경우에는 감독자와 충분히 협의하고 감독자의 지시를 받는다.

⑵ 선로유지관리지침 제151조(작업온도제한)에 의거하여 작업을 시행하여야 한다.

마. (선로차단작업) 수급인은 선로차단 작업 시 다음 사항에 유의하여 시행하여야 한다.

⑴ 승인된 선로차단공사의 작업량은 장비의 진출입에 필요한 시간까지 포함하여 승인된 차단시간 내에 완료할 수 있도록 계획을 수립하고, 감독자와 협의 시행하고 작업량의 변동이 불가하고 차단시간이 제한되어 있을 때에는 인원, 장비 추가 투입계획을 작성하여 감독자의 승낙을 받은 후 시행하여 열차운전에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.

⑵ 당일 차단공사 운전협의 시 기 승인된 시간과 변동이 있을 시에는 운전협의 된 차단시간에 작업을 마칠 수 있는지 확인한 후 작업에 임하여야 하며, 작업량 등을 조정하여 감독자의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

⑶ 열차운행선로지장작업업무세칙 제40조(작업완료 조치)에 의해 감독자(작업책임자)는 승인된 작업시간 안에 작업을 완료하고 열차 운행에 지장이 없음을 확인한 후 철도운행안전관리자에게 작업 완료를 통보하여야 하며, 철도운행안전관리자는 작업시행을 협의한 역장 또는 관제사에게 작업 완료를 통보하여야 한다.

바. (사상사고 예방을 위한 작업 단계별 안전관리)작업 시작 전부터 작업이 종료될 때 까지 모든 과정에서 작업절차가 준수될 수 있도록 확인

① 착공전		② 작업전		③ 작업전		④ 작업전		⑤ 작업중		⑥ 작업후
안전관리 계획서 제출		선로작업 협의		철도운행안전협의		작업장 이동		출입문 관리		작업장 철수
수급인 → 발주자		작업책임자 ↔ 관련처장 또는 사업소장		철도운행안전관리자 ↔ 역장		작업책임자인솔 (公社 직원 또는 건설사업관리자)		작업책임자 (公社 직원 또는 건설사업관리자)		작업책임자인솔 (公社 직원 또는 건설사업관리자)

⑴ 작업시행 전 안전관리: 선로지장 작업 시행 전 작업장 이동계획, 열차감시원 배치, 당일 안전교육 시행에 관한 조치사항

구 분		시행자		조치사항
안전관리계획서 작성·제출		(작성) 시공사 (확인) 작업책임자		- 현장 작업개소별 현황 파악 * 현장여건, 이동경로, 단전여부, 위험요인 등 작업자 이동경로, 선로횡단 개소 선정(필요시), 차단승인 전 작업자 대기장소, 출입문 위치 등이 표시된 약도를 작성하여 작업책임자에게 보고
선로작업협의		작업책임자		작업내용, 작업자 이동방법 및 대기장소, 안전조치계획 등을 관련 부서와 사전 협의
작업적합성 검사 및 안전교육 시행 (작업 당일)		현장대리인 작업책임자(필요시)		음주여부, 질병유무 등을 검사하여 작업 적합성을 판정 당일 작업계획서를 바탕으로 일일 안전교육 시행
철도운행 안전협의		철도운행안전관리자 (운행안전협의담당자)		당일 작업계획, 작업자 이동방법 등을 확인 후 제어역 역장과 협의

㈎ 현장 답사는 착공 전에 시행 하며, 작업책임자와 시공사에서 시행

㈏ 당일 투입될 작업자 수, 공기구 종류, 장비, 현장여건 등을 고려하여 이동 경로 선정

㈐ 장비, 작업자 이동경로를 별도로 작성하고, 장비 이동시 장비신호수 배치 계획 수립

㈑ 선로횡단이 필요한 개소는 횡단 위치를 지정하고 열차감시원 별도배치 계획 수립

㈒ 당일 철도운행안전협의 완료 및 작업승인 전 현장 출입 금지

㈓ 작업책임자와 철도운행안전관리자는 작업시행 전 다음 사항을 상호 교차 확인 및 기록· 유지 할 것

작업적합성검사 안전교육, 안전장비 착용상황 점검 안전장비·안전시설의 점검, 열차감시원의 배치, 그 밖에 작업자와 철도운행 안전 확보를 위해 점검이 필요한 사항

⑵ 작업현장 작업자 이동: 차단작업 시행 전 작업현장 이동 시 발생할 수 있는 위험요인에 대한 조치사항

구 분		시행자		조치사항
작업현장 이동 (차량이동)		작업책임자 및 현장대리인(안전관리자)		이동 단위별로 관리자(작업책임자, 현장대리인 등)가 동승하여 작업자 대기장소로 이동 후 차단승인 대기 * 임의·사전작업 예방
작업현장 이동 (선로 또는 도보이동)		작업책임자 및 현장대리인(안전관리자)		작업승인 후 출입문을 개방하여 작업위치까지 작업자를 인솔하여 이동
작업용 공기구 및 재료 운반		작업자 및 현장대리인		선로에 진입하여 공기구 운반은 차단승인 후 시행 연장이 길어 반대선 열차에 지장을 초래할 우려가 있는 장비·재료는 2인 1조로 운반

㈎ 선로에 진입하지 않고 작업현장으로 이동 가능 시 계획된 작업자 대기장소에 집합

㈏ 본 작업 전 선로를 이용하여 작업현장까지 이동 필요(방음벽, 울타리 설치개소 등) 시 작업계획 수립 단계에서           작업자 이동을 위한 열차사이차단 요청

㈐ 선로를 횡단하는 경우 지정된 장소에 열차감시원 배치 후 작업책임자의 지시에 따라 선로횡단

㈑ 선로에 진입하여 이동 시 작업책임자 및 현장대리인이 작업자 앞쪽과 뒤쪽에서 단독행동 통제

㈒ 임시신호기 등 연장이 길어 뒤를 돌아보는 등 회전 중 반대선 열차에 접촉우려가 있는 장비·재료는 2인 1조로 운반       하여 회전하지 않도록 조치

㈓ 운반된 공기구, 장비, 재료는 건축한계 외방에 적치하여 열차접촉에 의한 사고 예방

⑶작업현장 안전설비 등 설치:  차단승인 후 안전설비(임시신호기 등) 설치에 대한 조치사항

구 분		시행자		조치사항
안전설비 설치		작업책임자 또는 철도운행안전관리자		안전시설 및 임시신호기 등 설치위치 선정
		작업자 2인 이상		- 선로작업표, 임시신호기, 안전휀스(띠) 등 설치 토목·건축공사 중 작업개소가 고정되어 있는 경우 공사알림판, 열차접근경보기, 건축한계접근 경보기, 안전휀스(띠) 등 설치 단전작업 시 접지걸이(양단) 취부

㈎ 선로작업표, 임시신호기 등은 정해진 위치에 설치하여야 하나 지형 여건상 기관사가 알아보기 어려울 때에는 정해       진 위치 이상의 거리에 알아보기 쉬운 곳에 설치

㈏ 공사현장이 고정되어 있는 경우 본 작업 시행 전 고정 안전설비 설치

㈐ 임시신호기, 선로작업표 설치를 위한 이동은 사용중지된 선로 또는 반대선 시공기면으로 열차를 마주보며 2인 1조로 이동

㈑ 반대선 진입 예방을 위한 안전휀스(띠) 설치는 건축한계 확보 여부 및 설치 위치를 사전에 파악

㈒ 건축한계 미확보 또는 작업현장이 매일 변경되는 공사는 작업자의 주위를 환기시킬 수 있는 경광봉 등 설치

⑷ 작업시행: 작업시행 중 안전, 품질, 공정관리에 관한 조치사항

구 분		시행자		조치사항
열차감시원 배치		작업책임자 또는 철도운행안전관리자		공사현장 여건에 따라 열차감시원 1인 또는 2인 배치
작업시행		작업책임자, 현장대리인 안전관리자, 철도운행안전관리자 작 업 자		작업책임자 : 공사 전반적인 진행상태 확인(품질, 공정, 안전) 현장대리인 : 승인 시간 내 계획된 작업이 완료 될 수 있도록 공정 관리 안전관리자 : 열차감시원, 장비감시자 등 배치 및 근무상태 확인

㈎ 장비신호수는 열차접근 경보기(건설장비에 부착) 조작을 통하여 인접선 열차접근 시 장비작업 중지

㈏ 안전관리자는 작업자의 불안전 요인 발견 즉시 시정명령을 지시하며, 이에 응하지 않을 경우 작업현장 퇴출 지시

⑸ 작업완료 후 현장 철수 및 최초열차 확인: 작업완료 후 안전관리 조치사항

구 분		시행자		조치사항
작업자 철수		작업책임자 및 현장대리인		승인시간 종료 전 조기 완료 후 작업자 전원 동시 철수
차단작업 완료 및 최초열차 통과 확인		작업책임자 현장대리인 철도운행안전관리자		접지걸이 철거, 전기설비 이상유무 확인 모든 작업자가 선로 밖으로 철수한 것을 확인(무선통신 및 휴대전화 등) 급전 후 작업종료 보고 최초열차 통과 후 작업현장 철수

㈎ 차단작업 시행 시 선로 진입 방법과 동일하게 작업장 철수(열차감시원 배치 등)

㈏ 작업책임자는 작업 완료 후 작업자들을 인솔하여 작업현장 밖 안전한 장소로 이동

㈐ 작업책임자 및 현장대리인은 공사 뒷정리 상태  및 모든 작업자 철수 확인 후 개통

㈑ 최초열차 통과 후 이상없음을 확인하고 현장 철수

	사. (열차운행선 공사 안전관리) 열차운행선 안전관리를 위해 수급인은 다음과 같은 안전관리를 시행하여야 한다. ⑴ 현장대리인 및 안전관리자 현장공백 방지를 위해 다음과 같이 조치한다. ㈎ 현장대리인, 안전관리자는 반드시 현장에 상주한 상태에서 공사를 시행하여야 하며, 현장대리인(안전관리자)이 부득이 현장을 이탈할 경우에는 공사감독자의 승인을 득하고 안전관리자(현장대리인)에게 인수인계 후 현장을 이탈하여야 한다. ㈏ 현장대리인 및 안전관리자가 현장이탈 시 공사감독자 승인을 득하고, 공사감독자는 “승인기록부”에 승인여부 기록 유지하여야 하며, 선로지장 우려 작업의 경우, 현장대리인 또는 안전관리자 중 1명이라도 현장을 이탈할 경우 당일 작업을 취소하여야 한다. ㈐ 미리 감독자의 승인을 받은 경우에는 반드시 감독자가 현장 상주하고, 복수(보조)감독자를 배치하여서는 안 된다. ㈑ 안전관리자가 배치되지 않은 공사 중 현장대리인이 현장을 이탈할 경우에는 당일 작업을 취소하여야 한다. ⑵ 현장 안전교육 강화를 위해 다음과 같이 조치한다. ㈎ 현장 안전점검, 감독업무 수행, 안전지도사 활동 시 작업원에 대하여 전파교육 시행여부 확인(교육일지, 서명부, 작업원 인지상태 등)하고 점검요구 시 성실히 임하여야 한다. ㈏ 신규자(일용인부) 고용 시 반드시 안전교육(2시간 이상) 시행 후 작업현장 투입하여야 한다. ㈐ 작업원에 대한 교육 소홀 시 공사를 중지하여야 하며, 현장대리인(안전관리자)이 별도의 안전대책 수립 및 공사감독자 승인 후 공사를 재개할 수 있다. ㈑ 열차운행선(인접) 작업 시 단독작업 금지 및 위반사항 적발 시 관련자는 작업현장 출입금지 조치하여야 하며, 승인 없이 무단 작업 시 전면 작업 중지 및 현장대리인을 교체할 수 있다. 아. (안전관리 체크리스트) 궤도공사 안전관리를 위해 발주청에서 체크리스트에 의한 점검을 시행하고 점검결과에 따라 궤도공사 적격심사 신인도 평가 “업무지시 불이행” 항목에 평가 기준으로 적용한다.

⑴ 발주청에서는 아래 체크리스트에 의한 연간 4회(분기별 1회) 점검을 시행한다.

시행시기	세부점검사항	이행여부	비고
공사 착공 전	- 공사 착공 전 작업원 안전교육 시행 * 교육 이수자를 대상으로 교육필증 발급 및 발급대장 작성 * 신규자 발생 시 별도 교육 후 교육필증 정비
	- 자체 안전성검증을 시행 후 위험요인 분석 후 예방대책 수립 및 발주청 보고
작업 전 일일 안전교육	- 차단계획, 작업명, 작업량, 작업순서 및 방법, 위험요인 도출 및 조치방법, 열차대피 요령, 업무분장, 일일세부작업 계획, 지적확인 환호응답 요령 등이 포함된 작업계획서 작성 및 교육 시행
	- 전기철도안전관리자 배치 및 전차선로 근접작업 안전관리에 관한 사항 교육
	- 안전보호구 착용여부 점검
	- 음주측정기로 음주여부 측정
	- 장비유도자 지참물 확인(안전보호구, 무전기, 열차시각표, 확성기, 적색, 백색 기(등))
현장이동 및 대기	- 작업원에 대하여 대기 장소 대기조치 및 인원을 파악하여 차단승인 전 출입통제
작업시행	- 감독자로부터 출입증 교부받은 후 작업원 투입
	- 장비유도자 배치(장비유도 외 타 업무 종사금지)
	- 각종 임시신호기 설치(선로작업표, 서행표지 등) · 임시신호기 설치 시 2인 1조 이동
	- 반대선 진입 방지를 위한 안전휀스(띠, 경광봉) 설치
작업종료	- 최초열차 통과 이상유무 확인 · 열차운행에 지장이 없는지 여부 확인 및 첫 열차 현장통과 이상유무 확인

⑵ 점검결과 지적사항은 익년도 궤도공사 적격심사 시 감점으로 적용하며, 그 기준은 다음과 같다.

㈎ 차단업무 불이행 : 1회 불이행(-2점), 2회 불이행(-3점)

㈏ 체크리스트 점검 : 1회 지적(서면 경고), 2회 지적(-2점), 3회 지적(-3점)

구분	관련근거 자료	점검주기	감점적용			비고
			1회	2회	3회
차단업무 불이행	- 차단요청 및 승인 문서	수시	-2점	-3점	-
업무지시 불이행	- 체크리스트에 의한 점검 * 체크리스트 1개 항목 이상 지적 시 1회 불이행으로 평가	분기 1회	서면 경고	-2점	-3점

자. (장비운전원 자격) 공사에 투입되는 장비(연마차) 운전원은 인적오류 예방을 위하여 다음 각 호의 자격을 갖추어야 한다.

(1) 공사 계약일 기준으로 연령이 65세 이하인 자로써 「외부업체 장비운전원 자격기준 강화 세부시행 계획(안), 선로관리처-1164(2016.03.10.)호」의 기준에 적합한 자

(2) 철도안전법시행령 제11조 제1항5호 '철도차량운전면허' 소지자로서 동법 제21조에 따라 운전업무수행에 필요한 조건을 갖추고 해당지역의 인증구간 자격을 갖춘 자

(3) 철도안전법 시행규칙 제40조 (운전업무종사 등에 대한 신체검사)를 궤도공사 착공 전 신체검사를 완료한 자 적격성 확인자료를 공사감독자에게 제출한 자

1) 최초검사: 해당 업무를 수행하기 전에 실시하는 신체검사

2) 정기검사: 최초 검사를 받은 후 2년마다 실시하는 검사

(4) 공사 착공 전 발주청에서 시행하는 안전교육 2일(16시간)을 이수하고 공사기간 내 운행하게 되는 노선, 역구내에 대하여 모두 실무수습(첨승), 시청각 교육 등 시행을 완료한 자

차. (장비운전원 휴대품) 열차운행선로지장작업업무세칙 제59조 및 제78조에 의거 다음 각 호의 휴대품을 휴대하고 운전하여야 한다.

⑴ 시계 및 열차운전시각표

	⑵ 방호용품 : 적색․녹색기, 적색․녹색등, 단락용 동선 ⑶ 정거장과 무선통화가 가능한 무선전화기 ⑷ 장비운전원적합성검사표 ⑸ 무선전화기 등 비상용 통신기기 ⑹ 사각열쇠(베른키) ⑺ 운전명령서식(고속철도 운전취급 세칙 별지4) ㈎ 운행 중인 선로의 작업과 작업자 보호요구 ㈏ 절대표지 통과 후 시계운전 ㈐ 고속선 진입신호기 통과 후 시계운전 ㈑ 입환표지 통과 후 시계운전 ㈒ 구분진로쇄정 취소 ㈓ 선로전환기 수동전환 ㈔ 선로전환기 개통방향 확인 5. 기타 시방서 가. 연마 후 품질기준 미달 시 또는 연마 중 레일 흠(결함) 발생 시 재연마로 복원 불가능한 경우 원상 복구하여야 하며 이에 소요되는 재료비 및 시공비는 수급인은 부담으로 하여야 한다. (연마 중 또는 장비 이동 중 시설물이나 레일훼손이 없도록 주의철저) 나. 연마 중 화재 예방부분 포함, 연마 중 연마차 또는 시설물에 화재가 발생하여 시설물 피해 또는 열차운행 지장을 초래할 경우 원상복구 및 피해배상을 하여야 한다.

	다. 수급인은 공사 착수 전 시공방법과 기계기구, 장비, 인원동원 계획 등 공사 전반에 관한 사항을 사전에 시행부서와 협의, 공사 착수 전 예정 공정표를 제출하여야 한다. 라. 공사기한 연장 및 공사일시중지 ⑴ 공사 착공 후 우리공사의 형편에 의하여 선로차단공사를 승인하지 못하였을 경우에는 수급인의 요청에 의하여공사일시정지 결의를 할 수 있다. ⑵ 장기간 우천 및 천재지변 등으로 인하여 작업을 하지 못하였을 경우에는 기상증명으로 공사기간을 연장할 수 있으나 선로차단공사 승인 후 수급인의 사정으로 작업을 하지 못하였을 경우에 수급인은 다음 차단 공사계획을 차단 10일전에 제출하여야 하며 그 기간은 기한연장의 사유가 될 수 없다. 마. 사진촬영 ⑴ 본 공사는 시공 전, 시공 중, 시공 후의 주요공정을 천연색으로 동일위치, 동일각도에서 사진 촬영하여 사진첩 2부를 작성, 원판 포함하여 제출하여야 한다.(CD-ROM 포함) ※ 연마공사를 수행키 위하여 작성된 도면, 문서 등 일체는 철도공사에 귀속한다. 바. 감독자는 안전관리비 사용내역에 대하여 수시 확인할 수 있으며 수급인은 이에 응하여야 한다. 사. 공사가 완료되었을 때는 공사 현장 내 뒷정리 및 환경을 깨끗이 하여 감독자의 검사를 받은 후 준공검사에 임하여야 한다. 아. 본 시방서에 명시되어 있는 않은 규정 및 법령은 상호협의 및 상위법에 의한다.

		3. 표 준 안 전 시 방 서
	제1조(적용기준) 본 표준안전시방서는 2.공사시방서(안전시방서)에서 정한 사항 외 일반적인 안전관리 사항에 적용한다. 제2조(안전관리 목표) 안전관리는 인명의 사상과 장비․물자의 파괴 및 손실을 가져올 잠재적 위험 상태로부터 사고를 예방하여 임무를 안전하게 수행할 수 있도록 계획․편성․통제하고, 최종적으로 공사시행 시 무사고․무재해 현장을 실현하는 것을 그 목표로 한다. 제3조(안전관리 조직․안전관계자 임무) ① 일반사항 1. 시공자는 철도안전법, 산업안전관계법규(산업안전보건법, 산업안전재해보상법, 근로기준법 등) 및 동법 시행령의 제반규정과 의무사항을 준수한다. 2. 현장대리인 및 안전관리 종사자 또는 작업책임자는 작업원 및 공중(公衆)의 안전에 대한 보호책임이 있으므로 작업원 및 공중을 보호하기 위하여 충분한 보호·예방조치를 한다. 3. 시공자는 결국 안전사고 방지에 관한 모든 책임을 갖고 있으므로 본 설계서에 특별히 정하지 않은 사항이라도 안전유지를 위하여 포괄적이고 적극적인 대책을 수립한다. 4. 철도운행선 공사는 열차운행선에서 시행되는 특수성을 감안하여 별도의 안전관리자를 배치하여야 한다.[열차운행선 인접공사 안전관리 매뉴얼(’18. 3.)] ② 안전관리 조직 1. 안전관리 조직은 종․횡적으로 원활하고 신속하게 업무가 전달되고 상호협조가 용이한 형태로 구성한다. 2. 안전관리 조직에는 공사현장에 종사하는 자는 모두 포함된다. 3. 안전관리 업무의 수행을 위한 조직은 안전보건관리책임자, 안전관리자, 안전담당자 등으로 구성한다.

	③ 안전관리 조직의 역할 1. 안전관리계획서에 따른 표준작업 이행 및 안전시공 여부를 확인 한다. 2. 안전관리계획서에 따른 안전교육을 실시한다. 가. 제반 유해 위험 요소의 제거 나. 계획적이고 체계적인 현장 순찰 및 위험예지활동 전개 ④ 안전보건관리책임자 1. 안전보건관리책임자는 현장 안전관리업무를 총괄한다. 2. 공사에서 현장안전점검 시 입회하고 점검결과 지적사항을 시정하여야 한다. 3. 안전관리업무와 관련하여 발주청에 보고․제출하는 서류 등에 대한 책임이 있다. 4. 산업재해 예방계획 수립, 안전보건관리 규정의 작성 및 근로자의 안전․보건 교육 5. 작업환경의 측정 및 점검, 개선 한다. 6. 산업재해의 원인 조사 및 재발방지 대책을 수립한다. 7. 안전 보건에 관련되는 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부를 확인 한다. 8. 기타 근로자의 유해 위험 예방 조치를 시행한다. ⑤ 안전관리자 1. 안전관리자는 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 산업안전보건 법규에서 정한 직무 및 공사 안전을 담당한다. 2. 작업자에 대한 안전교육 실시 및 작업현장 수시 순회점검을 시행한다. 3. 방호장치․기계․기구 및 설비 또는 보호구 구입 시 적격품을 선정한다. 4. 기타 안전에 관한 사항으로 고용노동부장관이 정한 사항을 준수하고 위험작업에 대한 교육을 시행한다. 5. 협의되지 않은 작업(무단작업)의 시행여부를 확인 및 제재하고 작업원의 산업안전수칙 숙지상태를 점검한다.

	6. 작업원에 대한 안전교육은 안전교육일지에 기록하고 기타 안전관련 사항 조치 시 조치사항도 기록한다. 7. 선로 변 작업 시 작업원에게 열차운전시각을 주지시켜 열차안전운행을 도모하여야 한다. 8. 선로에 인접하여 작업 할 때는 작업원에게 안전모와 안전조끼를 착용시켜 기관사가 식별하기 용이하도록 하여야 한다. 9. 안전관리 종사자는 당해공사의 다음 사항을 특별히 점검한다. 가. 가설물 설치 등에 대한 안전성 및 작업 중단 또는 작업 종류 후의 상태 나. 복장 및 장구류 다. 일기예보 등 기상상태를 파악하여 우기에는 풍수해 예방개소 점검 라. 작업의 곤란성과 위험성에 대한 조치, 기타 작업원 및 공중안전에 필요한 모든 사항을 사전 조치 ⑥ 전기철도안전관리자 1. 전기사령과 전차선로 급․단전을 협의 한다. 2. (단전 시) 전차선로 단전 확인 및 접지걸이 설치 후 작업책임자에게 통보 한다. 3. (급전 시) 작업책임자로부터 작업관계자 철수 확인 후 접지걸이를 철거 한다. 4. 전차선로가 급전된 상태에서 시행되는 작업은 열차운행선로지장작업 업무세칙 제11조에 의한 안전관리를 시행 한다. ⑦ 안전담당자 1. 안전, 보건에 관련되는 안전장비를 구입하고 관리 한다. 2. 작업완료 후 현장정리 및 위험시설에 대한 안전조치 상태를 확인 한다. 3. 안전보호구 착용 상태를 확인하고 불량 상태를 시정 조치한다. 4. 작업장 정리정돈, 안전시설물 유지관리 등 작업환경 조성상태를 확인 한다. ⑧ 현장대리인 1. 현장대리인은 공사시공에 적합한 기술자격 소지자로 선임한다.

	2. 현장대리인은 안전관리와 안전대책 관리 각서를 제출하고 인계인수까지 현장에 상주하며, 현장대리인․사용인․작업자의 숙소 및 자재보관서 등을 감독자에게 보고하여야 한다. 3. 작업원의 기능․지식․숙련도 등에 대하여 감독자가 부적격자로 판명하여 통보할 경우 현장대리인은 그 작업원을 즉시 교체 하여야 한다. 4. 현장대리인이 부득이하게 현장을 이탈할 경우에는 공사감독자의 승인을 득하고 안전관리자에게 인계인수를 하여야 하며, 공사감독자의 승인 없이 현장을 이탈할 때에는 과태료 부과, 교체 등 관련자를 제재조치 할 수 있다. 5. 현장대리인은 작업 전반에 대한 안전관리 및 작업관리 업무를 총괄하여야 한다. 6. 현장대리인(안전관리자)은 작업시작 30분 전에 작업내용과 개인별 임무를 숙지토록 안전교육(작업특성에 맞는 안전작업계획서 작성 포함, 참여자 서명)을 시행하고 공사감독자 확인 후 작업을 시행한다. 7. 현장대리인은 매일 작업 전에 해당 작업에 대한 안전을 위하여 다음 사항을 주시시킨다. 가. 작업의 목적과 범위 및 각 작업원이 담당 직무 나. 작업의 시행순서와 방법 및 작업지시서의 검토 다. 작업이 곤란성과 위험성에 대한 조치 등 8. 현장대리인은 고령자(65세 이상) 및 심신 미약자에 대한 적합성 및 인성검사를 시행하여 건강상태 및 업무숙련도 등을 확인 후 적정 작업에 배치하여야 한다. 가. 공사 착수 전 현장대리인은 참여기술자에 대한 교육을 4시간 이상 시행하고 작업시작 30분 전에는 작업내용과 개인별 임무 및 내용을 숙지토록 안전교육을 시행을 하여야 한다. 나. 작업현장 주변 소음에 의하여 열차감시원ㆍ감독자ㆍ작업자 상호간에 소통이 차단될 경우를 대비하여 대체 신호방법과 대응요령을 사전에 협의하고, 작업당일 현장에서 대응연습을 시행하여야 한다. 다. 기타 안전관리사항은 별도로 제공되는 안전관리계획서의 안전관리 세부사항을 준수한다.

⑨ 장비유도자

1. 장비유도자는 작업자에게 열차의 접근 여부를 알려주기 위한 기본 휴대품(열차시각표, 호루라기, 적․백 수신호기, 손전등, 단락동선 등)을 소지하고, 그 여부를 현장대리인에게 확인 받고 근무일지에 서명한다.

2. 장비유도자는 선로 변 작업 시 작업 개소별로 배치하여 작업자가 열차에 접촉되지 않도록 열차접근 여부를 지속 확인 한다.

3. 장비유도자는 선로 변 작업안전수칙을 준수하며 인근역과 연락상태를 유지한다.

4. 의사소통이 되지 않는 구간으로 작업자가 이동하여 작업할 경우에는 사전에 다른 소통방법을 협의하고 연습을 시행한 후 작업하도록 한다.

5. 작업개소가 의사소통이 되지 않은 거리에 있을 경우에는 장비유도자를 작업개소 만큼 배치하여 개소별 열차를 감시토록 한다.

6. 장비유도 업무를 할 때에는 선로에서 벗어나 선로 변에서 감시하여야 하며, 본인의 안전관리에도 주의하여야 한다.

7. 장비유도자는 장비유도 이외의 다른 업무에 배치되어서는 안 되며, 휴대폰 사용이나 잡념으로 업무가 소홀해지지 않도록 특히 주의하여야 한다.

⑩ 작업자

1. 작업자는 스스로의 안전에 대한 궁극적 책임이 본인에게 있으므로 각종 수칙의 준수는 물론 수칙에 명기되지 않은 사항이라도 특별한 경우에는 작업책임자와 협의하여 안전에 유의한다.

2. 작업자는 안전모․안전화 등 개인 안전장구를 착용하고 작업현장에 출입하여야 하며, 모든 작업도구 및 공구는 작업 전에 점검하여 완전한 것만을 사용한다.

3. 작업자는 작업도중에 음주행위를 하여서는 안 된다.

4. 작업자는 작업책임자이 지휘계통에 따라 작업지시를 준수함은 물론 독단적인 행동을 하지 않는다.

5. 작업자는 작업장을 무단으로 이탈하지 말고, 작업 중 통신 및 연락을 확실하게 한다.

6. 작업자는 작업 중 위해개소 발견 시 즉시 작업책임자에게 보고하고 안전조치를 취한다.

7. 작업자는 고속작업 시 안전대 및 안전 고리를 확인하고, 감독자는 확인 후 작업지시를 해야 하며 자재 및 공구 등을 떨어뜨리지 않도록 한다.

8. 작업자는 현장작업 전에 주변정리를 한 후 작업에 임해야 한다.

⑪ 열차감시원

1. 열차감시원은 작업자에게 열차의 접근 여부를 알려주기 위한 기본 휴대품(열차시각표, 호루라기, 적·백 수신호기, 손전등, 단락동선 등)을 소지하고, 그 여부를 현장대리인에게 확인 받고 근무일지에 서명한다.

2. 열차감시원은 선로변 작업 시 작업 개소별로 배치하여 작업자가 열차에 접촉되지 않도록 열차접근 여부를 지속 확인 한다.

3. 열차감시원은 선로변 작업안전수칙을 준수하며 인근역과 연락상태를 유지한다.

4. 의사소통이 되지 않는 구간으로 작업자가 이동하여 작업할 경우에는 사전에 다른 소통방법을 협의하고 연습을 시행한 후 작업하도록 한다.

5. 작업개소가 의사소통이 되지 않은 거리에 있을 경우에는 열차감시원을 작업개소 만큼 배치하여 개소별로 열차를 감시토록 한다.

6. 열차감시업무를 할 때에는 선로에서 벗어나 선로변에서 감시하여야 하며, 본인의 안전관리에도 주의하여야 한다.

7. 열차감시원은 열차감시업무 이외의 다른 업무에 배치되어서는 안 되며, 휴대폰 사용이나 잡념으로 업무가 소홀해지지 않도록 특히 주의하여야 한다.

8. 열차감시원은 수급인에게 열차 접근여부를 확인하기 위한 열차접근경보 앱이 설치된 모바일 단말기를 지급 받았을 시에는 열차 접근여부 보조수단으로 활용하여야 한다.

⑫ 철도운행 안전관리자

1. 철도운행안전관리자는 그날 선로작업을 시작하기 전에 해당역장(고속선의 관제사와 상시로컬구간 운전취급책임자, 일          반선의 운전취급책임자를 포함한다. 이하 “역장”이라 한다)과 철도운행안전협의를 시행하여야 한다.

2. 철도운행안전관리자와 역장은 철도운행안전협의서를 공통으로 작성하여 각 1부씩 보관하여야 한다.

3. 철도운행안전관리자는 작업책임자 등 작업원에게 철도운행안전 협의 결과를 정확히 통보하여야 한다.

4. 철도운행안전관리자는 수급인에게 열차 접근여부를 확인하기 위한 열차접근경보 앱이 설치된 모바일 단말기를 지급 받았을 시에는 열차 접근여부 보조수단으로 활용하여야 한다.

5. 철도운행안전협의 내용중 변동사항이 발생한 경우 역장에게 즉시 통보하여야 하며, 철도운행안전관리자의 협의사     항은 열차운행선로지장작업 업무세칙 제33조에 의한 사항을 시행 한다

6. 철도운행안전관리자는 배치된 기간 중에 수행한 업무에 해하여 근무상황일지를 작성하여 철도운영자 등에게 제출하여야 한다.

	제4조(안전점검) ① 안전검사 1. 발주자는 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 안전에 관한 제반 관리 상태를 점검 또는 진단한다. 2. 점검․진단결과 미흡하거나 잘못된 사항이 있을 경우 시공자에게 해당공사의 일시중단을 요구하고 시공자는 즉시 해당공사를 중지하고 시정한다. ② 안전관리 활동 1. 발주자 및 시공자는 일상적인 자체 안전점검 계획을 수립․실시하여야 하며, 안전점검결과와 조치내용은 기록․유지하고 기록서류는 공사 준공 후 하자담보 책임기간까지 보관한다. 2. 현장 전체 또는 단위공종에 대한 일제점검을 실시하여 불안전한 요소를 발견․시정하는 점검을 의미하며, 분기․월간․주간점검계획에 의거 정기적으로 실시하고 모든 작업현장의 파악과 기 실시한 안전점검의 상황을 비교하거나 단위별 안전대책 전반에 대한 성과를 평가한다. ③ 안전점검 1. 일일점검 시는 다음사항을 확인하고 점검한다. 가. 전 작업장에 대한 점검 및 순찰을 시행 나. 점검 실시는 현장대리인, 안전관리자, 감독자가 시행 다. 실시 시기 및 회수는 1일 1회 이상 점검 라. 주요점검 및 순찰내용은 다음사항을 확인 ⑴ 강관비계 및 안전난간대, 각종 간판 설치상태 점검 및 확인 ⑵ 음주 후 출근상태, 개인보호구 미 착용자 및 복장불량자 즉시 지적 및 시정지시 ⑶ 작업 시 신호수 및 장비유도자 배치여부 확인 및 작업장 내 정리ㆍ정돈상태 점검 ⑷ 기타 작업장 내 불안전한 상태 및 불안전한 행동(선로무단횡단 등) 점검 ⑸ 비상연락망 숙지 사항

	마. 점검시행 후 다음과 같이 조치 ⑴ 점검결과 점검기록부 비치 및 일일 결재 ⑵ 점검 시 미비사항 및 지적사항은 현장에서 조치하고, 결재권자의 판단 및 결심을 요하는 사항은 안전관계자 협의 후 안전총괄 책임자에게 대책수립 보고 2. 정기점검 시는 다음 사항을 확인하고 점검한다. 가. 전 작업장에 대하여 점검 및 순찰 나. 점검 실시는 현장대리인, 안전관리자, 감독자가 시행 다. 점검실시 시기는 공정별로 매월 4일(1월 1회) 실시 라. 주요 위험개소를 합동으로 점검, 순찰하여 미비사항 및 개선사항 집중 토의 후 개선사항을 결정 3. 특별점검 시는 다음 사항을 확인하고 점검한다. 가. 필요하다고 인정되는 작업장에 대하여 점검 및 순찰 나. 점검 실시는 현장대리인, 안전관리자, 감독자가 시행 다. 점검실시 시기는 안전조치 상 필요하다고 인정될 때 시행 라. 주요점검 및 순찰내용 ⑴ 특별히 점검 및 순찰이 필요하다고 인정되는 사업장 ⑵ 호우, 대설, 태풍 등 천재지변에 의해 예상되는 위험지역 및 취약지구

	제5조(안전교육) ① 안전교육의 목적 근로자가 안전하게 업무를 수행할 수 있도록 안전의 중요성을 인식시키고 맡은 작업의 작업방법에 관한 지식․기능을 습득하도록 교육 및 훈련하여 작업에 대한 안전태도를 양성하며, 재해예방과 실질적인 효과를 거두는데 목적이 있다. ② 안전교육 계획 1. 일일 안전교육은 매일 현장 투입 전 당해 공정에 대한 교육을 실시한다. 2. 정기 안전교육은 매월 2시간 이상(교육실시 일지작성)을 실시한다. 3. 수시교육은 매일 현장 투입 전 당해 공정에 대한 안전교육을 실시한다. 4. 특별교육은 유해 위험작업 투입 시 안전교육을 실시한다. ③ 대상별 교육내용 1. 일일 안전교육은 다음과 같이 실시한다. 가. 안전에 대한 기술적인 사항 교육 나. 당해 사업장의 안전관리규정에 정한 임무를 교육 다. 방호장치, 기계기구 및 설비, 보호구 등 안전에 관련되는 보호구 착용에 대한 교육 라. 법 또는 법에 의한 명령이나 안전관리 규정 중 안전에 관한 사항을 교육 2. 신규 채용 시는 다음의 안전교육을 실시한다. 가. 산업안전보건법령에 관한 사항 및 현장설명 및 유해위험 작업개소 나. 근로자의 의무 및 회사규정 설명

	다. 당해 설비, 기계 및 기구의 작업안전점검에 관한 사항 라. 기계, 기구의 위험성과 안전작업방법에 관한 사항 마. 보호구 착용요령 및 생활화 강조 바. 기타 안전, 보건관리에 필요한 사항 3. 작업내용 변경 시 다음의 안전교육을 실시한다. 가. 산업안전보건법령에 관한 사항 나. 당해 설비, 기계 및 기구의 작업안전 점검에 관한 사항 다. 기계, 기구의 위험성과 안전작업방법에 관한 사항 라. 기타 안전, 보건관리에 필요한 사항 4. 정기안전교육은 다음과 같이 실시한다. 가. 산업안전보건법령 및 작업공정의 유해위험에 관한 사항 나. 표준 안전 작업방법에 관한 사항 다. 보호구 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 라. 안전사고 사례 및 산업재해 예방대책에 관한 사항 마. 기타 안전, 보건관리에 필요한 사항 5. 관리감독자 안전교육은 다음과 같이 실시한다. 가. 산업안전보건법령 및 작업안전지도 요령에 관한 사항 나. 기계․기구 또는 설비의 안전점검에 관한 사항 다. 관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항 라. 기타 안전, 보건관리에 필요한 사항

	6. 특별안전교육은 다음과 같이 실시한다. 가. 밀폐된 장소(탱크 내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다.)에서 행하는 용접작업 또는 습한 장소에서 행하는 전기 용접 장치는 다음사항을 교육한다. ⑴ 작업순서, 안전작업 방법 및 수칙에 관한 사항 ⑵ 환기설비 응급저치에 관한 사항 ⑶ 전격방지 및 보호구 착용에 관한 사항 ⑷ 작업환경점검 및 기타 안전보건관리에 필요한 사항 나. 아세틸렌 또는 가스접합 용접장치를 사용하여 금속의 용접 용단 또는 가열작업은 다음 사항을 교육한다. ⑴ 용접, 분진 및 유해광선 등이 유해성에 관한 사항 ⑵ 가스용접, 압력 조정기, 호스 및 취관두 등의 기기점검에 관한 사항 ⑶ 작업방법, 작업순서 및 응급처치에 관한 사항 ⑷ 안전기, 보호구 취급 및 기타 안전보건관리에 필요한 사항 다. 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 이하의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업은 다음사항을 교육한다. ⑴ 방호장치의 종류, 기능 및 취급에 관한 사항 ⑵ 걸고리, 와이어로프 및 비상정지 장치 등의 기계기구 점검에 관한 사항 ⑶ 화물의 취급, 작업방법, 작업통신 및 공동 작업에 관한 사항 ⑷ 기타 안전보건관리에 필요한 사항 라. 고소작업 : 추락재해 방지에 관한 사항을 교육한다. 마. 운반 등 하역기계에 의한 작업은 다음 사항을 교육한다.

	⑴ 운반 하역기계 및 부속설비의 점검에 관한 사항 ⑵ 작업순서와 방법에 관한 사항 ⑶ 안전 운전방법 및 작업통신 화물 취급에 관한 사항 ⑷ 기타 안전보건관리에 필요한 사항 바. 산소 결핍 장소에 있어서의 작업은 다음 사항을 교육한다. ⑴ 산소농도 측정 및 작업환경에 관한 사항 ⑵ 사고 시의 응급초치 및 비상 시 구출에 관한 사항 ⑶ 보호구 착용․사용방법, 산소 결핍 작업이 안전교육 방법에 관한 사항 ⑷ 기타 안전보건관리에 필요한 사항 7. 교육 후 다음과 같이 기록 유지 한다. 가. 안전교육계획에 의한 교육을 실시한 후 교육내용을 기록 유지 나. 일일 안전교육 및 수시교육은 안전일지에 기타교육은 별도 양식에 기록 유지 제6조(안전장구 확보) ① 안전보호구는 안전모, 안전화, 안전벨트, 보안경, 마스크, 귀마개, 안전장갑, 안전등 등을 확보한다. ② 각종 안전보건 표지판은 무재해 기록판, 일반․건설․전기안전수칙, 위험표지를 확보한다. ③ 전기안전시설은 분전반 안전시설, 전격방지 장치를 설치한다. 제7조(안전관리비 집행) ① 안전관리비의 계상은 다음과 같다. 1. 시공자는 공사계획을 체결할 때 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 공사비에 계상 2. 계상된 산업안전보건관리비는 다른 목적으로 금지

	3. 산업안전보건관리비의 계상 및 사용기준은 고용노동부 고시에 따름 ② 산업안전보건관리비의 사용내역은 다음과 같다. 1. 안전시설비(공사설계내역 및 표준품셈 명기사항은 제외) 2. 개인보호구 및 안전장구 구입비 3. 안전진단비, 안전보건 교육 및 행사비 제8조(사고 발생 시 긴급조치 요령 및 보고계통) ① 작업 중 사고 발생 시 조치 및 보고 체계는 다음과 같다. 1. 철도교통사고 및 운행 장애(관리장애 포함) 보고 계통도는 ‘철도사고조사 및 피해구상 세칙’ 별표2에 따름 2. 사고 시 다음의 조치를 시행한다. 가. 사고 발생 시 사상자 우선 응급조치 및 관계자 외 사고현장 출입제한 나. 사고복구 계획에 따라 사고복구 작업 시행 ② 즉시보고 사항은 다음과 같다. 1. 보고대상은 철도건설공사와 관련된 모든 사고(장애) 2. 보고방법은 전화, 팩스, 문자메시지 등 가능한 통신수단을 사용하여 사고발생 즉시 보고 ③ 이상 징후 발생 시 대처요령은 다음과 같다. 1. 사고를 유발할 수 있다고 판단되는 이상 징후 발견 시 발견자 또는 공사현장의 장은 유․무선 전화 또는 문자정보서비스를 이용하여 관계 소속에 신속히 보고 2. 열차운행선 공사 시 열차를 긴급히 정차시킬 필요가 있을 때는 ‘비상전호’ 또는 운전취급규정 제264조(열차의 방호) 및 제266조(무선전화기 방호 시 조치)를 준용하여 우선 열차를 정차시키고 즉시 철도운영자에게 통보 3. 이상 징후를 보고 받은 관계 소속은 원인을 조사하여 대책방안을 수립 시행

	④ 정식보고는 감독자의 지시에 따른다. ⑤ 긴급복구는 지역본부장(사무소장)의 지시에 따라 시행한다. 제9조(화재예방) ① 작업 전 화재예방을 위하여 화재예방 교육을 시행하고 소화기, 감시자 배치 등 충분한 조치를 취해야 한다.(특히 지하구간 작업 시) ② 작업에 사용되는 재료 중 인화물질은 반입 할 때에는 감독자의 확인을 받아야 한다. ③ 위험성평가의 위험요인에 추가하고 근로자 사전교육 시행 후 작업을 개시한다. ④ 화재 발생 시 초동 진화가 가능하도록 작업장소의 지정된 곳에 대형소화기(25kg)를 비치하며, 진화장비 배치장소를 숙지하고 작업 전 사전 훈련을 한다. ⑤ 화재 발생 시 초동진화를 신속히 하기 위하여 화재대처용 마스크를 비치한다. ⑥ 작업 공정 중 발생할 수 있는 화재유발 요인을 사전에 검토하여야 한다. 제10조(열차안전운행) ① 안전관리 대책 1. 수급인은 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 산업안전보건법규 및 열차운행선 인접공사 안전관리 매뉴얼에서 정한 안전을 담당하는 안전관리자를 선임하여 안전관리를 하여야 하며, 시공 중 발생되는 일체의 사고에 대하여 그 책임을 진다. 2. 수급인은 작업 전 감독자와 협의하여 안전계획을 수립하고, 산업재해(사상․사고) 예방을 위한 안전교육(산업안전보건관계법령 및 안전수칙 등)을 실시하여야 한다. 3. 감독자는 안전관리계획서를 면밀히 검토하여 보완사항이 있을 경우 즉시 수급인에게 수정 보완토록 하여야 한다. 4. 안전관리요원은 작업 전에 현장종사원에게 필요한 안전교육을 실시하여야 하며, 안전관리일지를 비치․기록하고, 작업현장을 수시로 순회하여 안전사고 예방에 최선의 노력을 다하고 감독자에게 이상 유무를 보고하여야 한다.

5. 수급인은 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독자와 충분히 협의하여야 하며, 필요시 입회를 요구하여야 한다.

6. 공사현장에 투입되는 작업자는 작업시간 단축을 위하여 정해진 통로 이외의 곳으로 통행해서는 안 된다.

7. 현장대리인은 작업 전에 작업내용․시공방법 등을 작업원에게 명확히 지시하여 작업 중 사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 공구 및 공사재료의 사용에 대하여 명확한 지시를 하고 사용 직전에는 충분한 검사를 실시하여야 한다.

8. 공사 시행 시 열차운행 및 시설물에 지장을 주지 않도록 유의하고, 차량통행 및 순회자, 고객 등에 지장이 없도록 충분한 대책을 강구한다.

9. 철도선로 내 및 이에 접하여 작업을 할 때에는 장비유도자를 배치하여 열차접근 시 조기대피를 시키도록 하고 공사재료, 작업용 공구 등은 열차운행에 지장을 주지 않도록 관리하여야 한다.

10. 장비유도자는 수급인이 작업순서, 작업내용, 작업방법, 열차시각, 열차운전사항 및 연락방법 등에 대한 교육을 사전에 충분히 시켜야 한다.

11. 모든 작업원은 안전조끼를 착용하여야 하며, 정해진 휴대품을 지참한 장비유도자를 고정으로 배치하여야 한다.

12. 열차운전에 관련된 공사를 할 경우에는 해당 역장 및 사업소장과 충분히 협의한 후 적절한 조치를 취하여야 한다.

13. 심신 미약자는 적합성 및 인성검사를 시행하여 건강상태 및 업무숙련도 등을 확인 후 적정 작업에 배치하여야 한다.

14. 공사감독자는 작업 전 열차운행협의를 하고 협의 전에 작업현장 투입을 금지하여야 하며, 열차운행상황에 맞는 특별교육 시행여부를 확인하고, 감독자 협의 없이 무단작업 시 공사 중지 및 제재를 요청하여야 한다.

15. 공사감독자는 차단작업 시 관제, 역 등의 승인 없이 작업하면 전면 작업 중지 및 현장대리인 교체를 요청하여야 한다.

16. 의사소통이 되지 않는 구간으로 작업자가 이동하여 작업할 경우에는 미리 다른 소통방법을 협의하고 연습을 시행한 후 작업하도록 한다.

17. 터널, 운행선 근접 등 임시고정 시설물이 열차풍압, 열차진동으로 인하여 이완, 탈락이 되지 않도록 작업책임자 및 안전관리자가 확인한다.

	18. 철도운행안전관리자는 차단승인 전 선로 내 진입 금지를 교육하고, 장비유도자는 작업 종료 후 모든 작업원이 선로에서 철수 완료시까지 선로 내 방호를 시행 한다. 19. 주변 소음으로 인하여 열차 진입여부를 확인하지 못할 경우에는 작업자(2인 1조)간 상호 감시하며 작업 한다. 20. 본선에서 열차운행 시 큰 소음으로 인하여 장비열차 등의 진입을 확인하지 못할 경우를 대비하여 본선 열차운행 시에도 작업을 일시 중지한다. 21. 각 분야별 세부작업은 철도설계지침 및 편람을 적용 한다. 22. 작업 특성에 따른 필요한 안전대책은 안전계획서 작성 시 추가한다. ② 작업 단계별 안전관리 방안 1. 작업시행 전 다음 사항을 확인한다. 가. 다음 사항의 작업계획을 수립하고 확인한다. ⑴ 현장대리인은 공사시행 감독자와 작업계획 사전 협의 ⑵ 시공 상세도에 따른 작업방법, 건설장비와 인원 동원계획 수립 ⑶ 동원인원, 장비, 자재준비상태 확인 ⑷ 작업시간 적정성 및 관계소속(관련 역, 관련 사업소) 통보여부 확인 나. 작업계획에 따른 관련 부처간 사전 협의하고 확인한다. ⑴ 시설물(설비) 철거 설치 관련 해당 역장과 사전 업무협의 ⑵ 철도운행안전협의서를 역과 협의 전 관련부서의 작업승인서 승인을 득한 후 운전취급역과 협의를 시행 ⑶ 작업협의 전에는 선로 내 출입 및 준비작업 등 절대 금지, 위반 시 작업취소 조치 ⑷ 주요장치 절체작업에 따른 차단시간확보 및 열차사이 일시중지 다. 안전책임자를 지정하여 작업내용 및 안전교육을 실시하고 확인한다.

	⑴ 당일 작업할 내용, 작업시간, 작업방법 설명 및 안전교육 실시 ⑵ 전 작업원의 안전모, 안전화, 작업복 착용 생활화 ⑶ 안전보호구 및 복장 착용 부적격자 현장 투입 제한 ⑷ 작업 시행을 위한 안전교육 시행 전 안전관련 설비 및 안전보호구 등을 점검확인하고 이를 기록 유지 ⑸ 작업 전 장치별 공종별 금지사항 교육 라. 작업현장 준비 및 안전조치 상태를 확인한다. ⑴ 장비유도자 배치 및 보호구와 휴대품(안전조끼, 안전모, 무선전화기, 운전시각표, 경보설비, 손전등, 적․백색기, 적․백색등 등) 휴대 ⑵ 보호설비 설치 상태 2. 작업 시행 중에는 다음 사항을 확인한다. 가. 장비유도자에 대하여는 다음 사항을 확인한다. ⑴ 장비유도자는 가능한 철도경험이 있는 자로 채용․근무토록 유도하여 이상 사항 발생 시 신속히 대처(철도 무경험자는 교육 강화 및 특별관리) ⑵ 수시로 장비유도자의 근무상태, 안전수칙 이행여부, 기본 보호구와 휴대품 소지여부(안전조끼, 안전모, 무선전화기, 운전시각표, 경보설비, 적․백색기, 적․백색등 등) 휴대 확인하고 감시원 근무일지에 서명 ⑶ 장비유도자 배치는 작업개소가 의사소통이 되지 않은 거리에 있을 경우 작업 개소 수만큼 배치하여 개소별로 장비를 유도 나. 건축한계 저축여부 확인 사항은 다음과 같다. ⑴ 열차 진입 시 모든 작업 중단 ⑵ 장비작업으로 운행 선에 지장우려 시 필히 차단공사 승인 후 시행

	⑶ 작업 반경 내의 작업원 및 선로와의 안전거리 확보 유무 수시 확인 다. 지하매설물(케이블, 관류 등) 발견 시 즉시 관계처에 통보(비상연락망 상시 소지) 라. 주변의 현지여건을 고려하여 무리한 작업 및 타성에 젖은 작업을 금지 마. 안전관리자는 다음 사항에 대하여 매일 순회 점검을 실시하고 기록 유지한다. ⑴ 점검관리대장 기록 유지 ⑵ 시정사항은 조치이행계획을 세부적으로 수립하고 이행결과 확인 ⑶ 현장대리인은 점검사항 및 조치결과를 매일 확인 바. 안전한 시공 및 철도운행선 작업안전 확보를 위하여 다음 사항을 준수한다. ⑴ 열차운행선 근접지역 및 정거장 구내 공사 시 ‘열차운행선로지장작업업무세칙’ 등의 제 규정에 따라 시행 ⑵ 사용 자재 및 기계기구류는 열차운전에 위해를 주지 않도록 관리 ⑶ 화약류․유류 등의 인화물질을 사용할 경우 선로에 근접하여 보관금지 ⑷ 공사 작업원에게 열차운전시각표를 주지시켜 열차안전운행을 확보 ⑸ 선로에 인접하여 작업할 때는 작업원에게 안전모와 조끼를 착용하도록 하여 기관사가 식별이 용이하도록 한다. ⑹ 철도운행선에 공사관계자 외 외부인이 출입하지 못하도록 통제하고, 공사인력과 외부인이 구별되도록 공사인력은 안전보호구 및 작업복장 등을 통일되게 한다. ⑺ 안전관리자는 매일 공사 시행 전에 공사인력 명단을 공사감독자에 작성 제출하여 외부인의 선로변 작업 및 선로출입을 통제한다. ⑻ 현장대리인은 공사인력에 대하여 공사내용 및 열차운행사항 등 외부 유출 시 열차안전에 저해가 될 수 있는 사항을 보안유지토록 교육하고 필요 시 보안각서를 징수한다. 3. 작업 시행 후에는 다음 사항을 확인한다.

	가. 다음 항목으로 합동점검 시행한다. ⑴ 작업 완료 후 자재 등이 건축한계 및 안전 이격거리 확보여부 확인 ⑵ 장비, 자재 및 공구류의 정리정돈 상태 확인 ⑶ 작업 종류사항을 관계 역 및 사업소, 운전관제에 통보 나. 기기별 동작 및 기능상태 점검은 점검목록에 의한 규정상 기준치 적합여부를 확인 제11조(현장 작업여건에 따른 안전보건상의 조치) ① 안전보건 관리 1. 공사현장의 안전․보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체계를 구성하여야 하며, 안전수칙에 따라 작업 전에 교육 등을 통하여 재해방지에 필요한 주의사항을 충분히 주지시키고, 항상 안전관리에 유의한다. 2. 하도급 공사계약을 체결할 때는 고용노동부장관이 정하는 바에 의하여 산업재해예방을 위한 표준안전관리비를 공사금액에 계상하여야 한다. 계상된 안전관리비는 공사현장의 재해방지 및 근로자의 보건관리에 사용하며, 다른 목적으로 사용해서는 안 된다. 3. 인적․물적 사고가 발생하열을 때에는 즉시 감독자와 업무담당자에게 보고하고, 민․형사상의 모든 책임은 시공사가 진다. 4. 시공자는 소음, 진동, 교통장애 및 분진 등의 발생으로 인해 부근 거주자 및 통행자에게 생명, 신체 및 재산상이 피해가 발생하거나 불편이 없도록 주의하여야 한다. 5. 시공자가 고용하는 시공 종사자가 신체적, 정신적 및 기능적으로 부적당한 행위가 있을 때에는 감독자 또는 업무담당자가 즉시 그이 교체를 요구할 수 있으며, 불안전한 자의 현장투입을 금지한다. 6. 안전관리책임자가 장기 출장할 때에는 후임자를 선정하고, 감독자에게 승인을 받는다. 7. 작업현장에 출입하는 사람은 필히 적절한 안전장구 및 보호구를 착용하도록 한다. 8. 모든 작업도구 및 공기구는 사전에 점검하여 견고한 것만을 사용한다.

	9. 작업 전․중 음주행위를 금하고, 큰소리로 떠들거나 모닥불을 피우는 일이 없도록 한다. 10. 위험한 작업의 경우에는 감시자를 배치하여 근접되지 않도록 하며, 감독자 입회하에 시공책임자의 지시에 따라 안전하게 작업이 완료되도록 한다. ② 보건상의 조치 1. 작업현장에서의 산업보건기준은 다음 사항을 준수한다. 가. 가스․증기․유해광선․초음파․소음․진동․이상기압․병원체에 의한 오염 등 근로자에게 유해한 작업은 그 원인을 제거 또는 대체, 작업방법 및 시설의 변경 또는 개선 조치 나. 작업장소의 채광 및 조명은 명암의 차이가 침하지 않고, 눈이 부시지 않게 법정수준으로 설치 다. 고․저온, 건조, 다습한 옥내작업 시는 냉․난방, 통풍 등 적절한 온․습도조절 조치 라. 근로자들이 휴게 또는 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 구비 마. 부상자의 응급치료에 필요한 응급용구를 상비하고, 비치상조와 사용방법을 근로자에게 통보 2. 근로자에 대한 건강진단은 채용 시 그리고 취업 중 정기적으로 실시한다. 3. 작업환경측정은 다음 사항을 준수한다. 가. 인체에 해로운 작업을 행하는 작업장은 작업환경을 측정, 평가한 후 그 결과를 기록․보존 나. 작업환경 측정결과 허용기준 이상일 때는 즉시 해당근로자에게 보호구를 지급하고, 설비의 설치 또는 개선 등 필요한 조치를 강구 4. 전염병, 정신병 또는 근로로 인하여 병세가 악화될 우려가 있는 질병자는 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한한다. 5. 근로시간 연장의 제한은 다음 사항을 준수한다. 가. 휴일작업이나 야간작업은 사전에 해당자에게 통보하고 동의를 받아야 하며, 필요할 경우 감독자를 입회할 수 있도록 조치

	나. 사용 중인 기존시설물에 인접한 장소에서의 작업은 작업시간을 주위 당사자들과 협의 조정하여야 하며, 무리가 가는 작업, 밀폐된 장소에서의 작업 등은 필요한 안전조치를 선행하고 안전작업 기준을 준수 다. 야간작업 시에는 조명, 작업장의 정리정돈, 식별이 용이한 통신, 통신수 및 경계표지의 설치 또는 배치, 울타리의 설치, 통로의 점검 등 사전에 필요한 조치를 하여 작업에 따른 위험이 없도록 조치 라. 유해 또는 위험한 작업에 종사하는 근로자에 대하여는 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하여 근로금지 제12조 공사관계자 현장상주 의무 강화 ① (감독자 현장 상주) 작업현장 감독자 (公社 직원 또는 건설사업관리기술인) 상주 1. 모든 작업현장은 감독자 상주가 원칙이며, 인력 확보시 까지 건설사업관리용역 확대로 업무공백 방지 2. 공사특성상 작업시간이 유동적이므로(07시 작업시행 등) 공사감독자는 “초과근로시간 제한” 예외 적용 (인사) ② (책임자 상주) 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주청이 지정한자) 및 철도운행안전관리자는 작업장 단위별로 반드시 현장 상주 1. 수급인은 단일 현장 작업시행을 원칙으로 하고, 부득이 공사현장이 분산되어 시행할 경우, 작업장 단위로 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주청이 지정한자)와 철도운행안전관리자가 반드시 상주하여야 한다. ③ (현장관리 강화) 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주청이 지정한자) 및 철도운행안전관리자가 감독자(公社 직원 또는 건설사업관리기술인)의 승인 없이 현장 이탈시 당일 작업중지 조치 1. 책임자(현장대리인 또는 발주청이 지정한자)와 철도운행안전관리자는 작업장 단위별로 현장에 반드시 상주하여야 하며, 감독자의 승인 없이 현장 이탈시 당일 작업 중지 등 제재 조치

제13조 산업안전보건법 준수

산업안전보건법 제64조

《도급에 따른 산업재해 예방 조치사항》

가.  도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영

* 매월 1회 이상 정기적 회의개최 및 결과의 기록·보존

나.  작업장 순회점검(1주일 1회 이상) 및 도급인·관계수급인 합동 안전·보건점검(분기 1회 이상)

다.  관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공 등 지원 및 법 제29조 제3항에 따른    안전     보건교육의 실시 확인

라.  다음 어느 하나의 경우에 대비한 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련

* 작업 장소에서 발파작업을 하는 경우

* 작업 장소에서 화재·폭발, 토사·구축물 등의 붕괴 또는 지진 등이 발생한 경우

산업안전보건법 제51조, 제54조

《작업중지 및 중대재해 발생 시 조치사항》

* 사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 및 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 작업을 중지시        키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치 시행

[산업안전보건법]

제2조(정의) 2. "중대재해"란 산업재해 중 사망 등 재해 정도가 심하거나 다수의 재해자가 발생한 경우로서 고용노동부령으로 정하는 재해를 말한다.

[산업안전보건법 시행규칙]

제3조(중대재해의 범위) 법 제2조제2호에서 "고용노동부령으로 정하는 재해"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재해를 말한다.

1. 사망자가 1명 이상 발생한 재해

2. 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해

3. 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

* 산업안전보건법 제2조, 제51조, 제54조, 제64조(법률 제16272호, ‘19.1.15, 시행 ‘20.1.16.)

* 산업안전보건법 시행규칙 제3조(고용노동부령 제272호, ‘19.12.16, 시행 ‘20.1.16.)

		4. 안전계약 특수조건
	제1조(목적) 본, 안전계약 특수조건은 한국철도공사와 계약상대자가 체결하는 공사․용역계약에 있어 일반조건외에 산업재해예방 및 철도안전법령에 의한 철도안전관리체계에 대한 점검 및 준수의무 등을 특별히 규정함에 그 목적이 있다. 제2조(적용범위) 한국철도공사의 사업장내에서 시행하는 모든 발주공사와 용역사업의 계약상대자를 대상으로 한다. 제3조(안전준수 의무 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 산업안전보건 관계법령 및 철도안전법령과 안전수칙을 준수하여야 하며 한국철도공사에서 시행하는 산업재해예방 시책 및 철도안전관리체계를 적극 따라야 한다. 제4조(사전예방조치 의무 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 유해․위험요인 실태를 수시로 파악하고 평가하여 불안전요소를 개선하는 등 산업재해예방 및 철도안전을 위한 사전조치를 하여야 한다. 제5조(통지 의무 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 중대재해가 발생하였거나 긴박한 재해발생 우려가 있다고 판단될 경우 해당 작업자를 대피시키고 지체 없이 한국철도공사에 통지하여야 한다. 제6조(안전․보건협의체 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 한국철도공사가 운영하는 안전․보건협의체의 당연 구성원이 되며 협의회에 출석할 의무와 필요시 임시회의 개최요구를 할 권한이 있다. 제7조(안전보건지도․점검 등) ① 한국철도공사는 계약상대자가 공사․용역이행 과정에서 취하는 산업재해 예방조치를 확인하기 위하여 언제든지 안전지도․점검을 시행할 수 있으며 계약상대자는 지도․점검에 동참하는 등 적극 협조하여야 한다. ② 한국철도공사는 안전지도․점검결과에 따라 필요하다고 인정하는 경우 계약상대자에게 시정요구를 할 수 있으며 시정요구를 받은 계약상대자는 한국철도공사에 개선계획 및 개선결과를 제출하여야 한다.

		4. 안전계약 특수조건
	③ 계약상대자는 철도안전법령에 따라 한국철도공사가 요구하는 열차운행 및 유지관리에 대한 철도안전관리체계의 준수 및 적정성 평가를 따라야 한다. ④ 계약상대자는 착수 시 한국철도공사가 제3항의 내용에 따라 제시한 안전관리체계 준수 및 적정성에 대한 평가시기, 평가방법 및 평가항목에 대해 적극 협조하여야 하며 정당한 이유가 없는 한 평가결과에 따른 조치 요구를 수행하여야 한다. 제8조(공사․용역 중지 등) ① 한국철도공사는 안전지도․점검결과 긴박한 사고발생 우려가 있는 유해․위험요인을 발견하였을 경우 그 유해․위험요인이 완전히 해소되었다고 인정될 때까지 계약상대자에게 해당 공사 또는 용역의 중지를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다. ② 계약상대자는 제1항의 규정에 따라 공사 또는 용역 중지로 발생되는 지체상금 부과 및 작업원에 대한 휴업급여 등의 책임을 진다. 제9조(공사․용역 계약해지) 한국철도공사는 계약상대자가 공사ㆍ용역 과업수행 중 계약상대자의 귀책사유로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사고가 발생한 경우에는 해당 계약을 해지할 수 있다. 가. 사망자가 발생한 경우 나.「철도사고조사 및 피해구상 세칙」에 정한 열차사고(열차충돌, 열차탈선, 열차화재)가 발생한 경우

		5. 공사계약 특수조건
	제1조(목적) 이 공사계약특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)은 한국철도공사와 계약상대자가 체결하는 공사도급계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다. 제2조(정의) ① 이 특수조건에서 사용하는 용어의 정의는 특수조건에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 한국철도공사 공사계약일반조건(이하 “일반조건”이라한다) 제2조에서 정한 바에 따른다. ② 공사의 착공, 감독, 하도급관리, 공정관리, 대가의 지급검토, 검사, 재해방지조치, 인수, 하자관리 등 공사현장에서 계약이행과 관련된 사항에 대하여는 달리 규정한 경우를 제외하고는 공사 및 용역관리규정(철도공사 사규)에 의한 시행부서의 장(그 위임을 받은 직원을 포함한다. 이하 같다)을 계약담당자로 본다. 제3조(수입인지 및 국·공채의 매입) 계약상대자는 인지세법, 주택법등에서 규정한 바에 따라 수입인지 또는 국·공채를 매입하고 그 매입필증 등을 계약담당자에게 제출하여야 한다. 제4조(장기계속계약의 잔여공사 계약) 장기계속계약의 경우 제2차 이후 공사계약은 부기한 총공사 부기금액에서 이미 계약된 금액을 공제한 잔여금액의 범위 안에서 계약을 체결하여야 한다. 제5조(공사손해보험의 가입) ① 계약상대자는 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」제11장(공사의 손해보험가입 업무집행) 및 일반조건 제10조에서 정하는 바에 따라 공사손해보험 계약목적물의 착공일(공사손해보험가입 비대상공사가 포함된 공사의 경우에는 손해보험가입대상공사 착공일을 말함)이전에 공사손해보험 또는 조립보험(이하 “보험”이라 한다)에 가입하여야 한다. ② 「정부 입찰·계약 집행기준」제57조에서 정한 손해의 담보에 대한 계약상대자의 자기부담금은 매 건당 각각 1억원 이하로 한다. 다만, 공사의 특성 및 여건에 따라 자기부담금의 최고한도액을 1억원을 초과하지 않는 범위 내에서 조정할 수 있다. ③ 보험약관은 특별히 정한 경우를 제외하고는 도심지내의 공사는 영국식 약관, 기타공사는 독일식 보통약관으로 한다.

	④ 계약상대자는 공사보험 계약일로부터 6개월 이내에 보험회사로부터 위험도조사보고서(Risk Survey Report)를 징구하여 시행부서에 제출하여야 한다. 다만, 공사의 특성 및 여건에 따라 불가피한 경우 시행부서와 협의하여 제출기한을 연장할 수 있다. ⑤ 계약상대자는 보험회사가 제출한 위험도 조사보고서에 따른 적절한 위험방지 조치를 취하여야 하며, 공정률 50% 전후에 이미 제출한 위험도조사보고서의 내용을 보완하여 다시 제출하여야 한다. ⑥ 공사계약금액이 증감(시행령 제64조 내지 제66조의 규정에 의한 계약금액의 증감)된 경우 보험가입금액의 증감은 「정부 입찰·계약 집행기준」제57조제4항에 의하며, 계약상대자는 계약금액 변경일로부터 14일 이내에 보험계약을 변경 처리 하여야 한다. ⑦ 계약상대자는 「정부 입찰·계약 집행기준」제62조제2호에 따라 계약금액의 변경, 설계변경, 공사 중단 등의 공사계약 변경사항을 보험회사에 통지하여야 한다. ⑧ 보험가입대상 공사에 대한 보험가입 지연으로 발생하는 보험사고의 보상·배상은 계약상대자 부담으로 하며 보험가입대상 공사의 준공일까지 보험에 가입하지 않는 경우에는 예정가격조서상에 계상된 보험료를 감액 조치한다. ⑨ 계약상대자는 보험사 선정시 당해 보험사의 재정상태, 담보능력 등을 감안하여 건실한 보험사를 선정하여야 하며 부실보험사 선정으로 보상 또는 배상을 받지 못할 경우에는 계약상대자 부담으로 한다. ⑩ 계약상대자는 예정가격조서상에 계상된 보험료와 보험가입시 실제 납입한 보험료간의 차액발생을 이유로 보험가입을 거절하거나 동 차액의 정산을 요구할 수 없으며, 보험가입 이전에 청구하는 기성대가에 대하여는 지급을 유보할 수 있다. ⑪ 계약상대자는 보험계약서류, 위험도 조사보고서, 보험사고 발생 및 처리현황, 보험계약 종결보고서를 시행부서에 제출하여야 한다. ⑫ 제1항 내지 제10항에 규정한 사항이외에 보험과 관련된 기타 계약조건은 공사계약일반조건 제10조 및 집행요령에 정한 바에 의한다.

제7조(노임지급) 계약담당자는 원활한 계약이행을 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 공사현장에 종사하는 근로자의 노임지급과 관련하여 필요한 지시를 할 수 있으며, 계약상대자가 이를 이행하지 아니할 경우 당해 공사대금에서 노임을 공제하여 근로자에게 직접 지불할 수 있다. 다만, 현장근로자의 노임을 직접 공제해서는 아니 되는 정당한 사유가 있음을 계약상대자가 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 계약상대자는 노임을 계약금액 산출내역서에 명시하여야 하며, 이를 명시하지 아니한 경우 관련법령의 규정에 의거 압류가 금지되는 노임은 노동부장관이 산업재해보상보험법의 규정에 따라 고시하는 당해 연도의 건설공사 노무비율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액으로 본다.

제8조(환경오염방지 등) ① 계약상대자는 대기오염, 수질오염, 소음, 진동, 악취 등으로 환경피해가 발생하거나 인근주민 또는 통행인에게 불편이 없도록 대기환경보전법, 소음·진동관리법, 폐기물관리법등 관계법령 및 설계서에 의거 발생 오염물질 종류와 예상량, 처리방법, 처리시행자등이 포함된 환경오염방지계획을 수립하여야 한다.

② 계약상대자는 공사착공신고서 제출시 제1항의 환경오염방지계획서를 계약담당자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 계약담당자가 보완을 요청하였을 때에는 이에 따라야 한다.

③ 계약상대자는 환경오염방지계획서를 현장에 비치하고, 오염방지 이행실적을 기록 유지하여야 하며, 계약담당자가 환경오염방지계획 및 이행실적의 제출을 요구할 때에는 그에 따라야 한다.

④ 계약대상자는 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」제18조(고농도 미세먼지 비상저감조치)와 관련하여 비상저감조치 요구를 받을시 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 비산먼지 발생공사시 작업시간 변경 등 조치사항 및 점검표작성하여 제출한다. (한국철도공사 고농도 미세먼지 저감조치 대응매뉴얼 참조)

제8조의 2(폐기물의 처리) ① 계약상대자는 폐기물관리법령에 의거 폐기물처리업자로 허가된 자에게 위탁하여 폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 관련법령에 따라 폐기물처리시설을 설치하여 승인을 받았거나 신고 후 직접 처리하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 계약상대자는 폐기물관리법령의 규정에 따라 폐기물을 처리하여야 하며 이를 위반하여 처리하는 경우 계약담당자는 이의 시정을 요구할 수 있다.

③ 계약상대자가 제2항에서 규정한 시정 요구에 응하지 않을 경우 계약담당자는 폐기물처리업자에게 위탁하여 처리할 수 있으며 이에 소용되는 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

④ 계약담당자 폐기물을 폐기물처리업자에게 직접 위탁하여 처리하는 경우에도, 계약상대자는 계약담당자 및 폐기물처리업자와 협의하여 폐기물의 반출 등에 필요한 적정한 편의를 제공하여야 한다.

제9조(적격심사 관련사항의 준수의무) ① 계약상대자는 조달청시설공사적격심사세부기준 제4조 제2항의 규정에 의한 하도급관리계획서를 제출한 경우 적격심사 당시 제출한 내용대로 철저하게 이행하여야 한다.  ② 계약상대자는 공사를 수행함에 있어 불가피한 사유로 제1항에서 규정하는 하도급관리계획서의 하도급사항을 변경하고자 할 경우에는 당초의 하도급 조건 이상으로 하여 수요기관의 장의 사전 승인을 받아야 한다.

제10조(산업안전보건관리비 등의 목적 외 사용금지 및 기술지도계약) ① 계약담당자는 계약상대자가 계약금액에 포함된 산업안전보건관리비, 환경보전비 및 건설근로자 퇴직공제부금(이하 “산업안전보건관리비 등이라 한다)을 산업안전보건법령 또는 건설기술관리법령 또는 건설산업기본법령에서 정한 목적 이외에 사용하거나 목적대로 사용하지 아니한 경우 그 금액을 감액조치 한다. 이 경우 관련 증빙서류에는 당해공사명 또는 계약번호 등이 포함되어 있어야 한다. <개정 2014. 10. 31.>

② 계약상대자는 제1항에서 규정한 산업안전보건관리비 등을 목적 외에 사용하지 않았음을 이유로 안전관리 및 환경관리를 소홀히 하여서는 아니 된다.

③ 계약상대자는 산업안전보건법시행규칙 제32조 제3항에 규정된 “고용노동부령이 정하는 자”에 해당하는 규모의 건설공사는 기술지도계약을 공사착공 후 14일 이내에 체결하고 기술지도계약서를 시행부서에 제출하여야 한다.  다만, 동조항 단서 각호의 1에 해당하는 공사인 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 계약담당자는 계약상대자가 산업안전보건법령 및 제3항에서 규정하는 기술지도계약대상공사에 대하여 기술지도계약을 체결하지 아니한 경우에는 산업안전보건법 제30조 제1항의 규정에 의하여 계상한 산업안전보건관리비의 20%에 해당하는 금액을 감액하며, 기술지도계약을 지연 체결하여 수수료가 조정된 경우에는 조정된 금액만큼 감액한다.

제10조의 2(산업안전보건관리비 등의 계상) ① 총액입찰로 집행한 공사인 경우, 관련법령의 규정에 의거 공사비에 포함하도록 한 산업안전보건관리비 등은 다음에 해당하는 금액을 계약금액 산출내역서에 포함하여야 한다.

1. 설계금액에 계상된 산업안전보건관리비 등에 투찰율(예비가격기초금액 대비 계약금액 비율을 말하며, 이하 이 조에서 같다)을 곱한 금액 이상 <개정 2014. 10. 31.>

② 계약상대자가 제1항에서 규정하는 비용을 포함하지 않은 경우, 계약담당자는 계약체결 이후라도 당해 비용을 산출내역서에 포함하고 그로 인하여 증감된 차액은 「정부 입찰·계약 집행기준」제21조제2항의 규정에 따라 조정하도록 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

제11조(공사감독자의 지시) 계약상대자는 공사감독자의 구두지시가 있을 경우(지시내용의 이행 전후에 관계없이) 이를 지체 없이 서면으로 확인하여야 한다.

제12조 (계약상대자에 의한 도면) ① 공사 일부분의 시공상세도면을 계약상대자가 작성토록 설계서에 명시된 경우 계약상대자는 필요한 시공상세도면·계산서 등을 작성 제출하여 당해 공종의 착공전까지 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

② 계약상대자는 제1항에서 규정하는 시공상세도면 등에 대하여 공사감독자의 서면 승인을 받기 전까지는 당해 공종을 착수하여서는 아니 된다. 시공상세도면 등에 대한 공사감독자의 승인은 제1항에 따른 계약상대자의 책임을 감면시키지 아니한다.

③ 공사감독자는 공사전·공사중 또는 준공여부와 관계없이 계약상대자가 제공한 시공상세도면 등의 결함을 발견한 경우에는 그의 시공상세도면 등을 변경·수정토록 하고 그에 따라 시공토록 지시할 수 있다.

제13조(인접공사 계약자에 대한 협조) ① 계약상대자는 계약담당자의 요구가 있을 경우 이 계약의 공사현장내 또는 인접 공사현장(이하 “인접공사”라 한다)에서 다음 각호의 자가 자기공사를 이행하는 데 필요한 적절한 편의를 제공하여야 한다.

1. 계약담당자과 계약한 다른 계약자 및 그들의 고용인

2. 인접 공사현장의 시공자

	② 이 계약을 이행함에 있어 공사 전체 또는 일부분이 인접공사 계약의 적절한 시행 또는 그 결과에 의존할 때에는, 계약상대자는 이 계약의 이행에 악영향을 끼칠 수 있는 명백한 위반 또는 결함을 조사하여 즉시 서면으로 공사감독자에게 통보하여야 한다. 계약상대자가 이를 이행하지 아니한 경우에는 계약상대자는 인접공사 계약의 이행이 공사를 진행하는데 적합함을 인정하는 것으로 본다. 제14조(하자보수 책임승계 등) 계약상대자는 이전의 계약상대자가 이행한 공사를 계속하여 시공하는 경우 이전 계약상대자가 이행한 부분에 대하여도 하자보수의 책임을 진다. 다만, 계약상대자가 하자발생 사유가 자신의 귀책이 아님을 입증하였거나 하자책임 구분이 분명한 경우에는 그러하지 아니하다. 제15조(하자담보) ① 일반조건 제33조에서 정한 하자담보책임기간은 준공검사를 완료한날로부터 계약서에 정한 바에 따른다. 다만, 공종별 하자담보책임기간은 시행규칙 제70조에서 정한 바에 따르며, 장기계속공사에 있어서 하자담보책임기간은 시행령 제60조 제2항에 정한 바에 의한다. ② 일반조건 제34조에서 정한 하자보수보증금은 계약서에 정한 바에 의한다. 다만, 공종별 하자보수보증금율은 시행규칙 제72조에서 정한 바에 의하며, 장기계속공사에 있어서 하자보수보증금은 시행령 제62조 제3항에 의하여 납부하여야 한다. 제16조(공사관리) ① 계약담당자는 계약관리를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 공사현장에 대하여 다음 각호의 사항을 조사·점검하거나 계약상대자에게 자료를 요구할 수 있다. 1. 시공상태 2. 안전관리 상태 3. 설계변경등 계약내용 변경에 관한 사항 4. 공사현장 관리상태 5. 하도급에 관한 사항 6. 기타 계약조건 이행사항

	② 계약담당자는 제1항에 의한 조사·점검 결과 계약상대자가 계약조건 및 설계서 등의 계약내용과 다르게 시공한 사항에 대하여는 시정토록 조치할 수 있다. ③ 계약담당자는 제1항 또는 제2항의 결과에 대하여 시행령 제13조 및 제42조의 규정에 의한 심사에 반영할 수 있다. ④ 계약담당자는 공사관리를 위하여 필요한 경우 제1항 각호의 사항을 조사·점검하거나 자료의 제출을 요구할 수 있다. 제16조의 2(공사계약내용의 변경) 계약담당자는 공사계약 체결이후에 발생하는 설계변경 등으로 인하여 계약내용을 변경하고자 하는 경우에는 변경계약체결 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제17조(법령의 준수 등) ① 계약상대자는 각종 법령, 조례, 규칙 또는 공사수행과 관련하여 공공기관에 의하여 요구되는 사항을 준수하여야 하며, 법령 및 계약내용 등 이 상호 일치하지 않거나 모순이 있어 계약이행에 어려움이 예상될 경우 지체 없이 계약담당자에게 이를 서면으로 확인하여야 한다. ② 계약상대자는 어떠한 경우에도 이 계약의 체결 또는 이행과 관련하여 관련직원에게 금품 또는 향응을 제공하여서는 아니 된다. ③ 제2항의 규정을 위반함으로써 받게 되는 입찰참가자격제한 처분등 모든 불이익에 대한 책임은 계약상대자에게 있다. 제17조의 2(공동계약 내용의 준수) ① 공동계약의 경우 공동수급체의 구성원은 출자비율 또는 분담내용대로 계약이행에 참여하여야 한다. ② 계약상대자는 공사 착공신고서 제출 시 공동수급체 구성원별 출자비율 또는 분담내용에 따른 다음 각 호의 내용이 포함된 공동계약이행계획서(이하 “계약이행계획서”라 한다)를 수요기관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 다만, 불가피한 사유가 있는 경우 시행부서의 장의 승인을 받아 착공신고서 제출일로부터 30일 이내에 제출할 수 있다. 1. 구성원별 이행부분 및 내역서(이행부분을 구분하지 아니하는 경우에는 제외) 2. 별첨양식의 공동계약이행계획서(붙임 1) 3. 그 밖의 수요기관이 요구하는 사항

③ 시행부서의 장은 공동수급체구성원이 연명으로 출자비율 또는 분담내용을 준수하는 범위내에서 제2항의 규정에 의한 계약이행계획서의 변경에 대한 승인을 요청하는 때에는 공사의 적정한 이행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에 한하여 이를 승인할 수 있다.

제18조(부도 등으로 인한 보증시공 청구) ① 일반조건 제44조 제1항 각호의 사유로 인하여 계약을 해지·해제할 수 있을 경우에는 연대보증인 또는 공사이행보증회사에게 보증시공을 청구하거나 공동수급체 구성원에게 잔여공사를 완성하게 할 수 있다.

② 계약상대자의 부도·파산·해산·영업정지 등(이하 “부도 등”이라 한다)으로 인하여 준공기한까지 공사를 완성할 가능성이 없다고 인정될 경우에는 계약자의 동의여부에 불구하고 제1항에 정한 조치를 할 수 있다.

③ 공동수급체 구성원중 부도 등이 발생한 자에 대하여는 부도 등의 발생일로부터 1개월 이내에 당해 구성원의 잔여 출자비율을 ‘0’으로 조정하거나 연대보증인 또는 공사이행보증회사에 보증시공을 청구 할 수 있으며, 정당한 이유 없이 당초 협정서의 내용대로 공사를 이행하지 않는 경우 수요기관의 장 및 잔여구성원 전원의 탈퇴요청이 있으면 당해 구성원의 동의여부에 불구하고 탈퇴조치하고 제1항에 정한 조치를 할 수 있다.

④ 공동수급체 구성원 중 부도 등으로 출자비율을 변경하여 잔여공사지분이 없는 구성원이 있는 경우에는 대가지급신청·계약내용변경 및 장기계속공사의 차수계약 등은 잔여공사지분이 있는 구성원만의 서명 날인에 의할 수 있다.

제19조(분쟁의 해결) ① 일반조건 제51조제1항에서 규정하는 협의는 문서로 하여야 한다.

② 계약상대자는 당해 계약의 이행과 관련하여 분쟁의 사유가 되는 사안이 발생한 날 또는 지시나 통지를 접수한 날로부터 30일 이내에 공사감독자를 경유하여 계약부서로 협의를 요청하여야 한다.

③ 계약담당자는 제2항에서 규정하는 협의요청을 받은 날로부터 60일 이내에 계약상대자의 요구사항에 대한 수용 여부를 결정하여 계약상대자에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우 30일의 범위내에서 결정기한을 연장할 수 있으며 연장하는 사유와 기한을 계약상대자에게 통지하여야 한다.

	④ 계약상대자는 제3항에서 규정하는 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 통지내용에 대한 수용여부를 계약담당자에게 통보하여야 하며, 이 기간내에 통보하지 않은 경우에는 이를 거절한 것으로 본다. ⑤ 일반조건 제51조제2항에서 규정하는 중재법에 의한 중재로써 분쟁을 해결하고자 하는 경우에는 사전에 계약당사자간에 중재로서 분쟁을 해결한다는 별도의 서면합의가 있어야 한다. 제20조(감액 또는 환불) ① 계약상대자는 계약조건에 따라 신의성실하게 계약이행을 하여야 한다. 다만 본 계약을 위하여 작성한 설계서 내역중 정부가 발행한 표준품셈 물량규격·수량·단가 또는 노임단가가 기준보다 과다하게 책정되었거나 제잡비율 적용에 착오가 있음이 계약체결 후에 발견되었을 경우, 계약담당자는 계약상대자에게 감액 또는 환불을 요구할 수 있다. <개정 2015. 9. 11> ② 전항의 감액 또는 환불 해당액은 철도공사가 계약상대자에게 지불할 기성고 지급금액 중에서도 차인할 수 있으며, 기성고 지급분이 없을 경우에는 발주부서에서 정한 소정기일까지 환불하여야 한다. 제20조의2(채권양도) 계약상대자는 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사대금청구권)을 제3자에게 양도하고자 하는 경우에는 미리 연대보증인 또는 공사이행보증서 발급기관의 동의를 얻어 계약담당자의 서면승인을 받아야 한다. 제21조(보칙) ① 계약예규 공동계약운용요령에 의거 공동수급체가 제출한 공동수급협정서는 계약담당자의 사전승인 없이는 변경할 수 없다. ② 계약이행과 관련한 기간의 계산은 특별한 규정이 없는 한 민법에서 정한 바에 따른다. ③ 공사계약일반조건 제22조에 의하여 물가변동에 의한 계약금액을 조정할 경우는 (품목조정율, 지수조정율)을 적용한다. ④ 계약상대자는 계약서에 명시된 주소가 변경되었을 때에는 즉시 계약담당자 및 공사감독자에게 서면으로 변경 신고를 하여야 하며, 이를 이행하지 아니하여 발생하는 불이익은 계약상대자에게 있다. ⑤ 계약상대자의 전화·팩스번호 등 의사전달 수단의 변경 시에도 제4항을 준용한다.

						6. 예 정 공 정 표
	공사종류	단위	수량	착수지정일로부터 180일간														기사
				2020년~2021년
				11월	12월		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		8월	9월	10월
	레일연마작업	식	1

공 사 명 : 한국철도 대전충청본부 등 7개본부 레일연마 기타공사
			7. 설 계 예 산 내 역 서
	총 공 사 비
	1.	도 급 공 사 비		별 봉
	2.	지 급 자 재 비 (당 기 조 달 품)
	3.	지 급 자 재 비 (전 년 도 조 달 품)
	4.	지 급 자 재 비 (중 고 품)
	5.	지 급 자 재 비 (레 미 콘, 충 용 품)
	6.	철 도 공 사 제 공 기 계 기 구 사 용 료
	7.	철 도 공 사 직 원 급		5,120,000
	8.	철 도 공 사 직 원 급 일 반 관 리 비
	9.	재 료 일 반 관 리 비
	10.	운 송 비
	11.	계 약 수 수 료

		8. 공종(용종)별 예산조서
공사(용역)종류	규 격		단위	수량	단가		금액	기사
공사비
가. 레일연마			식	1
나. 부대공사			식	1
2. 간접노무비	직노X12.7%		%	1
3. 산재보험료	노무비X3.73%		%	1
4. 고용보험료	노무비X0.87%		%	1
5. 건강보험	직노X3.335%		%	1
6. 연금보험	직노X4.5%		%	1
7. 노인장기요양보험료	건보X10.25%		%	1
8. 퇴직공제부금	직노X2.3%		%	1
9. 산업안전관리비	(재+직노)X2.93%		%	1
10. 기타경비	(재+노)X8.8%		%	1
11. 환경보전비	(재+직노+산경)X0.8%		%	1
12. 운행안전관리자			식	1
13. 일반관리비	(재+노+경) × 5.5%		%	1
14. 이 윤	(노+경+일) × 15.0%		%	1
15. 부가가치세	10%		%	1
합 계

				8. 공종(용종)별 예산조서
공사(용역) 종 류	단위	수량	재 료 비			노 무 비		경 비			계		기 사
			단 가		금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		단 가	금 액
가. 레일연마
#2 레일연마 (야간, 차단 3시간초과 - 4시간이하)	km	885.288
소 계	km	885.288
나. 부대공사
#5 열차감시자 (야간, 차단 3시간초과 - 4시간이하)	인	111
#8 안전관리자· 철도운행안전관리자 (야간, 차단 3시간초과 - 4시간이하)	인	111

		9. 철도공사 직원급 내역서
구 분	단 위		수 량	단 가	금 액		기 사
감독여비
일 비	일		121	20,000	2,420,000
식 비	일		121	20,000	2,420,000
소 계					4,840,000
2. 준공검사여비
일 비	일		7	20,000	140,000
식 비	일		7	20,000	140,000
소 계					280,000
합 계					5,120,000

	10. 총괄수량집계표

	11. 세부수량산출서

	11. 세부수량산출서

	11. 세부수량산출서

	11. 세부수량산출서